АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

03 ноября 2021 года03 ноября 2021 года

 

Дело № А33-22216/2021

Красноярск

 

Резолютивная часть решения размещена на сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» 26 октября 2021 года.

Мотивированное решение составлено 03 ноября 2021 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Горбатовой А.А., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Капитальный Ремонт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании процентов,

без вызова лиц, участвующих в деле, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Капитальный ремонт" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее – ответчик) о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 418 325,97 руб.

Определением от 01.09.2021  исковое заявление  принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

25.10.2021 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных главой 29 Кодекса. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

27.10.2021 истец обратился в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-21548/2020 установлено следующее.

Между муниципальным казенным учреждением города Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Капитальный ремонт» (подрядчик) заключен договор №1270095 от 16.09.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши, системы электроснабжения многоквартирных домов, расположенных на территории Центрального района в городе Красноярске (протокол о признании аукциона несостоявшимся от 26.08.2019 №б/н, размещенного на официальном сайте -031930010561900080), предметом которого является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее - работы) (пункт 1.1).

Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием) - приложение № 1 к договору, проектной документацией - приложение № 2 к договору, ведомостью объемов работ - приложение № 3 к договору, локальным сметным расчетом - приложение № 4 к договору, графиком выполнения работ на объекте - приложение № 5 к договору, адресным перечнем - приложение №6 к договору,

Заказчик обязался обеспечить приемку и передать Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее - «плательщик») пакет документов для осуществления оплаты работ в соответствии с разделом 5 «Цена и порядок расчетов» договора.

Согласно пункту 1.2. договора, объектами капитального ремонта являются многоквартирные дома (далее - объект), расположенные на территории г. Красноярска по адресам (приложение №6 к договору): 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>.

Вид работ на объекте: ремонт крыши, ремонт системы электроснабжения (пункт 1.2.1.).

Пунктом 1.3. договора установлено, что объемы работ по договору, в том числе набор (перечень) работ указаны в проектной документации (приложение № 2 к договору).

Согласно пункту 2.1. срок выполнения работ:

2.1.1.    Начало выполнения работ: 13.09.2019 в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 5 к настоящему договору). Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора, а также досрочной оплаты плательщиком выполненных работ.

2.1.2.    Окончание выполнения работы: 31.12.2019. Уведомление о завершении работ и необходимости приемки направляется Заказчику в срок не позднее: 26.12.2019.

В соответствии с пунктом 6.14. договора работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта комиссионной приемки выполненных работ. Приемка результатов выполненных работ осуществляется приемочной комиссией. Состав комиссии по приемке выполненных работ устанавливается приказом заказчика.

В соответствии с пунктом 5.1. договора, общая стоимость работ по договору указана в приложении № 4 к договору и составляет 25 523 709,45 руб., НДС не облагается. Цена договора включает стоимость выполненных работ, в том числе стоимость выполненных работ по капитальному ремонту крыши, системы электроснабжения, стоимость материалов, трудозатраты, транспортные расходы, расходы на оборудование, грузоподъемные и иные механизмы, транспортные расходы, расходы на доставку материалов, сметную прибыль, накладные расходы, непредвиденные затраты, командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, прочие возможные работы, необходимые для исполнения договора. Цена договора не подлежит увеличению, кроме случая, предусмотренного пунктом 5.6.2 договора (пункт 5.2. договора).

30.12.2019 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору от 16.09.2019 № 1270095 выполнение работ по капитальному ремонту крыши, системы электроснабжения многоквартирных домов, расположенных на территории Центрального района в городе Красноярске (6 МКД), в соответствии с которым стороны договорились пункт 5.1. договора изложить в следующей редакции: общая стоимость работ по настоящему договору составляет 26 714 527,44 руб., в т.ч. НДС 20% - 4 452 421,24 руб.

Пунктом 5.4. договора установлено, что источник финансирования - средства фонда капитального ремонта, формируемого за счет взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме перечисленных на счет регионального оператора и средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (далее - средства собственников помещений в многоквартирных домах).

Расчет производится после сдачи работы подрядчиком заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно с согласия заказчика (пункт 5.5.1. договора).

Срок оплаты в течение 60 рабочих дней с даты подписания акта комиссионной приемки выполненных работ по договору (подписанного в отношении конкретного объекта), указанной в акте передачи общего имущества многоквартирного дома после выполнения работ, на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета или счета-фактуры выполненных работ (пункт 5.5.2 договора)).

Оплата выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества вмногоквартирном доме осуществляется плательщиком, на основании заявки на финансирование, в срок не превышающий 20 рабочих дней со дня предоставления заказчиком вышеуказанных документов в адрес плательщика и при наличии на счете (счетах) плательщика необходимой суммы аккумулированных средств собственников помещений в многоквартирных домах. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Обязанность плательщика по оплате считается выполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета регионального оператора (пункт 5.5.3. договора).

В соответствии с условиями заключенного между Региональный фонд КРМДКК (Фонд) и администрацией города Красноярск (заказчик) в лице департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска № 13 от 04.04.2019 о передаче функций технического заказчика фонд обязан производить перечисление денежных средств за оказанные услуги и (или выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителям (подрядным организациям) на основании заявки заказчика, в пределах сумм, определенных краткосрочным планом капитального ремонта (пункт 2.1.2); при этом технический заказчик обязан своевременно предоставлять фонду заявки на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план реализации региональной программы, для оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ (пункт 2.2.6 договора).

Факт приемки выполненных работ подтверждается также актом комиссионной приемки от 30.12.2019.

Письмом от 16.01.2020 вх.№НИ-351 заказчик по договору (МКУ г. Красноярска «УРТСЖ и МС») обратился в адрес плательщика (Региональный фонд КРМДКК) с заявкой на финансирование выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу 

<

...>.

22.05.2020 истец обратился в адрес заказчика и плательщика (Региональный фонд КРМДКК) с претензией об оплате выполненных работ.

Решением по делу №А33-21548/2020 от 05.04.2021 с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 09.10.2013) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Капитальный ремонт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 11.05.2018) взыскано 7 393 493,96 руб.  задолженности, 59 967 руб.  расходов по уплате государственной пошлины.

Платёжным поручением от 23.04.2021 №13971 Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края перечислил истцу 7 393 493,96 руб. оплат долга.

В претензии от 28.04.2021 №334 истец просил ответчика оплатить 418 325,97 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты долга.

Ссылаясь на то, что требование истца, изложенное в претензии, ответчиком не исполнено, истец обратился в суд с настоящим иском о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 418 325,97 руб.

Ответчик отзыв на иск не представил, требования истца не оспорил.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, в том числе из договоров и иных сделок.

Статья 9 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу положений статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Требование истца о взыскании с ответчика 418 325,97 руб. процентов  за пользование чужими денежными средствами за период с 13.02.2020 по 23.04.2021 обосновано взысканием с ответчика решением от 05.04.2021 по делу №А33-21548/2020  7 393 493,96 руб.  задолженности по договору №1270095 от 16.09.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши, системы электроснабжения многоквартирных домов, расположенных на территории Центрального района в городе Красноярске

В соответствии со статьей 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Следовательно, преюдиция - это установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами.

Преюдициальность предусматривает не только отсутствие необходимости повторно доказывать установленные в судебном акте факты, но и запрет на их опровержение.

Данным решением установлено следующее:

- между муниципальным казенным учреждением города Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Капитальный ремонт» (подрядчик) заключен договор №1270095 от 16.09.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши, системы электроснабжения многоквартирных домов, расположенных на территории Центрального района в городе Красноярске (протокол о признании аукциона несостоявшимся от 26.08.2019 №б/н, размещенного на официальном сайте -031930010561900080), предметом которого является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее - работы) (пункт 1.1),

- факт выполнения подрядчиком и приемки заказчиком работ на сумму 7 393 493,96 руб., подтвержденный подписанными актом о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1270095 от 30.12.2019, актом комиссионной приемки выполненных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> от 30.12.2019, заявкой заказчика (письмо от 16.01.2020 вх.№НИ-351) на финансирование выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу 

<

...>.

- письмом от 16.01.2020 вх.№НИ-351 заказчик по договору (МКУ г. Красноярска «УРТСЖ и МС») обратился в адрес плательщика (Региональный фонд КРМДКК) с заявкой на финансирование выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу 

<

...>,

Исполняя указанное решение суда, платёжным поручением от 23.04.2021 №13971 Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края перечислил истцу 7 393 493,96 руб. оплат долга.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации  в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Факт нарушения ответчиком срока оплаты выполненных работ установлен судом на основании материалов дела, ответчиком по существу не оспорен.

Ответчик арифметическую правильность и порядок расчета процентов за пользование чужими денежными средствами не оспорил.

Суд, проверив представленный в материалы дела расчет процентов, пришел к выводу, что расчет произведен арифметически неверно.

С учетом предусмотренного пунктом 5.2.2 договора порядка оплаты выполненных работ в течение 60 рабочих дней с даты подписания акта комиссионной приемки выполненных работ и даты подписания акта комиссионной приемки выполненных работ 30.12.2019, срок оплаты истек 01.04.2020.

Таким образом, размер обоснованно начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.04.2020 по 23.04.2021 составляет 358 935,62 руб.

Суд считает некорректным произведенный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом  порядок оплаты,  определенного пунктом 5.5.3 договора, при отсутствии в материалах дела доказательств, достоверно подтверждающих дату  принятия ответчиком направленной письмом от 16.01.2020 заявки, а также с учетом установленного пунктом 5.2.2. договора порядка оплаты.

При изложенных обстоятельствах суд считает требование истца о взыскании с ответчика процентов  за пользование чужими денежными средствами обоснованным в размере 358935,62 руб.

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

Частями 1, 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание результат рассмотрения спора, судебные расходы истца по оплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально размеру удовлетворённых требований.

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Капитальный Ремонт" (ИНН 

<

***>, г. Красноярск) 358 935,62 руб. процентов за пользование чужим денежными средствами, 9 753,21 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя. 

 

Судья

А.А. Горбатова