Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-933/2024

25 июня 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2024 года. Полный текст решения изготовлен 25 июня 2024 года.

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе: судьи Суворов М.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Азиковым А.М.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель ФИО1

ответчик: Публичное акционерное общество  «Россетти Ленэнерго»

об обязании произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств по договору от 30.05.2022 № 22-030160-100-032 в срок, не превышающий 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, о взыскании денежных средств в размере 3000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начисляемые с 31 календарного дня с даты вступления решения суда в законную силу и до даты фактического исполнения

 

при участии

от сторон – согласно протоколу с/з от 06.06.2024 

 

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1  (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу  «Россетти Ленэнерго» об обязании произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств по договору от 30.05.2022 № 22-030160-100-032 в срок, не превышающий 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, о взыскании денежных средств в размере 3000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начисляемые с 31 календарного дня с даты вступления решения суда в законную силу и до даты фактического исполнения.

Суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и при отсутствии возражений со стороны лиц, участвующих в деле, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Исследовав материалы дела, заслушав и оценив доводы сторон и представленные  доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Между Предпринимателем и Обществом заключен договор от 04.05.2022 № 22-030160-100-032 о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, дер. Малое Верево, АО «Верево», вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного назначения.

Согласно п. 16 Правил № 861, для категории земель сельскохозяйственного назначения, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев.

С учетом п. 1 дополнительного соглашения к вышеназванному договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации установлен до 15.03.2023г.

Предпринимателем 30.05.20222  оплачен счет № 22-030160 от 27.05.2022.

Таким образом, технологическое присоединение должно быть завершено не позднее 15.03.2023.

Ссылаясь на неисполнение Обществом в установленный срок обязательств по Договору, Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском об обязании Общества осуществить подключение энергопринимающих устройств в срок, не превышающий 30 дней со дня вступления решения в законную силу, а также о присуждении в случае неисполнения решения в установленный срок судебной неустойки.

В соответствии с положениями статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 12 ГК РФ, присуждение к исполнению обязательства в натуре является одним из способов защиты нарушенного права.

Согласно статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861).

Согласно пункту 16 Правил N 861 договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

В соответствии с пунктом 16.3 Правил N 861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом:

- заявитель исполняет обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно пункту 16 Правил N 861, для категории заявителей, к которым относится Предприниматель, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев.

Нарушение срока выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается, о чем свидетельствует ответ Общества на досудебную претензию от 04.12.2023г.

Обращаясь с иском в суд, Предприниматель просил присудить неустойку в размере 3 000 руб. за каждый день просрочки неисполнения решения суда, начиная с 31 календарного дня после вступления решения суда в законную силу

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В пунктах 28 и 32 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что судебная неустойка может быть присуждена в целях побуждения должника к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ).

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Оценив все фактические обстоятельства спора, суд признает возможным присудить судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждую неделю неисполнения вступившего в силу решения суда, в случае его неисполнения в течение 90 дней.

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

В соответствии со статьей 101 АПК РФ в состав судебных расходов входит государственная пошлина.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. При удовлетворении иска судебные расходы, понесенные истцом, подлежат возмещению истцу ответчиком.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

решил:

Обязать публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (ИНН 

<

***>) произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя ФИО1  по договору от 30.05.2022 № 22-030160-100-032 в срок, не превышающий 90 дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 денежные средства в размере 5000 руб. за каждую неделю неисполнения решения суда, начисляемые с 31 календарного дня с даты вступления решения суда в законную силу и до даты его фактического исполнения. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1  судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

 

Судья                                                                                      Суворов М.Б.