138/2017-28654(2) 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Тамбов «29» мая 2017 года Дело № А64-1500/2017 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Тишина А.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Е.В. 

рассмотрел дело № А64-1500/2017  по исковому заявлению  

Администрации Мордовского района Тамбовской области, р.п. Мордово (ОГРН  

1026800955609 ИНН 

<

***>)  к Обществу с ограниченной ответственностью «Звезда-2», п. Строитель (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  третье лицо: МБДОУ Новопокровский детский сад «Росток»  

о понуждении к соблюдению условий муниципального контракта  

при участии в судебном заседании:  от истца: ФИО1 - представитель, доверенность № 1 от 01.11.2016, ФИО2  

- представитель, доверенность № 2 от 02.05.2017 

от ответчика: не явился, извещен  от третьего лица: не явился, извещен  

отводов не заявлено 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Звезда-2» в течение  тридцати календарных дней с момента вступления в законную силу решения  арбитражного суда исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту   № 016430001021000011_52402 от 08.04.2013 на выполнение подрядных работ по объекту:  «Строительство детского садика в р.п. Новопокровка Мордовского района Тамбовской  области», а именно провести следующие виды работ по устранению выявленных  недостатков:  

по дефекту - образование вертикальных трещин в местах сопряжения наружных  стен и внутренних стен - произвести ремонт штукатурки, шпатлевки, окраски и элементов  настенных панно в местах возникновения трещин;  

по дефекту - протекание кровли над помещениями зимнего сада, медицинского  блока, холла, лестничной площадки, кабинета директора, кабинета обслуживающего  персонала - усилить крепление металлических профилированных листов кровли к доскам  обрешетки, провести герметизацию мест сопряжения кровли с кирпичной кладкой стен,  вентиляционных каналов (в соответствии СП 17.13330.2011 Кровли);  

29 мая 2017 года 

по дефекту - в помещении раздаточной старшей группы происходит отклеивание  облицовочной плитки на стенах - провести отделку стен облицовочной плиткой в местах  её отслоения от стен;  

по дефекту - деформирование дверного ПВХ блока в помещении мясо-рыбного  цеха - провести перемонтаж или замену дверного ПВХ блока;  

по дефекту в результате протекания крыши пришли в негодность плитки  подвесного потолка «Армстронг» - провести замену пришедших в негодность в результате  протекания кровли плиток подвесного потолка «Армстронг»;  

по дефекту проседание тротуарной плитки на входах в здание - провести  перекладку тротуарной плитки в местах проседания.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Звезда-2» (

<

...> стр. 19, оф. 10, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу,  обжалуется в порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской  области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу:  394006, 

<

...>, в течение месяца после принятия настоящего  решения.  

Решение суда об удовлетворении заявления о признании права собственности на  недвижимое имущество, вступившее в законную силу, является основанием для  государственной регистрации права собственности истца на недвижимое имущество в  установленном законом порядке и не заменяет собой документы, выдаваемые органом,  осуществляющим регистрацию.  

Судья Тишин А.А.