1020/2020-658(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4  

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-1566/2019

г. Чебоксары

10 января 2020 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Владимировой О.Е.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

муниципального автономного учреждения культуры "Дворец культуры "Восход"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 429120, 

<

...>  

к обществу с ограниченной ответственностью "Юман" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 428022, 

<

...>. пом. 1  

о взыскании 90976 руб. 99 коп. и об обязании устранить недостатки, 

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, общества с ограниченной  ответственностью "Проектный институт "Суварстройпроект" (

<

...>),  

при участии 

от истца: ФИО2 по доверенности от 18.03.2019 № 52 (сроком на один  год),  

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 18.03.2019 (сроком на один год),  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в пользу  муниципального автономного учреждения культуры "Дворец культуры "Восход"  1`324 (Одна тысяча триста двадцать четыре) руб. 31 коп. неустойки за период с  01.11.2018 по 11.12.2018, 70`923 (Семьдесят тысяч девятьсот двадцать три) руб. 62  коп. штрафа, 2`890 (Две тысячи восемьсот девяносто) руб. расходов по  

государственной пошлине, 35`000 (Тридцать пять тысяч) руб. расходов по  экспертизе.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Юман» в месячный  срок со дня вступления решения в законную силу устранить недостатки в  выполненных работах в рамках гарантийных обязательств по контракту от 13  сентября 2018 года № 0815300003418000033_131238, а именно:  

1) на 1 этаже: 

в Фойе устранить следы протечек на окрашенных стенах между первым и  четвертым этажами, пятна от загрязненной воды на панелях подвесного потолка  «Армстронг», отслоения краски на облицовке потолка из древесно-волокнистых  плит вокруг колонны, следы подтеканий на стене кинозала;  

в Кабинете директора устранить пятна от загрязненной воды на потолке  вокруг точек вывода проводов светильников;  

в Коридоре устранить следы протечек на верхней части перегородки,  образующей вместе со стеной зрительного зала коридор, следы протечек на  верхней части окрашенной стены зрительного зала;  

на Лестнице устранить следы намокания на нижней части окрашенной стены  в углу, со стороны санузла;  

в Гардеробе устранить следы протечек на окрашенных стенах гардероба со  стороны фойе, в углу;  

на 2 этаже: 

на Лестнице устранить пятна от загрязненной воды на крайней угловой  панели подвесного потолка «Армстронг»;  

в Коридоре устранить пятна от загрязненной воды на панелях подвесного  потолка «Армстронг»;  

в Зрительном зале устранить пятна от загрязненной воды на потолке; 2) устранить недостаток, связанный с трубой водостока: 

- 1 вариант устранения - наращивание трубы водостока с последующей  герметизацией, для чего потребуется (ориентировочно) 0,5 м трубы диаметром 108  мм и 0.5 м2 ПВХ мембраны;  

- 2 вариант устранения - устройство водостока с кровли двухэтажной части  здания в соответствии с рабочей документацией "Капитальный ремонт здания  МАУК ДК «Восход» под потолком фойе, для чего потребуется (ориентировочно)  10 м трубопровода диаметром 108 мм и пробитие 2 дополнительных отверстий в  стенах с последующей их герметизацией;  

3) устранить недостаток, связанный с неплотностями сопряжения мембраны  и металлических лестниц путем уплотнения сопряжений лестничных косоуров с  рулонной кровлей герметиком в 4 местах;  

4) устранить недостатки, связанные с неплотным прилеганием мембраны к  элементам, выступающим за пределы плоскости кровли, а именно: выполнить  местный ремонт появляющихся протечек в местах отслоения мембраны путем  проклейки заплаток и герметизации швов.  

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в доход  федерального бюджета 6`000 (Шесть тысяч) руб. государственной пошлины.  

Возвратить муниципальному автономному учреждению культуры "Дворец  культуры "Восход" из федерального бюджета 123 (Сто двадцать три) руб.  

государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 81 от  06.02.2019.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.Е. Владимирова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 10:52:49

 Кому выдана Владимирова Ольга Евгеньевна