1111111350_5430666  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19- 13044/2022  «29» сентября 2022 года  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Липатовой Ю.В., рассмотрев  в судебном заседании дело по исковому заявлению ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК -  ИРКУТСК ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" (далее - ФКУ УПРДОР  "ПРИБАЙКАЛЬЕ") (адрес: 664007, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД,  БАБУШКИНА УЛИЦА, 14, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.12.2002,  ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-ОЙЛ" (далее -  ООО "ГАЗ-ОЙЛ") (адрес: 666037, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕЛЕХОВ ГОРОД,  ИЗВЕСТКОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 5Б, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  14.03.2005, ИНН: 

<

***>)  

об обязании выполнить работы, взыскании неустойки,  

 руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-ОЙЛ" в  срок до 01.07.2023:  

Провести работы по приведению примыкания (въезда, выезда) в нормативное  состояние отвечающее требованиям по безопасности дорожного движения, объекта  дорожного сервиса АЗС «Руснефть» к дороге общего пользования федерального значения  А-331 «Вилюй» Тулун-Братск-Усть-Кут - Мирный - Якутск на км 256+900 (справа):  

1.1. получить технические требования и условия на капитальный ремонт и  эксплуатацию примыкания объекта;  

1.2. разработать проектную документацию на капитальный ремонт примыкания  объекта и согласовать с ФКУ Упрдор «Прибайкалье»;  

1.3. выполнить обустройство примыкания объекта в соответствии с проектной  документацией, согласованной с ФКУ Упрдор «Прибайкалье», включая работы:  

- по устройству переходно-скоростной полосы в соответствии с п 6.74. «СП  34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;  

- по устройству стационарного электрического освещения на переходно-скоростных полосах, в соответствии с п. 5.1.11 ГОСТ 33062-2014 «Межгосударственного  стандарта. Дорог автомобильного общего пользования. Требования к размещению  объектов дорожного и придорожного сервиса», п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007  «Национального стандарта РФ» Дорог автомобильного общего пользования. Элементов  обустройства. Общих требований».  

- по устройству поверхностного водоотвода, в увязке с водоотводом  автомобильной дороги;  

1.4. установить дорожный знак 3.1 «въезд запрещен» в местах въезда и выезда,  для выезжающих и въезжающих на АЗС автомобилей, в соответствии с п. 5.4.2 ГОСТ Р  52289- 2019 «Национального стандарта РФ. Технических средств организации дорожного  движения. Правил применения дорожных знаков, разметок, светофоров, дорожных  ограждений и направляющих устройств».  

1.5. установить дорожный знак 2.4 «уступи дорогу» в месте выезда с Объекта, в  соответствии с п. 5.3.6. ГОСТ Р 52289-2019.  

1.6. установить дорожный знак 4.1.1 «движение прямо» перед выездом с АЗС в  соответствии с п. 5.5.2 ГОСТ Р 52289-2019.  

1.7. установить дорожный знак 7.3 «автозаправочная станция», в соответствии с  п. 5.8.1 ГОСТ Р 52289-2019.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ- ОЙЛ" судебную неустойку в размере 30 000 рублей за каждый месяц неисполнения  судебного акта, из расчета 1 000 руб. в день.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ- ОЙЛ" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия.  

Судья Ю.В. Липатова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 20.04.2022 7:18:00

 Кому выдана Липатова Юлия Валерьевна