142/2023-47035(2) 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда апелляционной инстанции 

по проверке законности и обоснованности решений (определений)  

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-3469/2023

город Ростов-на-Дону

23 июня 2023 года

15АП-7474/2023  

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июня 2023 года.  

Полный текст постановления изготовлен 23 июня 2023 года.  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Николаева Д.В., судей Д.В. Емельянова, Н.В. Сулименко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  при участии:  

от общества с ограниченной ответственностью "МонтажТехСтрой": представитель  ФИО2 по доверенности от 01.03.2023;  

при участии посредством проведения онлайн-заседания в режиме  веб-конференции:  

от временного управляющего общества с ограниченной ответственностью  "МонтажТехСтрой": представитель ФИО3 по доверенности  от 12.05.2023,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью "МонтажТехСтрой" на определение Арбитражного суда  Краснодарского края от 12.04.2023 по делу № А32-3469/2023 о включении в реестр  требований кредиторов по заявлению общества с ограниченной ответственностью СК  "КРОНОС" в рамках дела о несостоятельности (банкротства) общества с ограниченной  ответственностью "МонтажТехСтрой",  

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротства) общества с ограниченной  ответственностью "МонтажТехСтрой" (далее – должник) в Арбитражный суд  Краснодарского края обратилось ООО СК «КРОНОС» (далее - заявитель, кредитор) с  заявлением о включении требований кредиторов задолженности в размере 7 025 343,49  рублей.  

Определением суда от 12.04.2023 в удовлетворении заявленного ходатайства  отказано.  

Суд определил включить требования ООО СК «КРОНОС» в размере 7 025 343,49  рублей задолженности в третью очередь реестра требований кредиторов ООО  «МонтажТехСтрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).  

Общество с ограниченной ответственностью "МонтажТехСтрой" обжаловало  определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и  просило отменить судебный акт, принять новый.  

В судебном заседании суд огласил, что от общества с ограниченной  ответственностью «СК КРОНОС» через канцелярию суда поступил отзыв на  апелляционную жалобу.  

Суд, совещаясь на месте, определил: приобщить отзыв на апелляционную жалобу к  материалам дела.  

Суд огласил, что от общества с ограниченной ответственностью  "МонтажТехСтрой" через канцелярию суда поступило дополнение к апелляционной  жалобе.  

Суд, совещаясь на месте, определил: приобщить дополнение к апелляционной  жалобе к материалам дела.  

Суд огласил, что от временного управляющего общества с ограниченной  ответственностью "МонтажТехСтрой" через канцелярию суда поступили письменные  пояснения.  

Суд, совещаясь на месте, определил: приобщить письменные пояснения к  материалам дела.  

Представитель общества с ограниченной ответственностью "МонтажТехСтрой":  представитель ФИО2 поддержал доводы, изложенные в своей  апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.  

Представитель временного управляющего общества с ограниченной  ответственностью "МонтажТехСтрой" поддержал доводы, изложенные в отзыве на  апелляционную жалобу, просил определение суда отменить.  

Суд, совещаясь на месте и руководствуясь статьей 163 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, определил: объявить перерыв в  судебном заседании до 13.06.2023 до 14 час. 10 мин.  

Суд разместил на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о  времени и месте продолжения судебного заседания 13.06.2023 до 14 час. 10 мин.  (публичное объявление о перерыве и продолжении судебного заседания.  В определении о принятии апелляционной жалобы к производству указана возможность  получения информации о движении дела на официальном сайте суда в сети Интернет по  соответствующему веб-адресу.  

Судебное заседание прервано 06 июня 2023 г. в 14 час. 35 мин. 

После перерыва судебное заседание продолжено 13 июня 2023 г.  в 17 час. 57 мин.  

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3 статьи 156  АПК РФ счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся  представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом о времени  и месте судебного разбирательства.  

В суд поступило ходатайство от общества с ограниченной ответственностью  «СК "КРОНОС"» об участии в судебном заседании путем использования системы  веб-конференции.  

Суд направил представителю общества с ограниченной ответственностью  «СК "КРОНОС"» информацию в электронном виде, необходимую для участия в  судебном заседании с использованием системы веб-конференции.  

В судебном заседании посредством телефонной связи представителю общества с  ограниченной ответственностью «СК "КРОНОС"» было предложено секретарем  присоединиться к онлайн-заседанию в режиме веб-конференции. Представитель общества  с ограниченной ответственностью «СК "КРОНОС"» в телефонном режиме пояснил суду,  что не намерен подключаться к онлайн-заседанию в режиме веб-конференции.  

Суд огласил, что от общества с ограниченной ответственностью «СК Кронос»  через канцелярию суда поступило дополнение к отзыву на апелляционную жалобу.  

Суд, совещаясь на месте, определил: приобщить дополнение к отзыву на  апелляционную жалобу к материалам дела.  

Суд огласил, что от общества с ограниченной ответственностью «СК Кронос»  через канцелярию суда поступили дополнительные письменные пояснения.  

Суд, совещаясь на месте, определил: приобщить дополнительные письменные  пояснения к материалам дела.  

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, дополнений,  отзывов, пояснений, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд  апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не  подлежит удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, ООО «Лидер» обратилось в Арбитражный суд  Краснодарского края с заявлением о признании ООО «МонтажТехСтрой»  несостоятельным (банкротом).  

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 08.02.2023 заявленные  требования признаны обоснованным, в отношении должника введена процедура  наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО4.  

Согласно сведениям, размещенным на официальном источнике, сообщение о  введении в отношении должника процедуры банкротства (наблюдение) опубликовано в  ЕФРСБ - 10.02.2023.  

01.03.2023 в арбитражный суд поступило заявление ООО СК «КРОНОС» о  включении требований кредиторов задолженности в размере 7 025 343,49 рублей.  

В обоснование заявленных требований кредитор указал: 

Между ООО «МонтажТехСтрой» (Подрядчик) и ООО СК «КРОНОС»  (Субподрядчик) заключен контракт от 04.06.2020 № 116-2020/297 (далее - Контракт № 1162020/297) на выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР), в счет  Контрактной цены, по объекту:  

- 15-ПКВ-010-022348 «Реконструкция объектов нефтебазы № 2 (нефтепродукты)  для увеличения пропускной способности МНПП «Приморск-Высоцк»;  

- 15-ПКВ-010-028300 «Реконструкция объектов нефтебазы № 2 (нефтепродукты)  для увеличения пропускной способности МНПП «Приморск-Высоцк». 2-этап».  

В силу п. 4.1. Контракта № 116-2020/297 в редакции Дополнительного соглашения  от 18.09.2020 № 1 Контрактная цена работ, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет  28 856 514,96 руб., в том числе НДС.  

Во исполнение принятых на себя обязательств Субподрядчик выполнил работ на  сумму 18 884 265,77 руб., в том числе НДС, что подтверждается:  

справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за август 2020 и  Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) за август 2020 в размере 4 299 122,09  руб., в том числе НДС;  

справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за сентябрь 2020  и Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) за сентябрь 2020 размере 4 405  185,49 руб., в том числе НДС;  

справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за декабрь 2020 и  Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) за декабрь 2020 размере 7 173 325,47  руб., в том числе НДС;  

справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за декабрь 2020 и  Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) за декабрь 2020 размере 3 006 632,72  руб., в том числе НДС.  

Кроме того, субподрядчиком, по Заявке Подрядчика от 07.10.2020 реализованы  ТМЦ на сумму 128 651,14 руб., что подтверждается накладной от 07.10.2020 № 2, а также  доверенностью на ФИО5  

Пунктом 6.3. Контакта № 116-2020/297, предусмотрена выплата Субподрядчику  аванса для выполнения работ, в размере 5 500 000 руб., в том числе НДС.  

Руководствуясь, п. 6.4.1.1. Контакта № 116-2020/297, стороны в Приложении № 1а к  Дополнительному соглашению от 18.09.2020 № 1 к Контакту № 116-2020/297, согласовали  зачет аванса, путем зачета выплаченного аванса на фиксированную сумму 5 500 000 руб.,  в том числе НДС, путем зачета за август 2020. Если сумма указанная в справке по форме  КС-3 меньше, чем сумма указанная по строке «Зачет аванса», то погашение аванса  производится на сумму, указанную в справке по форме КС-3, а остаток не зачтенного  аванса подлежит удержанию в следующем отчетном периоде.  

Оплата стоимости выполненных работ, поставленных материалов и оборудования  производится Подрядчиком в пользу Субподрядчика с учетом гарантийного удержания в  размере 5% от суммы выполненных работ за каждый месяц. Удержанная сумма в размере  5% от Контрактной цены будет выплачена Субподрядчику после окончания гарантийного  срока в течении 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента получения письменного  обращения от Субподрядчика (п. 6.5.2. Контакта № 116-2020/297).  

Следовательно, размер гарантийного удержания по Контракту № 1162020/297  составляет 944 213,28 руб. (18 884 265,77*5%).  

Продолжительность Гарантийного срока на результат работ (кроме  Антикоррозийного покрытия металлоконструкций резервуаров), составляет 2 (два) года от  даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта  приемочной комиссией (КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного  капитальным ремонтом объекта (Ф-36).  

На дату подачи настоящего заявления гарантийный срок истек - 20.12.2022. 

Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ  осуществляется Подрядчиком в течении 45 (сорока пяти) календарных дней следующих за  датой получения Подрядчиком оригинала счета, счета фактуры (п. 6.5.3. Контракта № 1162020/297).  

В период действия Контракта Подрядчик произвел оплату по договору на общую  сумму 13 766 400 руб., что подтверждается: платежным поручением от 17.07.2020 № 12694  на сумму 5 500 000 руб.; актом взаимозачета от 18.11.2020 на сумму 705 595,86 руб.;  платежным поручением от 01.12.2020 № 24097 на сумму 150 501,86 руб. (оплата по письму  от 27.11.2020 № 135); платежным поручением от 01.12.2020 № 24096 на сумму 37 350,60  руб. (оплата по письму от 01.12.2020 № 134); платежным поручением от 01.12.2020   № 24095 на сумму 110 208 руб. (оплата по письму от 01.12.2020 № 132); платежным  поручением от 01.12.2020 № 24094 на сумму 8 331,53 руб. (оплата по письму от 27.11.2020   № 133); платежным поручением от 01.12.2020 № 24144 на сумму 1 193 608,01 руб.;  платежным поручением от 12.02.2021 № 2319 на сумму 500 000 руб.; зачетом по претензии  от 15.02.2021 № МТС/ПРТ-47/2021 на сумму 75 000 руб.; платежным поручением от  22.03.2021 № 5144 на сумму 1 000 000 руб.; платежным поручением от 06.04.2021 № 6481  на сумму 1 832 599,88 руб.; платежным поручением от 20.04.2021 № 7233 на сумму 1 000  000 руб.; платежным поручением от 17.05.2021 № 8686 на сумму 505 108 руб. (оплата по  письму от 17.05.2021 № 3); платежным поручением от 05.07.2021 № 13008 на сумму 971  238,80 руб.; платежным поручением от 06.12.2021 № 29324 на сумму 113 172,21 руб.  (оплата по письму от 03.12.2021 № 57); актом взаимозачета от 18.11.2020 на сумму 63  725,26 руб.  

Таким образом, сумма принятых и неоплаченных Подрядчиком работ с учетом  гарантийного удержания (944 213,28 руб.) и реализации ТМЦ составляет 5 246 476,90 руб.  (18 884 265,77-13 766 440)+128 651,14.  

Между ООО «МонтажТехСтрой» (Подрядчик) и ООО СК «КРОНОС»  (Субподрядчик) заключен контракт от 01.06.2019 № 249-2019/235 (далее - Контракт № 2492019/235) на выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР), в счет  Контрактной цены, по объекту:  

- 15-ТПР-002-019212 «РВСПК 50000м3 № 4. Техперевооружение;  - 15-ТПР-002-019214 «РВСПК 50000м3 № 3. Техперевооружение.  

В силу п. 4.1. Контракта № 249-2019/235 в редакции Дополнительного соглашения  от 16.10.2019 № 2 Контрактная цена работ, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет  44 930 797,03 руб., в том числе НДС.  

Во исполнение принятых на себя обязательств Субподрядчик выполнил работ на  сумму 44 930 797,03 руб., в том числе НДС, что подтверждается: справкой о стоимости  выполненных работ и затрат (форма КС-3) за октябрь 2019 и Актом о приемке  выполненных работ (форма КС-2) за октябрь 2019 в размере 30 440 690,84 руб., в том  числе НДС; справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за ноябрь  2019 и Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) за ноябрь 2019 в размере 14  490 106,19 руб., в том числе НДС.  

Оплата стоимости выполненных работ, поставленных материалов и оборудования  производится Подрядчиком в пользу Субподрядчика с учетом гарантийного удержания в  размере 5% от суммы выполненных работ за каждый месяц. Удержанная сумма в размере  5% от Контрактной цены будет выплачена Субподрядчику после окончания гарантийного  срока в течении 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента получения письменного  обращения от Субподрядчика (п. 6.5.2. Контакта № 249-2019/235).  

Следовательно, размер гарантийного удержания по Контракту № 249-2019/235  составляет 2 246 539,85 руб. (44 930 797,03*5%).  

Продолжительность Гарантийного срока на результат работ (кроме  Антикоррозийного покрытия металлоконструкций резервуаров), составляет 2 (два) года от  даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта  приемочной комиссией (КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного  капитальным ремонтом объекта (Ф-36).  

На дату подачи настоящего заявления гарантийный срок истек - 14.11.2021. 

Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ  осуществляется Подрядчиком в течении 45 (сорока пяти) календарных дней следующих за  датой получения Подрядчиком оригинала счета, счета фактуры (п. 6.5.3. Контракта № 2492019/235).  

В период действия Контракта Подрядчик произвел оплату по договору на общую  сумму 44 746 106,46 руб., что подтверждается: платежным поручением от 04.12.2019   № 24217 на сумму 7 000 000 руб.; платежным поручением от 05.12.2019 № 24326 на сумму  3 000 000 руб.; платежным поручением от 26.12.2019 № 26358 на сумму 8 000 000 руб.;  платежным поручением от 27.12.2019 № 26471 на сумму 1 600 000 руб.; зачетом по  претензии от 23.01.2020 № МТС/ПРТ-3/2020 на сумму 100 000 руб.; платежным  поручением от 28.01.2020 № 1119 на сумму 2 200 000 руб.; платежным поручением от  03.03.2020 № 2980 на сумму 3 000 000 руб.; актом взаимозачета от 26.12.2019 на сумму 825  889,09 руб.; платежным поручением от 01.04.2020 № 4919 на сумму 3 000 000 руб.;  платежным поручением от 22.04.2020 № 6392 на сумму 1 563 200 руб.; платежным  поручением от 30.04.2020 № 7149 на сумму 1 000 000 руб.; платежным поручением от  06.05.2020 № 7362 на сумму 1 000 000 руб.; платежным поручением от 20.05.2020 № 8561  на сумму 2 000 000 руб.; соглашением об урегулировании претензионных требований от  05.06.2020 на сумму 3 900 000 руб.; актом взаимозачета от 30.06.2020 на сумму 219 264,18  руб.; платежным поручением от 02.07.2020 № 11311 на сумму 3 500 000 руб.; актом  взаимозачета от 30.09.2020 на сумму 25 228,88 руб.; платежным поручением от 02.10.2020   № 19464 на сумму 139 433,75 руб. (оплата по письму от 01.10.2020 № 32); платежным  поручением от 02.10.2020 № 19465 на сумму 371 194,08 руб. (оплата по письму от  01.10.2020 № 33); платежным поручением от 01.10.2020 № 19460 на сумму 1 000 000 руб.;  платежным поручением от 21.10.2020 № 21142 на сумму 801 566,48 руб.; платежным  поручением от 18.11.2020 № 23247 на сумму 500 000 руб.  

Таким образом, задолженность Подрядчика перед Субподрядчиком с учетом  гарантийного удержания (2 246 539,85 руб.) составляет 184 690,57 руб. (44 930 797,03-44  746 106,46).  

Между ООО «МонтажТехСтрой» (Подрядчик) и ООО СК «КРОНОС»  (Субподрядчик) заключен контракт от 01.04.2019 № 272-2019/234 (далее - Контракт № 2722019/234) на выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР), в счет  Контрактной цены, по объекту: комплексная реконструкция автоматического  пожаротушения.  

В силу п. 4.1. Контракта № 272-2019/234 в редакции Дополнительного соглашения  от 11.12.2019 № 1 Контрактная цена работ, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет  6 108 814,56 руб., в том числе НДС.  

Во исполнение принятых на себя обязательств Субподрядчик выполнил работ на  сумму 6 108 814,56 руб., в том числе НДС, что подтверждается: справкой о стоимости  выполненных работ и затрат (форма КС-3) за ноябрь 2019 и Актом о приемке  выполненных работ (форма КС-2) за ноябрь 2019 в размере 6 108 814,56 руб., в том числе  НДС.  

Оплата стоимости выполненных работ, поставленных материалов и оборудования  производится Подрядчиком в пользу Субподрядчика с учетом гарантийного удержания в  размере 5% от суммы выполненных работ за каждый месяц. Удержанная сумма в размере  5% от Контрактной цены будет выплачена Субподрядчику после окончания гарантийного  срока в течении 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента получения письменного  обращения от Субподрядчика (п. 6.5.2. Контакта № 272-2019/234).  

Следовательно, размер гарантийного удержания по Контракту № 272-2019/234  составляет 305 440,73 руб. (6 108 814,56 *5%).  

Продолжительность Гарантийного срока на результат работ (кроме  Антикоррозийного покрытия металлоконструкций резервуаров), составляет 2 (два) года от  даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта  приемочной комиссией (КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного  капитальным ремонтом объекта (Ф-36).  

На дату подачи настоящего заявления гарантийный срок истек - 29.11.2021. 

Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ  осуществляется Подрядчиком в течении 45 (сорока пяти) календарных дней следующих за  датой получения Подрядчиком оригинала счета, счета фактуры (п. 6.5.3. Контракта № 2722019/234).  

В период действия Контракта Подрядчик произвел оплату по договору на общую  сумму 5 803 373,83 руб., что подтверждается: платежным поручением от 17.01.2020 № 398  на сумму 5 000 000 руб.; платежным поручением от 28.01.2020 № 1120 на сумму 803  373,83 руб.  

Таким образом, задолженность Подрядчика перед Субподрядчиком составляет 305  440,73 руб. (6 108 814,56- 5 803 374).  

Между ООО «МонтажТехСтрой» (Подрядчик) и ООО СК «КРОНОС»  (Субподрядчик) заключен контракт от 23.07.2019 № 299-2019/210 (далее - Контракт № 2992019/210) на выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР), в счет  Контрактной цены, по объекту: 04-КРПО-304-000985 «ПК «Шесхарис» Площадка  «Грушовая» Реконструкция. 3 этап».  

В силу п. 4.1. Контракта № 299-2019/210 в редакции Дополнительного соглашения  от 22.01.2020 № 1 Контрактная цена работ, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет  7 353 426,61 руб., в том числе НДС.  

Во исполнение принятых на себя обязательств Субподрядчик выполнил работ на  сумму 7 353 426,61 руб., в том числе НДС, что подтверждается: справкой о стоимости  выполненных работ и затрат (форма КС-3) за февраль 2020 и Актом о приемке  

выполненных работ (форма КС-2) за февраль 2020 в размере 7 353 426,61 руб., в том числе  НДС.  

Оплата стоимости выполненных работ, поставленных материалов и оборудования  производится Подрядчиком в пользу Субподрядчика с учетом гарантийного удержания в  размере 5% от суммы выполненных работ за каждый месяц. Удержанная сумма в размере  5% от Контрактной цены будет выплачена Субподрядчику после окончания гарантийного  срока в течении 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента получения письменного  обращения от Субподрядчика (п. 6.5.2. Контакта № 299-2019/210).  

Следовательно, размер гарантийного удержания по Контракту № 2992019/210  составляет 367 671,33 руб. (7 353 426,61*5%).  

Продолжительность Гарантийного срока на результат работ (кроме  Антикоррозийного покрытия металлоконструкций резервуаров), составляет 2 (два) года от  даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта  приемочной комиссией (КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного  капитальным ремонтом объекта (Ф-36).  

На дату подачи настоящего заявления гарантийный срок истек-29.02.2022. 

Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ  осуществляется Подрядчиком в течении 45 (сорока пяти) календарных дней следующих за  датой получения Подрядчиком оригинала счета, счета фактуры (п. 6.5.3. Контракта № 2722019/234).  

В период действия Контракта Подрядчик произвел оплату по Контракту № 2992019/210 на общую сумму 6 985 755,28 руб., что подтверждается: актом взаимозачета от  21.03.2020 на сумму 766 439,76 руб.; платежным поручением от 19.06.2020 № 10609 на  сумму 725 000 руб.; платежным поручением от 30.06.2020 № 11 на сумму 2 295 882 руб.;  платежным поручением от 04.08.2020 № 15172 на сумму 1 500 000 руб.; платежным  поручением от 28.08.2020 № 16707 на сумму 1 000 000 руб.; платежным поручением от  21.10.2020 № 21143 на сумму 698 433,52 руб.  

Таким образом, задолженность Подрядчика перед Субподрядчиком составляет 367  671,33 руб. (7 353 426,61-6 985 755,28).  

Между ООО «МонтажТехСтрой» (Подрядчик) и ООО СК «КРОНОС»  (Субподрядчик) заключен контракт от 01.10.2019 № 286-2019/228 (далее-Контракт № 2862019/228) на выполнение работ на объекте: 03-ТПР-002-012581 Резервуар РВС-10000 № 9,  РВС-10000 № 11 ЛПДС «Никольское». Строительство (1 этап № 9), 03-ТПР-002-012582  Резервуар РВС-10000 № 9, РВС-10000 № 11 ЛПДС «Никольское». Строительство (2 этап   № 11).  

Стоимость работ составляет 1 199 988 руб., в том числе НДС (п. 6.1 . Контракта   № 286-2019/228).  

Во исполнение принятых на себя обязательств Субподрядчик выполнил работ на  сумму 921 063,96 руб., в том числе НДС, что подтверждается: справкой о стоимости  выполненных работ и затрат (форма КС-3) за октябрь 2020 и Актом о приемке  выполненных работ (форма КС-2) за октябрь 2020 в размере 921 063,96 руб., в том числе  НДС.  

Стороны в п. 9.2. Контракта № 286-2019/228 согласовали, что для обеспечения  гарантии выполнения Субподрядчиком своих обязательств Подрядчик ежемесячно  производит гарантийное удержание в размере 5% от общей стоимости выполненных  работ.  

Следовательно, размер гарантийного удержания по Контракту № 286-2019/228  составляет 46 053,20 руб. (921 063,96 *5%).  

Общая сумма гарантийного удержания возвращается Субподрядчику в течении 30  (тридцати) рабочих дней со дня принятия Подрядчиком письменного уведомления от  Субподрядчика. Данное уведомление может быть направлено по истечении 24 месяцев с  даты ввода объекта в эксплуатацию (п. 9.2.1. Контракта № 286-2019/228).  

Гарантийный срок выполненных работ составляет 24 месяца (п. 7.11. Контракта   № 286-2019/228).  

На дату подачи настоящего заявления гарантийный срок истек-01.10.2022. 

Согласно п. 6.4. Контракта № 286-2019/228, оплата выполненных работ  производится на основании счета, в течении 45 дней с момента подписания сторонами  акта по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, при  условии предоставления счета-фактуры.  

В нарушение принятых на себя обязательств Подрядчик не произвел оплату  выполненных работ.  

Таким образом, сумма принятых и неоплаченных Подрядчиком работ с учетом  гарантийного удержания (46 053,20 руб.) составляет 921 063,96 руб.  

Наличие неисполненных обязательств должника перед кредитором явилось  основанием для обращения ООО СК «КРОНОС» в арбитражный суд с заявленным  требованием.  

В силу статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по  правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными  федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).  

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в  соответствии с порядком, предусмотренным статьями 71 и 100 Федерального закона от  26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве),  в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника.  

Согласно пункту 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом  собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в  течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.  Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному  управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих  обоснованность этих требований. Требования включаются в реестр требований  кредиторов на основании определения арбитражного суда. Возражения относительно  требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд не позднее чем через  пятнадцать дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов  должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к  должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем  собственника имущества должника - унитарного предприятия (пункт 2 статьи 71 Закона о  банкротстве).  

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве  проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом  независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и  лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и  предъявившим требование кредитором, с другой стороны. При установлении требований  кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными  могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены  достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Требования, по которым  не поступили возражения, могут быть рассмотрены без привлечения лиц, участвующих в  деле.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 142 Закона о банкротстве реестр требований  кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования  сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.  

В соответствии с пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного  Суда Российской" Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных  вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее -постановление № 35)  при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из  

того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых  представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Кроме того,  при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или  арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои  требования(часть 3 статьи 70 Кодекса), само по себе не освобождает другую сторону от  необходимости доказывания таких обстоятельств.  

Следовательно, в деле о банкротстве суд обязан вне зависимости от доводов лиц,  участвующих в деле, оценить действительность заявленного требования о включении в  реестр и соответствие закону процессуальных и материально -правовых интересов  заявителя.  

Согласно пункту 1 статьи 40 Закона о банкротстве к заявлению кредитора  прилагаются документы, подтверждающие обязательства должника перед кредитором, а  также наличие и размер задолженности по указанным обязательствам, доказательства  оснований возникновения задолженности, позволяющие установить документальную  обоснованность этих требований.  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Положениями статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по  заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику,  а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В случае, когда для результата работы предусмотрен гарантийный срок, результат  работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о  качестве (пункт 1 статьи 722 ГК РФ).  

Под гарантийным сроком в договорах подряда понимается период времени, в  течение которого подрядчик гарантирует стабильность показателей качества результата  произведенных работ в процессе его использования по назначению при условии  соблюдения заказчиком установленных правил использования.  

Содержание гарантийного обязательства включает право заказчика требовать от  подрядчика обеспечения надлежащего качества результата выполненных работ и  корреспондирующую ему обязанность подрядчика обеспечивать его с момента приемки и  до окончания действия гарантийного срока.  

Судом установлено, что должник имеет неисполненные денежные обязательства  перед ООО СК «КРОНОС» (Субподрядчик) в размере 7 025 343,49 руб. согласно  следующих контрактов: от 04.06.2020 № 116-2020/297, от 01.06.2019 № 249-2019/235, от  01.04.2019 № 272-2019/234, от 23.07.2019 № 299-2019/210, от 01.10.2019 № 286-2019/228.  

Указанный кредитором размер задолженности подтверждается представленными в  материалы дела доказательствами (первичной документацией - контракты, платежные  поручения, справки КС-3 и КС-2, акты сверки взаимных расчетов и др).  

Доказательств обратного в материалы дела не представлено. 

Доводы подателя жалобы со ссылкой на акты взаимозачета не принимаются. В  нарушение статьи 65 АПК РФ в материалах дела отсутствует акт взаимозачета,  подписанный со стороны кредитора.  

Доводы подателя жалобы со ссылкой на недостатки работ, со стороны кредитора,  отклоняются как документально не подтвержденные. Заявитель жалобы не обращался в  суд с ходатайством о назначении экспертизы по вопросу объема и качества выполненных  работ.  

В рассматриваемом случае кредитором представлены достаточные доказательства  наличия и размера задолженности, заявленной к включению в реестр требований  кредиторов должника, которые надлежащим образом не опровергнуты.  

На основании изложенного, требования заявителя в размере 7 025 343,49 рублей  основного долга признаются обоснованными и подлежат включению в третью очередь  реестра требований кредиторов должника.  

В целом доводы апелляционной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда, оценке  доказательств, не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта,  так как они не опровергают правомерность выводов арбитражного суда и не  свидетельствуют о неправильном применении норм материального и процессуального  права.  

Согласно ч. 1, 6 ст. 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного  производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным  доказательствам повторно рассматривает дело, вне зависимости от доводов,  содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции  проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права,  являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ основанием для отмены  определения арбитражного суда первой инстанции.  

Суд первой инстанции выполнил требования статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, полно, всесторонне исследовал и оценил  представленные в деле доказательства и принял законный и обоснованный судебный акт.  

Оснований для переоценки выводов и доказательств, которые при рассмотрении  дела были исследованы и оценены судом первой инстанции с соблюдением требований  статьи 71 АПК РФ, не имеется.  

При указанных обстоятельствах основания для отмены или изменения  обжалуемого судебного акта отсутствуют.  

 Нарушений процессуальных норм, влекущих отмену оспариваемого акта (ч. 4  ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом  апелляционной инстанции не установлено. С учетом изложенного, основания для  удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 272 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 12.04.2023 по делу   № А32-3469/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление  арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его  принятия.  

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном  статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.  

Председательствующий Д.В. Николаев 

Судьи Д.В. Емельянов  

 Н.В. Сулименко