Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-14089/2017

07 августа 2017 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  22 мая 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  07 августа 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

Истец: Администрация Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (адрес: Россия 188255, пгт ТОЛМАЧЕВО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ЛУЖСКИЙ р-н, ул ТОЛМАЧЕВА 26 В, ОГРН:  1064710000300);

Ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Проект Плюс" (адрес:  Россия 199178, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, наб РЕКИ СМОЛЕНКИ 14/ЛИТ. А/ПОМ. 343, ОГРН:  1107847024977);

о взыскании 94 651 руб. 20 коп.

установил:

Администрация Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области обратилась с иском к ООО «Проект Плюс» о взыскании 94 651 руб. 20 коп., составляющих 25 897 руб. 30 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств на основании п.6.3.1 муниципального контракта № 0145300022915000063-0194381-02 от 02.02.2016 и 68 753 руб. 90 коп. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по п.6.3.2 указанного контракта. 

Ответчик иск отклонил и заявил ходатайство о снижении неустойки по ст.333 ГК РФ. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании ст.ст.226-229 АПК РФ. 

Судом установлено:

Между сторонами был заключен муниципальный контракта № 0145300022915000063-0194381-02 от 02.02.2016 на выполнение работ по объекту: «Строительство газопровода низкого давления для газификации 16-ти квартирного жилого дома № 6 по ул.Советская в г.п. Толмачево Лужского района Ленинградской области. Газопровод-ввод.» и дополнительные соглашения к нему. 

Цена контракта составляет 687 539 руб. 00 коп. 

Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2016 – 15.06.2016.

Ответчик-подрядчик выполнил работы по контракту в полном объеме с надлежащим качеством. 

Истец в обоснование исковых требований ссылается на нарушение ответчиком п.2.1.3 контракта в части непредставления пакета документов:  сертификатов, технических паспортов не позднее чем за 3 дня до начала их использования. 

В соответствии с п.6.3.1 контракта истец рассчитал неустойку в размере 25 897 руб. 30 коп. 

Суд считает, что подлежащая взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и с учетом ходатайства ответчика на основании ст.333 ГК РФ уменьшает ее до 15 000 руб. 00 коп.

Штраф, предусмотренный п.6.3.2 контракта, в размере 68 753 руб. 90 коп. (10% от цены контракта) взысканию не подлежит, т.к. за одно правонарушение не может применяться две меры ответственности. 

Учитывая, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина в размере 2 000 руб. 00 коп. подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проект Плюс" в пользу Администрации Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области 15 000 руб. 00 коп. неустойки по п.6.3.1 контракта. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проект Плюс" в доход федерального бюджета 2 000 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Сергеева О.Н.