АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А39-2734/2020

город Саранск26 мая 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 мая 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 26 мая 2020 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла" 

к обществу с ограниченной ответственностью "Поволжская дорожно-строительная компания"

о взыскании 1997351 руб. 92 коп. убытков и понесенных судебных расходов,

при участии в заседании:

от истца: не явились,

от ответчика: ФИО2, по доверенности от 10.12.2019 г., диплом №101318 0371751 от 29.06.2005 г.,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла" (далее – ООО "СК "Тавла", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с иском к обществу с ограниченной ответственностью ""Поволжская дорожно-строительная компания" (далее – ООО "ПДСК", ответчик) о взыскании убытков в сумме 1997351 руб. 92 коп.

Иск мотивирован ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору строительного подряда № 2-Ж от 23.12.2016 ООО "ПДСК" на строительство 1 жилого дома (№2, корпус А) гостинично-жилого комплекса «Тавла», в связи с чем  гражданам в рамках договоров долевого участия в строительстве были переданы квартиры несвоевременно и с недостатками. На основании судебных актов судов общей юрисдикции с ООО "СК "Тавла" взысканы в пользу граждан неустойки за нарушение сроков передачи квартир, денежные средства в счет уменьшения цены договора  участия в строительстве соразмерно выявленным недостаткам, а также судебные расходы. В счет возмещения убытков истец просит взыскать с ответчика 1997351руб. 92коп.

Ответчик иск не признал, в отзыве в частности указал, что заявленные в настоящем иске требования уже были предметом рассмотрения в арбитражном суде в рамках дела №А39-626/2019. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 26.07.2019 по указанному делу в иске ООО "СК "Тавла" к ООО "ПДСК" о взыскании убытков отказано.

Из материалов дела следует, что между сторонами заключен договор строительного подряда № 2-Ж от 23.12.2016, согласно которому ООО "ПДСК" (подрядчик) по заданию ООО "СК "Тавла" (заказчика) собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций обязался построить (выполнить полный комплекс строительных работ: с подготовительных работ и завершая получением заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) объект, предусмотренный Республиканской целевой программой «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» на 2013 – 2018 годы», утвержденной Постановлением Республики Мордовия от 04.10.2013 № 450: «Строительство гостинично-жилого комплекса «Тавла» г.Саранск, в том числе 380 номеров категории «три звезды» и 470 номеров категории «четыре звезды», а именно построить 1 жилой дом (№ 2 корпус А) Комплекса (далее – объект), на земельном участке в г.Саранске между ул.Волгоградская и автомобильной дорогой на с.Кочкурово (в районе реки Тавла) (пункт 1.1).

Акт приемки объекта капитального строительства подписан сторонами 23 апреля .2018 года без замечаний со стороны заказчика (ООО "СК "Тавла").

Срок передачи квартир гражданам в рамках договоров долевого участия установлен до 30.04.2018, а также до 01.03.2018.

Поскольку квартиры были переданы гражданам несвоевременно, на основании положений Федеральных законов "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", "О защите прав потребителей" участники долевого строительства обратились в суды общей юрисдикции за защитой своих прав. 

Вступившими в законную силу и представленными в материалы дела  судебными актами судов общей юрисдикции с ООО "СК "Тавла" в пользу граждан взысканы денежные средства в счет уменьшения цены договора  участия в строительстве соразмерно выявленным недостаткам, неустойка за нарушение сроков передачи квартир на общую сумму 1997351руб. 92 коп. 

Взысканные денежные средства ООО "СК "Тавла" оплачены. 

Считая, что ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору строительного подряда № 2-Ж от 23.12.2016 в части нарушения сроков строительства спорного многоквартирного дома и некачественного выполнения строительных работ  ООО "СК "Тавла" понесло убытки, истец обратился в суд с рассматриваемым иском.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В решении Арбитражного суда Республики Мордовия от 26.07.2019 по делу №А39-626/2019, вступившим в законную силу, требования  ООО "СК "Тавла" о взыскании с ООО "ПДСК" убытков в счет возмещения затрат на выплату гражданам денежных средств по судебным актам судов общей юрисдикции признаны несостоятельными. В иске ООО "СК "Тавла" к ООО "ПДСК" о взыскании убытков отказано.

В рамках рассмотрения настоящего дела истцом предъявлены требования, основанные на тех же судебных актах судов общей юрисдикции, которые были предметом рассмотрения в рамках дела №А39-626/2019, за исключением денежных средств, взысканных с ООО "СК "Тавла" в счет компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя и понесенных судебных расходов.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание преюдициальное значение решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 26.07.2019 по делу №А39-626/2019 для разрешения настоящего спора, иск удовлетворению не подлежит.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяЮ.А. Кшняйкин