8998/2023-130086(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 Дело № А43-34797/2022 

г. Нижний Новгород 19 июля 2023 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Куприяновой Александры Александровны (шифр 48-895), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Махневой И.И., рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали  Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства"  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью "Мапо-Транс"  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  о взыскании 1 414 019 руб.,  

при участии представителей: от истца: ФИО1 – доверенность от 27.12.2022, от ответчика: ФИО2 – доверенность от 09.01.2023, 

установил:

заявлено требование о взыскании 1 414 019 руб. 68 коп. штрафа по  государственному контракту от 02.06.2017 № 142.  

Представитель истца требования поддержала в полном объеме. 

Представитель ответчика требования истца не признала по доводам, изложенным в  письменном отзыве на иск и дополнении к нему.  

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации объявлялся перерыв до 11 часов 30 минут 19.07.2023.  

В указанное время судебное заседание продолжено в отсутствие представителей  сторон.  

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон по  имеющимся доказательствам.  

Как следует из материалов дела, между Федеральным казенное учреждение  «Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального  дорожного агентства» (далее - ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, Управление) и  обществом с ограниченной ответственностью «МАПО-ТРАНС» (далее - Общество,  Подрядчик) заключен государственный контракт от 02.06.2017 № 142 по ремонту  автомобильной дороги Р -178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 61+000 - км  68+000, Республика Мордовия.  

В соответствии с пунктом 8.9 Контракта Подрядчик обязался обеспечить  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в  течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта  исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с  Заказчиком сроки.  

Согласно пункту 10.2 Контракта гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов,  возникших в течение гарантийных сроков, на Объекте составляет: - по верхнему слою  покрытия из ЩМА-15: 4 года; - подсыпка обочин гранулятом: 2 года; - по обустройству  дороги: разметка термопластичными материалами: 1 год; посадочные площадки: 4 года;  барьерное ограждение (металлическое) - 5 лет; дорожные знаки - 5 лет; стойки дорожных  знаков - 5 лет; световозвращающие элементы - 3 года; автопавильоны - 2 года; работы по  замене барьерного ограждения - 2 года; работы по замене дорожных знаков - 2 года, с  момента (даты) подписания Сторонами Акта приемочной комиссии по приемке  законченного ремонтом Объекта.  

Пунктом 10.3 Контракта установлено, что если в период гарантийной эксплуатации  Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в  согласованные в установленном порядке сроки.  

Согласно Акту комиссионного обследования объекта от 08.04.2021 № 5 Подрядчик  обязался в срок до 20.05.2021 выполнить работы по гарантийным обязательствам в  соответствии с ведомостью дефектов (приложение № 1 к указанному акту) и направить в  адрес Заказчика уведомление о выполнении работ с подтверждающими документами.  

09.09.2021 при повторном обследовании Объекта установлено, что работы по  гарантийным обязательствам не выполнены, о чем Заказчиком совместно с ООО  «Мегаполис» (лицом, осуществляющим содержание) составлен Акт комиссионного  освидетельствования выполнения гарантийных обязательств от 09.09.2021 № 4.  Представитель Подрядчика для участия в работе комиссии по освидетельствованию работ по  гарантийным обязательствам не явился.  

В соответствии с пунктом 11.4.8 Контракта за нарушение установленных Заказчиком  сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период  гарантийного срока, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 % от цены контракта, что  составляет 707 009 рублей 84 копейки.  

В соответствии с пунктом 11.4.12. за неявку полномочных представителей Подрядчика,  приглашенных Заказчиком для участия в комиссии по обследованию Объекта, составления  акта, фиксирующего дефекты и участия в совещаниях, Подрядчик уплачивает штраф в  размере 1 % от цены контракта, что составляет 707 009 рублей 84 копейки (в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063).  

Таким образом, по расчету истца, сумма штрафных санкций, начисленных ответчику,  составила 1 414 019 рублей 68 коп.  

В адрес ООО «МАПО-ТРАНС» выставлена Претензия № 4/7625 от 22.09.2021 о  взыскании штрафных санкций.  

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием  для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.  

Исследовав материалы дела, суд считает исковые требования не подлежащими  удовлетворению исходя из следующего.  

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно пункту 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные  строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758),  предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд,  осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение  подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ  для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или  муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и  другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и  

непроизводственного характера работы и передать их государственному или  муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется  принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда  указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между  сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов  работы (промежуточные сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено  договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так  и промежуточных сроков выполнения работы.  

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств  может обеспечиваться неустойкой.  

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства законом или договором может быть  предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пени).  

Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных  контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,  заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек  (штрафов, пеней).  

В соответствии с пунктом 11.4.8 Контракта за нарушение установленных Заказчиком  сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период  гарантийного срока, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 % от цены контракта, что  составляет 707 009 рублей 84 копейки.  

В соответствии с пунктом 11.4.12. за неявку полномочных представителей Подрядчика,  приглашенных Заказчиком для участия в комиссии по обследованию Объекта, составления  акта, фиксирующего дефекты и участия в совещаниях, Подрядчик уплачивает штраф в  размере 1 % от цены контракта, что составляет 707 009 рублей 84 копейки (в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063).  

Вместе с тем Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (в редакции от  23.03.2022) утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом".  

Правила № 783 устанавливают порядок и случаи списания сумм неустоек (штрафов,  пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в  связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом (далее - списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).  

Согласно пункту 3 Правил № 783 списание начисленных и неуплаченных сумм  неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:  

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не  превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных  подпунктами "в" - "д" настоящего пункта;  

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней)  превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены  контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных  сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и  

неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, предусмотренных  подпунктами "в" - "д" настоящего пункта;  

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с  возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения  контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик  осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);  

г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с  существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем  невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик  осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в  период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем  пятым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9  августа 2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской  Федерации" предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении  существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные  ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с  приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;  

д) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с  возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения  контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, заказчик  осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).  

Подпунктом «а» пункта 5 Правил установлено, что при наличии документа о  подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме  неустоек (штрафов, пеней) основанием для принятия решения о списании начисленной и  неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) является: в случае, предусмотренном  подпунктом "а" пункта 3 настоящих Правил, - исполнение поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в  полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом.  

Согласно пункту 40 Обзора судебной практики применения законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом  28.06.2017, списание или предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) в  соответствии с частью 6.1 статьи 34 Закона о контрактной системе является обязанностью  заказчика.  

Как следует из материалов дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле,  подрядчик исполнил обязательства по спорному контракту, работы по контракту выполнены  в полном объеме, что подтверждается предоставленными в материалы дела актами о приемке  выполненных работ.  

Цена контракта составляет 70 700 983 руб. 52 коп. 

Сумма неустойки составляет 1 414 019 руб. 68 коп., что не превышает 5 процентов  цены контракта.  

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о доказанности совокупности  условий, необходимых и достаточных для возложения на заказчика обязанности по  списанию начисленных неустоек.  

Обязанность заказчика по списанию начисленных и неуплаченных неустоек возникает  при наступлении обстоятельств, предусмотренных в пункте 3 Правил № 783, и при наличии  условия, установленного в пункте 5 названных Правил.  

Согласно правовому подходу, примененному в определениях Верховного Суда  Российской Федерации от 24.04.2018 № 305-ЭС17-23242, от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712, при  

рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному  контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер  государственной поддержки, наличие спора относительно начисленной неустойки не может  трактоваться как условие, препятствующее списанию или предоставлению отсрочки уплаты  неустоек, поскольку подобные антикризисные меры были установлены специально для  защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным контрактам.  

Данный правовой подход изложен в пункте 40 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, согласно которому  списание или предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) является  обязанностью заказчика, в связи с чем, суд обязан проверить соблюдение им требований  указанной нормы. Несовершение заказчиком действий по сверке задолженности с  исполнителем не может служить основанием для неприменения правил о списании или  предоставлении отсрочки.  

Таким образом, поскольку основания для применения мер, предусмотренных  Постановлением от 04.07.2018 № 783, установлены, размер предъявленной к взысканию  неустойки не превышает 5 процентов от цены контракта, в материалах дела содержатся  доказательства исполнения обязательств подрядчиком в полном объеме, суд не усматривает  правовых оснований для удовлетворения исковых требований.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180-182 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может  быть обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было  предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.А. Куприянова  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 24.03.2023 2:03:00

Кому выдана Куприянова Александра Александровна