АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, 

<

...> стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-60481/2025

10 февраля 2026 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2026 года

Полный текст решения изготовлен 10 февраля 2026 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.К. Загайновой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.Д. Жигаловой, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-60481/2025 по иску Акционерного общества «ГАЗЭКС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Смарт групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), о взыскании 8 099 317 руб. 11 коп.,

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 29.12.2025 № 035-04/2026, предъявлен паспорт, диплом,

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от 19.08.2025, предъявлен паспорт, диплом,

от третьего лица: не явился.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отвода составу суда не заявлено.

АО «ГАЗЭКС» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о взыскании с ООО «Ресурс» расходов в сумме 8 099 317 руб. 11 коп., понесенных по договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения (многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...> уч. №23а).

Определением от 09.10.2025 исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Свердловской области, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Смарт групп".

Третье лицо 22.12.2025 представило отзыв и документы о выполнении работ и организации строительства объекта по адресу: 

<

...> уч. №23А.

Ответчик отзыв в материалы дела не представил, заявил в судебном заседании 23.12.2025 (устно) ходатайство об отложении судебного разбирательства для ознакомления с документами, представленными третьим лицом, и для подготовки отзыва.

Истец 21.01.2026 представил письменные пояснения по иску.

Ответчик 28.01.2026 представил отзыв на исковое заявление, исковые требования не признал.

Истец в судебном заседании 28.01.2026 представил дополнительные документы и заявил ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с отзывом ответчика. В удовлетворении ходатайства судом отказано.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Из материалов дела следует, что между АО «ГАЗЭКС» (истец, исполнитель) и ООО «Ресурс» (ответчик, заявитель) заключен договор № 18-1-18/2022 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 15.03.2022 г., в соответствии с условиями которого исполнитель принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – котельной многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> уч. № 23а (кадастровый № 66:08:0801009:679) к сети газораспределения, принадлежащей истцу на праве собственности или ином законном основании, или к технически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, а заявитель обязался обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: 

<

...> уч. № 23а (кадастровый № 66:08:0801009:679) и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а единый оператор газификации или региональный оператор газификации - обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Права и обязанности сторон определены в разделе 2 договора.

Мероприятия по технологическому присоединению определены в технических условиях № Г-18/2022 на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Свои обязательства по договору истец выполнил в полном объеме, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 10.06.2025.

Фактическая стоимость затрат на подключение составила 8 099 317 руб. 11 коп. без учета НДС и включала стоимость затрат на проектно-изыскательские работы (639 998 руб.), работы по организации и строительству газопровода высокого давления до границы земельного участка (7 288 333 руб. 33 коп.), вырубку земельных насаждений (104 985 руб. 78 коп.), государственную пошлину за регистрацию объекта недвижимости ( 66000 руб.).

Ответчик обязательства по оплате не исполнил, у ответчика образовалась задолженность в сумме 8 099 317 руб. 11 коп. Ответчик направил в адрес истца уведомление о расторжении договора № 135 от 31.03.2025 ввиду нарушения исполнителем сроков оказания услуг.

В связи с неисполнением обязательств по оплате, истец с соблюдением досудебного порядка урегулирования спора (претензия от 30.04.2025 № Г/1500) обратился в суд с настоящим иском.

Заслушав доводы представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, оценив их в порядке ст. 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований, исходя из следующего.

Возникшие между сторонами правоотношения в рамках заключенного договора о технологическом присоединении объектов капитального строительства к сети газораспределения регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными от 13.09.2021 № 1547 (далее - Правила N 1547), действовавшими на момент заключения и действия данного договора.

Кроме того, договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации («Возмездное оказание услуг»), а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из основных понятий Правил N 1547, "подключение (технологическое присоединение)» – это совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Исполнитель - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а также осуществляющая строительство перспективных сетей газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение) перспективных объектов капитального строительства, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов.

Согласно пунктам 5, 9 Правил N 1547 подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении, который является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных данными Правилами.

Из пункта 6 Правил N 1547 следует, что по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия); заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 71 Правил № 1547 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка);

г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с подпунктом "д" пункта 74 Правил N 1547, заявитель обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.

В силу статьи 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, подлежат государственному регулированию; размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

При рассмотрении дела судом установлено, что между ответчиком и Администрацией Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области был заключен договор аренды земельного участка № 2257 от 20.05.2021 года, согласно которому ответчик (Арендатор) принял земельный участок № 23а по улице Энгельса, кадастровый номер 66:08:0801009:679, площадью 4700 кв. м. для использования под застройку многоквартирного дома.

На основании данного договора аренды между АО «ГАЗЭКС» (истцом) и ООО «Ресурс» (ответчиком) был заключен договор № 18-1-18/2022 (далее – Договор №18-1-18/2022) о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 15.03.2022 г.

В соответствии с п. 3 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта капительного строительства (многоквартирного дома) к сети газораспределения и пуску газа составляет 2 года со дня заключения договора. Последний день срока считается днем подключения (технологического присоединения).

Согласно пункту 4 Договор №18-1-18/2022 истец принял на себя обязательства, в том числе по разработке проектной документации, проведению работ по строительству котельной, сети газораспределения до границы земельного участка ответчика, обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению многоквартирного дома к пуску газа.

Поскольку для подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения необходимо выполнение работ как со стороны профессионального участника рынка газоснабжения, так и владельца земельного участка, то стороны в пункте 6 Договора №18-1-18/2022 согласовали обязанность ответчика выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства ответчика; обеспечить готовность объекта капитального строительства (многоквартирного дома по адресу: 

<

...> уч. № 23а) и газоиспользующего оборудования к подключению в пределах границ принадлежащего ответчику земельного участка; обеспечить ответчиком разработку проектной документации сети газопотребления от точки (точек) подключения до газоиспользующего оборудования в соответствии с техническими условиями; обеспечить ответчиком создание сети газопотребления на принадлежащем ответчику земельном участке от точки (точек) подключения до газоиспользуюшего оборудования; внести плату за подключение в размере и сроки, которые установлены договором.

В соответствии с пунктом 11 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) (далее - плата) определяется в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 22.12.2021 № 243-ПК «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (за исключением платы за поставку газоиспользующего оборудования и (или) поставку прибора учета газа) на основании расчета размера платы согласно Приложению No 2 являющегося неотъемлемой частью договора и составляет 4 081 937 руб. 59 копеек, включая НДС 20% - 680 322 руб. 93 коп.

Порядок исполнения ответчиком обязательств по оплате за технологическое присоединение урегулирован сторонами в пункте 12 договора и сводится к следующему:

25 процентов платы, что составляет 1020484 (один миллион двадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20 процентов - 170080 (сто семьдесят тысяч восемьдесят) рублей 73 копейки, вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;

25 процентов платы, что составляет 1020484 (один миллион двадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20 процентов -170080 (сто семьдесят тысяч восемьдесят) рублей 73 копейки, вносится в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения;

30 процентов платы, что составляет 1428678 (один миллион четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 16 копеек, в том числе НДС 20 процентов - 238113 (двести тридцать восемь тысяч сто тринадцать) рублей 03 копейки, вносится в течение 1 года со дня заключения настоящего, но не позже дня фактического присоединения;

- 15 процентов платы, что составляет 612290 (шестьсот двенадцать тысяч двести девяносто) рублей 63 копейки, в том числе НДС 20 процентов - 102048 (сто две тысячи сорок восемь) рублей 44 копейки, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Для исполнения своих обязательств по строительству многоквартирного дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

...> уч. № 23а (кадастровый № 66:08:0801009:679) ответчик получил в Администрации Верхнесалдинского городского округа разрешение на строительство от 03.10.2023 года№ 66-08-04-2023 со сроком действия разрешения до 03.05.2024 года.

Кроме того, ответчиком (Застройщик по Контракту) был заключен Государственный контракт № 58/2024-ГК/И от 27.02.2024 года с Государственным казенным учреждением Свердловской области «Фонд жилищного строительства» (Инвестором) на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории г. Верхняя Салда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений.

В соответствии с п. 2.2 данного контракта Инвестор поручал ответчику строительство объекта- 5 жилых домов, а Ответчик принял на себя обязательство выполнить работы и совершить все необходимые действия по созданию данных объектов. Срок действия контракта - до 23 декабря 2025 года (пункт 14.1. Контракта).

Истец в рамках исполнения своих обязательств по Договору №18-1-18/2022 заключил 11.07.2022 года договор с АО «Газекс» № 32211464716 на выполнение проектно-изыскательских работ. Работы были выполнены, что подтверждается актом выполненных работ № 407 от 30.09.2022, № 449 от 31.07.2023 года.

После проведения проектно-изыскательских работ истцом был заключен договор с ООО «Смарт-Групп» по организации и строительству объекта газопровода высокого давления до границы земельного участка № 32312622785 от14.09.2023. Строительство данных объектов было завершено и объекты сданы истца по акту о приемке выполненных работ от 05.05.2025 года.

Для строительства объекта истцу пришлось провести работы по вырубке зеленых насаждения, соответствующие договоры с Администрацией Верхнесалдинского муниципального образования Свердловской области были заключены 20.11.2023 № 77, 19.02.2024 б/н.

Ответчик свои обязательства по Договору №18-1-18/2022 как в части строительства многоквартирного дома и обеспечения его готовности к подключению к сети газораспределения, так и в части внесения денежных средств, не исполнил.

Так, истец направил в адрес ответчика письмо, исходящий № 1641 от 03.08.2022 года, с уведомлением о необходимости внесения платежа по Договору №18-1-18/2022 в размере 2 040 968 руб.80 коп. за оплату I и II этапов технологического присоединения.

Оплата ответчиком произведена не была.

Ответчик в письме истцу, исх. б\н от 27 мая 2024 года указывает, что по Договору №18-1-18/2022 у ответчика перед истцом имеется задолженность в размере 3 469 646 руб. 96 коп. в виду сложной финансовой ситуации. Просит предоставить рассрочку оплаты и заключить дополнительное соглашение о продлении сроков по договору, а также произвести перерасчет по договору в виду изменения границ земельного участка.

В ответе на данное письмо (исх. № 2179 от 19.06.2024) истец указывает, что уже понес затраты на исполнение договора, просит в кратчайшие сроки внести первый платеж в размере 1 020 484 руб. 40 коп., а также в срок до 31.08.2024 года внести платежи в размере 1 020 484 руб. 40 коп. и 1 428 768 руб. 16 коп. Дополнительное соглашение о продлении сроков истцом ответчику будет направлено позднее.

24.06.2024 года истец направил ответчику дополнительное соглашение, которое распространяет свое действие с 29.03.2024 года и устанавливает срок технологического подключения – 4 года, что не противоречит Правилам № 1547.

Ответчик получил дополнительное соглашение 28.06.2024, но не подписал его.

В последующем свои обязательство по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению к сети газораспределения и внесению оплаты за технологическое подключение ответчик не исполнил.

20.08.2024 года между ответчиком и Инвестором был расторгнут Государственный контракт № 58/2024-ГК/И от 27.02.2024 года.

С 01.05.2025 года между ответчиком и Администрацией Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области был расторгнут договор аренды земельного участка № 2257 от 20.05.2021 года, земельный участок был передан Администрации по акту от 01.05.2025 года.

После расторжения с Инвестором государственного контракта ответчик не уведомил об этом истца, не направлял никаких писем, с целью минимизации затрат истца на строительство объекта газораспределения, работы по строительству велись привлеченным истцом ООО «Смарт» в период с декабря 2024 по апрель 2025 года. Акт о приемке выполненных работ между истцом и ООО «Смарт» был подписан 05.05.2025 года.

В целях постановки на кадастровый учет объекта – газопровода высокого давления до границы земельного участка по адресу: 

<

...> уч. № 23а (кадастровый № 66:08:0801009:679), инвентарный № Г3013383, протяженностью 1181 м., кадастровый номер 66:08:0000000:4559, истец оплатил государственную пошлину в размере 66 000 рублей, платежное поручение № 12781 от 18.06.2025 года, осуществил государственную регистрацию права собственности, что подтверждается имеющейся в материалах дела выпиской из ЕГРН.

Ответчик направил истцу уведомление о расторжении Договора №18-1-18/2022 с 01.04.2025 года. Основание расторжения – расторжение государственных контрактов с Инвестором.

Таким образом, с учетом данных обстоятельств, суд отклоняет доводы ответчика, что именно в связи с нарушением истцом обязательств по Договору №18-1-18/2022 ответчик был вынужден отказаться от данного договора, поскольку данные доводы не нашли своего подтверждения. Напротив, именно ответчик не исполнил свои обязательства по Договору №18-1-18/2022, строительство объекта капитального строительства так и не было начато, соответственно объект, который должен был подключить истец к сети газораспределения не был создан, в связи с чем истец понес убытки, за взысканием которых он обратился в суд.

Истец принятые на себя обязательства по строительству котельной и сети газораспределения для многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> уч. № 23а (кадастровый № 66:08:0801009:679), иные действия, необходимые для технологического присоединения объекта капитального строительства и пуска газа выполнил, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 10.06.2025.

В соответствии с условиями договора истец выполнил:

- проектно-изыскательские работы;

- организацию и строительство газопровода высокого давления до границы земельного участка;

- вырубку земельных насаждений;

- регистрацию объекта недвижимости.

Общая стоимость фактически понесенных затрат на проведение данных мероприятий составила 8 099 317 руб. 11 коп. без учета НДС.

В подтверждение несения расходов истцом представлены заключенные с подрядными организациями договоры на выполнение работ, акты приемки-передачи выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения об оплате работ и уплате государственной пошлины за регистрацию объекта недвижимости.

Фактический объем и стоимость проведенных работ ответчиком не оспорены (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик возражает против размера убытков, указывая, что по Договору №18-1-18/2022 цена на подключение согласована в размере 4 081 937 руб. 59 коп., с учетом НДС, в то время как истец предъявляет ответчику убытки в размере 8 099 317 руб. 11 коп. без учета НДС.

Данные возражения ответчика суд не принимает во внимание, так как указанная в договоре цена определена истцом не по рыночным ценам, и не с учетом фактически понесенных затрат, а по тарифам РЭК для технологического подключения объекта капитального строительства к сети газоснабжения. Поскольку по вине ответчика объект капитального строительства построен не был, и истец лишен возможности компенсировать свои затраты за счет получения платы за газоснабжение с собственников жилых помещений непостроенного многоквартирного дома, то истец размер убытков обосновывает размером фактически понесенных затрат на создание сети газораспределения.

Кроме того, возражая на доводы ответчика о возможности использования построенного газопровода для подключения иных объектов к сети, истец в судебном заседании пояснил, что данный газопровод построен был только для подключения объектов ответчика, использование его для подключения иных объектов не возможно, в виду их отсутствия как в настоящее время, так и в будущем. Фактически газопровод подведен в «пустое поле». Наличие иных объектов, которые могли быть подключены к построенному истцом газопроводу, ответчиком не доказано.

Согласно п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Согласно п. 5 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Таким образом, в случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понес до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался.

Иное толкование положений могло бы привести к тому, что при отсутствии интереса заказчика в строительстве объекта, присоединение которого планировалось произвести к сети истца, исполнитель не смог бы возместить убытки, понесенные при исполнении договора по технологическому присоединению.

Принимая во внимание положения ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации возражения ответчика подлежат отклонению.

Доказательств оплаты долга в сумме 8 099 317 руб. 11 коп. либо наличия обстоятельств, служащих основанием для уменьшения размера долга, ответчиком не представлены, доводы истца ответчиком документально не опровергнуты (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исследовав и оценив в соответствии со ст. 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании задолженности в размере 8 099 317 руб. 11 коп. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 267 980 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «ГАЗЭКС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежные средства в сумме 8 099 317 руб. 11 коп. на возмещение фактически понесенных затрат в связи с исполнением договора № 18-Г-18/2022 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 05.03.2022, а также 267 980 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

Судья С.К. Загайнова