АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-2654/2022

04 июля 2022 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 июня 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 04 июля 2022 года.

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Луговика С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 140 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 10.01.2022 № 1 сроком до 31.12.3022;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 06.04.2022 сроком на 3 года.

УСТАНОВИЛ:

Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области обратилась в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением, уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» о взыскании 140 000 руб. штрафа.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.

Представитель ответчика исковые требования не признал, указал на возможность списания суммы штрафа, поскольку его размер не превышает 5 процентов цены муниципального контракта.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, считает исковые требования не подлежащими удовлетворению.

Как следует из искового заявления, 16.06.2020 Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью «Каскад» (подрядчик) заключили муниципальный контракт № 2020.000012 (идентификационный код закупки: 203551400713055140100100340014211244 (далее - контракт).

В соответствии с пунктом 1.1 контракта подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по ремонту автомобильных дорог в 

<

...> (от ул. Большевистская до ул. Пригородная), ул. Первомайская (от ул. Жукова до ул. Московская)) (далее соответственно - объект, работы) и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим контрактом.

В пункте 1.3 контракта стороны согласовали место выполнения работ: Российская Федерация, Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, автомобильные дороги: ул. Степная (от ул. Большевистская до ул. Пригородная); ул. Первомайская (от ул. Жукова до ул. Московская). Срок выполнения работ: начало срока выполнения работ - с даты заключения настоящего контракта; окончание срока выполнения работ - 31.08.2020. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к настоящему контракту) (пункт 1.4 контракта).

Цена настоящего контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом), и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 15 200 000 руб., НДС не облагается в связи с применением подрядчиком упрощённой системы налогообложения (пункт 2.1 контракта).

В силу пункта 8.4.1 контракта подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода.

Согласно пунктам 8.2.6, 8.2.8 заказчик обязан осуществлять приёмку выполненных по контракту работ (этапа выполненных по контракту работ) в соответствии с условиями настоящего контракта, в порядке, предусмотренном Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), в том числе в форме текущего контроля состояния автомобильной дороги и сооружений на ней. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом и требованиями законодательства Российской Федерации.

На основании пункта 1.9 Плана работы Контрольно-счётной палаты Омской области на 2021 год и распоряжения от 13.09.2021 № 119 в отношении Администрации Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области была проведена проверка законности и результативности использования субсидий, предоставленных из областного бюджета в 2020 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области» (далее - госпрограмма), по результатам которой составлен акт от 18.10.2021.

Согласно акту от 18.10.2021 по результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

Локальным сметным расчётом, являющимся приложением № 1 к контракту, предусмотрены работы по исправлению профиля основания дороги и съездов на улице Первомайская. При выполнении данных работ согласно ТЕР27-03-001-02 применяется щебень из природного камня марки 800 фракции 10-20 мм. Учитывая норму расхода щебня 11,5 куб.м. на 1 000 кв.м., для исправления профиля основания дороги площадью 2 679 кв.м. и съездов общей площадью 650 кв.м. требуется 38,3 куб.м. щебня.

Кроме того, щебень данной фракции предусмотрен ТЕР27-04-006-01 при устройстве основания из щебня на съездах улицы Первомайская общей площадью 650 кв.м.

С учётом нормы расхода 15 куб. м на 1 000 кв.м., объём щебня фракции 10-20 мм для устройства основания на съездах составляет 9,7 куб.м. Указанные виды работ приняты заказчиком актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) от 04.08.2020 № 1 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 04.08.2020 № 1 и оплачены в полном объёме в сумме 439,1 тыс. руб.

При устройстве основания дороги из щебня на улице Степная, локальным сметным расчётом согласно ТЕР27-04-006-02 предусмотрено применение щебня марки 800 фракции 10-20 мм. Учитывая норму расхода щебня 15 куб. м на 1 000 кв.м., для устройства 1 997,4 кв.м. оснований на улице Степная локальным сметным расчётом предусмотрено применение щебня фракции 10-20 мм в объёме 30 куб.м.

Работы по устройству основания из щебня по улице Степная площадью 1 997,4 кв.м. приняты заказчиком актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) от 04.08.2020 № 2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 04.08.2020 № 1 и оплачены в полном объёме, в сумме 1 903, 8 тыс. руб.

При этом согласно данным журнала входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования (далее - журнал входного учёта) на объекты ремонта щебень марки 800 фракции 10-20 мм не поступал.

Таким образом, заказчиком неправомерно принят и оплачен щебень марки 800 фракции 10-20 мм в количестве 78,0 куб.м.: на общую сумму 205,8 тыс. руб. (в том числе на улице Первомайская в «количестве 48,0 куб.м. на сумму 125 000 руб. и на улице Степная в количестве 30,0 куб.м. на сумму 80 000 руб.).

Помимо этого, при приёмке работ по нанесению нормальной антикоррозийной битумно-резиной или битумно-полимерной изоляции на стальные трубы. Согласно ТЕР22-02-001-16 при проведении указанных работ на 12 м. трубопровода требуется 47,0 кв.м. холста стекловолокнистого (при норме 392 кв.м. на 100 м. трубопровода) и 0,2 т. битумной мастики (1,38 т. на 100 м. трубопровода).

Актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) от 04.08.2020 № 2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 04.08.2020 № 1 приняты работы по укладке стальных водопропускных труб диаметром 1 000 мм. с нанесением антикоррозийной изоляции на улице Степная и оплачены в полном объёме, на сумму 441,6 тыс. руб. При этом согласно данным журнала входного учёта холст стекловолокнистый и битумная мастика на объект ремонта не поступали. В связи с чем, заказчиком неправомерно приняты и оплачены мастика битумная в количестве 0,2 т на сумму 11,2 тыс. руб., холст стекловолокнистый в количестве 47,0 кв.м на сумму 1,7 тыс. руб.

Также не подтверждено использование в ходе проведения ремонта битума и песка природного.

Так, согласно журналу входного учёта на объекты ремонта (улица Первомайская и улица Степная) в период с 18.07.2020 по 26.07.2020 поступил битум нефтяной дорожный вязкий в количестве 5,33 т.

Согласно актам о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) от 04.08.2020 № 1 и № 2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 04.08.2020 № 1 заказчиком приняты работы по розливу вяжущих материалов, устройству выравнивающего из асфальтобетонной смеси и устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей для выполнения которых предусмотрено применение битума в количестве 5,91 т. В связи с чем, количество фактически принятого и оплаченного битума нефтяного дорожного превышает количество фактически поступившего на объекты ремонта битума на 0,58 т, или на 9,8 тыс. руб.

По данным журнала входного учёта на объекты ремонта 9.07.2020 поступил песок природный для строительных работ средний в общем объёме 3,6 куб.м.

При этом согласно актам о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) от 04.08.2020 № 1 и № 2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 04.08.2020 № 1 заказчиком приняты работы по устройству песчаного основания под трубы. Общее количество принятого песка природного составило 3,9 куб.м. Фактически принятый и оплаченный песок средний в количестве 053 куб.м. на общую сумму 0,4 тыс. руб. на объекты ремонты не поступал.

Исходя из положений части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путём взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе:

- приёмку поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом;

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

В нарушении вышеуказанной нормы, а также положений пунктов 8.4.1, 8.2.6, 8.2.8 контракта заказчиком неправомерно приняты и оплачены фактически неиспользованные при выполнении работ по ремонту улицы Первомайская и улицы Степная материалы (щебень марки 800 фракции 10-20 мм, мастика битумная, холст стекловолокнистый, песок, битум) на общую сумму 228 900 руб.

Помимо этого, пунктом 8.4.15 контракта предусмотрено, что при выполнении работ по ремонту улицы Первомайская и улицы Степная в городе Исилькуле подрядчик обязан использовать автомобильный транспорт, не превышающий допустимые массы транспортных средств и допустимые осевые нагрузки транспортных средств, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

В ходе выполнения работ подрядчиком нарушен пункт 8.4.15 контракта в части перевозки асфальтобетонной смеси автомобильным транспортом, превышающим допустимые массы транспортных средств.

Согласно паспортам-накладным на асфальтобетонную смесь перевозка смеси осуществлялась 18.07.2020, 19.07.2020, 21.07.2020 и 26.07.2020, всего 28 накладных.

Минимальное количество перевезенной за 1 рейс в кузове грузового автомобиля смеси составляет - 26,6 т., максимальное - 36,5 т. Для перевозки груза указанной массы возможно применение автомобилей, имеющих три оси и более. Снаряженный вес трехосного автомобиля-самосвала составляет - от 12 т., четырехосного - от 15 т., пятиосного - от 20 т. Соответственно, при использовании любого типа транспортных средств общая масса автомобиля с грузом превышает допустимую массу и относится к тяжеловесным транспортным средствам.

За специальным разращением на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильной - дороге, подрядчик в Администрацию не обращался.

Согласно части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

На основании пункта 10.5 контракта за каждый факт ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, подрядчик выплачивает штраф в размере 5 000 руб. (28*5 000 руб. = 140 000 руб.).

13.12.2021 в адрес ответчика была направлена претензия исх. № 01-33/845 с вышеуказанными нарушениями, которая получена 23.12.2021, что подтверждается отчётом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 64602459147183.

Согласно уведомления № 88 об уточнении вида и принадлежности платежа от 29.12.2021 ответчиком были оплачены фактически неиспользованные при выполнении работ по ремонту улицы Первомайская и улицы Степная материалы (щебень марки 800 фракции 10-20 мм, мастика битумная, холст стекловолокнистый, песок, битум) на общую сумму 228 900 руб.

В части оплаты нарушений, выразившихся в перевозке асфальтобетонной смеси автомобильным транспортом, превышающим допустимые массы транспортных средств, требования остались без удовлетворения.

19.01.2022 в Администрацию Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от ответчика поступил ответ от 14.01.2022 № 04 на вышеуказанную претензию, с указанием на несогласие и проведение встречи представителей организаций для разрешения данного вопроса, с привлечением ООО «СудСтройЭкспертиза» - организацией, осуществлявшей строительный контроль на объекте: ремонт автомобильных дорого в 

<

...> (от улицы Большевистская до улицы Пригородная), улица Первомайская от улицы Жукова до улицы Московская, в целях избежание финансовых потерь в случае судебного разбирательства.

19.01.2022 истцом в адрес общества с ограниченной ответственностью «Каскад» было направлено письмо исх. № 01-33/33 о назначении рабочей встречи на 28.01.2022 в 11 час. 00 мин. в каб. № 1 Администрации Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области. В указанное время представители ответчика и ООО «СудСтройЭкспертиза» не явились.

Ссылаясь на ненадлежащее выполнения обязательств обществом с ограниченной ответственностью «Каскад» по контракту, истец обратился с иском в арбитражный суд.

Статьёй 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В силу статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (часть 2 статьи 763 ГК РФ).

Исходя из статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

По условиям пункта 1.4 контракта срок выполнения работ: начало срока выполнения работ - с даты заключения настоящего контракта; окончание срока выполнения работ - 31.08.2020. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к настоящему контракту).

Отношения, связанные с государственным контрактом, помимо Гражданского кодекса Российской Федерации, регулируются также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

На основании части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 10.5 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 5 Правил: а) 1 000 руб., если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. руб.; б) 5 000 руб., если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно).

Возражая относительно заявленных требований, ответчик ссылается на то, что начисленная истцом неустойка подлежит списанию.

Частью 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 утверждены Правила осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом (далее - Правила № 783).

Подпунктом «а» пункта 2 Правил № 783 установлено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объёме, за исключением контрактов, по которым в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объёме работ, услуг, предусмотренных контрактами.

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил № 783 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке: если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта.

Как установлено судом, в настоящем случае размер штрафа в сумме 140 000 руб. не превышает 5% цены муниципального контракта, при этом материалами дела подтверждается, что обязательства по контракту исполнены подрядчиком.

Заказчик в течение 20 дней со дня принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанных в пункте 9 Правил № 783, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме уведомление о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам с указанием её размера по форме согласно приложению (пункт 13 Правил № 783).

Указанный порядок списания начисленных сумм неустоек направлен на установление действительного размера задолженности и урегулирование споров между сторонами.

По смыслу положений пункта 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, при соблюдении указанных в них условий являются обязанностью государственного (муниципального) заказчика, а не правом, несовершение заказчиком действий по учёту возникшей задолженности, а равно наличие спора относительно начисленной неустойки не может трактоваться как условие, препятствующее списанию неустойки, поскольку подобные антикризисные меры были установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных (муниципальных) контрактов.

Основанием для принятия решения о списании неустойки является исполнение подрядчиком обязательства (за исключением гарантийных обязательств) по контракту, подтверждённое справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 04.08.2020 № 1.

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённого Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определённых условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований приведенного законодательства.

В соответствии с правовой позицией Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712 по делу № А40-179525/2017, указанный порядок списания начисленных сумм неустоек направлен на установление действительного размера задолженности и урегулирование споров между сторонами.

По смыслу вышеприведённых положений, государственный (муниципальный) заказчик обязан произвести списание сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020, 2021 годах государственного (муниципального) контракта по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объёме, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта. При этом наличие спора относительно начисленной неустойки не может трактоваться как условие, препятствующее списанию или предоставлению отсрочки уплаты неустоек, поскольку подобные антикризисные меры были установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным контрактам.

Как следует из материалов дела, сумма начисленной неустойки не превышает 5 процентов цены контракта. Работы по контракту в полном объёме 04.08.2020.

Таким образом, к спорным правоотношениям подлежит применению положение подпункта «а» пункта 3 Правил.

С учётом изложенного, суд приходит к выводу, что у заказчика имелись все основания для списания спорной суммы неустойки.

На основании изложенного, требования истца о взыскании с ответчика неустойки и удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьёй 110 АПК РФ судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Администрации Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путём подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьёй 177 (статьёй 186) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение (определение), выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия (вынесения).

По ходатайству указанных лиц копии решения (определения) на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья

С.В. Луговик