Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-47530/2020

29 декабря 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  10 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  29 декабря 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение “Парк 300-летия Санкт-Петербурга” (адрес: 195197, 

<

...>, лит. Б, ОГРН: 

<

***>), 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью “ГласСтрой” (адрес: 197374, 

<

...>, лит. А, пом. 6Н, ОГРН: 

<

***>) 

об обязании,

при участии

- от истца: Булыга О. И. (доверенность от 05.10.2020), 

- от ответчика: ФИО2 (доверенность от 12.10.2020), 

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение “Парк 300-летия Санкт-Петербурга” обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью “ГласСтрой” об обязании освободить от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного имущества строительную площадку, расположенную на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0416602:3344, принадлежащем СПб ГКУ “ПАрк 300-летия Санкт-Петербурга” на праве постоянного бессрочного пользования и передать её по акту приема-передачи в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ). 

Ответчик возражает против удовлетворения иска по доводам, изложенным в отзыве. 

Судом установлено, что между СПб ГКУ «Парк 300-летия Санкт - Петербурга» и ООО «ГласСтрой» был заключен государственный контракт № 0172200002519000071-ЭА от 28.05.2019 на выполнение работ по строительству спортивно-досугового центра тестирования по выполнению нормативов ВФСК ГТО на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга в 2019 году (далее - Контракт). 

Согласно пункту 2.5 Контракта, срок выполнения работ: с даты заключения Контракта, но не ранее 15.05.2019, по 31.10.2019. 

По состоянию на 01.11.2019 ответчиком не были закончены следующие работы по Контракту в соответствии с Техническим: Отсыпка площадки; Берегоукрепление; Укрепление откосов; Формирование площадок согласно генеральному плану; устройство Основания площадок; а также по состоянию на 01.11.2019 года ответчик не приступил к таким видам работы как: Устройство верхних покрытий площадок: Изготовление и монтаж оборудования на площадках; Монтаж трибун; Поставка и монтаж сэндвич - панелей для павильонов; Поставка и монтаж витражных конструкций остекления; Отделенные работы; Устройство внутренних инженерных сетей; Наружное электроснабжение; Наружное освещение; Благоустройство территории: тротуары, ограждения, озеленение. 

В соответствии с пунктами 10.4 и 10.4.1 Контракта истец принял решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Письмом №362/19 от 11.11.2019 истец уведомил ответчика о принятом решении об одностороннем отказе от Контракта. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.08.2020 по делу № А56-16079/2020, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2020, решение истца об отказе от исполнения Контракта признано законным. 

 Письмами №419/19 от 19.12.2019 и №423/19 от 23.12.2019 истец просил ответчика прекратить работы и освободить земельный участок с кадастровым номером 78:34:0416602:3344, принадлежащий истцу на праве постоянного бессрочного пользования, на котором в соответствии с Контрактом производилось строительство. Ордер Государственной административно-технической инспекцией Санкт-Петербурга на производство работ на вышеуказанном земельном участке истек 31.05.2020. Оставление указанного требования без удовлетворения послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 6.4.14 Контракта Подрядчик должен в согласованные сроки с Заказчиком освободить территорию земельного участка: вывезти временные сооружения, технику, механизмы, материалы, оборудование, иное имущество, а также строительный мусор.

При таких обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению с отнесением расходов по уплате государственной пошлины в порядке статьи 110 АПК РФ на ответчика. 

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью “ГласСтрой” освободить от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного имущества строительную площадку, расположенную на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0416602:3344, принадлежащем СПб ГКУ “ПАрк 300-летия Санкт-Петербурга” на праве постоянного бессрочного пользования и передать её по акту приема-передачи в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью “ГласСтрой” в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения “Парк 300-летия Санкт-Петербурга” 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.