АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-3036/2017

г. Киров

30 мая 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2017 года

В полном объеме решение изготовлено 30 мая 2017 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Славинского А.П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

администрации Вятскополянского района Кировской области (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 612964, Россия, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Лидерпрофстрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 612990, Россия, 

<

...>)

о взыскании 72 363 рублей 20 копеек

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, по доверенности от 26.01.2017, ФИО3, по доверенности от 07.11.2016

от ответчика – ФИО4, по доверенности от 15.04.2017, ФИО5, по доверенности от 15.04.2017

установил:

администрация Вятскополянского района Кировской области (далее – истец, Администрация) обратилась в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Лидерпрофстрой» (далее – ответчик, Общество) о взыскании штрафа в сумме 72 363 рублей 20 копеек за неисполнение муниципального контракта на приобретение жилого помещения (квартиры) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 30.09.2016 №0340200003316003572-0217391-01 (далее - контракт).

Исковые требования основаны на положениях статей 309, 310, 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что ответчик, неисполнивший обязательства по контракту, которым предусмотрена ответственность в виде неустойки (пени и штрафа), обязан уплатить Администрации штраф.

 Определением суда от 29.03.2017 дело было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Определением суда от 24.04.2017 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Представители истца в судебном заседании исковые требования поддержали.

Представители ответчика возражали против удовлетворения исковых требований, указывая в судебном заседании и в отзыве на иск, что муниципальный контракт от 30.09.2016 №0340200003316003572-0217391-01 был расторгнут в одностороннем порядке, что повлекло прекращение обязательств сторон, в том числе, обязательства ответчика по передаче квартиры, предусмотренной контрактом, а также обязательств по выплате неустоек, установленных контрактом.  

Также ответчик указал, что имеет место просрочка исполнения обязательств по контракту, за которую предусмотрен иной вид ответственности. 

Истец представил письменные возражения на отзыв ответчика, в которых со ссылкой на пункт 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора" (далее - Постановление N 35), указал, что неустойка начисляется до даты расторжения договора. А поскольку ответчик не исполнил взятые на себя обязательства, установленные контрактом, то в соответствии с пунктом 8.3 контракта, он обязан оплатить штраф.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, судом установлено следующее.

Между Администрацией (покупатель) и Обществом (продавец) подписан муниципальный контракт на приобретение жилого помещения (квартиры) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 30.09.2016 №0340200003316003572-0217391-01, согласно пунктам 1.1, 1.2 которого продавец обязуется передать жилое помещение (квартиру) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, покупателю, а покупатель обязуется обеспечить оплату жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>. Цена контракта 723 632 рубля 00 копеек (пункт 3.1). В соответствии с пунктом 4.1 контракта жилое помещение передается покупателю в срок по 10.10.2016.

В пункте 5.1 контракта указано, что требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) жилого помещения, общая площадь и стоимость определяются техническим заданием, являющимся приложением к контракту. 

В техническом задании, являющемся приложением к контракту, отмечено, что материал стен дома: газобетонные блоки заводского производства.  

Согласно пункту 8.3 контракта, за ненадлежащее исполнение продавцом обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 72 363 рублей 20 копеек (10 процентов цены контракта).

В силу пункта 9.4 контракта покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в том числе, в случаях: отказа поставщика передать покупателю жилое помещение или принадлежности к нему; существенное нарушение продавцом требований к качеству товара, а именно обнаружение покупателем неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков; невыполнение продавцом в разумный срок требований заказчика о доукомплектовании товара.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию №43-101-16-2016, выданном Администрацией ООО «Лидерпрофстрой», указано, что стены жилого дома по адресу: 

<

...> по проекту должны быть выполнены из арболитовых блоков, а фактически изготовлены из прочих материалов.

По итогам приема жилых помещений, в том числе, спорной квартиры, комиссией по приему была составлена претензия к жилым помещениям от 03.10.2016, в которой было указано на необходимость представить информацию из какого материала выполнены стены дома по адресу: 

<

...>.

В ответе на претензию Общество пояснило, что стены названного дома выполнены из арболитовых блоков, данный материал отсутствует в списке материалов стен, указанных в технической части аукционного задания. 

Письмом от 22.11.2016 № 2654-01-01-12 Администрация уведомила Общество  об одностороннем отказе от исполнения контракта по причине несоответствия предложенной квартиры документации о закупке, указав, что согласно пункту 9.9 муниципального контракта последний будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления продавца.

Уведомление было получено ответчиком. При этом устранение нарушений условий контракта не последовало.

Поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по контракту, истец направил ответчику претензию от 27.01.2017, с уточнением от 15.02.2017, о нарушении срока передачи жилого помещения по контракту с требованием об уплате суммы штрафа за ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с пунктом 8.3 контракта.

Однако ответчик требования претензии не исполнил.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Оценив представленные в дело доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

В силу статей 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из материалов дела следует, что между сторонами был подписан муниципальный контракт на приобретение квартиры.

В соответствии со статьей 526 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

В нарушение условий контракта ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по контракту, представил к передаче Администрации квартиру, расположенную в доме, стены которого выполнены из материала, отличного от согласованного в контракте.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

На основании пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с нормами части 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Контракт заключен на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ-44).

В пункте 5 статьи 34 ФЗ-44 предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Как было отмечено выше, пунктом 8.3 контракта предусмотрено, что за ненадлежащее исполнение продавцом обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 72 363 рублей 20 копеек (10 процентов цены контракта).

Материалами дела подтверждено, что ответчиком обязательства, предусмотренные контрактом, не исполнены. Ответчиком доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Довод ответчика о том, что в данном случае имеет место просрочка исполнения обязательства, за которую предусмотрено взыскание пени, судом отклоняется, поскольку в рассматриваемом случае жилое помещение, отвечающее техническим характеристикам, согласованным в контракте, не передано покупателю,  то есть допущено нарушение условий контракта, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа.

Тот факт, что контракт был расторгнут в одностороннем порядке, не влияет на обязанность ответчика оплатить штраф истцу, поскольку согласно пункту 3 Постановления N 35, где разъяснено, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.

Как следует из имеющихся в деле документов расторжение контракта связано с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по контракту. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о правомерном начислении истцом ответчику штрафа на основании пункта 8.3 контракта.

Судом проверен расчет суммы штрафа; установлено, что размер штрафа определяется в виде фиксированной суммы - в размере 10% цены контракта и составляет 72 363 рубля 20 копеек. Штраф начислен ответчику верно.

Размер штрафа установлен в фиксированной сумме в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063.

Доказательств явной несоразмерности суммы штрафа последствиям неисполнения обязательства, а также доказательств наличия предусмотренных законом оснований для снижения судом штрафа, ответчиком не представлено.

На основании изложенного, требования истца о взыскании с ответчика штрафа являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Поскольку исковые требования подлежат удовлетворению, истец освобожден от уплаты государственной пошлины (пункт 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации), государственная пошлина в размере 2 895 рублей 00 копеек подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета на основании статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лидерпрофстрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 612990, Россия, 

<

...>) в пользу администрации Вятскополянского района Кировской области (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 612964, Россия, 

<

...>) штраф в сумме 72 363 (семьдесят две тысячи триста шестьдесят три) рубля 20 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лидерпрофстрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 612990, Россия, 

<

...>) доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 895 (две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья                                                                                               А.П. Славинский