АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-20553/2022

г. Уфа

29 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 декабря 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 29 декабря 2022 г.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Ганеева Р. Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

ГКУ УКС РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третье лицо -  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании штрафа по государственному контракту в размере 1 540 927 руб. 59 коп., об обязании устранения выявленных недостатков

при участии в судебном заседании:  

от истца – ФИО2 представитель по доверенности № 10-08 от 10.01.2022 г., предъявлен диплом о высшем юридическом образовании

от третьего лица – ФИО3 представитель по доверенности № 18-9722 от 28.10.2022 г.

 

ГКУ УКС РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) при участии третьего лица  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании штрафа по государственному контракту в размере 1 540 927 руб. 59 коп., об обязании устранения выявленных недостатков.

От третьего лица поступил отзыв на исковое заявление,  исковые требования  считают обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил,  определения Арбитражного суда Республики Башкортостан получены по  юридическому адресу регистрации согласно выписке из ЕГРЮЛ.

В соответствии с абзацем 1 части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

В соответствии с абзацем 2 части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Кроме того, в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания по рассмотрению искового заявления  была   опубликована на официальном интернет-сайте суда.

        Лица участвующие в деле, несут риск  наступления неблагоприятных последствий в результате не принятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (абз. 2 часть 6 ст. 121 АПК РФ). 

          Определениями суда сторонам разъяснена возможность проведения судебного онлайн-заседания с использованием системы веб-конференции и возможности онлайн-ознакомления с материалами судебных дел через электронный сервис «Мой арбитр». 

Таких ходатайств от ответчика не поступило.

         Ответчик отзыв не представил.

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы сторон, доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, в обоснование исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Между государственным казенным учреждением Управление капитального строительства Республики Башкортостан (далее - Управление, Государственный заказчик) и ООО «A-Строй» (далее - Ген. подрядчик) заключен государственный контракт от 05.04.2018 № 04/2018-13 (далее - Контракт), в соответствии с условиями которого, Ген. подрядчик обязался выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы (далее - Работы) по объекту «Строительство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау, г. Стерлитамака РБ» (далее - Объект) в соответствии с условиями Контракта, действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, проектной документацией и в установленные Контрактом сроки.

Цена Контракта в редакции дополнительного соглашения от 13.09.2019 № 5 составляет 192 083 618,71 руб.

Срок окончания Работ - август 2019 года.

Приемка выполненных работ в полном объёме подтверждается КС - 3 от 29.12.2019

№29.

Письмом от 29.03.2022 № 2494 Администрация ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан уведомила ООО «A-Строй» о составлении Акта осмотра.

31.03.2022 составлен Акт от 31.03.2022 № 1, согласно которому выявлены следующие недостатки:

1.на брусчатке перед центральным крыльцом собирается талая вода;

2.плитка на центральном крыльце отстает от поверхности;

3.плитка в раздевалке для девочек спортзала, медицинском кабинете, в З(трех) цехах столовой отходит от стен;

4.разрушение участков пола № 110, 111, 112, 308;

5.протекание крыши и затопление кабинета родного языка, библиотеки и химии;

6.отставание плитки на полу от поверхности: в коридорах, лестничных клетках, столовой;

7.снесение защитного ограждения с северной стороны крыши (после снесения 2020 году);

8.трещины на балконе над спортивным залом.

Письмом от 04.04.2022 № 05-106 Управление направило в адрес Ген. подрядчика копию указанного Акт от 31.03.2022 с требованием устранить замечании, указанные в Акте, в срок до 08.04.2022.

Администрация ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан письмо от 24.06.2022 № 16-5306 также требовала устранить строительные недостатки согласно Акту от 31.03.2022 № 1.

В установленный срок требование Управления не выполнено, строительные недостатки не устранены.

Согласно п. 5.1 Контракта Генеральный подрядчик обязался качественно выполнить все работы, включая монтаж, пусконаладочные работы оборудования, необходимого для эксплуатации Объекта, своими силами либо с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков) в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, сдать Государственному заказчику законченный строительством и готовый к вводу в эксплуатацию Объект в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую эксплуатацию Объекта.

Согласно п. 9.4. Контракта «Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Государственным заказчиком сроки».

В соответствии с п. 9.3 Контракта гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

30.12.2019 Администрацией ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.09.2019 № 02-03307000-41-2019.

В соответствии с п. 15.1 Контракта, Управление направило в адрес Ген. подрядчика претензию от 09.06.2022 № 10-490, в которой требовало устранить вышеуказанные недостатки выполненных работ в течении 10 дней со дня получения претензии.

15.06.2022 данная претензия была получена Ген. подрядчиком, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 45000071374416.

Соответственно, срок для устранения недостатков установлен - до 25.06.2022.

В установленный срок требование Управления не выполнено, строительные недостатки не устранены.

Согласно п. 14.7 Контракта, за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, генеральный подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,5 % от цены Контракта, что составляет 1 540 927,59 руб.

Таким образом, за нарушение за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту в виде неисполнения гарантийных обязательств, Ген. подрядчику надлежит оплатить штраф в размере 1 540 927,59 руб.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес ответчика  была направлена претензия № 10-490 от 09.06.2022 об оплате суммы задолженности данное письмо было оставлено ответчиком без удовлетворения. 

В связи с отсутствием добровольного возврата ответчиком указанной суммы истец обратился в арбитражный суд с соответствующим иском за защитой нарушенных прав. 

Ответчиком в материалы дела направлен отзыв, исковые требования не оспаривает, указывает, что в период гарантийной эксплуатации были выявлены недостатки, ответчик вызывался для составления акта выявленных недостатков, однако представителя не направил, недостатки не устранены.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает иск подлежащим удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

Спорные правоотношения являются правоотношениями подряда для государственных нужд, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ). 

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. 

Согласно пункту 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

В соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Государственный контракт и муниципальный контракт заключаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений настоящего Федерального закона. 

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Общие требования к качеству выполняемой работы установлены статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1). Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. 

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (пункт 2 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Исходя из данных норм, истец, ссылающийся на выявленные недостатки принятых работ, должен представить доказательства, свидетельствующие о фиксации данных недостатков и извещении подрядчика об обнаружении таких недостатков, а также отказ подрядчика от их устранения за свой счет или не устранение в установленный срок. 

Пунктом 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в том случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве, гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ). 

Таким образом, из буквального толкования положений пункта 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика в виде ответственности за недостатки (дефекты) выполненных работ. 

В силу пункта 1 статьи 721 и статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда; в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве; гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, что составляет результат работы. 

Наличие подписанного без замечаний акта приемки работ по договору строительного подряда не препятствует заказчику заявить в суде возражения по качеству, объему и стоимости работ (пункты 12 и 13 информационного письма от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда"). Кроме того, если недостатки результата работы существенны или неустранимы, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

Таким образом, указанные нормы регулируют обязательства сторон по качеству исполнения подрядных работ и гарантируют заказчику соответствие результата его обоснованным ожиданиям как одну из целей договора подряда. 

Следовательно, вопрос о наличии недостатков работ, их характере (устранимые, неустранимые) является существенным для правильного рассмотрения настоящего спора. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо участвующее в деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений. 

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора (требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а также быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Из смысла указанных норм следует, что оплате подлежат только работы, выполненные подрядчиком с надлежащим качеством. 

Судом установлено, материалами дела подтверждено, что по контракту ответчиком выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы (далее - Работы) по объекту «Строительство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау, г. Стерлитамака РБ».

31.03.2022 г. составлен Акт № 1 по МАОУ СОШ №9 (строительство новой школы в пос.Шахтау на 340 мест) по адресу: 

<

...>, согласно данного акта обнаружены дефекты: На брусчатке перед центральным крыльцом собирается талая вода, Плитка на центральном крыльце отстаёт от поверхности, Плитка в раздевалке для девочек спортзала, медицинском кабинете, в з-х цехах столовой отходит от стен; Разрушение участков пола в кабинетах №110,111, 112, 308; Протекание крьши и затопление кабинета родного языка, библиотеки и химии, Отставание плитки на полу от поверхности: в коридорах, лестничных клетках, столовой; Снесение защитного ограждения с северной стороны крыши (после снесения 2020 году), Потрескивания на балконе над спортивным залом.

Факт наличия дефектов ответчиком при рассмотрении спора не оспорен. 

Контрактом стороны определили, что подрядчик гарантирует качество выполненных работ. 

В соответствии с п. 9.3 Контракта гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию  30.12.2019 г. 

Исходя из норм статей 724 и 756 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока и если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком. 

Поскольку подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (согласно пункту 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации), на стороне ответчика возникло гарантийное обязательство по устранению недостатков и дефектов ввиду некачественного выполнения им подрядных работ. 

Условием для предъявления требования, связанного с недостатками результата работы в течение гарантийного срока, является факт возникновения недостатков по вине подрядчика. 

Исходя из предмета спора и обстоятельств дела, истец должен доказать факт отступления ответчиком от требований, предусмотренных технической документацией, выполнение работ ненадлежащего качества (с дефектами), а ответчик, в свою очередь, доказать выполнение работ в соответствии с технической документацией, надлежащего качества. 

В пункте 6.2 контракта предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, либо в результате неправильной эксплуатации. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Доказательств, подтверждающих возникновение недостатков вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатации, ответчиком в материалы дела не представлено (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Спора между истцом и ответчиком по качеству выполненных работ не имеется, возражений со стороны ответчика в отношении обнаруженных недостатков, а также доказательств об их устранении в материалы дела не представлены. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что представленные доказательства подтверждают наличие недостатков выполненных подрядных работ, подлежащих устранению.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из положений части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчику было предоставлено достаточно времени для представления доказательств, принятия мер по урегулированию спора. При этом, ответчик отзыв по существу исковых требований, доказательств, опровергающие требования истца не представил.

Согласно части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

           С учетом указанных обстоятельств исковые требования  об  обязани ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение пятнадцати дней со дня вступления решения в законную силу устранить выявленные недостатки выполненных работ по государственному контракту от 13.09.2016 г. № 04/2016-110 в рамках исполнения гарантийныхобязательств, а именно:

на брусчатке перед центральным крыльцом собирается талая вода;

плитка на центральном крыльце отстает от поверхности;

плитка в раздевалке для девочек спортзала, медицинском кабинете,в 3(трех) цехах столовой отходит от стен;

разрушение участков пола № 110, 111, 112, 308;

протекание крыши и затопление кабинета родного языка, библиотеки и химии;

отставание плитки на полу от поверхности: в коридорах, лестничных клетках, столовой;

снесение защитного ограждения с северной стороны крыши;

трещины на балконе над спортивным залом,  подлежат удовлетворению.

         Также истцом заявлено требование о взыскании штрафа за ненадлежащие исполнение условий контракта  в размере 1 540 927 руб. 59 коп.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. 

В соответствии с пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени. 

По пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Согласно пункту 14.7 контракта за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, генеральный подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,5 % от цены Контракта.

Согласно п. 9.4. Контракта «Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Государственным заказчиком сроки».

В соответствии с п. 9.3 Контракта гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

30.12.2019 Администрацией ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.09.2019 № 02-03307000-41-2019.

В соответствии с п. 15.1 Контракта, Управление направило в адрес Ген. подрядчика претензию от 09.06.2022 № 10-490, в которой требовало устранить вышеуказанные недостатки выполненных работ в течении 10 дней со дня получения претензии.

15.06.2022 данная претензия была получена Ген. подрядчиком, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 45000071374416.

Соответственно, срок для устранения недостатков установлен - до 25.06.2022.

В установленный срок требование Управления не выполнено, строительные недостатки не устранены.

Из представленных в материалы дела документов следует, что ответчиком не устранены выявленные недостатки. 

Доказательства передачи ответчиком истцу согласованного объема работ в спорный период в материалах дела отсутствуют (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Данные обстоятельства ответчиком не опровергнуты. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2). 

Ответчик знал об условиях рассматриваемого контракта, требованиях по срокам исполнения обязательств, последствиях их нарушения и, подписав контракт, принял на себя обязательства по его надлежащему исполнению. 

Ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств отсутствия своей вины не представил. 

Ходатайство о снижении размера неустойки (штрафа) ответчиком не заявлялось, контррасчет суммы неустойки (штрафа) ответчиком не представлен. 

Учитывая изложенное, а также то, что требования истца о взыскании штрафа в размере 1 540 927 руб. 59 коп подтверждаются материалами дела, документально не оспорены ответчиком, исковые требования в данной части признаются законными и обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

Также истец просил о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения решения суда.

Согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами (часть 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Из статьи 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что судебные акты приводятся в исполнение с момента их вступления в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. 

В силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе  принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пунктом 4 статьи 1 ГК РФ). 

В соответствии с разъяснениями, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). 

Согласно пункту 31 Постановления № 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. 

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, действующее законодательство предоставляет стороне, в пользу которой принят судебный акт по существу спора, в случае его неисполнения должником в установленный судом срок право требовать взыскания неустойки с целью побуждения последнего к исполнению решения, постановления суда. 

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. 

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). 

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. 

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.). 

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре. 

По смыслу вышеизложенных норм и разъяснений суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора- взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. 

Оценив требование о взыскании 200 000 руб. в качестве единовременной неустойки, а также  по 50 000 рублей за каждый месяц неисполнения судебного акта до даты его фактического исполнения, суд пришел к выводу о чрезмерности заявленного размера, не отвечающим принципу справедливости и соразмерности. 

В связи с чем суд полагает возможным присудить в пользу истца судебную неустойку за неисполнение решения суда в размере 20 000 руб. за каждый месяц просрочки исполнения указанного решения суда.

 При этом суд считает необходимым отметить, что судебный акт в части взыскания судебной неустойки подлежит принудительному исполнению только по истечении определенного судом срока исполнения обязательства в натуре, а не с момента вступления решения в законную силу. 

При подаче иска государственная пошлина не уплачена, поскольку истец освобожден от ее уплаты в силу закона. 

В соответствии с частью 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

 На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая удовлетворение исковых требований, государственная пошлина в размере 34409 руб.  подлежит взысканию с ответчика в федеральный бюджет.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

            Обязать ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение пятнадцати дней со дня вступления решения в законную силу устранить выявленные недостатки выполненных работ по государственному контракту от 13.09.2016 г. № 04/2016-110 в рамках исполнения гарантийныхобязательств, а именно:

на брусчатке перед центральным крыльцом собирается талая вода;

плитка на центральном крыльце отстает от поверхности;

плитка в раздевалке для девочек спортзала, медицинском кабинете,в 3(трех) цехах столовой отходит от стен;

разрушение участков пола № 110, 111, 112, 308;

протекание крыши и затопление кабинета родного языка, библиотеки и химии;

отставание плитки на полу от поверхности: в коридорах, лестничных клетках, столовой;

снесение защитного ограждения с северной стороны крыши;

трещины на балконе над спортивным залом.

Взыскать с ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ГКУ УКС РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 540 927 руб. 59 коп. сумму штрафа.

На случай не исполнения ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в течение пятнадцати дней со дня вступления решения в законную силу судебного акта присудить ГКУ УКС РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежные средства, подлежащие взысканию  с ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в размере 20000 рублей за каждый месяц неисполнения решения суда до фактического исполнения в полном объеме.

В удовлетворении остальных требований – отказать.

             Взыскать с ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)   34409 руб. сумму государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Исполнительный лист на взыскание госпошлины в доход бюджета выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном  объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aac.ru. 

 

Судья Р.Ф. Ганеев