АРБИТРАЖНЫЙ СУД  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

улица А.Невского, дом 29/11, г. Симферополь, Республика Крым, 295000

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-6031/2019

г. Симферополь

05 сентября 2019  года

Резолютивная часть решения оглашена  29.08.2019  

Полный текст решения изготовлен  05.09.2019          

             Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым  к Обществу с ограниченной ответственностью «СИС»  о взыскании,

При участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности №87 от 15.01.2019;

от ответчика – не явился;

            Обстоятельства дела: Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ответчику  с требованием  о взыскании 150,00 руб.      

            Исковые требования обосновываются ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по государственному контракту.

  Ответчик отзыва на иск не представил.

  Рассмотрев материалы дела, суд 

                                                      УСТАНОВИЛ:

Между государственным учреждением - Отделением Пенсионной фонда Российской Федерации по Республике Крым (далее по тексту - Отделение, (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственность «СИС» (далее - Исполнитель) 26.01.2018 заключен государственный контракт № 26/01/18/6 , на выполнение топографической съемки для строительства здания государственного учреждения - Управлении Пенсионного фонда (Российской Федерации в г.Саки и Сакском районе Республики Крым по. адресу: 

<

...> между школой № 2 и музыкальной школой (далее - Работы).

Цена контракта составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % 2 288 руб. 14 коп.

Подписав данный Контракт Исполнитель согласился со всеми условиями его исполнения, в том числе со сроками выполнения работ.

Согласно п.1.5. Контракта Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания контракта и сдать результат выполненных работ Заказчику не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения работ.

Фактически Работы сданы Заказчику только 16.03.2018, т.е. имеет место просрочка исполнения обязательств по Контракту. Приняты работы Заказчиком без замечаний 16.03.2018, что подтверждается актом № 1 приема-передачи от 01.03.2018 на котором под подписью заказчика, которая скреплена печатью, стоит дата 16.03.2018.

Согласно п.5.3. Контракта при нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных п.1.5. контракта, к нему могут применяться штрафные санкции в виде пени в размере 0,2 % (ноль целых две десятых) от контрактной стоимости за каждый день просрочки, но не более 15 % от данной суммы на момент предъявления: соответствующего требования.

18.02.2019 в адрес ООО «СИС» в рамках досудебного урегулирования Отделением направлена претензия. 15 марта 2019 был получен ответ на претензию, в котором ООО «СИС» признает факт ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, однако сумма пени не была перечислена на счет Отделения в добровольном порядке.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая, вышеизложенное, государственная пошлина в размере 2000,00 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

          Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИС» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в пользу Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым  (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) пени в сумме 150 ,00  руб.

          Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИС» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)  в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 2 000,00 руб. 

          Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

          Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                                      В.И. Гайворонский