АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Казань                                                                                         Дело №А65-4653/2017 

Дата принятия решения –  17 июля 2017 года.

Дата объявления резолютивной части –  11 июля 2017 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Королевой Э.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ТатМонолитСтрой», Высокогорский район, с. Высокая Гора, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), к Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань», г. Казань, (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), о взыскании 1 800 000 рублей 09 копеек долга,

с участием:

истца – директор ФИО1,

ответчика общества с ограниченной ответственностью «Производственно- строительное объединение «Казань» – представитель ФИО2, по доверенности от 09 января 2017 года,

ответчика Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» - представитель ФИО3, по доверенности от 02 июня 2017 года,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального образования города Казани» – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ТатМонолитСтрой», Высокогорский район, с. Высокая Гора, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), (далее по тексту - истец), обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань», г. Казань, (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), (далее по тексту – ответчики), о взыскании 1 800 000 рублей 09 копеек долга.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, привлечено муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального образования города Казани».

Директор истца в судебном заседании исковые требования поддержал.

Представитель ответчика общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» в судебном заседании с иском не согласился, огласил отзыв на исковое заявление, в котором просит отказать в удовлетворении исковых требований, и ссылается на то, что порядок взаимодействия сторон в рамках поставки товара на биржевой площадке bp.zakazrf.ru установлен Регламентом работы биржевой площадки от 2016 года, размещенном на сайте биржевой площадки. Поскольку закупка осуществлялась на биржевой площадке, применяется регламент работы указанной биржевой площадки, в соответствии с которым обязанность по оплате поставленного товара лежит непосредственно на Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан».

Представитель ответчика Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» в судебном заседании с иском не согласился, огласил отзыв и дополнительный отзыв на исковое заявление, в которых просит отказать в удовлетворении иска, и ссылается на то, что согласно представленных истцом документов, поставщик поставил товар покупателю обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань». Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» по договору поставки №ВР 00024042-ТR от 15 ноября 2016 года не является стороной договора, и не выступает ни покупателем, ни получателем товара. Указанный договор является договором поставки, и элементов другого договора не содержит. Регламент работы биржевой площадки не может устанавливать обязательство по оплате товара организатором закупочной процедуры по отношению к поставщику товара. То обстоятельство, что финансирование объекта осуществляется за счет инвестора-застройщика, не предоставляет каждому из поставщиков материалов для выполнения работ предъявлять требования об оплате материалов непосредственно к инвестору-застройщику, и противоречит требованиям гражданского законодательства об обязательствах и общим положениям о подряде (строительном подряде), а также предполагает наличие у общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» права предъявления требований об оплате работ и материалов к заказчику в рамках своих договорных отношений.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального образования города Казани» в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие третьего лица.

Как следует из материалов дела и установлено судом, между Некоммерческой организацией «Государственный  жилищный  фонд  при  Президенте  РТ" (инвестор-застройщик) и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (технический  заказчик) 08 июля 2014 года заключен договор №327 об инвестиционной деятельности (по строительству (созданию) многоквартирного жилого дома), в соответствии  с  которым  инвестор-застройщик  поручает  построить (создать)  и  инвестирует  в  строительство «Жилой дом №11-5 с нежилыми помещениями в ж/р «Салават  Купере» г. Казани» (объект), общей площадью объекта 21637,86 кв.м., нежилых помещений общей площадью 1298,00 кв.в., и получает  готовый  для  эксплуатации  объект  в  порядке  и  в  сроки, установленные  договором (пункт 1.1 договора) ( том 2 л.д. 5-8).

В соответствии с пунктом 2.1.7 договора технический заказчик в договоре с  подрядчиком обязуется предусматривать закупку материальных ресурсов для строительства  объекта только через электронную площадку ГУП  «Агентство  по  государственному  заказу,  инвестиционному    заказу, инвестиционной  деятельности  и межрегиональным  связям  Республики Татарстан», открытие специальных казначейских счетов исполнителей  работ,  включая субподрядчиков, в банке ОАО «Ак Барс Банк». Обеспечить и санкционировать на  электронной торговой площадке ГУП «Агентство по государственному заказу,  инвестиционному заказу, инвестиционной деятельности межрегиональным связям Республики Татарстан», заключение договоров и приобретение исполнителями работ и  материалов и  изделий по оптимальным ценам на момент закрытия сделки.

Согласно пункту 1.6 договора объем инвестиций по настоящему договору  устанавливается в размере 552 702 389 рублей 69 копеек. Указанный объем инвестиций  является твердым и включает в себя все затраты связанные со строительством объекта, кроме  стоимости вознаграждения услуг технического заказчика.

В  пункте 2.1.15 договора стороны предусмотрели, что технический заказчик не  позднее 5 числа каждого месяца обязан предоставлять инвестору-застройщику акты  выполненных  работ по объекту по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости  выполненных работ и затрат по объекту по форме КС-3, ведомости приобретенных и  уложенных  материалов, изделий  и  оборудования  за  предыдущий  месяц  на  бумажном  носителе ,заверенные  подписями  и  печатями  технического  заказчика  в  электронном  виде.,  осуществлять  строительный  контроль  и  технический  надзор  за ходом  и качеством  выполняемых  работ, соблюдением  сроков  их  выполнения, качеством  и  объемом  применяемых  конструкций  и  материалов  и  оборудования   утвержденной  проектно-сметной  документации.

Технический  заказчик  обязуется  принять от генподрядной организации  результаты выполненных работ по унифицированным формам КС-2, КС-3, ведомости  уложенных  материалов (пункт 2.1.16 договора).

В соответствии с  реестром оплаты и платежных поручений первого ответчика по   объекту «Жилой  дом  №11-5 с  нежилыми  помещениями в  ж/р  «Салават Купере»   г.  Казани»  общей  площадью  объекта  21637,86  кв.м,, за  период с  01 января 2014 года по  02 июня 2017 года перечислено третьему лицу 250 368 443 рубля 13 копеек ( том 2 л.д. 20-21).

Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального  строительства и реконструкции  Исполнительного  комитета  муниципального  образования  города Казани» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (подрядчик) заключен  договор  подряда на строительство №115/н (566/1п-06) от 12 декабря 2014 года, согласно которому  подрядчик обязуется в  установленные  договором   сроки  выполнять  по  заданию  заказчика  на  объекте:  «Жилой  дом  №11-5  с  нежилыми  помещениями  в  Ж/Р  «Салават  Купере»  г.  Казани»,  общей  площадью  21637,86  кв.м. строительно-монтажные  работы,  поставку  и  монтаж  оборудования,  прочие  работы,  необходимые  для  ввода  объекта  в  эксплуатацию  в  соответствии с  условиями  договора и  утвержденной  проектной  документацией (пункт 1.1 договора)  ( том 1 л.д. 122-127).

Согласно пункту 2.1 договора стоимость выполняемых  работ  на  сооружаемом  подрядчиком  объекте составляет  542 320 482 рубля 41 копейку.

Источник  финансирования  средства инвестора-застройщика или  с  привлечением  заемных  средств (пункт 2.4  договора)

В  пункте 4.12  договора стороны установили, что подрядчик  обязан производить  закупку материальных ресурсов для строительства объекта только на электронной торговой  площадке ГУП «АГЗ РТ», производить регистрацию сделок на  приобретении  материальных  ресурсов,  работ  и услуг, в  том  числе  субподрядных  договоров на  электронной  торговой  площадке  ГУП  «АГЗ  РТ».

Не  позднее 25 числа  каждого месяца представлять заказчику справки о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  КС-3,  актов  выполненных  работ по  форме  КС-2 с  приложением   исполнительных  схем.

В  письме  №7063 от 25 августа 2016 года  первый  ответчик   на  письмо по  поводу  несогласия по осуществлению закупки на бирже материалов и оборудования для  строительства подрядчиком и условиями договора поставки между выгравшим  поставщиком  и подрядчиком сообщил  следующее: 21 апреля 2016 года Президентом РТ утвержден  Регламент  взаимодействия  участников  строительства  жилья  по  программе социальной  ипотеки  в  Республике  Татарстан. В условиях указанного Регламента прописаны  мероприятия о взаимодействии участников (исполнителей), порядок и сроки  их  выполнения.  Согласно указанному Регламенту, Государственным жилищным фондом при Президенте РТ  разработаны договоры, соглашения по выстраиванию формы отношений между инвестором и  техническим заказчиком, проектировщиками, генподрядными и подрядными (субподрядными)  организациями. В разработанных Фондом Регламента договорах и  соглашениях учтены  доводы  второго  ответчика,  сроки  выполнения  работ,  порядок  оплаты исполнителям  работ, ответственность  сторон, согласование  подрядной  организации  на  биржевой  площадке и на  электронной  информационной  системе РТ ( ЭТИС  РТ)  заявки  на  приобретение  строительных  материалов  и  выбора  поставщика  по  результатам  торгов,  обеспечении регистрации  в  соответствии с  Регламентом  на  Биржевой  площадке. В  соответствии с Регламентом взаимодействия участников строительства жилья  по  программе  Социальной  ипотеки, ГУП «Агентство  по  государственному заказу, инвестиционной  деятельности и  межрегиональным  связям  РТ»  разработан  Регламент работы биржевой  площадки, в котором расписана процедура организации и проведения торгов.  Осуществление закупочной процедуры на приобретение материалов, изделий и  оборудования на  Биржевой  площадке  будет  производится  через  регистрации  сделок, а также  с  регистрацией  заказчика и  подрядной  организации,  в  соответствии  с  Регламентом  утвержденным  Президентом  РТ ( том 1 л.д. 39). 

На  основании  электронных  торгов на Электронной площадке «Биржевая  площадка bp.zakazrf.ru обществом с ограниченной ответственностью «ТатмонолитСтрой» (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (покупатель) 15 ноября 2016 г. заключен  контракт  №ВР00024042-ТR, согласно   которому  поставщик  обязуется  осуществить  поставку  товара  в  соответствии  с условиями  настоящего договора, наименование, ассортимент, количество и стоимость  товара  устанавливается в Спецификации ( Приложение  № 1 к  договору), и   составляемую  на  основании  извещения и Протокола  проведения итогов  запроса доставки в  электронной  форме  на  электронной  торговой  площадке Биржевая  площадка bp.zakazrf.ru, а  покупатель  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  товар  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящим  договором ( том 1 л.д. 15-17).

Товар  приобретается  в  целях  осуществления  строительства  объекта.  Оплата   за  поставленный  товар  производится  непосредственно инвестором-застройщиком НО  «Государственный  жилищный  фонд  при  Президенте  РТ (инвестор-застройщик), так  как  он  является  лицом, осуществляющим  инвестирование в  строительство  объекта. Права  и  обязанности  по  договору  возникают  у  покупателя, хотя    инвестор-застройщик  и  назван  в  договоре  лицом, оплачивающим  товар.

Покупатель  принимает  товар, с  соблюдением  условий  настоящего  договора  в  целях  исполнения  обязательств  по  строительству  объекта, финансируемого  инвестором-застройщиком.

Оплата  по  договору  осуществляется  по  безналичному  расчету  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  поставщика (пункт 1.1 договора).

В  пункте 2.6 договора стороны предусмотрели, что инвестор-застройщик  непосредственно осуществляет оплату товара, необходимого  для  строительства  объекта, на  основании  настоящего  договора.

Для  оплаты  товара  покупатель  должен  предоставить  инвестору-застройщику  заявку  на  оплату  товара,  с  приложением  копии  настоящего  договора  со  всеми  приложениями, счета поставщика на оплату, товарные  накладные  или УПД (универсальный  передаточный  документ), акт об отсутствии взаимных претензий и  иные документы  первичной  бухгалтерской отчетности, подтверждающие поставку  товара  покупателю. Инвестор-застройщик  осуществляет оплату поставщику в течение 7 рабочих дней с момента  получения от покупателя указанных  документов, подтверждающих надлежащую  поставку.

Об оплачиваемых  за  товар  суммах  инвестор-застройщик  уведомляет  покупателя   путем  отправления  реестра  об  оплатах.

В пункте 5.2.2 договора стороны установили, что для оплаты товара за  поставленный  товар покупатель  обязан  подать заявку, путем  размещения  в  программе 1С инвестора-застройщика, и  в  течение  7  рабочих  дней  передать  документы  инвестору-застройщику, подтверждающую  поставку  товара  согласно  пункту 2.6  настоящего  договора.

В  подтверждении  исполнения  договора  поставки  истец  представил  в  материалы  дела товарные накладные №587 от 18 ноября 2016 года на сумму 600 000, 03 рублей, №588 от 18 ноября 2016 года на сумму 600 000, 03 рублей, №589 от 18 ноября 2016 года на сумму 600 000, 03 рублей. Всего на общую сумму 1 800 000, 09 рублей ( том 1 л.д. 35-40).

В  связи с отсутствием оплаты, как от первого, так  и  второго ответчика, истцом в адрес ответчиком 07 декабря 2016 года направлено претензионное письмо №237, в  котором  предложил  в  добровольном  порядке в течение 7 дней  оплатить  товар (том 1 л.д. 41).

Истец  также  направил  претензионное письмо №269 от 26 декабря 2016 года  второму  ответчику,  в  котором  предложил в  течение 7 дней оплатить  товар ( том 1 л.д. 43).

В ответе  на  претензионное письмо от 07 декабря 2016 года первый ответчик  сообщил  истцу  о том, что с целью своевременного и  безусловного  ввода  объектов  в  эксплуатацию в 2016 году, фондом произведена оплата денежных средств для  осуществления строительства напрямую техническим заказчикам и генеральным  подрядчикам  в  размере,  необходимом  для  завершения  строительства. По объектам   строительствам, переходящим на 2017 года, все денежные средства за фактически  выполненные  работы и  приобретаемые  материалы  будут  перечисляться  также  на  счета  генеральных  подрядчиков (на основании подтвержденных техническим заказчиком актов  выполненных  работ  и  справок  о  стоимости  выполненных  работ  по  формам  КС-2, КС-3). С  целью  обеспечения  оплаты  генеральными  подрядчиками  поставщикам  за  приобретаемые   на  биржевой  площадке  материалов,  было  принято  решение  возложить  контроль  за  оплатой  по  актам  на  Департамент  казначейства  министерства  финансов РТ.  По  вопросу  оплаты  по  актам  поставок, по  которым  не  произошла  оплата  Фондом,  просит   обращаться  напрямую  к  генеральным  подрядчикам,  являющимся  стороной  договора  поставки, заключаемого  на  биржевой  площадке ( том 1 л.д. 42).

Оставление  претензий без удовлетворения послужило основанием для обращения  истца в  суд с  настоящим  иском.

Судом  установлено, что истцом произведена поставка арматуры А500С ф 12,0 на  объект  - строительство многоквартирного жилого  дома ( том 1 л.д. 35-40).

21 апреля 2016 года Президентом Республики Татарстан утвержден Регламент  взаимодействия  участников  строительства  жилья  по  программе  социальной  ипотеки  в  Республике  Татарстан.

Регламентом  регламентированы мероприятия  о  взаимодействии  участников (исполнителей), порядок и сроки  их  выполнения,  определен  порядок  приобретения  строительных  материалов  подрядчиком в  рамках  строительства  объекта  по  заказу  инвестора-застройщика, а  именно,  НО «Государственный  жилищный  фонд при  Президенте  РТ».

Как  установлено судом, между первым ответчиком (инвестор-застройщик) и  третьим  лицом по делу (технический  заказчик) заключен  договор об  инвестиционной  деятельности (по  строительству (созданию)  многоквартирного  жилого  дома) от 08 июля 2014 года.

Технический  заказчик  в  договоре с  подрядчиком обязуется  предусматривать  закупку   материальных  ресурсов  для  строительства  объекта  только  через  электронную  площадку  ГУП «Агентство  по  государственному  заказу,  инвестиционному    заказу, инвестиционной  деятельности  и межрегиональным  связям  РТ».

В  пункте 2.1.15  договора  стороны  предусмотрели, что  технический  заказчик  не  позднее  5  числа  каждого  месяца  обязан  предоставлять  инвестору-застройщику  акты  выполненных  работ  по  объекту  по  унифицированной  форме  КС-2, справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  объекту  по  форме  КС-3,  ведомости  приобретенных  и  уложенных  материалов, изделий  и  оборудования  за  предыдущий  месяц  на  бумажном  носителе, заверенные  подписями  и  печатями  технического  заказчика  в  электронном  виде.

Инвестор-застройщик  принял  обязательства  по  осуществлению  финансирования  объекта  в  случае  исполнения   техническим  заказчиком,  надлежащим  образом.

Инвестирование осуществляется путем перечисления инвестиционной стоимости  объекта  и  стоимости  услуг  на  счет  технического  заказчика  либо  зачетом  встречных требований, либо иным согласованным сторонами способом, предусмотренным  законодательством  РФ.

Третье лицо (заказчик) заключило со вторым  ответчиком (подрядчиком) договор  подряда  на  строительство  №115/н (566/1п-06) от 12 декабря 2014 года.

В пункте 4.12  договора   подрядчик  обязан  производить  закупку  материальных  ресурсов  для  строительства  объекта  только  на  электронной  торговой  площадке ГУП  «АГЗ РТ» производить  регистрацию  сделок на  приобретении  материальных  ресурсов,  работ и услуг, в  том  числе  субподрядных  договоров на  электронной  торговой  площадке  ГУП  «АГЗ РТ».

В  пункте 2.1.15  договора  стороны  предусмотрели, что  технический  заказчик  не  позднее  5  числа  каждого  месяца  обязан  предоставлять  инвестору-застройщику  акты  выполненных  работ  по  объекту  по  унифицированной  форме  КС-2, справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  объекту  по  форме  КС-3,  ведомости  приобретенных  и  уложенных  материалов, изделий  и  оборудования  за  предыдущий  месяц  на  бумажном  носителе, заверенные  подписями  и  печатями  технического  заказчика в электронном  виде.,  осуществлять  строительный  контроль и технический  надзор за ходом и качеством  выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством и объемом  применяемых  конструкций  и  материалов  и  оборудования   утвержденной  проектно-сметной  документации.

Заказчик  принял  обязательства  по  оплате  работ согласно разделу 6 договора.

Финансирование  производится  по  мере  поступления финансовых средств от  инвестора-застройщика на счет  заказчика.

Финансирование  осуществляется  путем перечисления денежных средств на  специальный казначейский счет подрядчика на основании  предъявленных  и  утвержденных  заказчиком за  отчетный  период строительства  актов  приемки  выполненных  работ  и  форм  КС-2,  справок  о стоимости выполненных работ  и затрат в форме КС-3, подписанных  руководителем заказчика или его заместителем.

На основании электронных торгов  на  электронной  площадке «Биржевая  площадка» заключен  договор  поставки №ВР00024042-ТR  от 15 ноября 2016 года.

Как следует из условий договора покупатель обязуется принять и оплатить   поставленный  товар  в  порядке и  на  условиях  договора. 

Согласно пункту 1.1. договора оплата  за  поставленный и товар производится непосредственно инвестором-застройщиком, так как он является лицом, осуществляющим инвестирование в  строительство  объекта. Права  и  обязанности  по  договору  возникают у  покупателя,  хотя  инвестор- застройщик  и  назван  в  договоре  лицом,  оплачивающим  товар ( том 1 л.д. 28).

 Указанный договор является  договором  поставки.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Согласно   пункту 3  статьи  308  Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство  не  создает  обязанностей  для  лиц, не  участвующих  в нем  качестве сторон (третьих  лиц)

В силу пункта 1  статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение  обязательства  может  быть  возложено  на  третье  лицо,  если  из  закона, иных  нормативных  актов, условий  обязательства  или  его  существа  не  вытекает  обязанность  должника  исполнить    это  лично.  В  этом  случае  кредитор  обязан   принять  исполнение, предложенное  за  должника  третьим  лицом.  

В  то  же  время  в  силу  статьи  403  Гражданского кодекса Российской Федерации за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства  третьими  лицами, на  которых  было  возложено  исполнение  отвечает  должник, если  законом  не  установлено ,что  ответственность  несет  являющееся  непосредственным  исполнителем  третье  лицо.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав  условия  договора  поставки, суд  установил, что  права  и  обязанности  по  договору  поставки  по  оплате товара  возникают  у  покупателя, хотя  инвестор-застройщик  и  назван  в  договоре  лицом,  оплачивающем  товар.

Доводы второго ответчика, что нет заключенного договора между истцом и вторым ответчиком судом отклоняются как несостоятельные, поскольку опровергается представленными в материалы дела товарными накладными ( том 1 л.д. 35-40) с отметкой о получении товара, уполномоченным представителем.

Следовательно, обязанным лицом по договору поставки является  второй ответчик.

Как следует из совокупности представленных доказательств, в том числе буквального толкования договоров по строительству объекта, обязательства  по  оплате  инвестиционной  стоимости  объекта  строительства первый ответчик принял перед третьим лицом по договору об инвестиционной  деятельности (по строительству (созданию)  многоквартирного  жилого  дома)  от  08 июля 2014  года, а  не  перед  вторым  ответчиком.

Права и  обязанности  покупателя  по  договору  поставки,  в  том  числе  по  оплате  товара  возникли  у  второго  ответчика, хотя  и   застройщик-инвестор  и  назван  в  договоре  лицом, оплачивающим  товар, суд  приходит  к  выводу, что  первый  ответчик  не  является  надлежащим  ответчиком  по  настоящему  спору.

Следовательно, первый  ответчик   не  является  надлежащим  ответчиком  по  делу,  правовые основания для удовлетворения к нему исковых требований отсутствуют.

Факт поставки товара подтвержден материалами дела и не оспаривается  ответчиками.

Доказательств  оплаты  товара  второй  ответчик  суду  не  представил. что является основанием для удовлетворения настоящего иска в полном объеме.

При подаче искового заявления истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенных исковых требований и относятся на ответчика общество с ограниченной ответственностью «Производственно- строительное объединение «Казань».

Руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

исковые требования к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань», г. Казань, (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно- строительное объединение «Казань», г. Казань, (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТатМонолитСтрой», Высокогорский район, с. Высокая Гора, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 1 800 000 рублей 09 копеек долга.

В удовлетворении иска к Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно- строительное объединение «Казань», г. Казань, (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в доход федерального бюджета 31 000 рублей.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Судья:                                                                                                                     Э. А. Королева