АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-29277/2017

22 декабря 2017 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 декабря 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен 22 декабря 2017 года.

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Т.А. Ефимовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл», город Уфа, Республика Башкортостан,

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление №5», город Саратов,

о взыскании задолженности по договору субподряда №1112187381492090942000000/МО-2011/15/155-3к/142 от 04.09.2014 года в размере 1002022 рублей 82 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.01.2017 года по 10.11.2017 года в размере 73024 рублей 13 копеек; задолженности по договору субподряда №1516187381652090942000000/МО-2015/318/РК-1Р/85 от 19.05.2015 в размере 1343738 рублей 70 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.03.2016 года по 10.11.2017 года в размере 282674 рублей 87 копеек,

при участии:

представителя истца – ФИО2, доверенность от 01.12.2017 года, сроком до 01.12.2018 года, 

представителя ответчика – ФИО3, доверенность №44/2-178 от 27.10.2017 года, сроком до 31.12.2018 года,  

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Акционерное общество «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» с исковым заявлением к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление №5» о взыскании задолженности по договору субподряда №1112187381492090942000000/МО-2011/15/155-3к/142 от 04.09.2014 года в размере 1002022 рублей 82 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.01.2017 года по 10.11.2017 года в размере 73024 рублей 13 копеек; задолженности по договору субподряда №1516187381652090942000000/МО-2015/318/РК-1Р/85 от 19.05.2015 в размере 1343738 рублей 70 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.03.2016 года по 10.11.2017 года в размере 282674 рублей 87 копеек.

Как видно из материалов дела, между АО «МТУ «Кристалл» (Субподрядчик) и ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» (правопредшественник ФГУП «ГВСУ №5») (Генподрядчик) был заключен договор субподряда №1112187381492090942000000/МО-2011/15/155-3к/142 от 04.09.2014 года, с учетом дополнительных соглашений к нему. Согласно условиям данного договора, Генподрядчик осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ и поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте 15/155-3к: расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, в соответствии с проектной, рабочей документацией и условиями договора. Субподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями договора на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами. Субподрядчик обязуется выполнить не менее 85% от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами. Объем работ выполняемый привлеченными силами не должен превышать 15% от общей стоимости работ по договору, указанной в пункте 2.1. договора.

Далее, между АО «МТУ «Кристалл» (Субподрядчик) и ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» (правопредшественник ФГУП «ГВСУ №5») (Генподрядчик) был заключен договор субподряда №1516187381652090942000000/МО-2015/318/РК-1Р/85 от 19.05.2015 года, с учетом дополнительных соглашений к нему. Согласно условиям данного договора, Генподрядчик осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ и поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте 318/РК-1Р, расположенного по адресу: г. Козельск Калужская область, в соответствии с проектной, рабочей документацией и условиями договора. Субподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями договора на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами. Субподрядчик обязуется выполнить не менее 85% от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами. Объем работ выполняемый привлеченными силами не должен превышать 15% от общей стоимости работ по договору, указанной в пункте 2.1. договора.

 В обоснование заявленных исковых требований АО «МТУ «Кристалл» ссылается на то, что им работы по договорам №1112187381492090942000000/МО-2011/15/155-3к/142 от 04.09.2014 года (далее – договор 2014 года) и №1516187381652090942000000/МО-2015/318/РК-1Р/85 от 19.05.2015 года (далее – договор 2015 года) были выполнены надлежащим образом, в полном объеме и в установленные сроки. Вместе с тем, с учетом частичной оплаты, зачета услуг генподряда ФГУП «ГВСУ №5» не были исполнены обязательства по оплате данных работ в полном объеме, в связи с чем АО «МТУ «Кристалл» обратилось с настоящим исковым заявлением в суд.

ФГУП «ГВСУ №5» представило отзыв на исковое заявление, в котором указало, что возражает против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в представленном отзыве.

Изучив представленные документы, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующему выводу.

Из материалов дела следует, что между АО «МТУ «Кристалл» (Субподрядчик) и ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» (правопредшественник ФГУП «ГВСУ №5») (Генподрядчик) был заключен договор субподряда №1516187381652090942000000/МО-2015/318/РК-1Р/85 от 19.05.2015 года, с учетом дополнительных соглашений к нему. Согласно условиям данного договора, Генподрядчик осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ и поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте 318/РК-1Р, расположенного по адресу: г. Козельск Калужская область, в соответствии с проектной, рабочей документацией и условиями договора. Субподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями договора на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами. Субподрядчик обязуется выполнить не менее 85% от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами. Объем работ выполняемый привлеченными силами не должен превышать 15% от общей стоимости работ по договору, указанной в пункте 2.1. договора.

Сроки выполнения работ по договорам, с учетом их корректировки дополнительными соглашениями, согласованы сторонами в разделе 3 договоров.

Цена по договору 2014 года составляет 13527961 рубль, в том числе НДС 18%.

Цена по договору 2015 года составляет 2765149 рублей 21 копейку, в том числе НДС 18% (пункты 2.1. договоров).

Согласно пункту 4.2. договоров оплата выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных работ производится Генподрядчиком ежемесячно в течение 25 банковских дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, акта о приемке генподрядных услуг, и предоставления Субподрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры. Оплата поставленного оборудования осуществляется на основании товарных накладных формы ТОРГ-12, актов о приеме (поступлении) оборудования формы ОС-14, актов о приемке оборудования в монтаж формы ОС-15, актов установки оборудования, не требующего монтажа, оригиналов счета и счета-фактуры.

Буквальное толкование условий указанных договоров 2014 года и 2015 года позволяет сделать вывод о том, что по своей правовой природе заключенные сторонами договоры являются договорами строительного подряда. Взаимоотношения сторон по договору строительного подряда регулируются положениями разделов 1, 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

При этом договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, с учетом положений статей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, существенными условиями договора строительного подряда являются его предмет и начальный и конечный сроки выполнения работ.

В судебном заседании установлено, что в договорах 2014 года и 2015 года определены все существенные условия договора подряда (пункты 1.1., 1.2., раздел 3).

Согласно пунктам 1, 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В подтверждение надлежащего исполнения обязательств по выполнению работ по договорам субподряда, истец представил акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Подписанные ответчиком акты свидетельствует о выполнении истцом ответчику предусмотренных условиями договора работ и принятии последним результата без замечаний и возражений. Данные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

В силу статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Первичные учетные документы должны содержать реквизиты, установленные в пункте 2 указанной статьи.

Суд считает, что представленные документы полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к первичным документам, принимаемым к учету, содержат ссылку на договор, реквизиты сторон, объем выполненных работ, следовательно, являются надлежащими доказательствами. 

Таким образом, факт выполнения истцом работ по договорам 2014 года и 2015 года, подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами и ответчиком не оспаривается.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Судом установлено, что с учетом частичной оплаты долга, произведенного зачета генподрядных услуг, оставшаяся сумма задолженности по договору 2014 года составила 1002022 рубля 82 копейки; по договору 2015 года – 1343738 рублей 70 копеек.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Судом установлено, что обоснованность заявленных истцом требований о взыскании задолженности за выполненные работы подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

На момент рассмотрения настоящего спора, доказательства уплаты указанной суммы задолженности, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком в материалы дела не представлены.

В рамках настоящего спора истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами процентов за пользование чужими денежными средствами по договору 2014 года за период с 27.01.2017 года по 10.11.2017 года в размере 73024 рублей 13 копеек; процентов за пользование чужими денежными средствами по договору 2015 за период с 10.03.2016 года по 10.11.2017 года в размере 282674 рублей 87 копеек. 

Суд, оценивая вопрос о наличии основания для применения меры гражданско-правовой ответственности в виде начисления процентов, установил, что данное право прямо предусмотрено статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, период начисленных истцом процентов попадает на действие различных редакций статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 года №42-ФЗ) за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Статьей 2 Федерального закона от 08.03.2015 года №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что настоящий Федеральный закон вступает в силу с 01.06.2015 года. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 года №42-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года №315-ФЗ) в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

По смыслу пункта 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются за каждый день просрочки. При этом обязательство по уплате этих процентов считается возникшим не с момента просрочки исполнения основного обязательства, а с истечением периода, за который эти проценты начисляются. Указанная правовая позиция была сформирована в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №1861/10 от 01.06.2010 года.

На основании изложенного, а также учитывая общие принципы действия норм, устанавливающих ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств, и длящийся характер нарушения (просрочки исполнения обязательства по оплате за выполненные работы), при просрочке платежа с 10.03.2016 года по 31.07.2016 года  проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 08.03.2015 года №42-ФЗ, а с 01.08.2016 года – проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года №315-ФЗ.

Суд, проверив представленный расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, считает его верным.

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценив все представленные в материалах дела доказательства в их взаимосвязи и совокупности, как того требуют положения пункта 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что обоснованность заявленных исковых требований в ходе судебного разбирательства дела нашла свое подтверждение в полном объеме.

При обращении с настоящим исковым заявлением в суд АО «МТУ «Кристалл» уплатило государственную пошлину в размере 37457 рублей (платежное поручение №6692 от 24.08.2017 года).

В ходе рассмотрения дела представитель истца в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований. Данное ходатайство судом было удовлетворено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации, при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Судом установлено, что исковые требования АО «МТУ «Кристалл» по настоящему делу удовлетворены в полном объеме. 

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 36507 рублей подлежат взысканию в пользу истца с ответчика; излишне уплаченная государственная пошлина в размере 950 рублей подлежит возврату истцу.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса   Российской   Федерации

РЕШИЛ:

Исковое заявление Акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» удовлетворить.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №5» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 410033, 

<

...>) в пользу Акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 450096, 

<

...>) задолженность по договору субподряда №1112187381492090942000000/МО-2011/15/155-3к/142 от 04.09.2014 года в размере 1002022 рублей 82 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.01.2017 года по 10.11.2017 года в размере 73024 рублей 13 копеек; задолженность по договору субподряда №1516187381652090942000000/МО-2015/318/РК-1Р/85 от 19.05.2015 в размере 1343738 рублей 70 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.03.2016 года по 10.11.2017 года в размере 282674 рублей 87 копеек; судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере  36507 рублей.

Возвратить Акционерному обществу «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 950 рублей, уплаченную по платежному поручению №6692 от 24.11.2017 года.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Копии решения направить лицам, участвующим в деле.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой инстанции. 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области

Т.А. Ефимова