6/2022-61726(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-21594/2020

г. Ярославль

11 мая 2022 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Танцевой В.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи Параниной О.Н.  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к РЕГИОНАЛЬНОМУ ФОНДУ СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки третье лицо: ООО «Консалтинг Строй Инвест» (ИНН 

<

***>). 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов  Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 60 дней с  момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки выполненных  работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома  № 21 по ул. Маланова г.  Ярославля, выполнив работы, предусмотренные Заключением эксперта от 21.01.2022 года № 669/1-316.1 ФБУ «Ярославская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ, а именно:  

- ремонт замененных стропильных конструкций - устранение зазоров (разборка  отдельных элементов, торцевания и подгонка концов элементов, установка выравнивающих  подкладок). Постановка стягивающих болтов (шпилек).  

- ремонт мауэрлатов - устранение зазоров, постановка стягивающих болтов,  устройство гидроизоляционных подкладок.  

- установка дополнительных стоек (в проектном количестве). 

- замена элементов усиления, постановка двусторонних накладок проектного сечения  с установкой стягивающих шпилек Д10 с шагом 1 м.  

- установка усиливающих накладок проектного сечения с установкой стягивающих  шпилек Д10 с шагом 1 м (постановка вторых накладок).  

- установка стягивающих шпилек Д10 с шагом 1 м; - разборка ограждения кровли; - разборка снегозадержателей; - разборка кровельного покрытия, включая обделки, примыкания, фартуки; 

- разборка/установка обрешетки; - разборка/укладка подкровельной пленки с проклейкой швов; - огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; - устройство кровельного покрытия с обделкой примыканий; 

- установка ограждения кровли (с использованием нового материала с окраской в  условиях строительной площадки за два раза по грунтовке);  

- установка снегозадержателей ( с частичным использованием нового материала); 

- смена строительных конструкций и зонтов вентшахт ВШ1-ВШ4. Конструктивное  исполнение шахт принять в соответствии с проектной документацией;  

- установка колпаков и кровельных проходок канализационных стояков; - смена створок слуховых окон с установкой распашных створок; - устройство лестниц у слуховых окон. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Взыскать с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000,00 руб. в возмещение расходов на оплату  госпошлины, 45000 руб. расходов на проведение заключения.  

Возвратить АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА" из  федерального бюджета 37181 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному  поручению от 20.11.2020 № 3147. Исполнение судебного акта в части возврата  государственной пошлины производится по ходатайству плательщика государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья В.А. Танцева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 04.02.2022 8:54:04

Кому выдана Танцева Виктория Андреевна