АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

 

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ  ЧАСТЬ  РЕШЕНИЯ

Дело № А29-14868/2017

16 января 2018 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Босова А.Е. 

рассмотрел в порядке упрощенного производства 

дело № А29-14868/2017 по иску

управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального района «Прилузский» 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Компас» 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, выполненные в рамках муниципального контракта от 22.08.2014 № 0807300000814000021-0480138-01,

и о взыскании 194 798 рублей штрафа

за ненадлежащее исполнение контрактных обязательств,

без вызова сторон.

 

Руководствуясь статьёй 49, частью 3.1 статьи 70, статьями 110, 112, 167 — 171, 180, 181, 226 — 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Принять уточнение исковых требований от 28.11.2017 № 430.

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Компас» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ, выполненные по муниципальному контакту от 22.08.2014 № 0807300000814000021-0480138-01 и указанные в акте обследования двухквартирного жилого дома от 16.08.2017, а именно:

-        произвести вертикальную планировку рельефа земельного участка и благоустройство придомовой территории;

-        усилить бревенчатые стены дома, ослабленные проёмами окон и дверей;

-        утеплить цоколь по периметру здания;

-        выполнить работы по обустройству отмостки вокруг дома;

-        провести обработку наружных стен дома биозащитными, огнезащитными, водозащитными составами;

-        утеплить систему холодного водоснабжения при вводе в дом;

-        обустроить конструкцию канализационного колодца в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-        установить варочные плиты в кухнях квартир № 1 и 2 дома; 

-        выполнить устройство вентиляционных каналов из кухни в соответствии со СНиП 31-106-2002, п. 8.1 в квартире № 1 и в квартире № 2 дома;

-        выполнить устройство вентиляционных каналов из помещения санузла в соответствии со СНиП 31-106-2002, п. 8.1 в квартире № 1 и квартире № 2 дома.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компас» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Прилузский» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 194 798 рублей штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 22.08.2014 № 0807300000814000021-0480138-01.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компас» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 12 843 рублей 94 копеек государственной пошлины. 

5. Выдать исполнительные листы.

6. Разъяснить, что лица, участвующие в деле, вправе обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения арбитражного суда в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения (резолютивной части) на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/).

7. Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы (в том числе в электронном виде) через Арбитражный суд Республики Коми в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия (резолютивной части решения), а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда — со дня принятия решения в полном объёме.

 

Судья                                                                                             А.Е. Босов