Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-3916/2024

г. Хабаровск

14 июня 2024 года

Резолютивная  часть  решения  объявлена  06 июня 2024  

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем  О.Г. Лисичкиной

рассмотрев в заседании суда дело по иску краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680009, 

<

...> зд. 1, помещ. 41)

о взыскании 1 683 915 руб. 21 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, действующей по доверенности от 15.01.2024 № 15/2024,

от ответчика – ФИО2, действующего по доверенности от 29.05.2024 № 4.

 

Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» о взыскании 1 683 915 руб. 21 коп.  на основании контрактов от 22.09.2023 № 012220002523003695, № 012220002523003689, № 012220002523003696, № 012220002523003690, № 012220002523003687, № 012220002523003688, № 012220002523003692, № 012220002523003694, № 012220002523003686, № 012220002523003693.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 04 июня 2024 объявлен перерыв до 06 июня 2024 в 11 часов 00 минут.

Истец в порядке статьи 49 АПК заявил ходатайство об уменьшении исковых требований, просил взыскать 815 897 руб. 76 коп., составляющих пени в размере 765 897 руб. 76 коп. по 10 контрактам, штраф в размере 5 000 х 10 = 50 000 руб. по десяти контрактам.

Уменьшение размера иска судом принимается, так как данное распорядительное действие закону не противоречит, прав других лиц не нарушает.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие обязательственных отношений, возникших  из контрактов 22.09.2023 № 012220002523003695, № 012220002523003689, № 012220002523003696, № 012220002523003690, № 012220002523003687, № 012220002523003688, № 012220002523003692, № 012220002523003694, № 012220002523003686, № 012220002523003693, право на взыскание неустойки в размере 815 897 руб. 76 коп.

Ответчик, как следует из отзыва, объяснений представителя в судебном заседании, в отношении просрочки исполнения контрактов не возражал, просил снизить размер неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

22.09.2023 между Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», застройщик, заключен контракт № 0122200002523003686, в соответствии с которым участник долевого строительства поручает, а застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом (многоквартирные дома) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов) передать объекты долевого строительства, определенные настоящим контрактом, участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную контрактом цену и принять объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором (ых) находятся вышеуказанные квартиры.

Предмет контракта: участие  в долевом строительстве 3 квартир на территории г. Хабаровска Хабаровского края для граждан, категории которых установлены законодательством (пункт 1.1. контракта).

Цена контракта составляет 14 827 969 руб. 18 коп., включая НДС (пункт 2.1. контракта).

22.09.2023 между Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», застройщик, заключен контракт № 0122200002523003687, в соответствии с которым участник долевого строительства поручает, а застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом (многоквартирные дома) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов) передать объекты долевого строительства, определенные настоящим контрактом, участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную контрактом цену и принять объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором (ых) находятся вышеуказанные квартиры.

Предмет контракта: участие  в долевом строительстве 3 квартир на территории г. Хабаровска Хабаровского края для граждан, категории которых установлены законодательством (пункт 1.1. контракта).

Цена контракта составляет 14 827 969 руб. 18 коп., включая НДС (пункт 2.1. контракта).

22.09.2023 между Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», застройщик, заключен контракт № 0122200002523003688, в соответствии с которым участник долевого строительства поручает, а застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом (многоквартирные дома) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов) передать объекты долевого строительства, определенные настоящим контрактом, участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную контрактом цену и принять объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором (ых) находятся вышеуказанные квартиры.

Предмет контракта: участие  в долевом строительстве 3 квартир на территории г. Хабаровска Хабаровского края для граждан, категории которых установлены законодательством (пункт 1.1. контракта).

Цена контракта составляет 14 896 972 руб. 54 коп., включая НДС (пункт 2.1. контракта).

22.09.2023 между Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», застройщик, заключен контракт № 0122200002523003689, в соответствии с которым участник долевого строительства поручает, а застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом (многоквартирные дома) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов) передать объекты долевого строительства, определенные настоящим контрактом, участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную контрактом цену и принять объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором (ых) находятся вышеуказанные квартиры.

Предмет контракта: участие  в долевом строительстве 3 квартир на территории г. Хабаровска Хабаровского края для граждан, категории которых установлены законодательством (пункт 1.1. контракта).

Цена контракта составляет 14 851 228 руб. 74 коп., включая НДС (пункт 2.1. контракта).

22.09.2023 между Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», застройщик, заключен контракт № 0122200002523003690, в соответствии с которым участник долевого строительства поручает, а застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом (многоквартирные дома) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов) передать объекты долевого строительства, определенные настоящим контрактом, участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную контрактом цену и принять объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором (ых) находятся вышеуказанные квартиры.

Предмет контракта: участие  в долевом строительстве 3 квартир на территории г. Хабаровска Хабаровского края для граждан, категории которых установлены законодательством (пункт 1.1. контракта).

Цена контракта составляет 14 831 845 руб. 78 коп., включая НДС (пункт 2.1. контракта с учетом дополнительного соглашения от 13.12.2023 №2).

22.09.2023 между Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», застройщик, заключен контракт № 0122200002523003692, в соответствии с которым участник долевого строительства поручает, а застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом (многоквартирные дома) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов) передать объекты долевого строительства, определенные настоящим контрактом, участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную контрактом цену и принять объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором (ых) находятся вышеуказанные квартиры.

Предмет контракта: участие  в долевом строительстве 3 квартир на территории г. Хабаровска Хабаровского края для граждан, категории которых установлены законодательством (пункт 1.1. контракта).

Цена контракта составляет 14 912 478 руб. 91 коп., включая НДС (пункт 2.1. контракта).

22.09.2023 между Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», застройщик, заключен контракт № 0122200002523003693, в соответствии с которым участник долевого строительства поручает, а застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом (многоквартирные дома) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов) передать объекты долевого строительства, определенные настоящим контрактом, участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную контрактом цену и принять объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором (ых) находятся вышеуказанные квартиры.

Предмет контракта: участие  в долевом строительстве 3 квартир на территории г. Хабаровска Хабаровского края для граждан, категории которых установлены законодательством (пункт 1.1. контракта).

Цена контракта составляет 15 034 979 руб. 26 коп., включая НДС (пункт 2.1. контракта).

22.09.2023 между Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», застройщик, заключен контракт № 0122200002523003694, в соответствии с которым участник долевого строительства поручает, а застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом (многоквартирные дома) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов) передать объекты долевого строительства, определенные настоящим контрактом, участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную контрактом цену и принять объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором (ых) находятся вышеуказанные квартиры.

Предмет контракта: участие  в долевом строительстве 3 квартир на территории г. Хабаровска Хабаровского края для граждан, категории которых установлены законодательством (пункт 1.1. контракта).

Цена контракта составляет 15 034 979 руб. 26 коп., включая НДС (пункт 2.1. контракта).

22.09.2023 между Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», застройщик, заключен контракт № 0122200002523003695, в соответствии с которым участник долевого строительства поручает, а застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом (многоквартирные дома) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов) передать объекты долевого строительства, определенные настоящим контрактом, участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную контрактом цену и принять объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором (ых) находятся вышеуказанные квартиры.

Предмет контракта: участие  в долевом строительстве 3 квартир на территории г. Хабаровска Хабаровского края для граждан, категории которых установлены законодательством (пункт 1.1. контракта).

Цена контракта составляет 15 428 841 руб. 13 коп., включая НДС (пункт 2.1. контракта с учетом дополнительного соглашения от 13.12.2023 №2).

22.09.2023 между Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», застройщик, заключен контракт № 012220000252300396, в соответствии с которым участник долевого строительства поручает, а застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом (многоквартирные дома) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов) передать объекты долевого строительства, определенные настоящим контрактом, участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную контрактом цену и принять объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (многоквартирных домов), в котором (ых) находятся вышеуказанные квартиры.

Предмет контракта: участие  в долевом строительстве 3 квартир на территории г. Хабаровска Хабаровского края для граждан, категории которых установлены законодательством (пункт 1.1. контракта).

Цена контракта составляет 15 490 866 руб. 63 коп., включая НДС (пункт 2.1. контракта с учетом дополнительного соглашения от 13.12.2023 №2).

В соответствии с пунктом 4.4.6. контрактов застройщик обязан ввести в эксплуатацию многоквартирные дома (многоквартирный дом), в состав которого (ых) входят объекты долевого строительства, в срок, установленные в разделе 5 контракта.

Пунктом 5.1. контрактов согласованы  сроки оказания услуг: срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию  многоквартирного (ых) дома (ов), в котором (ых) расположен (ы) объект (ы): не позднее 01.11.2023, но не ранее даты заключения контракта. Срок передачи объекта (ов) заказчику: после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного (ых) дома (ов), в котором (ых) расположен (ы) объект (ы), но не позднее 01.12.2023.

Как указано в пункте 9.3. контрактов, в случае просрочки исполнения застройщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиком обязательств, предусмотренных контрактом, застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (штраф, пени).

В соответствии с пунктом 9.3.1. контрактов, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения застройщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе просрочки исполнения застройщиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.4.11. контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных застройщиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

В соответствии с пунктом 9.3.5. контрактов за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;

б) 5 000 руб., если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно).

Объект введен  в эксплуатацию  28.11.2023, что подтверждается разрешением.

В соответствии с передаточными актами по контрактам от 22.09.2023 № 0122200002523003694, 0122200002523003693, 0122200002523003692, 0122200002523003688, 0122200002523003687, 0122200002523003686 объекты переданы заказчику 19.12.2023, по контрактам от 22.09.2023 № 0122200002523003696, 0122200002523003695, 0122200002523003690, 01222000025230036989 объекты переданы заказчику 25.12.2023.

В связи с нарушением застройщиком сроков, указанных в пункте 5.1. контрактов заказчик направил претензии от 19.12.2023 № 7548, № 7545, № 7544, № 7542, № 7541, № 7540, от 25.12.2023 № 7672, № 7674, № 7671, № 7673 с требованиями оплаты неустойки.

Неисполнение в добровольном порядке ответчиком обязанности по оплате неустойки послужило основанием для обращения краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»  в арбитражный суд с настоящим иском.

Сложившиеся отношения сторон регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), общими нормами об обязательствах и положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В соответствии со статьей 4 Закона N 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Частью 2 статьи 6 Закона № 214-ФЗ предусмотрено, что  в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 4 Закона N 214-ФЗ договор участия в долевом строительстве должен содержать срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 8 Закона N 214-ФЗ передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока.

По смыслу части 1 статьи 12 Закона N 214-ФЗ, обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 5.1. контрактов согласованы  сроки оказания услуг: срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию  многоквартирного (ых) дома (ов), в котором (ых) расположен (ы) объект (ы): не позднее 01.11.2023, но не ранее даты заключения контракта. Срок передачи объекта (ов) заказчику: после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного (ых) дома (ов), в котором (ых) расположен (ы) объект (ы), но не позднее 01.12.2023.

Судом установлено, что объекты введены в эксплуатацию с нарушением, а именно 28.11.2023, объекты переданы заказчику с нарушением, а именно 19.12.2023 и 25.12.2023.

Как указано в пункте 9.3. контрактов, в случае просрочки исполнения застройщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиком обязательств, предусмотренных контрактом, застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (штраф, пени).

В соответствии с пунктом 9.3.1. контрактов, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения застройщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе просрочки исполнения застройщиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.4.11. контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных застройщиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

Расчет пени по контрактам произведен истцом, исходя из условий контрактов, количества дней просрочки (начисление за периоды с 02.12.2023 по 19.12.2023, с 02.12.2023 по 25.12.2023) в размере 1/300 от действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (7,5%) от основного долга за каждый день просрочки, составляет 765 897 руб. 76 коп.

Расчет пени судом проверен, юридически и математически является верным.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов  (часть 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 9.3.5. контрактов за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;

б) 5 000 руб., если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно).

Расчет штрафа по контрактам произведен истцом, исходя из условий контракта (5 000 руб. * 10), составляет 50 000 руб.

Расчет штрафа судом проверен, юридически и математически является верным.

Ответчиком заявлено о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ.

В силу статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 71, 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судомдопускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредиторомнеобоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Пунктом 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 разъяснено, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Основанием для применения статьи 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. (пункт 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Оценивая доводы ответчика, обстоятельства данного конкретного дела, учитывая чрезмерно высокий размер неустойки, при отсутствии доказательств наличия у истца возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, в размере сопоставимом с суммой начисленных пени и штрафа, суд приходит к выводу о несоразмерности начисленных пени и штрафа последствиям нарушения обязательства и считает необходимым уменьшить размер подлежащей взысканию неустойки на 30%.

Исковое требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в размере 543 931 руб. 84 коп.

Из правовой позиции, изложенной в абзаце третьем пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что при снижении арбитражным судом размера неустойки по правилам статьи 333Гражданского кодекса на основании заявления ответчика, расходы истца по госпошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком, исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

Государственная пошлина в  размере 19 318 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, поскольку  истец в соответствии со статьей 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680009, 

<

...> зд. 1, помещ. 41) в пользу краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>) неустойку в размере 543 931 руб. 84 коп.  на основании контрактов от 22.09.2023 № 012220002523003695, № 012220002523003689, № 012220002523003696, № 012220002523003690, № 012220002523003687, № 012220002523003688, № 012220002523003692, № 012220002523003694, № 012220002523003686, № 012220002523003693.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680009, 

<

...> зд. 1, помещ. 41) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  19 318 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

    Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

    Судья                                                                                                                 Л.А. Збарацкая