АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

Именем   Российской   Федерации

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ    ЧАСТЬ     РЕШЕНИЯ

Дело № А51-8509/2021

г. Владивосток

23 августа 2021 года

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Зайцевой Л.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» (ИНН 2543125768, ОГРН 1182536016960, дата государственной регистрации: 30.05.2018) 

к обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН» (ИНН 2538088630, ОГРН 1052503706639, дата государственной регистрации: 25.01.2005) 

об обязании выполнить работы по устранению недостатков

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Регион» безвозмездно, в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Приморского края устранить недостатки (дефекты) в общем имуществе многоквартирного жилого 11 по улице Черняховского в городе Владивостоке, допущенные в ходе строительства и выявленные в ходе эксплуатации дома в период гарантийного срока, а именно:

1.     Произвести замену вышедших из строя осветительных приборов в местах общего пользования жилого дома;

2.     Произвести ремонт эксплуатационной кровли жилого дома;

3.     Произвести монтаж системы молниезащиты на эксплуатируемой кровле;

4.     Произвести ремонт системы протипожарной автоматики: средств пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, автоматики дымоудаления, автоматики водопровода в местах общего пользования с заменой, вышедшего из строя оборудования;

5.       Произвести выравнивание стен лифтовых шахт в целях исключения отклонений вертикальных направляющих лифтов;

6.       Произвести установку системы диспетчеризации в лифтовом оборудовании KONE Elevators Co., Ltd № 43772704; KONE Elevators Co., Ltd № 43772703; KONE Elevators Co., Ltd №43772702;

7.   Произвести монтаж с 1 по 21 этаж дома дверец поэтажных учетно-распределительно-групповых щитков, также дверец поэтажных индивидуальных тепловых пунктов и на поэтажной слаботочной системе;

8.   Произвести герметизацию стыков стен на северо-западном фасаде дома протяженность до 35 м/пг;

9.   Произвести пусконаладочные работы по системе внутреннего (внутриквартирного) отопления с регулировкой каждого отопительного прибора для обеспечения равномерного прогрева согласно проекту.

         Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регион» в пользу акционерного общества «ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 6 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

         Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

         Судья                                                                          Зайцева Л.В.