АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-28999/2024

г. Новосибирск

09 октября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при составлении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Сурмановой Л.А., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску муниципального казенного учреждения города  Новосибирска «Управление дорожного строительства»  

(ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью «Перлит-Строй» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, 

об обязании устранить недостатки (дефекты) в выполненных работах по  муниципальному контракту от 78/21 № 07.09.2021,  

при участии представителей: 

истца - ФИО1 доверенность от 09.01.2024, диплом, служебное  удостоверение;  

ответчика – ФИО2, доверенность № 43 от 15.07.2024, паспорт,  диплом,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Перлит-Строй» в  течении месяца с момента вступления решения в законную силу, при  наступлении климатических условий (в сухую погоду весной и летом при  температуре окружающего воздуха не ниже 50С, осенью - не ниже 100С),  устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах по  муниципальному контракту от 78/21 № 07.09.2021 на объекте  «Автомобильная дорога общего пользования от железнодорожного переезда  до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском  районе г. Новосибирска (участок от жилого дома № 2 до дома № 6  

ул. Николая Сотникова)»: 

 1. Разрушение стыка между бортовым камнем и покрытием тротуара  (отслоение и разрушение а/б у кромок; нарушена целостность  конструктивного элемента) - 300 м. п. (локальными участками на протяжении  всего участка строительства) – нарушено соответствие конструктивного  элемента проектной документации.  

 2. Разрушение крышки дождеприемника - 1 шт. (напротив дома   № 105/1 по ул. Петухова) - нарушено требование п. 5.2.7 ГОСТ Р 50597-2017.  

3. Разрушение бетонной отмостки вокруг смотрового колодца – 0,01 м3  (в районе остановки «ЖК Акварельный») - нарушено требование проектно-сметной документации ЛСР № 06-01-01.3.  

4. Разрушение а/б покрытия тротуара (выбоина, отсутствие локального  участка покрытия) – до 1м2 (напротив остановочного пункта «Лесопарк им.  академика И.И. Синягина») - нарушено требование п. 5.1.3 ГОСТ Р 50597- 2017.  

5. Поперечные и продольные трещины в а/б покрытие на тротуаре - 50  м. п. (локальными участками на всем протяжении строительства от жилого  дома № 2 до дома № 6 по ул. Николая Сотникова участками) - нарушено  требование п. 5.1.3 ГОСТ Р 50597-2017.  

6. Выкрашивание стыка в зоне сопряжения полос – 2,5 м2 (разворотная  площадка в конце участка строительства) - нарушено требование п. 5.2.4  ГОСТ Р 50597-2017.  

7. Просадка грунта в газонной части между проезжей частью и  тротуаром - 20 м2 (локальными участками на всей протяженности  строительства от жилого дома № 2 до дома № 6 по ул. Николая Сотникова) –  нарушение требований проектной документации шифр 03.15-ТКР1.3.ТЧ.  

8. Провал - 1шт. и выкрашивание а/б покрытия тротуара – 0,02м2  (напротив дома № 4 ул. Н. Сотникова около светофора) - нарушено  требование п. 5.1.3 ГОСТ Р 50597-2017.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Перлит- Строй» в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в  размере 1 800 рублей.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк