АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-11898/2023

 

г. Нижний Новгород                                                                          21  февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 февраля    2024  года

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Левашовой Елены Алексеевны (шифр дела 48-302)

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройСервис" (ОГРН 

<

***>,  ИНН   

<

***>) 

к обществу с ограниченной  ответственностью "Гефест -2 " (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, государственного казенного учреждения Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), акционерного общества "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании  задолженности,  

при участии представителей, в том числе путем использования системы веб - конференции:

от истца: ФИО2 (доверенность от 22.03.2022),

от ответчика: ФИО3   (доверенность от  30.09.2022), 

от  АО  "СЗ НО "Дирекция по строительству": ФИО4 (доверенность от 31.01.2024),

от  ГКУ  НО  "Нижегородстройзаказчик": не явился  (извещен надлежащим образом), 

УСТАНОВИЛ:

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика 3 259 492,78  руб. задолженности за выполненные работы по договору №ГСС-01/10-22 от 26.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница")"; 522 537,31 руб. задолженности за выполненные работы по договору №ГСС-02/10-22  от 26.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП в д. Горицы г.о. Навашинский  (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница")";  3 924 197,95 руб. за выполненные работы по договору №ГСС-03/10-22 от 26.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП в с. Кошелиха  г.о.г Первомайск  (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница")"; 3 421 697,33 руб.  за выполненные работы по договору №ГСС-04/10-22 от 26.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница")".

Требования основаны на статьях 309, 702, 711, 740   Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком  обязательств по оплате выполненных истцом работ по договорам.

Представитель истца поддержал  исковые требования, возражал против доводов ответчика.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, ранее заявленное ходатайств о назначении по делу судебной экспертизы не поддержал.

Представитель АО  "СЗ НО "Дирекция по строительству" поддержал доводы отзыва, указав, что для устранения выявленных недостатков им привлекалось иное лицо - общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Гранит".

Третье лицо - ГКУ  НО  "Нижегородстройзаказчик", извещенное надлежащим образом, явку своего  представителя не обеспечило, представило отзыв по делу, к которому приложены разрешения на ввод спорных объектов в эксплуатацию от 30.12.2022 (л.д. 102-109).

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец (далее – субподрядчик) и ответчик (далее - подрядчик) заключили  договор №ГСС-01/10-22 от 26.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница")", по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по завершению строительства объекта: «ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО «Уразовская центральная районная больница»)» в соответствии с условиями договора и приложениями к нему. Объемы и перечень выполняемых работ определяются в Приложении №4 к  договору. Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях договора  (пункты  1.1 -1.2  договора  №ГСС-01/10-22 от 26.10.2022).

Цена договора определена в соответствии с расчетом цены договора (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью договора и составляет 4 429 412,00 руб., без НДС. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и договором. Предусмотренный договором объём и (или) вид работ может быть увеличен в связи с увеличением фактического объема или вида работ на объекте. В случае такого увеличения, подрядчик оплачивает субподрядчику фактически выполненные работы в соответствие с актом о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Цена договора включает в себя: расходы на выполнение строительно-монтажных работ, являющихся предметом договора, транспортировку и хранение материалов, приспособлений необходимых для выполнения работ, иные расходы субподрядчика, связанные с выполнением работ на объекте, включая прибыль субподрядчика и затраты субподрядчика на непредвиденные работы, возникшие в ходе выполнения работ, уплату налогов, сборов, пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона В случае существенного увеличения стоимости материалов, необходимых для выполнения работ по договору и закупаемых субподрядчиком, подрядчик обязан заключить с субподрядчиком дополнительное соглашение к договору об увеличении цены договора. В случае отказа в заключение такого дополнительного соглашения субподрядчик имеет право приостановить выполнение работ по договору на срок заключения дополнительного соглашения (п. 2.1 договора  №ГСС-01/10-22 от 26.10.2022).

Оплата работ производится в следующем порядке (п. 2.2 - 2.3 договора №ГСС-01/10-22 от 26.10.2022):

Подрядчик вправе выплатить аванс в размере до 90% от цены договора на счет субподрядчика в течение  пяти рабочих дней с даты представления субподрядчиком.

Дальнейшие расчеты за выполненные работы производятся в следующем порядке:

Приемка выполненных работ, осуществляется на основании первичных учетных документов (которые определяются договором как акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3), подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании расчета цены договора, графика производства работ, условиями договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Расчеты за выполненные работы производятся со счета подрядчика на основании актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, предъявляемых подрядчику субподрядчиком по мере выполнения работ, не реже одного раза в месяц. Оплата работ по договору производится на расчетный счет субподрядчика в срок не более семи рабочих дней с даты доведения денежных средств до подрядчика  и подписания подрядчиком акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, на основании счета-фактуры, выставленного субподрядчиком. Подрядчик осуществляет оплату с учетом погашения авансового платежа путем уменьшения каждой оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу. Субподрядчик формирует счет на оплату выполненных работ за вычетом сумм погашения авансового платежа путем уменьшения каждой оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу.

Окончательный расчет за выполненные работы производятся со счета подрядчика на расчетный счет субподрядчика, в течение семи рабочих дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта, на основании счета-фактуры, выставленного подрядчиком.

В соответствии с п. 3.1 - 3.2 договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств  сторонами. Срок выполнения работ - 15 декабря 2022 года включительно.

Стороны заключили дополнительное соглашение №1 от 06.12.2022 к договору №ГСС-01/10-22 от 26.10.2022, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ помонтажу здания "ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница")" в соответствии с условиями договора и приложениями к нему. Цена определяется сторонами в 1 350 000 руб. (п.1.1, 2.1 дополнительного соглашения  №1  от 06.12.2022 к договору №ГСС-01/10-22 от 26.10.2022).

В соответствии с актом приемки - сдачи выполненных работ (по форме КС-2)  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3)  №1 от 28.12.2022  на 5 762 865,98   руб., работы по  договору №ГСС-01/10-22 от 26.10.2022 приняты ответчиком без замечаний по объему и качеству.

Истец (далее – субподрядчик) и ответчик (далее - подрядчик) заключили  договор №ГСС-02/10-22 от 26.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП  в д. Горицы г.о. Навашинский  (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница"), по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по завершению строительства объекта: «ФАП в д. Горицы г.о. Навашинский  (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница" в соответствии с условиями договора и приложениями к нему. Объемы и перечень выполняемых работ определяются в Приложении №4 к  договору. Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы  на условиях договора  (пункты  1.1 -1.2  договора  №ГСС-02/10-22 от 26.10.2022).

Цена договора определена в соответствии с расчетом цены договора (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью договора и составляет 5 463 783,00 руб., без НДС. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и договором. Предусмотренный договором объём и (или) вид работ может быть увеличен в связи с увеличением фактического объема или вида работ на объекте. В случае такого увеличения, подрядчик оплачивает субподрядчику фактически выполненные работы в соответствие с актом о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Цена договора включает в себя: расходы на выполнение строительно-монтажных работ, являющихся предметом договора, транспортировку и хранение материалов, приспособлений необходимых для выполнения работ, иные расходы субподрядчика, связанные с выполнением работ на объекте, включая прибыль субподрядчика и затраты субподрядчика на непредвиденные работы, возникшие в ходе выполнения работ, уплату налогов, сборов, пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона В случае существенного увеличения стоимости материалов, необходимых для выполнения работ по договору и закупаемых субподрядчиком, подрядчик обязан заключить с субподрядчиком дополнительное соглашение к договору об увеличении цены договора. В случае отказа в заключение такого дополнительного соглашения субподрядчик имеет право приостановить выполнение работ по договору на срок заключения дополнительного соглашения (п. 2.1 договора  №ГСС-02/10-22 от 26.10.2022).

Оплата работ производится в следующем порядке (п. 2.2 - 2.3 договора №ГСС-02/10-22 от 26.10.2022):

Подрядчик вправе выплатить аванс в размере до 90% от цены договора на счет субподрядчика в течение  пяти  рабочих дней с даты представления субподрядчиком.

Дальнейшие расчеты за выполненные работы производятся в следующем порядке:

Приемка выполненных работ, осуществляется на основании первичных учетных документов (которые определяются договором как акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3), подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании расчета цены договора, графика производства работ, условиями договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Расчеты за выполненные работы производятся со счета подрядчика на основании актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, предъявляемых подрядчику субподрядчиком по мере выполнения работ, не реже одного раза в месяц. Оплата работ по договору производится на расчетный счет субподрядчика в срок не более семи рабочих дней с даты доведения денежных средств до подрядчика  и подписания подрядчиком акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, на основании счета-фактуры, выставленного субподрядчиком. Подрядчик осуществляет оплату с учетом погашения авансового платежа путем уменьшения каждой оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу. Субподрядчик формирует счет на оплату выполненных работ за вычетом сумм погашения авансового платежа путем уменьшения каждой оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу.

Окончательный расчет за выполненные работы производятся со счета подрядчика на расчетный счет субподрядчика, в течение семи рабочих дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта, на основании счета-фактуры, выставленного подрядчиком.

В соответствии с п. 3.1 - 3.2 договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств  сторонами. Срок выполнения работ - 15 декабря 2022 года включительно.

Стороны заключили дополнительное соглашение №1 от 06.12.2022 к договору №ГСС-02/10-22 от 26.10.2022, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по монтажу здания  "ФАП в д. Горицы г.о. Навашинский  (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница"), в соответствии с условиями договора и приложениями к нему. Цена определяется сторонами в 1 350 000 руб. (п.1.1, 2.1 дополнительного соглашения  №1  от 06.12.2022 к договору №ГСС-02/10-22 от 26.10.2022).

В соответствии с актом приемки - сдачи выполненных работ (по форме КС-2)  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3)  №1 от 28.12.2022  на 5 236 210,51 руб., работы по  договору №ГСС-02/10-22 от 26.10.2022 приняты ответчиком без замечаний по объему и качеству.

Истец (далее – субподрядчик) и ответчик (далее - подрядчик) заключили  договор №ГСС-03/10-22 от 26.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП  в с. Кошелиха  г.о.г Первомайск  (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница"), по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по завершению строительства объекта: "ФАП в с. Кошелиха  г.о.г Первомайск  (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница")" в соответствии с условиями договора и приложениями к нему. Объемы и перечень выполняемых работ определяются в Приложении №4 к  договору. Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы  на условиях договора  (пункты  1.1 -1.2  договора  №ГСС-03/10-22 от 26.10.2022).

Цена договора определена в соответствии с расчетом цены договора (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью договора и составляет 5 142 381,00 руб., без НДС. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и договором. Предусмотренный договором объём и (или) вид работ может быть увеличен в связи с увеличением фактического объема или вида работ на объекте. В случае такого увеличения, подрядчик оплачивает субподрядчику фактически выполненные работы в соответствие с актом о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Цена договора включает в себя: расходы на выполнение строительно-монтажных работ, являющихся предметом договора, транспортировку и хранение материалов, приспособлений необходимых для выполнения работ, иные расходы субподрядчика, связанные с выполнением работ на объекте, включая прибыль субподрядчика и затраты субподрядчика на непредвиденные работы, возникшие в ходе выполнения работ, уплату налогов, сборов, пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона В случае существенного увеличения стоимости материалов, необходимым для выполнения работ по договору и закупаемых субподрядчиком, подрядчик обязан заключить с субподрядчиком дополнительное соглашение к договору об увеличении цены договора. В случае отказа в заключение такого дополнительного соглашения субподрядчик имеет право приостановить выполнение работ по договору на срок заключения дополнительного соглашения (п. 2.1 договора  №ГСС-03/10-22 от 26.10.2022).

Оплата работ производится в следующем порядке (п. 2.2 - 2.3 договора №ГСС-03/10-22 от 26.10.2022):

Подрядчик вправе выплатить аванс в размере до 90% от цены договора на счет субподрядчика в течение  пяти рабочих дней с даты представления субподрядчиком.

Дальнейшие расчеты за выполненные работы производятся в следующем порядке:

Приемка выполненных работ, осуществляется на основании первичных учетных документов (которые определяются договором как акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3), подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании расчета цены договора, графика производства работ, условиями договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Расчеты за выполненные работы производятся со счета подрядчика на основании актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, предъявляемых подрядчику субподрядчиком по мере выполнения работ, не реже одного раза в месяц. Оплата работ по договору производится на расчетный счет субподрядчика в срок не более семи рабочих дней с даты доведения денежных средств до подрядчика  и подписания подрядчиком акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, на основании счета-фактуры, выставленного субподрядчиком. Подрядчик осуществляет оплату с учетом погашения авансового платежа путем уменьшения каждой оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу. Субподрядчик формирует счет на оплату выполненных работ за вычетом сумм погашения авансового платежа путем уменьшения каждой оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу.

Окончательный расчет за выполненные работы производятся со счета подрядчика на расчетный счет субподрядчика, в течение семи рабочих дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта, на основании счета-фактуры, выставленного подрядчиком.

В соответствии с п. 3.1 - 3.2 договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств  сторонами. Срок выполнения работ - 15 декабря 2022 года включительно.

Стороны заключили дополнительное соглашение №1 от 06.12.2022 к договору №ГСС-03/10-22 от 26.10.2022, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по монтажу здания  "ФАП в с. Кошелиха  г.о.г Первомайск  (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") в соответствии с условиями договора и приложениями к нему. Цена определяется сторонами в 1 350 000 руб. (п.1.1, 2.1 дополнительного соглашения  №1  от 06.12.2022 к договору №ГСС-03/10-22 от 26.10.2022).

В соответствии с актом приемки - сдачи выполненных работ (по форме КС-2)  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3)  №1 от 28.12.2022  на 5 662 147,33  руб., работы по  договору №ГСС-03/10-22 от 26.10.2022 приняты ответчиком без замечаний по объему и качеству.

Истец (далее – субподрядчик) и ответчик (далее - подрядчик) заключили  договор №ГСС-04/10-22 от 26.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП  в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница")", по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по завершению строительства объекта: "ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница")" в соответствии с условиями договора и приложениями к нему. Объемы и перечень выполняемых работ определяются в Приложении №4 к  договору. Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях договора  (пункты  1.1 -1.2  договора  №ГСС-04/10-22 от 26.10.2022).

Цена договора определена в соответствии с расчетом цены договора (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью договора и составляет 5 142 381,00 руб., без НДС. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и договором. Предусмотренный договором объём и (или) вид работ может быть увеличен в связи с увеличением фактического объема или вида работ на объекте. В случае такого увеличения, подрядчик оплачивает субподрядчику фактически выполненные работы в соответствие с актом о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Цена договора включает в себя: расходы на выполнение строительно-монтажных работ, являющихся предметом договора, транспортировку и хранение материалов, приспособлений необходимых для выполнения работ, иные расходы субподрядчика, связанные с выполнением работ на объекте, включая прибыль субподрядчика и затраты субподрядчика на непредвиденные работы, возникшие в ходе выполнения работ, уплату налогов, сборов, пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона В случае существенного увеличения стоимости материалов, необходимых для выполнения работ по договору и закупаемых субподрядчиком, подрядчик обязан заключить с субподрядчиком дополнительное соглашение к договору об увеличении цены договора. В случае отказа в заключение такого дополнительного соглашения субподрядчик имеет право приостановить выполнение работ по договору на срок заключения дополнительного соглашения (п. 2.1 договора  №ГСС-04/10-22 от 26.10.2022).

Оплата работ производится в следующем порядке (п. 2.2 - 2.3 договора №ГСС-04/10-22 от 26.10.2022):

Подрядчик вправе выплатить аванс в размере до 90% от цены договора на счет субподрядчика в течение  пяти  рабочих дней с даты представления субподрядчиком.

Дальнейшие расчеты за выполненные работы производятся в следующем порядке:

Приемка выполненных работ, осуществляется на основании первичных учетных документов (которые определяются договором как акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3), подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании расчета цены договора, графика производства работ, условиями договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Расчеты за выполненные работы производятся со счета подрядчика на основании актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, предъявляемых подрядчику субподрядчиком по мере выполнения работ, не реже одного раза в месяц. Оплата работ по договору производится на расчетный счет субподрядчика в срок не более семи рабочих дней с даты доведения денежных средств до подрядчика  и подписания подрядчиком акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, на основании счета-фактуры, выставленного субподрядчиком. Подрядчик осуществляет оплату с учетом погашения авансового платежа путем уменьшения каждой оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу. Субподрядчик формирует счет на оплату выполненных работ за вычетом сумм погашения авансового платежа путем уменьшения каждой оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу.

Окончательный расчет за выполненные работы производятся со счета подрядчика на расчетный счет субподрядчика, в течение семи рабочих дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта, на основании счета-фактуры, выставленного подрядчиком.

В соответствии с п. 3.1 - 3.2 договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств  сторонами. Срок выполнения работ - 15 декабря 2022 года включительно.

Стороны заключили дополнительное соглашение №1 от 06.12.2022 к договору №ГСС-04/10-22 от 26.10.2022, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по монтажу здания  "ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница")", в соответствии с условиями договора и приложениями к нему. Цена определяется сторонами в 1 350 000 руб. (п.1.1, 2.1 дополнительного соглашения  №1  от 06.12.2022 к договору №ГСС-04/10-22 от 26.10.2022).

В соответствии с актом приемки - сдачи выполненных работ (по форме КС-2)  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3)  №1 от 28.12.2022  на 6 207 871,15  руб., работы по  договору №ГСС-04/10-22 от 26.10.2022 приняты ответчиком без замечаний по объему и качеству.

Указанные договоры заключены в целях исполнения обязательств ответчика (субподрядчик) по договорам, заключенным с АО  "СЗ НО "Дирекция по строительству" (подрядчик): договор №209 от 19.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница")"; договор №210  от 19.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП в д. Горицы г.о. Навашинский  (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница")"; договор №211 от 19.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП в с. Кошелиха  г.о.г Первомайск  (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница")"; договор №212 от 19.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: "ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница")".

Вышеуказанные договоры заключены АО  "СЗ НО "Дирекция по строительству" (подрядчик) в целях исполнения государственных контрактов, заключенных  с ГКУ НО  "Нижегородстройзаказчик" (государственный заказчик): государственный контракт №1261 от 19.10.2022 на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница"); государственный контракт №1274 от 25.10.2022 на завершение проектных, изыскательских работ и комплекса работ по завершению строительства объекта на выполнение комплекса работ по завершению строительства объекта: ФАП в д. Горицы г.о. Навашинский  (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница"); государственный  контракт №1278 от 25.10.2022 на завершение проектных, изыскательских работ и комплекса работ по завершению строительства объекта: ФАП в с. Кошелиха  г.о.г Первомайск  (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница"); государственный контракт №1280 от 25.10.2022 на завершение проектных, изыскательских работ и комплекса работ по завершению строительства объекта: ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница")  (л.д.68-101).

По расчету истца задолженность ответчика по оплате выполненных работ по договору №ГСС-01/10-22 от 26.10.2022  составила 3 259 492,78  руб., по договору №ГСС-02/10-22 от 26.10.2022 - 522 537,31 руб., по договору №ГСС-03/10-22 от 26.10.2022 - 3 924 197,95  руб., №ГСС-04/10-22 от 26.10.2022 руб. - 3 421 697,33 руб., что послужило основанием для обращения в арбитражный суд за защитой нарушенного права.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (ст. 746  ГК РФ).

В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно ч. 3 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик не представил доказательств, опровергающих сведения истца об объеме и качестве выполненных работ, равно как и доказательств оплаты. Акты выполненных  работ подписаны  ответчиком без замечаний.

Истец сообщил, что уведомление о вызове на строительные участки для фиксации недостатков б/н от 03.03.2023  от ответчика не получал. Почтовые квитанции, приложенные ответчиком к уведомлению, являются квитанциями, подтверждающими отправку иных писем: отправление с почтовым идентификатором 12109680210077  - письмо ответчика в адрес истца №1 от 07.03.2023, отправление с почтовым идентификатором 12109680212408 - письмо №2 от 09.03.2023.

Иных доказательств, что ответчик вызывал истца на осмотр объектов  для фиксации недостатков, выявленных на объектах  в с. Кошелиха Первомайского района и в с. Чембилей Краснооктябрьского района, в материалы дела не представлено, акты о выявленных дефектах от 19.04.2023г. составлены в отсутствии истца и им не подписаны.

Ответчик при наличии у него претензий или замечаний по качеству выполненных работ вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору требовать от подрядчика совершения определенных действий, предусмотренных статьей 723 ГК РФ, а именно: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. Вместе с тем ответчик не обращался к истцу с заявлением требований, предусмотренных статьей 723 ГК РФ.

Доказательств направления требований об устранения недостатков в адрес истца  и предоставления ему разумного срока для их устранения, истец не представил.

В соответствии с п. 8.9 договоров №ГСС-01/10-22 от 26.10.2022 и №ГСС-03/10-22 от 26.10.2022 в случае не устранения субподрядчиком недостатков в установленные сроки, подрядчик вправе устранить их самостоятельно либо с помощью третьих лиц и взыскать с субподрядчика, выполнившего работы с недостатками, возмещение своих расходов, связанных с их устранением.

Поскольку ответчик, выявленные недостатки не устранил, для их устранения АО  "СЗ НО "Дирекция по строительству" привлекало иное лицо - общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Гранит".

Конкретные недостатки  в выполненных истцом работах ответчиком  не указаны и не доказаны, не осмечены.

Доказательств, что недостатки, зафиксированные ответчиком и АО  "СЗ НО "Дирекция по строительству"  в актах от 19.04.2023,  обнаружены  именно в работах, выполненных истцом,  не представлено.

От ходатайства о  назначении судебной экспертизы ответчик отказался.  Иных ходатайств в целях обоснования своих возражений ответчик не заявил.

Кроме того, все замечания к качеству выполненных работ, последующие после их приемки, в силу норм пункта 4 статьи 720 ГК РФ и статьи 722 ГК РФ  подлежат урегулированию между сторонами в рамках  гарантийных обязательств по договорам.

Иных мотивированных возражений по существу иска ответчиком не представлено, требования о взыскании задолженности по договорам от 26.10.2022 подлежит удовлетворению в заявленных  размерах.

Расходы по уплате государственной пошлине в порядке ч. 1 ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной  ответственностью "Гефест -2 " (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГазСтройСервис" (ОГРН 

<

***>,  ИНН   

<

***>) 11 127 925,37 руб. долга, 78 650 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                Е.А. Левашова