АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-15053/2020

04 декабря 2020 года

город Омск

Резолютивная часть решения изготовлена 27 ноября 2020 года.

Решение в полном объёме изготовлено 04 декабря 2020 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Луговика С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Марклайн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании за счёт собственных средств выполнить работы по устранению дефектов,

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО2 по доверенности от 30.01.2020 № 18 сроком на 1 год;

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 08.09.2020 № 111 сроком на 1 год;

УСТАНОВИЛ:

бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Марклайн» об обязании в рамках гарантийных обязательств по договору от 11.06.2019 № Ф.2019.000477, по договору от 24.09.2019 № Ф.2019.001083 за счёт собственных средств выполнить работы по устранению дефектов дорожной разметки в течение 15 дней со дня вступления в законную силу решения суда, а именно: восстановить горизонтальную разметку пластичными материалами в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», ГОСТ Р 53173-2008 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля», условиями договоров.

В судебном заседании, состоявшемся 27.11.2020, представитель истца исковые требования поддержал.

Представитель ответчика исковые требования не признал.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 11.06.2019 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАРКЛАИН» (подрядчик) был заключен договор № Ф.2019.000477 (далее - договор) на выполнение подрядных работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города Омска.

24.09.2019 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАРКЛАИН» (подрядчик) был заключен договор № Ф.2019.001083(далее - договор) на выполнение подрядных работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города Омска.

Место выполнения работ по договору от 11.06.2019 № Ф.2019.000477 -участки улично-дорожной сети города Омска:

1) ул. 2-я Восточная (от ул. Барнаульской до Октябрьского моста);

2) ул. Б.Хмельницкого (от ул. Нейбута до ул. 3-я Военная);

3) ул. Б. Хмельницкого (от ул. Масленникова до ул. Нейбута);

4) ул. Волгоградская (от ул. 2-я Солнечная до бульвар ФИО4);

5) ул. Заозерной (от ул. Лукашевича до Красноярского тракта);

6) ул. Красный путь (от Соборной площади до просп. Мира);

7) ул. Лермонтова (от ул. Маршала Жукова до пл. Бухгольца);

8) пр. Мира (от ул. Красный путь до ул. Полевой);

9) ул. Нефтезаводская (от просп. Мира до просп. Губкина);

10) ул. Новокирпичная (от просп. Сибирский до ул. 27-я Рабочая);

11) просп. К. Маркса (от ул. Лобкова до ул. Думская);

12) просп. Королева (от ул. Химиков до Красноярского тракта);

13) просп. Космический (от Окружной дороги до путепровода по ул. Л.Чайкиной);

14) ул. 1 -я Трамвайная (от ул. Воровского до ул. М.Леонова);

15) ул. 5-я Кировская (от ул. О.Кошевого до ул. Талалихина);

16) ул. 22 Декабря (от ул. Полярной до Исилькульского тракта);

17) ул. 24-я Северная (от ул. 21 -я Амурская до Красноярского тракта);

18) ул. Ватутина (от ул. Конева до ул. Лукашевича);

19) ул. Интернациональная (от ул. Гагарина до ул. Красный Путь);

20) ул. Кирова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 27-я Рабочая);

21) ул. Леконта (от ул. Калинина до ул.8-я Ленинская);

22) ул. Лукашевича (от просп. ФИО5 до ул. Дианова);

23) ул. Химиков (от просп. Мира до ул. Комбинатской); 

24) ул. Челюскинцев (от ул. Багратиона до ул. 5-ой Северной)

Место выполнения работ по договору от 24.09.2019 № Ф.2019.001083 - участки улично-дорожной сети города Омска: 

1)ул. 5 Северная;

2) ул. Барабинская;

3) ул. Госпитальная;

4) ул. Граничная;

5) ул. Заводская;

6) ул. Ипподромная;

7) ул. ФИО5;

8) ул. Красный Пахарь;

9) ул. Партизанская;

10) ул. Торговая;

11) ул. Циолковского.

В соответствии с условиями договоров гарантийный срок, представляемый подрядчиком, должен составлять 1 года с даты подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2).

Гарантии качества распространяются на результат выполненных подрядчиком по договору работ, а также на используемые товары. Качество и безопасность товаров, применяемых для выполнения работ, должны соответствовать действующим в Российской Федерации техническим условиям, стандартам и требованиям, предъявляемым к строительным товарам такого рода.

Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки товаров, выполненных им в соответствии с договором работ, обнаруженные в течение установленного договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

При обнаружении заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, заказчик обязан сообщить об этом подрядчику в письменной форме, а подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором указываются сроки их устранения.

16 апреля 2020 года в ходе комиссионного обследования по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города Омска проведенного с участием представителей подрядчика, были выявлены недостатки.

По итогам комиссионного обследования составлен акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения (до 20.05.2020).

23 апреля 2020 года в адрес подрядчика была направлена претензия о необходимости устранить замечания, указанные в актах, в рамках гарантийных обязательств в срок до 20 мая 2020 года.

20 августа 2020 года проведено повторное комиссионное обследования, замечания указанные в претензии от 23 апреля 2020 года в срок до 20 мая 2020 года не устранены.

Отсутствие действий со стороны ответчика по устранению выявленных недостатков послужило основанием для предъявления истца настоящего иска в арбитражный суд.

Оценив представленные доказательства, доводы сторон, приведённые в обоснование иска, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьёй 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьёй 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании положений статьи 754 ГК РФ подрядчик несёт ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

В соответствии со статьёй 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определёнными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Как указано в статье 722 ГК РФ, в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлечёнными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведённого самим заказчиком или привлечёнными им третьими лицами. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 Кодекса, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении (пункты 1, 2, 4 статьи 755 ГК РФ).

В силу статьи 756 ГК РФ при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 ГК РФ; при этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 Кодекса, составляет пять лет.

В пунктах 1, 3 статьи 724 ГК РФ определено, что в случае, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьёй; заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Дефекты, которые просит устранить истец, выявлены в пределах гарантийного срока эксплуатации, согласованного сторонами в вышеуказанном договоре; работы, об устранении дефектов которых просит истец, выполнены ответчиком. 

Согласно ч. 1 ст. 737 ГК РФ в случае обнаружения недостатков во время приёмки результата работы или после его приёмки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приёмки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 ГК РФ прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесённых им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

В соответствии с ч. 1 ст. 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Оценив совокупность представленных в дело доказательств, суд пришёл к выводу о том, что выявленные недостатки возникли вследствие ненадлежащего выполнения ответчиком работ, а избранный истцом способ защиты нарушенного права, а именно, обязание ответчика безвозмездно устранить недостатки выполненных работ, предусмотрен законом и является надлежащим (статья 12 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, суд находит исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёме. 

Возражения ответчика суд признает необоснованными в силу следующего.

Ссылка на методические рекомендации не может быть обоснована, так как методические рекомендации не содержат указание на возможность устранения гарантийных недостатков краской.

Применение краски не предусмотрено договорами.

Таким образом, устранять недостатки, применяя краску, ответчик не мог. Он должен был применить материалы, предусмотренные договорами. 

С учётом результатов рассмотрения иска, расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Марклайн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по договору от 11.06.2019 № Ф.2019.000477, по договору от 24.09.2019 № Ф.2019.001083 за счёт собственных средств выполнить работы по устранению дефектов дорожной разметки в течение 15 дней со дня вступления в законную силу решения суда, а именно: восстановить горизонтальную разметку пластичными материалами в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», ГОСТ Р 53173-2008 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля», условиями договоров:

1) - ул. Лермонтова (от ул. Маршала Жукова до пл. Бухгольца)

1. Восстановить разметку 1.5. на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.12. на всем протяжении участка;

2) - просп. К. Маркса (от ул. Лобкова до ул. Думская)

1. Восстановить разметку 1.5 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

4. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

5. Восстановить разметку 1.11 на участке (пр. К. Маркса д. 37, ул. Потанина)

3) - ул. Леконта (от ул. Калинина до ул. 8-я Лининска)

1. Восстановить разметку 1.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.5 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.6 на всем протяжении участка;

4) - ул. 1-я Трамвайная (от ул. Воровского до ул. М. Леонова)

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

5) - ул. Новокирпичная (от просп. Сибирский до ул. 27-я Рабочая)

1. Восстановить разметку 1.5 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.6 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.3 на участке (от ул. 6-й Станционной до ул. Молодогвардейской отсутствует разметка 1.3)

6) - ул. Кирова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 27-я Рабочая)

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.5 на всем протяжении участка;

4. Восстановить разметку 1.7 на всем протяжении участка;

7) - ул. Б. Хмельницкого (от ул. А. Нейбута до ул. 3-я Военная)

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.5 на всем протяжении участка;

4. Восстановить разметку 1.6 на всем протяжении участка;

5. Восстановить разметку 1.7 на всем протяжении участка;

6. Восстановить разметку 1.18 на всем протяжении участка;

8) - ул. Б. Хмельницкого (от ул. Масленикова до ул. А. Нейбута)

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.5 на всем протяжении участка;

4. Восстановить разметку 1.6 на всем протяжении участка;

5. Восстановить разметку 1.7 на всем протяжении участка;

6. Восстановить разметку 1.18 на всем протяжении участка; 

9) - ул. Ипподромная

1. Восстановить разметку 1.1 на участке (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 8-я Линия)

2. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

10) - ул. Циолковского

1. Восстановить разметку 1.5, 1.6, 1.18 на участке (от ул. Пушкина до ул. Иртышская Набережная)

11) - ул. Партизанская

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.18 на всем протяжении участка;

12) - ул. Интернациональная (от ул. Гагарина до ул. Красный Путь)

1. Восстановить разметку 1.23 на всем протяжении участка;

13) - ул. Красный путь (от Соборной площади до прос. Мира)

1. Восстановить разметку 1.5 на участке (от ул. 2-я Дачная до ул. 4-я Северная)

2. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

14) - ул. пр. Мира (от ул. Красный Путь до ул. Полевой)

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.5 на всем протяжении участка;

4. Восстановить разметку 1.6 на всем протяжении участка;

5. Восстановить разметку 1.25 на всем протяжении участка;

15) - ул. Нефтезаводская (от просп. Мира до просп. Губкина)

1. Восстановить разметку 1.5 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.6 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

4. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

16) - ул. Заводская

1. Восстановить разметку 1.5, 1.6, 1.1 на участке (от ул. Нефтезаво декой до ул. 1-й Заводской)

2. Восстановить разметку 1.5, 1.6, 1.1 на участке (от ул. 1-я Заводской ул. Комбинатская)

17) - ул. Химиков (от просп. Мира до ул. Комбинатской)

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.5, 1.6 на всем протяжении участка;

18) - просп. Королева (от ул. Химиков до ул. Красноярского тракта)

1. Восстановить разметку 1.5, 1.6 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

19) - ул. 24-я Северная (от ул. 21-я Амурская до Красноярского тракта)

1. Восстановить разметку 1.5, 1.6 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

20) ул. Челюскинцев (от ул. Багратиона до ул. 5-ой Северной)

1. Восстановить разметку 1.5, 1.6 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

21) - ул. 5-я Северная

1. Восстановить разметку 1.5, 1.6, 1.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

22) - ул. Госпитальная

1. Восстановить разметку 1.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

23) - ул. Красный Пахарь

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

24) - ул. 2-я Восточная (от ул. Барнаульской до Октябрьского моста)

1. Восстановить разметку 1.5, 1.6 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

25) - просп. Космический (от Окружной дороги до путепровода по ул. Л. Чайкина)

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

26) - ул. 5-я Кировская (от ул. Кошевого до ул. Талалихина)

1. Восстановить разметку 1.5, 1.6, 1.7, 1.14.1 на участке от ул. О. Кошевого до ул. Семиреченская;

2. Восстановить разметку 1.5, 1.6, 1.7, 1.14.1 на участке от ул. Перова до ул. Талалихина

27) - ул. Торговая

1. Восстановить разметку 1.5, 1.6 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

4. Восстановить разметку 1.18 на всем протяжении участка;

28) - ул. Граничная

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

29) - ул.22 Декабря (от ул. Полярная до Исилькульского тракта)

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

30) - ул. Волгоградская (от ул. 2-я Солнечная до Б. ФИО4)

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

31) - ул. Ватутина (от ул. Конева до ул. Лукашевича)

1. Восстановить разметку 1.5, 1.6 на участке (от ул. Лукашевича до ул. Перелета)

2. Восстановить разметку 1.18 на всем протяжении участка;

3. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

4. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

32) - ул. ФИО5

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка;

33) - ул. Лукашевича (от просп. ФИО5 до ул. Дианова)

1. Восстановить разметку 1.14.1 на всем протяжении участка;

2. Восстановить разметку 1.12 на всем протяжении участка.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Марклайн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                С.В. Луговик