Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-5862/2017

18 октября 2017 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 11.10.2017

Решение в полном объеме изготовлено 18.10.2017

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гуляевой А. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) "Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Восток" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить обязательство в натуре,

при участии в судебном заседании:

представителя истца ФИО2  по доверенности,

ответчик не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Восток» об обязании исполнить обязательство в натуре в рамках государственного контракта № 3ЭА от 02.11.2015 по капитальному ремонту объектов книгохранилища ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека РС (Я)».

Ответчик о дате, времени и месте судебного заседания извещен по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание не явился, явку своих представителей не обеспечил.

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие представителя ответчика.

Истец иск поддерживает в полном объеме.

Из материалов дела суд установил следующие обстоятельства.

02.11.2015 между ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека РС (Я)» (заказчик) и ООО Проектно-строительная компания «Восток» (подрядчик) заключен государственный контракт № 3ЭА выполнение работ по капитальному ремонту объектов книгохранилища ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека РС (Я)», по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту объектов Государственного казённого учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», расположенного по адресу: 

<

...> (далее -объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта и локальной сметы (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в установленном Контрактом порядке (пункт 1.1 контракта).

Контракт подписан по результатам протокола подведения итогов электронного аукциона от 19.10.2015г. № 0116200007915007722 (далее по тексту - Контракт), в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций (пункт 1.2 контракта).

Цена Контракта составляет 4 020 000,00 рублей (четыре миллиона двадцать тысяч рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен. Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта (пункт 2.1 контракта).

Указанная в пункте 2.1 настоящего Контракта цена является твердой, неизменной в течение всего срока его действия (пункт 2.2 контракта).

Оплата за выполненные работы производится в следующем порядке: 30% стоимости Контракта оплачивается авансом в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Государственным Заказчиком оригинала счета, остаток т.е. 70% оплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 3?Ь КС-3), акта сдачи-приемки работ. Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после проведения экспертизы выполненных работ (пункт 2.3 контракта).

Основанием для оплаты работ является подписанный Сторонами акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) без претензий Заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без претензий Заказчика, акт сдачи-приемки работ без претензий Заказчика, счет на оплату и счет-фактура, выставленные Подрядчиком (пункт 2.4 контракта).

Сроки выполнения работ установлены в п.3.1. Контракта, начало работ - с момента заключения Контракта, окончание работ - 20 ноября 2015г.

Ответчик  на неполное выполнение работ по Контракту направлял истцу гарантийные письма со сроками исполнения обязательств:

- Гарантийное письмо, исх. № 207 от 16.12.2015г.;

- Гарантийное письмо, исх. № 021 от 12.04.2017г.

Согласно гарантийного письма, невыполненными являются следующие работы:  установка оконного блока в комнате охраны;  подсыпка территории (горным) песком;  наружные тепловые сети от элеваторного узла административного здания до гаража;  наружные тепловые сети от элеваторного узла административного здания до теплого склада; разборка старого забора; -устройство металлического забора с воротами и калитками; устройство покрытий пола из сертифицированного противопожарного линолеума на клее; установка пожарных кранов д. 50 мм в сборе (кран, муфта, ствол, шкаф), 5 шт.

Стоимость работ, в том числе и невыполненные работы, оплачены истцом платежными поручениями: № 1171 от 10.11.2015 на сумму 1 206 000 руб.; № 1398 от 22.12.2015 на сумму 2 814 000 руб., всего на общую сумму  4 020 000 руб.

Сторонами подписаны унифицированные формы: КС-2 № 1 от 22.11.2015 и КС-3 № 1 от 22.11.2015 на сумму 4 020 000 руб.

Поскольку у ответчика имеется возможность исполнить обязательство (полная стоимость Контракта оплачена, включающая все расходы ответчика), которое им не исполнено, истец просит суд обязать ответчика исполнить обязательства в натуре, завершив все работы по контракту и сдать работы истцу, в соответствии главой 5 контракта.

Ответчик отзыва по иску не предоставил.

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Спорные правоотношения сторон возникли в рамках исполнения государственного контракта, правовое регулирование которого предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона № 44-ФЗ), действующим на момент заключения контракта.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона N 44-ФЗ заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными программами.

В пункте 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ указано, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

В силу части 1 ст. 59 Закона № 44-ФЗ под аукционом в электронной форме (электронном аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Пунктом 2 части 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 ст. 66 того же Закона и инструкцию по ее заполнению. К документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.

Государственный контракт № ЗЭА от 02.11.2015г. подписан сторонами, истцом и ответчиком, с Приложением № 1 (локальной сметой), где указаны наименования работ, объем работ, стоимость работ и т.д.

Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

Поскольку указанный выше Контракт  заключен для государственных нужд, то изменение его условий в части изменения предмета противоречит закону.

В материалах дела отсутствует соглашение сторон об изменении условий Контракта.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполнять надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и иных правовых актов.

В силу статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с абзацем 7 статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Ответчик гарантировал истцу выполнение работ (гарантийное письмо № 207 от 16.12.2015, гарантийное письмо № 021 от 12.04.2017) (л.д.39, 40).

Ответчик отзыва по иску не представил, доказательства выполнения работ, указанных  в гарантийных письмах в установленные сроки в материалах дела отсутствуют.

На основании изложенного, подлежат удовлетворению исковые требования истца об обязании ответчика в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства в натуре, выполнив следующие работы:  установка оконного блока в комнате охраны;  подсыпка территории (горным) песком;  наружные тепловые сети от элеваторного узла административного здания до гаража;  наружные тепловые сети от элеваторного  узла административного здания до теплого склада;  разборка старого забора;  устройство металлического забора с воротами и калитками;  устройство покрытий пола из сертифицированного противопожарного линолеума на клее;  установка пожарных кранов д. 50 мм в сборе (кран, муфта, ствол, шкаф), 5 шт.

Истец перечислил в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. по платежному поручению № 739 от 04.07.2017.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Восток" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства в натуре, выполнив следующие работы:

- установка оконного блока в комнате охраны;

- подсыпка территории (горным) песком;

- наружные тепловые сети от элеваторного узла административного здания до гаража;

- наружные тепловые сети от элеваторного  узла административного здания до теплого склада;

- разборка старого забора;

- устройство металлического забора с воротами и калитками;

- устройство покрытий пола из сертифицированного противопожарного линолеума на клее;

- установка пожарных кранов д. 50 мм в сборе (кран, муфта, ствол, шкаф), 5 шт.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Восток" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) "Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по госпошлине в размере 6 000 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

 

Судья

                    А.В. Гуляева