Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-48287/2025

19 сентября 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  20 августа 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  19 сентября 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Иноземцевой О.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Стенниковой А.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «А.Г.А Строй» (адрес:  Россия 188640, Ленинградская область, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.07.2013, ИНН: 

<

***>);

ответчик: муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей» (адрес:  Россия 188640, Ленинградская область, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.09.2002, ИНН: 

<

***>);

об обязании, 

при участии

- от истца: ФИО1, по доверенности от 04.08.2025,

- от ответчика: ФИО2, по доверенности от 07.03.2025, ФИО3, по доверенности от 21.11.2024,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «А.Г.А Строй» (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к муниципальному предприятию «Всеволожское предприятие электрических сетей» (далее – ответчик, Предприятие) об обязании исполнить обязательства по  договору от 25.07.2024 № 24/з-282 в части исполнения мероприятий, установленных пунктами 10.1 и 10.2 технических условий в срок, не превышающий 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

От Предприятия в суд поступили возражения на исковое заявление, согласно которым ответчик просил установить срок исполнения договора – 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Пояснил, что нарушение сроков исполнения договора со стороны Предприятия обусловлено спецификой территории Всеволожского района Ленинградской области; указал на выполнение необходимых работ, в частности, ссылался на заключенный 16.06.2025 договор на выполнение работ по строительству необходимых объектов электроэнергетики для осуществления техприсоединения, срок выполнения мероприятий по которому составляет 90 дней. 

Представитель Общества приобщил в материалы дела объяснения, ссылался на недобросовестность со стороны ответчика. 

В судебном заседании представители стороны поддержали свои позиции по делу. 

Учитывая достаточность собранных по делу материалов, суд из предварительного заседания перешел к судебному разбирательству дела по существу в настоящем судебном заседании в соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между Предприятием (сетевая организация) и Обществом (заявитель) был заключен договор, путем направления заявки от 08.07.2024 № 24/з-282, на осуществление технологического присоединения объектов по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., 

<

...> участок № 17б, кадастровый № 47:07:1301042:333 – земельный участок для предоставления коммунальных услуг, парки культуры и отдыха, площадки для занятия спортом, улично-дорожная сеть, благоустройство. 

 Предприятием выданы технические условия (далее – ТУ) для присоединения к электрическим сетям. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 150 кВт по III категории надежности; точка присоединения на контактах соединения оборудования измерительного комплекса сетевой организации в кабельном киоске, устанавливаемого на границе участка заявителя, от ТП-16 и наконечников отходящих ЛЭП-0,4 кВ заявителя в сторону присоединяемых объектов. Основной источник питания ПС-525, фид.525-403. 

Порядок расчетов указан в счете на оплату от 18.07.2024 № 511. 

Платежным поручением от 25.07.2024 № 124 Общество произвело оплату всех  авансовых платежей. 

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

Согласно п. 12 ТУ срок выполнения мероприятий составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 25.01.2025.

Срок действия ТУ – 2 года со дня заключения договора, то есть до 25.07.2026.

Ссылаясь на неисполнение Предприятием обязательств в установленный срок, Общество обратилось в суд с настоящим иском.

К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются нормы Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон N 35-ФЗ), Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ).

Общество относится к категории заявителей, предусмотренной пунктом 12(1) Правил N 861, что влечет за собой ряд особенностей процедуры технологического присоединения.

Так, в силу подпункта «д» пункта 7 Правил N 861 по общему правилу процедура технологического присоединения предполагает осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

Одновременно с этим в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил N 861, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, процедура технологического присоединения предусматривает лишь обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.

Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

В силу пункта 7(1) Правил N 861 в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5), 13(8) и 14 названных Правил, положения разделов I, II и IX настоящих Правил применяются, если разделом X названных Правил не установлено иное.

Из пункта 108 Правил N 861 следует, что результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 названных Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

Как отмечено в данном пункте, исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 10 ТУ Сетевая организация осуществляет следующие мероприятия: 

10.1 Организация мероприятий по обеспечению возможности присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации согласно схеме выдачи мощности: 

- построить КЛ -10 кВ многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией, с одним кабелем в траншее, сечением не менее 240 кв.мм, от РП-15 фид. 525-403 до ТП-16, L~3400 м., в том числе ГНБ, L~1400 м., Трассу, марку кабеля уточнить проектом; 

- на границе участка заявителя установить кабельный киоск с измерительным комплексом; 

- построить КЛ-0,4 кВ многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией, с одним кабелем в траншее, сечением не менее 185 кв.м.., от РУ-0,4 вК ТП-16 до точки присоединения по п. 7 ТУ, L~220 м., в том числе ГНБ L~20 м. Трассу, марку и сечение кабеля уточнить проектом; 

- до осуществления работ подготовить проектную документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года,

- в необходимых случаях осуществлять урегулирование отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично  между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и земельным участком заявителя; 

10.2. Выполнение мероприятий по обеспечению учета электрической энергии (мощности): 

10.2.1. Сетевая организация производит установку в точке присоединения (на границе балансовой принадлежности) прибора учета электрической энергии и мощности (трехфазный полукосвенного включения с ТТ), для энергопринимающих устройств заявителя, либо в ином месте, в соответствии с Правилами технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. 

10.2.2. Установка и допуск в эксплуатацию установленного прибора учета сетевая организация осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). 

10.2.3. После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета сетевая организация  размещает в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию. Со дня размещения указанного акта прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности). 

По настоящее время обязательства не исполнены, что Предприятием не оспаривается. 

Предприятие указало на принятие мер для исполнения обязательств, представило договор подряда от 16.06.2025 № ОКС-16/2025 на выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объектов. 

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Предприятие как профессиональный участник рынка в сфере энергоснабжения (сетевая организация, осуществляющая деятельность по технологическому подключению в соответствии со статьей 26 Закона N 35-ФЗ), заключая возмездный договор технологического присоединения к распределительным электрическим сетям, приняло на себя риски его исполнения; договор от 16.06.2025 № ОКС-16/2025 заключен уже после истечения срока на выполнение обязательств перед Обществом. 

Предприятием не представлено документов, свидетельствующих о принятии  исчерпывающих мер с даты заключения договора с Обществом для исполнения обязательств. Технические условия были выданы самим Предприятием.

Мероприятия по договору технологического присоединения в указанный срок не выполнены.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленный является императивным.

Нормами действующего законодательства не предусмотрено оснований для продления указанного срока, либо оснований, освобождающих сетевую организацию об обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на технологическое присоединение объекта заявителя.

Нарушение сроков, гарантированных Правилами N 861, ущемляет права лиц, обратившихся в сетевую организацию на своевременное подключение к электрическим сетям.

В соответствии с требованиями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они  ею  прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Руководствуясь статьями 9, 64-66, 71, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Обязать муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей» (ИНН: 

<

***>) исполнить обязательства по договору от 25.07.2024 № 24/з-282 в части исполнения мероприятий, установленных пунктами 10.1 и 10.2 технических условий, в срок, не превышающий 30 дней со дня вступления в силу решения суда по настоящему делу. 

Взыскать с муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических сетей» (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «А.Г.А Строй» (ИНН: 

<

***>) 50 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                                                                            Иноземцева О.С.