ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№09АП-15228/2020

Дело №А40-297980/19

г.Москва

11 июня 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 09 июня 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 11 июня 2020 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гончарова В.Я.,

судей Фриева А.Л., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ДСК-5"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2020

по делу №А40-297980/19,

по иску ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"

к ООО "ДСК-5"

о взыскании 13 197 522,67 руб.

При участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 27.02.2020,

от ответчика: ФИО3 генеральный директор.

У С Т А Н О В И Л:

Решением суда от 31.01.2020 присуждено к взысканию с ответчика в пользу истца задолженность по договору строительного субподряда № 1/16 Д (ЩЛЗ) от 01.10.2016 в размере 1.428.160,00 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 285.719,50 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 1.428.160,00 рублей, за период с 22.10.2019 по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженность по договору строительного субподряда № 3/16 Д (ЩЛЗ) от 01.10.2016 в размере 4.003.860,00 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 752.396,44 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 4.003.860,00 рублей, за период с 22.10.2019 по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженность по договору строительного субподряда № 9/17 Д (ЩЛЗ) от 04.08.2017 в размере 1.025.273,70 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 196.337,05 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 1.025.273,70 рублей, за период с 22.10.2019 по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженность по договору строительного субподряда № 10/17 Д (ЩЛЗ) от 04.08.2017 в размере 4.428.160,00 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 547.963,66 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 4.428.160,00 рублей, за период с 22.10.2019 по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, задолженность по договору строительного субподряда № 11/17 Д (ЩЛЗ) от 04.08.2017 в размере 471.264,00 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 58.388,32 рублей, компенсация расходов по оплате госпошлины в сумме 88.988,00 рублей.

При этом суд первой инстанции исходил из наличия оснований для удовлетворения заявленных требований.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой в которой просил отменить решение суда, в связи с неполным выяснением имеющих значение для дела обстоятельств, несоответствием выводов суда изложенных в решении обстоятельствам дела, неправильным применением норм материального права, приняв по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Отзыва на апелляционную жалобу в порядке ст.262 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) не поступало.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, приняв по делу новый судебный акт.

Представитель истца поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает их необоснованными, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы – отказать.

Проверив законность и обоснованность принятого решения в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного решения в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, между открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (генподрядчик) 01.10.2016г. заключен договор монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) № 1/16.

В соответствии с п. 1.1 раздела № 1 договора субподрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, из давальческих

материалов и оборудования генподрядчика (а именно материалы - обрамления дверей шахты лифтов и оборудование - лифты), предоставляемых субподрядчику на давальческой основе, полный комплекс работ под ключ по монтажу лифтового оборудования, а именно:

-монтаж нового лифтового оборудования,

-строительно-отделочные работы лифтовых шахт,

-строительно-отделочные работы машинного помещения

-пуско-наладочные работы лифтового оборудования,

-полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы,

-оформление декларации соответствия и регистрацию в Едином реестре деклараций соответствия Госстандарта

г/п 400 кг – 17 остановок – 5 лифтов

г/п 630 кг - 17 остановок - 5 лифтов

на объекте, расположенном по строительному адресу: М.О., 

<

...> позиция проекта планировки 3-27 (далее - объект), а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации (а именно паспорт на лифт), участвовать в передаче объекта эксплуатирующей организации, указанной генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и, при необходимости, установленной генподрядчиком, во вводе объекта в эксплуатацию (далее - работы). Сроки выполнения субподрядчиком работ были определены сторонами в п. 3.1. договора.

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора, и составляет 6 919 000 руб., в т.ч. НДС 18 % - 1 055 440,68 руб., определяется на основании протокола согласования договорной стоимости. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно п.п. 2.4.1 и 2.4.2 договора генподрядчик выплачивает субподрядчику единовременно или по частям по своему усмотрению аванс в размере не более 30% от цены договора. Субподрядчик обязан выставить соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения суммы аванса по форме, установленной законом. Оплата оставшейся суммы, за фактически выполненный и принятый объем работ в течение 30-ти (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Госкомстатом России - постановление № 100 от 11.11.1999 года.) и после получения генподрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Сдача и приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке, определенном сторонами в разделе 6 договора.

ОАО «ЩЛЗ» надлежащим образом исполнило договор, произвело комплекс работ по монтажу, пуск-наладке лифтового оборудования и иных работ по договору на общую сумму 1428160 руб., что подтверждается КС-2 от 31.12.2016г. и КС-3 от 31.12.2016г. (сумма 137 850 руб.); КС-2 от 28.02.2017г. и КС-3 от 28.02.2017г. (сумма 1 290 310 руб.).

При этом генподрядчик не заявлял о наличии недостатков в выполненных работах и не подписывал с субподрядчиком протокол о недостатках (дефектах), акты приемки были подписаны генподрядчиком.

Однако генподрядчик не исполнил обязанность по оплате выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

В связи с чем, у ООО «ДСК-5» перед ОАО «ЩЛЗ» по договору возникла задолженность в сумме 1 428 160 руб.

Также, между открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (генподрядчик) 01.10.2016г. заключен договор монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) № 3/16.

В соответствии с п. 1.1 раздела № 1 договора субподрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, из давальческих материалов и оборудования генподрядчика (а именно материалы - обрамления дверей шахты лифтов и оборудование - лифты), предоставляемых субподрядчику на давальческой основе, полный комплекс работ под ключ по монтажу лифтового оборудования, а именно:

-монтаж нового лифтового оборудования,

-строительно-отделочные работы лифтовых шахт,

-строительно-отделочные работы машинного помещения

-пуско-наладочные работы лифтового оборудования,

-полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы,

-оформление декларации соответствия и регистрацию в Едином реестре деклараций соответствия Госстандарта

г/п 400 кг - 17 остановок - 5 лифтов

г/п 630 кг - 17 остановок - 5 лифтов

на объекте, расположенном по строительному адресу: г. Обнинск, мкр. Заовражье, кв.5 корп.10, а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации (а именно паспорт на лифт), участвовать в передаче объекта эксплуатирующей организации, указанной генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и, при необходимости, установленной генподрядчиком, во вводе объекта в эксплуатацию (далее - работы). Сроки выполнения субподрядчиком работ были определены сторонами в п. 3.1. договора.

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора, и составляет 6 919 000 руб. (Шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч рублей), в т.ч. НДС 18 % - 1 055 440,68 рублей, определяется на основании протокола согласования договорной стоимости. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно п.п. 2.4.1 и 2.4.2 договора генподрядчик выплачивает субподрядчику единовременно или по частям по своему усмотрению аванс в размере не более 30% от цены договора. Субподрядчик обязан выставить соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения суммы аванса по форме, установленной законом. Оплата оставшейся суммы, за фактически выполненный и принятый объем работ в течение 30-ти (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Госкомстатом России - постановление № 100 от 11.11.1999 года.) и после получения генподрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Сдача и приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке, определенном сторонами договора в разделе 6 договора.

ОАО «ЩЛЗ» надлежащим образом исполнило договор, произвело комплекс работ по монтажу, пуск-наладке лифтового оборудования и иных работ по договору на общую сумму 4 003 860 руб., что подтверждается КС-2 от 28.02.2017г., КС-3 от 28.02.2017г. (сумма 529 303,50 руб.); КС-2 от 31.03.2017г., КС-3 от 31.03.2017г. (сумма 1 888 887,00 руб.); КС-2 от 30.04.2017г., КС-3 от 30.04.2017г. (сумма 1 585 669,50 руб.).

При этом генподрядчик не заявлял о наличии недостатков в выполненных работах и не подписывал с субподрядчиком протокол о недостатках (дефектах), акты приемки были подписаны генподрядчиком.

Однако генподрядчик не исполнил обязанность по оплате выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

В связи с чем, у ООО «ДСК-5» перед ОАО «ЩЛЗ» по договору возникла задолженность в сумме 4 003 860 руб.

Также, между открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (генподрядчик) 04.08.2017г. заключен договор монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) № 9/17.

В соответствии с п. 1.1 раздела № 1 договора субподрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, из давальческих материалов и оборудования генподрядчика (а именно материалы - обрамления дверей шахты

лифтов и оборудование - лифты), предоставляемых субподрядчику на давальческой основе, полный комплекс работ под ключ по монтажу лифтового оборудования, а именно:

-монтаж нового лифтового оборудования,

-строительно-отделочные работы лифтовых шахт,

-пуско-наладочные работы лифтового оборудования,

-полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы,

-оформление декларации соответствия и регистрацию в Едином реестре деклараций соответствия Госстандарта

г/п 400 кг - 27 остановок - 1 лифт

г/п 1000 кг - 27 остановок - 2 лифта (лифты без машинного помещения)

на объекте, расположенном по строительному адресу: МО, г. Одинцово, мкр.8 корп.4, а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации (а именно паспорт на лифт), участвовать в передаче объекта эксплуатирующей организации, указанной генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и, при необходимости, установленной генподрядчиком, во вводе объекта в эксплуатацию (далее - работы). Сроки выполнения субподрядчиком работ были определены сторонами в п. 3.1. договора.

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора, и составляет 3 296 700 рублей, определяется на основании протокола согласования договорной стоимости. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно п.п. 2.4.1 и 2.4.2 договора генподрядчик выплачивает субподрядчику единовременно или по частям по своему усмотрению аванс в размере не более 30% от цены договора. Субподрядчик обязан выставить соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения суммы аванса по форме, установленной законом. Оплата оставшейся суммы, за фактически выполненный и принятый объем работ в течение 30-ти (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Госкомстатом России - постановление № 100 от 11.11.1999 года.) и после получения генподрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Сдача и приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке, определенном сторонами договора в разделе 6 договора.

ОАО «ЩЛЗ» надлежащим образом исполнило договор, произвело комплекс работ по монтажу, пуск-наладке лифтового оборудования и иных работ по договору на общую сумму

1 025 273, 70 руб.., что подтверждается КС-2 от 28.02.2018г., КС-3 от 28.02.2018г. (201 098,70 руб.); КС-2 от 31.03.2018г., КС-3 от 31.03.2018г. (сумма 824 175,00 руб.)

При этом генподрядчик не заявлял о наличии недостатков в выполненных работах и не подписывал с субподрядчиком протокол о недостатках (дефектах), акты приемки были подписаны генподрядчиком.

Однако генподрядчик не исполнил обязанность по оплате выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

В связи с чем, у ООО «ДСК-5» перед ОАО «ЩЛЗ» по договору возникла задолженность в сумме 1 025 273, 70 руб.

Также, между открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (генподрядчик) 04.08.2017г. заключен договор монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) № 10/17.

В соответствии с пунктом №1. 1 раздела № 1 договора «Предмет договора» субподрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, из давальческих материалов и оборудования генподрядчика (а именно материалы - обрамления дверей шахты лифтов и оборудование - лифты), предоставляемых субподрядчику на давальческой основе, полный комплекс работ под ключ по монтажу лифтового оборудования, а именно:

-монтаж нового лифтового оборудования,

-строительно-отделочные работы лифтовых шахт,

-строительно-отделочные работы машинного помещения,

-пуско-наладочные работы лифтового оборудования,

-полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы,

-оформление декларации соответствия и регистрацию в Едином реестре деклараций соответствия Госстандарта

г/п 400 кг - 17 остановок - 5 лифтов

г/п 630 кг - 17 остановок - 5 лифтов

на объекте, расположенном по строительному адресу: 

<

...>, а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации (а именно паспорт на лифт), участвовать в передаче объекта эксплуатирующей организации, указанной генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и, при необходимости, установленной генподрядчиком, во вводе объекта в эксплуатацию (далее - работы). Сроки выполнения субподрядчиком работ были определены сторонами в п. 3.1. договора.

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора, и составляет 6 919 000,00 рублей, определяется на основании протокола согласования договорной стоимости. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно п.п. 2.4.1 и 2.4.2 договора генподрядчик выплачивает субподрядчику единовременно или по частям по своему усмотрению аванс в размере не более 30% от цены договора. Субподрядчик обязан выставить соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения суммы аванса по форме, установленной законом. Оплата оставшейся суммы, за фактически выполненный и принятый объем работ в течение 30-ти (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Госкомстатом России - постановление № 100 от 11.11.1999 года.) и после получения генподрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Сдача и приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке, определенном сторонами договора в разделе 6 договора.

ОАО «ЩЛЗ» надлежащим образом исполнило договор, произвело комплекс работ по монтажу, пуск-наладке лифтового оборудования и иных работ по договору на общую сумму 4 428 160 руб., что подтверждается КС-2 от 31.10.2017г., КС-3 от 31.10.2017г. (сумма 145 299,00 руб.); КС-2 от 30.11.2017г., КС-3 от 30.11.2017г. (сумма 1 162 392,00 руб.); КС-2 от 29.12.2017г., КС-3 от 29.12.2017г. (сумма 1 113 959,00 руб.); КС-2 от 31.01.2018г., КС-3 от 31.01.2018г. (сумма 1 314 610,00 руб.); КС-2 № 28.02.2018г., КС-3 от 28.02.2018г. (сумма 691 900,00 руб.)

При этом генподрядчик не заявлял о наличии недостатков в выполненных работах и не подписывал с субподрядчиком протокол о недостатках (дефектах), акты приемки были подписаны генподрядчиком.

Однако генподрядчик не исполнил обязанность по оплате выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

В связи с чем, у ООО «ДСК-5» перед ОАО «ЩЛЗ» по договору возникла задолженность в сумме 4 428 160 руб.

Также, между открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат №5» (генподрядчик) 04.08.2017г. заключен договор монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) № 11/17.

В соответствии с п. 1.1 раздела № 1 договора субподрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, из давальческих

материалов и оборудования генподрядчика (а именно материалы - обрамления дверей шахты лифтов и оборудование - лифты), предоставляемых субподрядчику на давальческой основе, полный комплекс работ под ключ по монтажу лифтового оборудования, а именно:

-монтаж нового лифтового оборудования,

-строительно-отделочные работы лифтовых шахт,

- строительно-отделочные работы машинных помещений,

-пуско-наладочные работы лифтового оборудования,

-полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы,

-оформление декларации соответствия и регистрацию в Едином реестре деклараций соответствия Госстандарта

г/п 400 кг - 17 остановок - 2 лифта

г/п 630 кг - 17 остановок - 2 лифта

на объекте, расположенном по строительному адресу: 

<

...>, а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации (а именно паспорт на лифт), участвовать в передаче объекта эксплуатирующей организации, указанной генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и, при необходимости, установленной генподрядчиком, во вводе Объекта в эксплуатацию (далее - работы). Сроки выполнения субподрядчиком работ были определены сторонами в п. 3.1. договора.

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора, и составляет 2 767 600 рублей, определяется на основании протокола согласования договорной стоимости. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

Согласно п.п. 2.4.1 и 2.4.2 договора генподрядчик выплачивает субподрядчику единовременно или по частям по своему усмотрению аванс в размере не более 30% от цены договора. Субподрядчик обязан выставить соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения суммы аванса по форме, установленной законом. Оплата оставшейся суммы, за фактически выполненный и принятый объем работ в течение 30-ти (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Госкомстатом России - постановление № 100 от 11.11.1999 года.) и после получения генподрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Сдача и приемка выполненных работ производится путем подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке, определенном сторонами договора в разделе 6 договора.

ОАО «ЩЛЗ» надлежащим образом исполнило договор, произвело комплекс работ по монтажу, пуск-наладке лифтового оборудования и иных работ по договору на общую сумму 471 264 руб., что подтверждается КС-2 от 29.12.2017г., КС-3 от 29.12.2017г. (471 264 руб.)

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить задолженность, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

Истцом также заявлялось требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере: по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор строительного субподряда) № 1/16 от 01.10.2016г. - 285 719, 50 руб. - проценты за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по состоянию на 21.10.2019г.; по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор строительного субподряда) № 3/16 от 01.10.2016г. - 752 396, 44 руб. -проценты за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по состоянию на 21.10.2019 г.; по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор строительного субподряда) - № 9/17 от 04.08.2017г. - 196 337, 05 руб. - проценты за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по состоянию на 21.10.2019 г.; по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) -№ 10/17 от 04.08.2017г. - 547 963, 66 руб. - проценты за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по состоянию на 21.10.2019 г.; по договору монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования (договор субподряда) -№ 11/17 от 04.08.2017г. - 58 388, 32 руб. - проценты за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по состоянию на 21.10.2019 г., исходя из ставки банковского процента по вкладам физических лиц, существующей в месте нахождения истца, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды согласно представленного расчета.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции, исследовав имеющие значение для дела обстоятельства, полно, детально, подробно, достоверно описав представленные в материалы дела доказательства, верно оценил в порядке ст.71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, правильно применив нормы материального, процессуального права сделал выводы, соответствующие обстоятельствам дела, принял по делу правомерный и обоснованный судебный акт, досконально описав необходимые обстоятельства дела, согласно которым сделал правильные выводы.

В соответствии с п.1 ст.702 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст.720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть или принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случае, если в акте, либо в ином документе, удостоверяющем приемку были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Основанием для возникновения обязательства ответчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ (ст.ст.711, 720, 746, 753 ГК РФ).

В силу ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст.310 ГК РФ).

Доказательств, полной и своевременной оплаты выполненной части работ, на взыскиваемую по суду сумму, ответчик суду первой инстанции в порядке ч.1 ст.65 АПК РФ, не представил.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч.1 ст.65 , ч.2 ст.9 АПК РФ).

Таким образом, суд первой инстанции правильно установил сумму задолженности ответчика, а также ввиду отсутствия доказательств погашения долга правомерно взыскал его, проценты, в том числе на будущий период с ответчика.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что исходя из положений ч.3 ст.158 АПК РФ, отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью суда, а также в силу ст.156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие, в связи с чем довод ответчика о том, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания, подлежит отклонению, с учетом того, что заявленные им причины для отложения судебного заседания не могут быть признаны уважительными.

Утверждения ответчика о том, что акты приемки выполненных работ от 31.12.2016 и 28.02.2017 подписаны не уполномоченным на то лицом, подлежат отклонению, как противоречащие представленным в материалы дела документам.

При таких обстоятельствах принятое по настоящему делу судебное решение является законным, обоснованным и мотивированным.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта в порядке ч.4 ст.270 АПК РФ, не допущено.

Понесенные истцом расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при обращении в суд с иском, правомерно взысканы с ответчика в порядке ч.1 ст.110 АПК РФ.

Расходы по оплате госпошлины за подачу апелляционной жалобы распределяются согласно ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2020 по делу №А40-297980/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:         В.Я. Гончаров 

Судьи:  А.Л. Фриев 

       О.Н. Семикина 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.