405/2022-216135(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  14 декабря 2022 года А46-16081/2022  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Пантелеевой С.С., при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании исковое заявление федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный  университет (СИБАДИ)» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644080, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Транссвязьметалл» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644092, 

<

...>) об обязании исполнить гарантийные обязательства,  

в заседании суда приняли участие: от истца - ФИО2, по доверенности № 30 от 03.10.2022,  от ответчика - не явились, извещены. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Транссвязьметалл» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644092, 

<

...>) с 01.04.2023г. по 01.08.2023г. (весенне-летний период 2023 года) безвозмездно  исполнить гарантийные обязательства по договору № Ф.2019.497452 от 13.08.2019 по  капитальному ремонту общежития № 2 по адресу: 

<

...>, а  именно:  

- фасад: устранить растрескивание, отслоение и шелушение штукатурного и покрасочного  слоя со стороны дворового фасада; устранить отслоение и обрушение облицовочного камня  (доломитовые плиты) на цокольной части фасада; устранить отслоение и обрушение карниза  на главном фасаде на месте крепления водосточной системы; устранить замечания по участку  просевшего цоколя (на углу со стороны главного фасада и левого торца);  

- отмостка: устранить замечания по поперечному уклону отмостки здания (проседание,  растрескивание, частичное разрушение); устранить замечания по бордюрному камню  (отходит от отмостки);  

- тротуар: устранить замечания со стороны главного фасада (провалы на тротуаре), устранить  замечания (вспучивания, сползание бетонной тротуарной плитки); устранить замечания  (сдвиг и сползание бордюрного камня от тротуарной дорожки);  

- крыльцо: закрепить тактильные полосы на крыльце главного входа; восстановить покрытие  из керамогранитной плитки (на крыльцах главного фасада и со стороны дворового фасада  левое крыльцо отслоение); восстановить покрытие по керамогранитной плитки (на крыльцах  главного фасада и дворового фасада (правое крыльцо) имеются сколы и трещины);  

 - водосточная система: установить горизонтальный сегмент водосточной системы; закрепить  нижние части водосточных труб; установить держатели труб на клиновидные замки;  

- пандус, ворота и ограждение: устранить замечания по металлическим конструкциям  (ограждение, ворота, пандус) следы коррозии и отслоения окрасочного слоя).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Транссвязьметалл» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644092, 

<

...>) в пользу федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный  университет (СИБАДИ)» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644080, 

<

...>) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может  быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

Судья С.С. Пантелеева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.03.2022 7:16:00Кому выдана Пантелеева Светлана Станиславовна