72/2018-400053(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-20226/2017

г. Ярославль

18 декабря 2018 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дыбцыной Е.А. 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью Управляющая компания "Рыбинск" (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>)  

к Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов  Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранения недостатков работ третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕР-ЛЮКС" 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Региональный фонд содействия капитальному ремонту г. Ярославля в  трехмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу устранить  недостатки, допущенные при проведении капитального ремонта кровли дома № 57 по  ул.Крестовой в городе Рыбинске Ярославской области и провести следующие работы:  

1. Произвести: ремонт аварийных стопил из бревен; замену поврежденных элементов,  выровнять деформированные (с прогибом) стропильных ног, восстановление плотности  стыков и сопряжений элементов стропильной системы (в том числе путем перемонтажа  отдельных элементов и замены с целью исключения зазоров в узлах, соблюдению  допустимых расстояний между средствами креплений), постановку дополнительных  средств креплений (в узлах новых элементов с наличием зыбкости соединений), демонтаж  элементов усиления, не предусмотренных проектом (замена усиляемых элементов новыми  большего сечения);  

2. Выполнить постановку дополнительных крепежных элементов кровельного  покрытия к обрешетке в соответствии с положениями проекта: устройство  дополнительных рядов обрешетки до нужной ширины по проекту, устранение пороков  древесины на обрешетке (снятие обзола), замену элементов с неустранимыми пороками  древесины;  

3. Произвести ремонт кирпичной кладки вентканалов в уровне чердака (расчистку  участков стен, замену отдельных поврежденных участков с перевязкой новой кладки со  старой, заделку трещин цементным раствором);  

4. Произвести переустройство примыканий кровельного покрытия к выступающим  над кровлей конструкциям в соответствии с разработанными узлами проекта и  положениями НТД (типовыми узлами СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная  редакция СНиП 11-26-76». «Кровли. Руководство по проектированию, устройству,  правилам приемки и методам оценки качества»: Обеспечение плотности соединений друг  с другом путем устройства фальцевых соединений листов: выполнение фартуков в  

соответствии с положениями проекта: постановку герметизирующих прокладок согласно  проекту;  

5. Выполнить ремонт кирпичной кладки мест опирания стропильных конструкций; 

6. Произвести выполнение узлов соединения согласно проекту (путем смены вновь  установленных элементов мауэрлатов);  

7. Произвести выравнивание гидрозашитной подкровельной пленки;  

8. Выполнить переустройство конструкций слуховых окон для соблюдения  надлежащих габаритных размеров; замену жалюзийных решеток согласно проекту;  устройство стационарных лестниц окон; работы по смене и устройству люков доступа на  чердак согласно проекту;  

9. Выполнить стесывание участков кирпичной кладки в зоне карниза согласно  проекту;  

10. Выполнить переустройство конструкций вентилируемого конька согласно  проекту (для обеспечения требуемой площади конька); установку поддона;  

11. Произвести выравнивание водосточных желобов; подрезку стальных листов  карнизных свесов;  

12. Произвести выполнение элементов крепления ограждения в соответствии с  проектом; постановку дополнительных элементов жесткости (подкосов) ограждения;  ремонтное окрашивание элементов ограждения с подготовкой основания.  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с Регионального фонда содействия капитальному ремонту  многоквартирных домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Рыбинск"  (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате  госпошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его  в полном объеме), а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном  порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок при условии,  что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Ярославской области, в том числе посредством заполнения форм, размещенных на  официальном сайте суда в сети «Интернет».  

Судья Бессонова И.Ю.