Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-56857/2020

30 августа 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  24 августа 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  30 августа 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Герасимова М.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ГУП «Петербургский Метрополитен» (адрес: 190013, Санкт-Петербург, пр. Московский д. 28, ОГРН 

<

***>)

к Комитету  по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Караванная д. 9 корп. Л.А., ОГРН 

<

***>)

третьи лица: 

       1) Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» 

       2) Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства»

        3) временный управляющий Открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» ФИО2

об обязании устранить замечания в выполненных работах

 

при участии

- от истца: представитель ФИО3 по доверенности от 12.03.2021;

- от ответчика: представитель ФИО4 по доверенности от 23.12.2020;

- от третьих лиц: 1) представитель ФИО5 по доверенности от 08.02.2021; 2) представитель не явился (извещен); 3) представитель не явился (извещен);

установил:

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский Метрополитен» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к Комитету  по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга об обязании:

- передать техническую (технические паспорта, технические планы) и эксплуатационную (исполнительную) документацию в отношении Объекта (п. 2.2.2 Соглашения).

- обеспечить передачу в отношении объектов интеллектуальной собственности всех интеллектуальных прав, необходимых для правомерного использования объекта (при их наличии) (п. 2.2.8 Соглашения).

         - обеспечить в установленном действующим законодательством порядке устранение замечаний специализированных рабочих групп в отношении работ, предусмотренных государственным контрактом, выявленных при приемке объекта в эксплуатацию (Приложение №3 к Соглашению) (п.2.2.12 Соглашения), а именно:

1) Ликвидировать водопроявления в тоннелях, в местах водопроявлений (течи), произвести организованный отвод воды в дренажных лоток жесткого основания пути, в Перегонный тоннель "Проспект Славы" - "Международная".

2) Подключить питание НВУ-622 на сети 380 В по постоянной схеме в перегоне ст. «Международная»- «Проспект Славы».

3) Установить, подключить и произвести пусконаладку вентилятора электрощитовой в количестве -1шт, клапана с электроприводом -1шт., короба вентиляционной системы на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в электрощитовой вентиляционной шахты (ВШ) №622 в соответствии с рабочей документацией П/1770-5-22-1348-ОВ.

4) Выполнить пуско-наладочные работы управления В А-1,2 вентшахты 622: местное - со шкафов управления ШУВ-ПЧ-1, ШУВ-ПЧ-2 ВШ-622, дистанционное с АРМ ЭМД и АРМ ДСП. Выполнить маркировку силовых и контрольных кабелей, зазамление шкафов управления, шкафов питания, кабельной продукции вентшахты 622 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" ВА-1,2; ШУВ ПЧ-1,2 ВШ-622 в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-22-1348-ОВ; 11/1770-5-22-1667-ОВ; 11/1770-5-22-1555-ЭМ.

5) Провести аэродинамические испытания В А 1,2 вентшахты 622 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-22-1348-ОВ и предоставить необходимые документы (протоколы испытаний).

6) Провести испытания вибродиагностики В А 1,2 ВА-1,2 ВШ622 Перегон "Международная" - "Проспект Славы" 1/1770-5-22-1348-ОВ и предоставить необходимые документы (протоколы испытаний).

7) Закончить строительно-монтажные работы в вентшахте 622 на перегоне перегон "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-22-1348-ОВ; 11/1770-5-22-1667-ОВ.

8) Демонтировать строительные леса в стволе вентшахты 622 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-22-1611-АС.

9) Ликвидировать строительный мусор и демонтировать строительное оборудование из НВУ (нижний вентиляционный узел) "Международная" - "Проспект Славы" вентшахты 622 в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-22-1611-АС.

10) Передать исполнительную документацию на смонтированное оборудование и программное обеспечение шкафов управления вентагрегатами вентшахты 622 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/770-5-22-1639-АДУ.ЭМ, 11/1770-5-22-1555-ЭМ, 11/1770-5-22-1669-ЭМ,11_1770-5-22-1348-ОВ,11_1770-5-22-1545-ПС, 11/1770-5-22-1611-АС.

11) Смонтировать система КАС ДУ ЭМ КП в электрощитовой вентахты 622, установить АРМ ДСП ст. "Международная", проложить кабели от КП Электрощитовая ВШ-622 до КАС ДУ ст. "Международная" в вентахте 622 на перегоне "Международная" -"Проспект Славы", вывести, смонтировать и подключить управление и сигнализацию на АРМ ДСП ст. "Международная" и АРМ ЭМД в соответствии с 11/1770-5-22-1639-АДУ.ЭМ.

12) Смонтировать и подключить рабочее и аварийное освещение вентшахты 622 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-22-1555-ЭМ, 11/1770-5-22-1669-ЭМ.

13) Выполнить работы по монтажу и пусконаладке противодымных ворот, установить электропривод, подключить управление и питание в створе НВУ-623, смонтировать шкаф БУ-ВПР НВУ-623, кабельную продукцию (силовые и контрольные кабели) НВУ-623 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1397-ОВ; 11/1770-5-22-654-АДУ.ЭМ.

14) Подключить к системе КАС ДУ противодымные ворота в НВУ-623, вывести на АРМ ДСП (автоматизированное рабочее место дежурного по станции) ст. "Международная" и АРМ ЭМД (диспетчер электромеханической службы) управление и сигнализацию шкафа БУ-ВПР на перегоне ст. "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1397-ОВ; 11/1770-5-22-654-АДУ.ЭМ.

15) Передать исполнительную документацию на смонтированное оборудование: противодымные ворота в створе НВУ-623 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1397-ОВ; 11/1770-5-22-654-АДУ.ЭМ.

16) Провести испытания на водоотдачу ХПВ (хозяйственно-пожарный водопровод) 1,2 путь на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1223-ВК.

17) Выполнить теплоизоляцию в районе вентшахты 623 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" ХПВ 1, 2 путь в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1223-ВК.

18) Передать исполнительную документацию ХПВ 1, 2 путь, перегон "Международная" - "Проспект Славы"   11/1770-5-23-1223-ВК.

19) Выполнить строительно-монтажные работы на напорной линии в тоннеле в резервной скважине ОВУ-607 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1503-ВК.

20) Передать исполнительную документацию на ОВУ-607 резервная скважина на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1503-ВК; 11/1770-5-23-1510-ОВ.

21) Выполнить  строительно-монтажные  работы     на  СУ-618  на перегоне "Международная" - "Проспект Славы"   в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1456-ЭМ.

22) Смонтировать и подключить оборудование, смонтировать кабельную продукцию (силовые и контрольные кабели), расключить шкафы управления и шкафы питания в машинном отделении СУ-618 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1400-ВК; 11/1770-5-23-1417-ОВ; 11/1770-5-23-1456-ЭМ.

23) Передать исполнительную документацию на СУ-618 в перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1400-ВК; 11/1770-5-23-1417-ОВ; 11/1770-5-23-1456-ЭМ.

24) Выполнить строительно-монтажные работы на СУ-619 в перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1454-ЭМ.

25) Смонтировать оборудование и кабельную продукцию (силовые и контрольные кабели), расключить шкафы управления и шкафы питания в машинном отделении СУ-619 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1418-ВК; 11/1770-5-23-1415-ОВ; 11/1770-5-23-1454-ЭМ.

26) Передать исполнительную документацию СУ-619 в перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1418-ВК; 11/1770-5-23-1415-ОВ; 11/1770-5-23-1454-ЭМ.

27) Завершить строительно-монтажные работы на объекте СУ-620 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1512-ЭМ.

28) Смонтировать и подключить оборудование, кабельную продукцию (силовые и контрольные кабели) в машинном отделении СУ-620 на перегоне "Международная" -"Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1419-ВК; 11/1770-5-23-1416-ОВ; 11/1770-5-23-1512-ЭМ.

29) Передать исполнительную документацию на СУ-620 в перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1419-ВК; 11/1770-5-23-1416-ОВ; 11/1770-5-23-1512-ЭМ.

30) Закончить монтаж оборудования , подключить кабели управления в ЯУВ-2П1-2К в ВС-609 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1244-ОВ; 11/1770-5-23-1433-ЭМ.

31) Передать исполнительную документацию на ВС-609 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1244-ОВ; 11/1770-5-23-1433-ЭМ.

32) Смонтировать и подключить оборудование РУС, ЩС-0-1, ЯУ-2П1-2К, ЯТП, смонтировать и подключить кабельную продукцию (силовые и контрольные кабели) на ВС-608 в перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1244-ОВ; 11/1770-5-23-1718-ЭМ.

33) Передать исполнительную документацию на смонтированное оборудование на ВС-608 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1244-ОВ; 11/1770-5-23-1718-ЭМ.

34) Установить и подключить оборудование РУС, ЩС-0-1, ЯУ-2П1-2К, ЯТП, смонтировать кабельную продукцию (силовые и контрольные кабели) на ВС на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1244-ОВ; 11/1770-5-23-1447-ЭМ.

35) Передать исполнительную документацию на ВС на перегоне "Международная" -"Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией 11/1770-5-23-1244-ОВ; 11/1770-5-23-1447-ЭМ.

36) Смонтировать и подключить шкаф местного управления электрозадвижкой, силовой и контрольный кабели электрозадвижки, соединительный ящик (СЯ) подключения кабеля дистанционного управления, кабель дистанционного управления затвором и электрозадвижкой (КВБВнг-LS 14x1,5 L-400M), заделать кабельные гильзы в количестве 4 штук в железобетонном упоре затвора типа ЗТ-В-1507В на объекте - вентшахта 622 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией РД 11/1770-5-22-1735-ЭМ , РД Ф-22-1730-ЭУ.

37) Подключить силовые и контрольные кабели к шкафу управления затвором, сирены сигнальные -2шт., Смонтировать и подключить кабель дистанционного управления затвором (КВБВнг-LS 14X1,5 L-400M), соединительный ящик (СЯ) подключения кабеля дистанционного управления, заделать кабельные гильзы в железобетонном упоре затвора типа ЗТ-Д-1503А (4 шт.) вентшахты 622 на перегоне "Международная" - "Проспект Славы" в соответствии с рабочей документацией РД 11/1770-5-22-1669-ЭМ, РД Ф-22-1730-ЭУ.

38) Закрыть ствол шахты, установить металлическое ограждение (решетку), выполнить монтаж охранной сигнализации нижнего и верхнего вентузлов вентшахты 622.

Определением от 22.07.2020 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

         К участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен временный управляющий Открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» ФИО2

        Распоряжением от 29.04.2021 в связи с назначением судьи Нестерова С.А. на должность судьи Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, в соответствии со ст. 18 АПК РФ, дело № А56-56857/2020 передано для рассмотрения в производство судье Герасимовой М.С.

         В судебном заседании от 22.06.2021, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд,  в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В судебном заседании 17.08.2021 в порядке ст. 49 АПК РФ судом приняты уточнения исковых требований.

По ходатайству третьего лица 1 объявлен перерыв для ознакомления с уточненными требованиями.

Судебное заседание 24.08.2021 возобновлено после перерыва.

В порядке ст. 49 АПК РФ судом приняты уточнения исковых требований путем исключения из просительной части уточненных требований от 27.07.2021 пунктов 38-41.

Истец поддержал уточненные требования, представил фотофиксацию шахты.

Ответчик и третье лицо возражали против удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзывах.

         В связи с неполучением каких-либо ходатайств, судом было принято решение о рассмотрении спора по существу.

         Исследовав и оценив материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из текста искового заявления, ГУП «Петербургский метрополитен» (Предприятие) обратилось в суд с исковым заявлением к Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) о понуждении к исполнению обязательства в натуре в части обеспечения устранения замечаний рабочих групп, выявленных при приемке объекта: «Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга» от станции «Садовая» («Площадь Мира - III») до станции «Международная» («ул. Белы Куна»), с участком переключения от станции «Достоевская» до станции «Спасская» («Площадь Мира - II»), включая проектирование (Корректировка проекта, стадия РД), на 6-й и 7-й пусковые комплексы» (далее – Объект).

Во исполнение положений постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.02.2008 № 187 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Санкт-Петербурга и их передаче специализированным эксплуатирующим организациям» объект в соответствии с Соглашением о временной эксплуатации объекта № Ф1 от 01.10.2019, заключенным между Истцом и Ответчиком (далее – Соглашение), передан ГУП «Петербургский метрополитен»  во временную эксплуатацию.

Согласно п.2.2.2. КРТИ обязан передать Метрополитену техническую технические паспорта, технические планы) и эксплуатационную (исполнительную) документацию в отношении Объекта. Передачу документации осуществлять по акту приема-передачи в срок до 15.12.2019.  

В соответствии с п. 2.2.8 Соглашения предусмотрена обязанность КРТИ в срок до 31.12.2019 обеспечить передачу метрополитену в отношении объектов интеллектуальной собственности всех интеллектуальных прав, необходимых для правомерного использования объекта (при их наличии). 

В соответствии с п. 2.2.12. Соглашения КРТИ обязан обеспечить с привлечением подрядчика или третьих лиц в соответствии с действующим законодательством устранение замечаний специализированных рабочих групп в отношении работ, предусмотренных государственным контрактом, выявленных при приемке объекта в эксплуатацию (Приложение №3 к Соглашению), в установленные сроки.

  В связи с неисполнением КРТИ своих обязанностей нарушены права Предприятия:

-  на владение и пользование технической и эксплуатационной (исполнительной) документацией в отношении Объекта, 

- на владение и пользование объектами интеллектуальной собственности в соответствии с действующим в этой сфере законодательством, что может обусловить нарушение интеллектуальных прав Санкт-Петербурга, Предприятия и третьих лиц и повлечь негативные правовые последствия для Предприятия,

- на пользование Объектом, в том числе, движимым и недвижимым имуществом (включая сооружения, оборудования и устройства), указанным в Приложении № 1 и Приложении № 2 к Соглашению, в отношении которого Предприятие в соответствии с п.2.1.8 Соглашения обязано осуществлять по мере необходимости модернизацию и ремонт Объекта.

Неисполнение КРТИ обязанностей, установленных Соглашением, лишает Предприятие права осуществлять надлежащую эксплуатацию Объекта с целью осуществления безопасных и бесперебойных, с высокой культурой обслуживания перевозок пассажиров и получения прибыли, установленной п.2.1 Устава Предприятия. Кроме того, неисполнение КРТИ условий Соглашения препятствует передаче Объекта в хозяйственное ведение ГУП «Петербургский метрополитен».

У ГУП «Петербургский метрополитен» отсутствует возможность поручить выполнение обязательства третьему лицу либо выполнить его своими силами по основаниям, изложенным в исковом заявлении от 13.07.2020. Исполнение обязательств, установленных п.п.2.2.2, 2.2.8, 2.2.12 Соглашения, может быть обеспечено исключительно Ответчиком. 

По мнению истца, в настоящее время остаются не устраненными вышеуказанные замечания и не передана исполнительная документация, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на решение арбитражного суда от 24.06.2021 по делу №А56-83961/2020, где в удовлетворении требований Комитета к ОАО «Метрострой» об исполнении обязательств в натуре было отказано. Таким образом, исполнение требований заявленных ГУП «Петербургский Метрополитен» в рамках настоящего дела становится невозможным. Более того, требования о передаче технической документации не обоснованы, так как документация передана Дирекцией, что подтверждается реестрами передачи технической и эксплуатационной документации. При этом, у Комитета не возникла обязанность по передаче интеллектуальных прав, поскольку такие права отсутствуют.

Третье лицо 1 возражало против удовлетворения иска ввиду отсутствия доказательств поручения истцом Комитету работ, указанных в иске, а также обязанности ответчика исполнить спорные виды работ.

        Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренным  законом.

Пунктом 1 ст. 723 ГК РФ установлено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

ОАО «Метрострой» как генподрядчик представило акт об устранении замечаний от 13.05.2021, подписанный ГУП «Петербургский Метрополитен» (эксплуатирующая организация) и СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Вместе с этим, истцом не представлено доказательств свидетельствующих о наличии со стороны ответчика обязательств по выполнению спорных видов и объемов работ.

Более того, представленная истцом в судебном заседании 24.08.2021 фотофиксация не является достаточным и достоверным подтверждением наличия спорных замечаний на момент рассмотрения спора по существу.

Одновременно с этим, суд первой инстанции признал необоснованными требования ответчика в части обязания передачи технической (технические паспорта, технические планы) и эксплуатационной (исполнительной документации) документации по объекту (пункт 2.2.2 соглашения), поскольку документация передана Дирекцией Предприятию, что подтверждается представленными Дирекцией в материалы дела реестрами по передаче технической и эксплуатационной документации.

Требования истца об обязании передать Предприятию все интеллектуальные права, необходимых для правомерного использования объекта (при их наличии) также несостоятельны.

Требование о предоставлении документации не может быть абстрактным, каждый истребуемый документ должен  соотноситься с определенным видом работ и в действительности иметься у ответчика (как и наличествовать факт создания конкретного объекта интеллектуальной собственности).

         В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

         В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

         При указанных обстоятельствах, требования истца судом первой инстанции признаны необоснованными, в связи с чем, удовлетворению не подлежат.

         В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца. 

         Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                           Герасимова М.С.