41/2020-129382(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А13-11327/2020

город Вологда

23 декабря 2020 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области   

р е ш и л :

1. Внести следующие изменения в Договор комплексного освоения  территории в целях строительства жилья экономического класса № 1 от  15.05.2015:  

- пункт 2.2 Договора № 1 изложить в следующей редакции: «Срок  действия Договора – по 31.12.2035 года включительно».  

- Приложение к Дополнительному соглашению № 1 к Договору 1  «График осуществления мероприятий по освоению территории» изложить в  новой редакции следующего содержания:  

13  

35:24:0502010:101  

Улично-дорожная сеть  

2021 

2035 

14  

35:24:0502010:102  

Улично-дорожная сеть  

2021 

2035 

15  

35:24:0502010:103  

12-16 этажный жилой дом 

встроенно-пристроенные  

помещения 

2029 

2033 

16  

35:24:0502010:104  

12 этажный жилой дом  

2030 

2033 

17  

35:24:0502010:105  

9-12 этажный жилой дом  

2031 

2035 

18  

35:24:0502010:106  

Улично-дорожная сеть  

2021 

2035 

19  

35:24:0502010:107  

9 этажный жилой дом  

2032 

2034 

20  

35:24:0502010:108  

9 этажный жилой дом детский сад  

2033 

2035 

21  

35:24:0502010:109  

9 этажный жилой дом  

2033 

2035 

22  

35:24:0502010:110  

Ледовая арена с физкультурно-

оздоровительным комплексом  

2029 

2035 

23  

35:24:0502010:111  

12-16 этажный жилой дом 

встроенно-пристроенные  

помещения 

2027 

2031 

24  

35:24:0502010:112  

12 этажный жилой дом встроенно-

пристроенные помещения  

2028 

2032 

25  

35:24:0502010:113  

12-16 этажный жилой дом  

2029 

2033 

26  

35:24:0502010:114  

12-16 этажный жилой дом  

2030 

2034 

27  

35:24:0502010:115  

Автостоянки наземные открытого  типа  

2022 

2035 

28  

35:24:0502010:116  

Улично-дорожная сеть 

2021 

2035 

2. Внести следующие изменения в Договор комплексного освоения  территории в целях строительства жилья экономического класса № 2 от  15.05.2015:  

- пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции: «Срок  действия Договора – по 31.12.2035 включительно».  

- Приложение к Дополнительному соглашению № 1 к Договору 1  «График осуществления мероприятий по освоению территории» изложить в  новой редакции следующего содержания:  

 № по  генпл 

ану 

Кадастровый 

номер 

Мероприятия 

Сроки строительства и 

ввода в эксплуатацию  

1 

2 

7 

начало 

окончание  

1 

35:24:0502010:73  

9 этажный жилой дом  

2016  

2019 

2 

35:24:0502010:75  

9 этажный жилой дом  

2016  

2020 

3 

35:24:0502010:76  

9 этажный жилой дом  

2018  

2020 

4 

35:24:0502010:77  

9 этажный жилой дом  

2016  

2017 

5 

35:24:0502010:71  

10-16 этажный жилой дом  

2016  

2027 

6 

35:24:0502010:71  

3-этажная автомобильная парковка 

2029  

2035 

7 

35:24:0502010:71  

Встроенно-пристроенные  

помещения 

2016  

2018 

8 

35:24:0502010:72  

Улично-дорожная сеть  

2016  

2035 

9 

35:24:0502010:74  

16 этажный жилой дом  

2030  

2035 

10 

35:24:0502010:74  

Встроенно-пристроенные  

2020  

2022 

помещения 

11 

35:24:0502010:74  

Встроенно-пристроенные  

помещения 

2027  

2028 

12 

35:24:0502010:78  

10-16 этажный жилой дом  

2028  

2033 

13 

35:24:0502010:78  

Встроенно-пристроенные  

помещения 

2025  

2026 

14 

35:24:0502010:78  

Встроенно-пристроенные  

помещения 

2023  

2024 

15 

35:24:0502010:79  

Детский сад 

2022  

2026 

16 

35:24:0502010:80  

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном  

2029  

2035 

17 

35:24:0502010:81  

Открытая парковка  

2021  

2035 

18 

35:24:0502010:82  

Улично-дорожная сеть  

2021  

2035 

19 

35:24:0502010:83  

Улично-дорожная сеть  

2016  

2035 

20 

35:24:0502010:84  

Улично-дорожная сеть  

2018  

2035 

21 

35:24:0502010:85  

Улично-дорожная сеть  

2016  

2035 

22 

35:24:0502010:86  

Шиномонтажный комплекс  

2018  

2035 

23 

35:24:0502010:87  

Благоустройство жилого дома 

2021  

2022 

24 

35:24:0502010:88  

16 этажный жилой дом  

2018  

2025 

25 

35:24:0502010:88  

3-этажная автомобильная парковка 

2026  

2035 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия через  Арбитражный суд Вологодской области.  

Судья Т.Б. Виноградова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 21.05.2020 5:37:16

Кому выдана Виноградова Татьяна Борисовна