Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-5151/2021

г. Рязань

12 июля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 06 июля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 12 июля 2022 года.

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Ушаковой И.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело  по исковому заявлению  Управления по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (ОГРН 

<

***>; 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью  группа компаний "Альянс" (ОГРН  

<

***>; 

<

...>) 

об обязании устранить недостатки работ, выявленные в период гарантийного срока, 

 

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности №94/04 от 17.05.2022, предъявлен диплом в подтверждение наличия высшего юридического образования, личность установлена на основании предъявленного паспорта.  

 

установил:

Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (ОГРН 

<

***>; Рязанская область, г. Касимов) обратилось с иском  к обществу с ограниченной ответственностью  группа компаний "Аль-янс" (ОГРН  

<

***>; Рязанская область, г. Спас-Клепики об обязании устранить недостатки работ, выявленные в период гарантийного срока, с учетом уточнения требования от 08.06.2022 истец просит:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью  группа компаний "Альянс" (ОГРН  

<

***>; 

<

...>)  безвозмездно устранить выявленные в пределах гарантийного срока следующие дефекты покрытия асфальтобетонного полотна:

Контракт  № 0859200001118004273 от 02 июля 2018 года

по ул. Рязанский спуск и участка по ул. Набережная г. Касимова (от пересечения с ул. Рязанский спуск до д. 42) 

- выбоины 4 штуки;

- выкрашивание поверхности покрытия; 

-поперечные, продольные трещины;

 

Контракт   № 0859200001118007626 от 27 августа 2018 года 

по ул.   Индустриальная г. Касимова (от АЗС до пункта технического осмотра) 

-выбоины 39 штук;

- выкрашивание поверхности покрытия; -поперечные, продольные трещины;

- вспучивание, колейность поверхности покрытия;

 

Контракт №0859200001118007816 от 27 августа 2018 года 

по ул. Илюшкина (от пересечения с ул. Советская до 

<

...> (от пересечения с ул. Советская до 

<

...> (от пересечения с ул. Большакова до пересечения с ул. Губарева) и ул. Губарева от д. 2 до пересечения с пл. Соборная) г. Касимова

- разрушение стыков примыкание с ул. Советской

 

Ответчик требование не признает.

Из материалов дела следует: между Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью Группа компаний «Альянс» (далее - Подрядчик) были заключены следующие муниципальные контракты (далее - Контракт) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог:

по ул. Рязанский спуск и участка по ул. Набережная г. Касимова (от пересечения с ул. Рязанский спуск до д. 42) контракт № 0859200001118004273 от 02 июля 2018 года (по результатам электронного аукциона на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0859200001118004273-3 от 14 июня 2018 года);

по ул. Индустриальная г. Касимова (от АЗС до пункта технического осмотра) контракт № 0859200001118007626 от 27 августа 2018 года (по результатам электронного аукциона на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0859200001118007626 - 1 от 14.08.2018);

по ул. Илюшкина (от пересечения с ул. Советская до 

<

...> (от пересечения с ул. Советская до 

<

...> (от пересечения с ул. Большакова до пересечения с ул. Губарева) и ул. Губарева (от д. 2 до пересечения с пл. Соборная) г. Касимова контракт № 0859200001118007816 от 27 августа 2018 года (по результатам электронного аукциона на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0859200001118007816 - 1 от 14.08.2018 года) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно разделу 9 «Гарантийные обязательства» контракта, гарантии качества распространяются на все работы, выполненные по Контракту. Выявленные дефекты в период гарантийной эксплуатации объекта Подрядчик обязан устранять за свой счет. 

Согласно п. 9.7 муниципального контракта течение гарантийного срока приостанавливается с момента обнаружения Заказчиком дефектов до подписания между сторонами акта выполненных работ по устранению дефектов.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших на объекте, составляет:

- основание дорожной одежды - 6 лет;

- асфальтобетонное покрытие - 5 лет;

со дня подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ.

В ходе эксплуатации в период течения гарантийного срока Заказчиком обнаружены недостатки оплаченных по контрактам работ (платежные поручения - л.д.28, 49-53).

Согласно акту 08.04.2021 года было произведено обследование автомобильных дорог в рамках муниципальных контрактов подрядных организаций, совместно с сотрудниками УКС и ЖКХ администрации г. Касимов и членами комиссии, где были выявлены дефекты покрытия асфальтобетонного полотна,

- разрушение стыка в районе 

<

...>;

- образование продольных и поперечных трещин, выкрашивание поверхности в районе д. №7 Рязанский спуск;

- просадка и выкрашивание поверхности с образованием продольой трещины в районе д. №8, д. №45 (ул. Набережная)

- поперечные трещины на участке в районе АЗС ул. Индустриальная;

- выкрашивание покрытия в районе кладбища ул. Индустриальная;

- на участке дороги от кладбища до станции тех. осмотра образовались: выбоины в количестве 11 (одиннадцати) штук, выкрашивание поверхности покрытия, обкрашивание кромки дороги , просадка дорожного покрытия (напротив пилорамы) ул. Индустриальная;

- разрушение стыка на перекрестке ул. Плюшкина с ул. Советская;

- просадка дорожного покрытия в районе 

<

...> в районе 

<

...>;

- образование выбоины напротив 

<

...>. 

Заказчиком были направлены письма № 01-06/513 от 14.04.2021, № 01-06/512 от 14.04.2021г. об установленных дефектах асфальтобетонного покрытия, образовавшиеся в период гарантийного срока, которые необходимо устранить до 30.04.2021г. Ответ от ООО ГК «Альянс» на данное письмо не поступал.

12.05.2021 года сотрудниками УКС м ЖКХ администрации муниципального образования - городской округ город Касимов повторно было направлено письмо № 01-06/631 от 12.05.2021г. об устранении дефектов асфальтобетонного покрытия, срок устранения до 14.05.2021 года.

Вышеуказанные дефекты ООО ГК «Альянс» до настоящего времени не устранило.

В ходе судебного разбирательства истец уточнил перечень дефектов, подлежащих устранению в соответствии с актом от  28.04.2022.

В соответствии с пунктом 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Фе-дерации (далее - ГК РФ) обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В рассматриваемом случае обязательства сторон возникли из муниципального контрактов: № 0859200001118004273 от 02 июля 2018 года, № 0859200001118007626 от 27 августа 2018 года, № 0859200001118007816 от 27 августа 2018 года.

 

Указанные контракты являются договорами подряда и регулируется нормами главы 37 ГК РФ, а также Федеральным Законом №94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона обя-зуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее ре-зультат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ  по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муни-ципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и не-производственного характера работы и передать их государственному или муни-ципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктом 1 статьи 722 ГК РФ определено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Пунктом 1 статьи 723 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда работа вы-полнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими ре-зультат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соот-ветствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ).

В обоснование исковых требований истцом представлен акт обследования ав-томобильных дорог от 28.04.2022, в котором отражены  дефекты выполненных ответчиком работ в рамках перечисленных муниципальных контрактов. Данное обследование проведено в присутствие представителя ответчика. 

Запись в акте и доводы ответчика в судебном заседании о том, что выкрашивание поверхности покрытия, поперечные трещины, разрушение стыков является естественным износом, судом в качестве объективного основания для отказа в удовлетворении иска  не принимаются, поскольку не подтверждены  документальными доказательствами. Указанные нарушения дорожного покрытия установлены в период гарантийных сроков, ходатайств о проведении судебной экспертизы с привлечением эксперта, имеющего специальные познания в области ремонта  автомобильных дорог, не заявлено. В связи с изложенным, исковые требования подлежат удовлетворению.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины, в связи с этим госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход фе6дерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью  группа компаний "Альянс" (ОГРН  

<

***>; 

<

...>)  безвозмездно в течение месяца после вступления решения в законную силу устранить выявленные в пределах гарантийного срока следующие дефекты покрытия асфальтобетонного полотна:

Контракт  № 0859200001118004273 от 02 июля 2018 года

по ул. Рязанский спуск и участка по ул. Набережная г. Касимова (от пересечения с ул. Рязанский спуск до д. 42) 

- выбоины 4 штуки;

- выкрашивание поверхности покрытия; 

-поперечные, продольные трещины;

 

Контракт   № 0859200001118007626 от 27 августа 2018 года 

по ул.   Индустриальная г. Касимова (от АЗС до пункта технического осмотра) 

-выбоины 39 штук;

- выкрашивание поверхности покрытия; -поперечные, продольные трещины;

- вспучивание, колейность поверхности покрытия;

 

Контракт №0859200001118007816 от 27 августа 2018 года 

по ул. Илюшкина (от пересечения с ул. Советская до 

<

...> (от пересечения с ул. Советская до 

<

...> (от пересечения с ул. Большакова до пересечения с ул. Губарева) и ул. Губарева от д. 2 до пересечения с пл. Соборная) г. Касимова

- разрушение стыков примыкание с ул. Советской

 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  группа компаний "Альянс" (ОГРН  

<

***>; 

<

...>) в доход федерального бюджета госпошлину 18000руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством  размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

 

Судья                                                                                                             И.А. Ушакова