Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-89400/2016

03 мая 2017 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 06 апреля 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен  03 мая 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Лобовой Д.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хирлиг-оол Ч.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» (адрес: 196158, Санкт-Петербург, шоссе Московское, д. 23, литер А, корп 2, пом. 21-Н, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СПб СтройСервис» (адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, жилой район Модуль, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 1, пом. 425, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору подряда от 28.03.2016 на производство строительно-монтажных работ № КП/З/Шт-16 в размере 6 598 115 руб. 25 коп., неустойки в сумме 329 905 руб. 75 коп. по первоначальным исковым требованиям

о взыскании неустойки по договору подряда от 28.03.2016 на производство строительно-монтажных работ № КП/З/Шт-16 в сумме 1 579 615 руб. 82 коп. по встречным исковым требованиям

при участии

- от истца: представителя ФИО1 по доверенности от 29.12.2016 

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Истец - общество с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «СПб СтройСервис» о взыскании задолженности по договору подряда от 28.03.2016 на производство строительно-монтажных работ № КП/З/Шт-16 в размере 6 598 115 руб. 25 коп., неустойки в сумме 415 462 руб. 68 коп., возмещении расходов по оплате госпошлины в размере 58 067 руб. 89 коп.

Определением суда от 16.02.2017 принято встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «СПб СтройСервис» к обществу с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» о взыскании неустойки по договору подряда от 28.03.2016 на производство строительно-монтажных работ № КП/З/Шт-16 в сумме 658 173 руб. 25 коп. для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 

Ответчик в судебное заседание не явился о времени и месте судебного разбирательства извещен.

В порядке, предусмотренном ст. 49 АПК РФ, истец уточнил исковые требования и просил взыскать задолженность в размере 6 598 115 руб. 25 коп., неустойку в сумме 481 213 руб. 30 коп., возместить расходы по уплате госпошлины в размере 58 397 руб.

В судебном заседании истец уточнил исковые требования в части пеней и просил взыскать 329 905 руб. 75 коп. 

В суд 06.03.2017 поступило уточнение встречного иска. Ответчик просил взыскать пени в сумме 1 579 615 руб. 82 коп.

Уточнения приняты судом. 

Как следует из материалов дела, между ответчиком - ООО «СПб СтройСервис» (далее также - «Подрядчик») и истцом – ООО «Экосфера 93» (далее также «Субподрядчик») был заключен Договор подряда № КП/З/Шт-16 на производство строительно-монтажных работ от 28.03.2016, согласно которому Субподрядчик принял на себя обязательство по выполнению комплекса строительно-монтажных работ по штукатурке внутренних помещений (квартиры и МОП) на объекте: Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой» по адресу: 

<

...> участок 2 (юго-восточнее пересечения с р. Каменкой), 1 очередь, участок 51, кад. № 78:34:0004281:10649, секции 5, 6, в объёме и в порядке, предусмотренном Договором и дополнительным соглашением № 1 от 29.04.2016 к Договору.

Свои обязательства по договору Субподрядчик - ООО «Экосфера 93» исполнял, о чем свидетельствуют подписанные обеими сторонами акты выполненных работ по форме КС-2) от 28.04.2016, от 31.05.2016, от 27.06.2016, от 31.07.2016 и от 31.08.2016. (приложение 9) и справки о стоимости работ и затрат (КС-3) от 28.04.2016., от 31.05.2016, от 27.06.2016, от 31.07.2016 и от 31.08.2016 (Приложение 10) на общую сумму 12 320 790 руб. 

Согласно пункту 2.2. Договора, Промежуточные расчеты по Договору производятся ежемесячно, исходя из объемов работ, выполненных по состоянию на 25 число оплачиваемого месяца, на основании документов, подтверждающих приемку работ за оплачиваемый месяц, в следующем порядке:

- 50 % от стоимости работ, указанной в утвержденной Подрядчиком форме КС-3, Подрядчик оплачивает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком форм КС-2, КС-3 за оплачиваемый месяц и предоставления Субподрядчиком счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства;

- 50 % от стоимости работ, указанной в утвержденной Подрядчиком форме КС-3, Подрядчик оплачивает в течение 3 (трех) месяцев с указанной выше даты.

Пункт 7.2. Договора предусматривает право Субподрядчика начислить Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но не более 5% от указанной суммы.

До настоящего времени Подрядчиком перечислена на расчетный счет Субподрядчика лишь сумма в размере 5 722 674 руб. 75 коп. Не оплачены работы на сумму 6 598 115 руб. 25 копеек. 

Согласно ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Таким образом, по состоянию на 09 декабря 2016 года задолженность ООО «СПб СтройСервис» перед ООО «Экосфера 93» по Договору подряда № КП/З/Шт-16 на производство строительно-монтажных работ от 28.03.2016 составляет: 6 598 115 руб. 25 коп. 

Пени по состоянию на 07.03.2017 составляют 329 905 руб. 75 коп.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

 Статьей 310 Кодекса предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

 В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

 В силу статьи 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку (денежную сумму, определенную законом или договором) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

 На основании изложенного, первоначальные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд считает, что встречные исковые требования подлежат удовлетворению частично:

В соответствии с п.1.1 договора подряда № КП/З/Шт-16 от 28.03.2017 года на производство строительно-монтажных работ, заключенным между ООО «СПб СтройСервис» (подрядчиком) и ООО «Экосфера 93» (субподрядчиком), субподрядчик принял на себя обязательства в установленный договором срок выполнить по заданию подрядчика своими силами средствами и из материалов подрядчика комплекс строительно-монтажных работ по штукатурке внутренних помещений на объекте строительства «Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенной автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 2 (юго-восточнее пересечения с р. Каменкой), 2 очередь, уч.51», кад.№ 78:34:0004281:10649, секции 5,6, а подрядчик - принять их результат и уплатить обусловленную цену.

29 апреля 2016 года стороны заключили дополнительное соглашение к вышеуказанному договору, в соответствии с которым был утвержден новый расчет сметной стоимости (Приложение № 1 к дополнительному соглашению), изменены пункты 2.1. (стоимость работ) и 3.1 .(срок выполнения работ).

Согласно п.2.1. вышеназванного договора в редакции дополнительного соглашения № 1 стоимость работ по настоящему договору составляет сумму в размере 13 163 465 рублей 00 копеек. В соответствии с п.3.1. договора окончание выполнения работ по договору не позднее 10 августа 2016 года.

По состоянию на 10 августа 2016 года ООО «Экосфера-93» выполнило следующие работы:

- по акту КС-2 от 28.04.2016 на сумму 663 310 руб.; 

- по акту КС-2 от 31.05.2016 на сумму 2 655 790 руб.;

- по акту КС-2 от 27.06.2016 на сумму 4 435 695 руб.;

- по акту КС-2 от 31.07.2016 на сумму 2 938 320 руб.

Итого по состоянию на 10 августа ( дату исполнения обязательств по договору) было выполнено работ на сумму 10 693 115 рублей 50 коп.

Сторонами договора не подписывалось дополнительных соглашений об изменении срока исполнения обязательства субподрядчика. До 10 августа 2016 года в адрес ООО «СПб СтройСервис» субподрядчик не заявлял никаких претензий по факту неисполнения обязательств подрядчика, установленных п.5.2.1. договора.

В соответствии с п. 7.3. договора подряда № КП/З/Шт-16 за нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ или срока устранения недостатков -неустойка в размере 0,1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но в любом случае не может превышать 5% от стоимости работ по договору за каждое нарушение.

08.09.2016 года ООО «СПб СтройСервис» по электронной почте направило в адрес ООО «Экосфера-93» претензию с требованием произвести окончательные работы по договору в срок до 10 октября 2016 года и в добровольном порядке заплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 381 740 рублей 48 коп.

ООО «Экосфера 93» получило претензию и присвоило ей входящий номер 027/3-16 от 08.09.16, что подтверждается данными информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

20.09.2016 ООО «Экосфера-93» направило ООО «СПб СтройСервис» (исх.№,: 117/КП-16от 20.09.2016) уведомление о приостановлении работ по договору подряда № КП/З/Шт-16, в котором содержалось требование передать необходимый фронт работ по договору, заключить дополнительное соглашение к договору об изменении сроков выполнения работ, а также погасить имеющуюся задолженность в сумме 2 283 432 руб.

Уведомление о приостановлении работ по договору было направлено через полтора месяца после того, как субподрядчик нарушил обязательства выполнить работу в установленный договором срок.

01.11.2016 комиссией в составе представителей Заказчика (ООО «Строительная компания «Каменка»), Подрядчика (ООО «СПб СтройСервис») и нового подрядчика (ООО «СнабСити») был произведен осмотр объекта на предмет объема и качества выполненных работ, составлен акт освидетельствования выполнения работ и произведена передача объекта другому подрядчику. На момент передачи объекта другому подрядчику просрочка исполнения обязательств ООО «Экосфера-93» по договору составила 81 день (с 11.08.16 по 01.11.2016 года).

Проверив правильность произведенного расчета пеней, суд установил арифметическую ошибку. Пунктом 7.3. Договора установлено 5% ограничение суммы пеней, которое рассчитывается от суммы договора. В данном случае 5% от суммы договора составляет 658 173 руб. 25 коп. (13 163 465 руб. х 5%).

Основания для снижения неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса, как по первоначальному, так и по встречному иску, суд не находит.

С учетом изложенного, требование ООО «СПб СтройСервис» подлежит удовлетворению в сумме 628 173 руб. 25 коп.     

Руководствуясь ст.ст. 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд решил:

Удовлетворить первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» полностью:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПб СтройСервис» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» задолженность по договору субподряда № ГМЖД/07/2015 от 02.07.2015 в сумме 6 598 115 руб. 25 коп., пени в размере 329 905 руб. 75 коп. и расходы по оплате госпошлины в сумме 57 640 руб. 10 коп.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 427 руб. 79 коп.

Удовлетворить встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СПб СтройСервис» частично:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СПб СтройСервис» пени по договору субподряда № ГМЖД/07/2015 от 02.07.2015 в размере 658 173 руб. 25 коп. 

Расходы по оплате госпошлины за рассмотрение встречных исковых требований в сумме 16 163 руб. оставить на обществе с ограниченной ответственностью «СПб СтройСервис».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПб СтройСервис» в доход федерального бюджета госпошлину за рассмотрение встречных исковых требований в сумме 634 руб. 75 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» в доход федерального бюджета госпошлину за рассмотрение встречных исковых требований в сумме 11 998 руб. 40 коп.

Произвести зачет взаимных требований общества с ограниченной ответственностью «СПб СтройСервис» и общества с ограниченной ответственностью «Экосфера 93»:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПб СтройСервис» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» денежные средства в сумме 6 327 487 руб. 85 коп.

Произвести зачет денежных средств, подлежащих взысканию с общества с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» в доход федерального бюджета, и денежных средств, подлежащих возврату обществу с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» из федерального бюджета:

   Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Экосфера 93» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 11 570 руб. 661 коп.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

СудьяД.ФИО2