АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-8773/2024

г. Барнаул

20 августа 2024 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Хворова А.В., при ведении  протокола секретарем Гулькиной Е.А., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев  в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь», г. Красноярск (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице филиала «Алтайэнерго»  

об обязании в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу  исполнить мероприятия по договору об осуществлении технологического присоединения   № 20.2200.3521.21, о взыскании 172 472 руб. 36 коп. неустойки за период с 27.08.2022 по  26.08.2023, а также неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 10 000  руб. за первый календарный месяц неисполнения судебного акта, 20 000 руб. за второй  месяц неисполнения судебного акта, 30 000 руб. за третий месяц неисполнения судебного  акта, с дальнейшим аналогичным увеличением размера неустойки на 10 000 руб. в каждом  следующем месяце неисполнения судебного акта,  

при участии: 

от истца - ФИО2, представитель по доверенности от 13.05.2024, диплом НОЧУ  ВО МФПУ «Синергия» № 090508 от 25.07.2022 (в режиме веб-конференции);  

Руководствуясь статьями 27, 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение двух месяцев  после вступления решения в законную силу выполнить на основании договора об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №  20.2200.3125.21 от 26.08.2021 и технических условий к нему предусмотренные пунктами  10.2.1-10.2.5 технических условий мероприятия для технологического присоединения  энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя ФИО1 к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ по третьей  категории надежности электроснабжения в пределах максимальной мощности  потребления 150 кВт для энергоснабжения объекта - производственное задние/помещение  расположенное по адресу: Алтайский край, Бийский район, в 125 метрах по направлению  

на восток от ул. Спортивной в с. Первомайское, кадастровый номер земельного участка  22:04:390001:1811.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1 68 988 руб. 94  коп. неустойки.  

Во взыскании остальной части неустойки отказать. 

Присудить индивидуальному предпринимателю ФИО1 неустойку на случай неисполнения судебного акта публичным акционерным  обществом «Россети Сибирь» с момента истечения установленного судом срока на  исполнение решения до его фактического исполнения в размере 30 000 руб. за каждый  месяц неисполнения.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1 12 175 руб.  расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья А.В. Хворов