410/2018-50822(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-16148/2017 

от 06 июня 2018 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований Управления Федеральной службы по надзору в  

сфере природопользования (Росприроднадзора) по Архангельской области в части взыскания с  

общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Кулой" 8 896 715 руб. 64 коп. в  

возмещение ущерба отказать. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Водоканал Кулой" за счет  

собственных средств в соответствии с проектом восстановительных работ по возмещению  

вреда реке Ненюшка, выполнить следующие работы: 

2 этап - срок исполнения до 31.12.2018, на сумму 1 158 240,54 руб.:  

- реконструкция КНС № 2 с оборудованием средствами автоматизации и  

диспетчеризации (продолжение и завершение работ). Ввод в эксплуатацию.  

- реконструкция КНС № 3 с оборудованием средствами автоматизации и  

диспетчеризации (продолжение и завершение работ). Ввод в эксплуатацию.  

- закупка и установка сорбционной загрузки "ИРВЕЛЕН-М" в фильтр "Ангара",  

установленный на выпуске с КОС. Ввод в эксплуатацию. 

- замена старой разводки одной секции биофильтра КОС на новую. Ввод в  

эксплуатацию. 

3 этап - срок исполнения до 31.12.2019, на сумму 1 429 298,60 руб.:  

- реконструкция КНС № 1 с оборудованием средствами автоматизации и  

диспетчеризации. Ввод в эксплуатацию. 

- реконструкция КНС № 4 с оборудованием средствами автоматизации и  

диспетчеризации. Ввод в эксплуатацию. 

4 этап - срок исполнения до 31.12.2020, на сумму 1 469 500 руб.:  

- реконструкция части крыши биозала на канализационных очистных  

сооружениях. Ввод в эксплуатацию. 

- очистка одной секции биофильтра КОС от щебневой загрузки.  5 этап - срок исполнения до 31.12.2021, на сумму 1 269 646 руб.:  

- реконструкция крыши биозала на канализационных очистных сооружениях  

(продолжение и завершение работ). Ввод в эксплуатацию. 

6 этап - срок исполнения до 31.12.2022, на сумму 1 017 393,92 руб.:  

- приобретение загрузки Виетах 8 650/2 объёмом 50 куб.м., с загрузкой её в биофильтр  

биозала КОС. 

7 этап - срок исполнения до 31.12.2023, на сумму 1 052 489,68 руб.: 

- приобретение загрузки Biremax S 650/2 объёмом 50 куб.м., с загрузкой её в биофильтр  биозала КОС.  

8 этап - срок исполнения до 31.12.2024, на сумму 1 088 982,65 руб.: 

- приобретение загрузки Biremax S 650/2 объёмом 50 куб.м., с загрузкой её в биофильтр  биозала КОС.  

9 этап - срок исполнения до 31.12.2025, на сумму 411 164,25 руб.: 

- приобретение загрузки Biremax S 650/2 объёмом 76 куб.м., с загрузкой её в биофильтр  биозала КОС.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Водоканал Кулой" не позднее  30 дней с даты окончания каждого из указанных этапов выполнения работ предоставлять  Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)  по Архангельской области отчет о выполнении названных работ с подтверждающими  документами.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Кулой" в доход  федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья А.Б. Филипьева