АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-222823/23-102-2507

г. Москва

18 октября 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 06 декабря 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 18 октября 2024 г.

Арбитражный суд

в составе судьи Козловского В.Э., (единолично)

рассмотрев дело в порядке упрощенного производства по исковому  заявлению АО «ФПК» (107078, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАШИ ФИО1, 34, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2009, ИНН: 

<

***>) к АО «ВАГОНРЕММАШ» (105005, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.05.2008, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании неустойки в размере 245 763 руб. 43 коп.

 без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:

АО «ФПК» обратилось в суд с требованием о взыскании с АО «ВАГОНРЕММАШ» о взыскании неустойки в размере 245 763 руб. 43 коп.

Стороны, будучи извещенными о принятии судом к рассмотрению заявленных истцом требований в порядке упрощенного производства в соответствии со ст.ст. 121, 122 АПК РФ надлежащим образом, ходатайств препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства не заявили.

При этом представленные сторонами в ходе рассмотрения настоящего спора в порядке упрощенного производства доказательства в своем единстве и совокупности являются достаточными для рассмотрения спора в порядке упрощенного производства, необходимость совершения каких-либо процессуальных действий, которые могут быть реализованы только по общим правилам искового производства судом не установлена. 

При таких обстоятельствах настоящий спор рассматривается арбитражным судом в порядке упрощенного производства в соответствии со ст.ст. 123, 156, 226-229 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из материалов дела, между АО «ФПК» и АО «Вагонреммаш» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских вагонов в объёме КР-1 и КР-2 от 17 февраля 2023 г. № ФПК-23-30 (далее - Договор).

Во исполнение условий Договора Исполнителем в 2023 году были отремонтированы вагоны Заказчика №№ 081-14233; 081-14290 (далее -вагоны).

Согласно указания Министерства Путей Сообщения № В-1465у от 23.12.1997 г. срок простоя вагонов с кондиционированием воздуха в ремонте не должен превышать 38 дней.

В соответствии с п. 1.4 Договора срок выполнения работ исчисляется с момента подписания обеими Сторонами акта приемки пассажирского вагона формы ЗРУ-25 и до момента выпуска вагонов из ремонта, с оформлением уведомления по форме ВУ-36.

Однако работы по указанным вагонам были выполнены не в соответствии со сроками, установленными Приложением.

Согласно п. 5.2 Договора в случае нарушения Исполнителем срока выполнения Работ, в том числе дополнительных работ, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предъявления требования об уплате неустойки, от соответствующей стоимости работ, по которым нарушен срок выполнения, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

Расчет сроков простоя начинается с даты подписания формы ЗРУ-25, следовательно, со следующего дня начинает отсчитываться нормативный срок простоя. Со следующего дня после окончания нормативного срока начинает отсчитываться срок простоя сверх нормы, на который начисляется штрафная неустойка за каждый календарный день простоя. Выпуск вагона из ремонта оформляется уведомлением формы ВУ-36, дата которого является окончанием срока простоя.

Для вагона № 081-14233 форма ЗРУ-25 о приемке вагона в ремонт подписана 20.03.2023 года, форма ВУ-36 о выпуске вагона из ремонта подписана 05.05.2023 года. То есть общий срок простоя вагона составил 46 дней, что превышает нормативный срок простоя (38 дней) на 8 суток. Неустойка составила: 46 542 руб. 02 коп.

Для вагона № 081-14290 форма ЗРУ-25 о приемке вагона в ремонт подписана 24.03.2023, форма ВУ-36 о выпуске вагона из ремонта подписана 15.05.2023 года. То есть общий срок простоя вагона составил 48 дней, что превышает нормативный срок простоя (38 дней) на 10 суток. Неустойка составила: 58 177 руб. 52 коп.

Между АО «ФПК» и АО «Вагонреммаш» заключен договор на выполнение капитально-восстановительному ремонту, капитальному ремонту в объёме КР-1; КР-2, деповскому ремонту и техническому обслуживанию в объёме ТО-3 вагонов для «Поезда Деда Мороза» № ФПК-22-204 от 29.07.2022 г. (далее - Договор).

Во исполнение условий Договора Исполнителем в 2022 году были отремонтированы вагоны Заказчика №№ 077-13571; 077-13589; 077-13597 (далее - вагоны).

Срок выполнения работ по ремонту указанных вагонов в объёме КР-1 согласно Приложения № 2 «График подачи и выпуска вагонов» составляет: 30 сентября 2022 г.

В соответствии с п. 4.1 Договора: Срок начала выполнения работ в отношении каждого вагона - не позднее дня следующего за днем подписания Сторонами акта приемки формы ЗРУ-25.

Срок окончания выполнения работ (срок выпуска вагона в отношении каждого конкретного вагон) определен в Графике подачи для выполнения Работ/выпуска вагонов.

Датой фактического окончания выполнения Работ в отношении каждого вагона определяется датой подписания Сторонами акта выполненных работ формы ФПУ-26 с приложением оформленного уведомления о приёмке пассажирского вагона из ремонта по форме ВУ-36.

Согласно п. 6.2 Договора случае нарушения Исполнителем предусмотренного Графиком подачи вагонов для выполнения Работ/выпуска вагонов после выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) срока окончания выполнения работ (срока выпуска вагона после выполнения Работ) по конкретным вагонам, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 1/365 от двойной ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предъявления требования от стоимости Работ, по которым Исполнителем допущена просрочка выполнения, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

Для вагона № 077-13571 форма ЗРУ-25 о приемке вагона в ремонт подписана 01.08.2022 года, форма ВУ-36 о выпуске вагона из ремонта подписана 04.10.2022 года. Срок простоя в ремонте согласно графика (Приложение № 2 к Договору) августа - сентябрь. Срок превышения простоя составил: 4 суток.

Неустойка составила: 43 398 руб. 12 коп.

Для вагона № 077-13589 форма ЗРУ-25 о приемке вагона в ремонт подписана 01.08.2022, форма ВУ-36 о выпуске вагона из ремонта подписана 04.10.2022 года. Срок простоя в ремонте согласно графика (Приложение № 2 к Договору) августа - сентябрь. Срок превышения простоя составил: 4 суток.

Неустойка составила: 43 398 руб. 12 коп.

Для вагона № 077-13597 форма ЗРУ-25 о приемке вагона в ремонт подписана 01.08.2022, форма ВУ-36 о выпуске вагона из ремонта подписана 05.10.2022 года. Срок простоя в ремонте согласно графика августа - сентябрь. Срок превышения простоя составил: 5 суток. Неустойка составила: 54 247 руб. 65 коп.

Расчет суммы неустойки Формула расчета: Сумма неустойки = (стоимость ремонта вагона*2*7,5% Отклонение от нормы)/365

Согласно прилагаемым расчетам, размер штрафной неустойки в связи с превышением норматива простоя составляет: 141 043 руб. 89 коп.

Таким образом, общая сумма неустойки по всем вагонам составляет: 104 719 руб. 54 коп. (неустойка по договору № ФПК-23-30) + 141 043 руб. 89 коп. (неустойка по договору № ФПК-22-204) = 245 763 руб. 43 коп. 

Расчет неустойки, произведенный истцом судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно. Требование истца о взыскании неустойки является обоснованным.

АО «ФПК» в адрес АО «Вагонреммаш» была направлена претензия № 1/23 от 15.05.2023 г. и № 8/23 от 22.05.2023 с требованием об уплате неустойки, вместе с тем оплаты сумм по указанным претензиям не поступало.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. 

Доказательств, опровергающих обстоятельства, указанные истцом в исковом заявлении, ответчиком не представлено. 

На основании изложенного, исковые требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме

Госпошлина  в порядке ст. 110 АПК РФ относится на ответчика.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310, 330 ГК РФ, ст.ст. 110, 123, 156, 167 – 171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО «ВАГОНРЕММАШ» в пользу АО «ФПК» 245 763 руб. 43 коп. неустойки, а также взыскать 7 915 руб. расходов по оплате госпошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                                                            В. Э. Козловский