АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Орёл 

28 октября 2024 года дело № А48–9767/2024  

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи О.И. Лазутиной, рассмотрев  дело по исковому заявлению органа местного самоуправления Администрации п.г.т.  Нарышкино Урицкого района Орловской области (303900, Орловская область, Урицкий  район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 104, пом. 2, ОГРН 1025702256634, ИНН  5725000127) к Обществу с ограниченной ответственностью «Региональное агентство  «Строй Дом» (302002, город Орёл, ул. Советская, д. 11, пом. 82, ОГРН 1185749001228,  ИНН 5752078563) об обязании выполнить работы по устранению дефектов о понуждении  подрядчика к исполнению гарантийных обязательств по муниципальному контракту  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать «Региональное агентство «Строй Дом» исполнить в натуре гарантийные  обязательства по муниципальному контракту от 3 марта 2020 года  

 № 0154300003820000006 на выполнение работ по текущему ремонту части улично-дорожной сети по ул. Ленина п.г.т. Нарышкино Урицкого района Орловской области  путем устранения за свой счет выявленных дефектов и недостатков, зафиксированных в  акте осмотра от 26 августа 2024 года, а именно: провалы и деформация тротуарной плитки  (ориентировочное количество - 150 штук), выкрашивание и разрушение  асфальтобетонного покрытия стоянки для автомобилей (ориентировочно площадью - 8  квадратных метров), раскрытие продольных швов и трещины асфальтобетонного  покрытия (ориентировочной протяженностью - 90 метров), множественные трещины на  асфальтобетонном покрытии (ориентировочной протяженностью - 25 метров),  вертикальное отклонение семи бортовых камней (БР 100.30.15) от проектного положения.  

Указанные работы должны быть произведены в течение тридцати календарных  дней при соблюдении технологии производства соответствующих работ с учетом  наружных температур, но не позднее мая 2025 года.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональное агентство  «Строй Дом» в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать налоговому органу по истечении десяти дней после  вступления в законную силу настоящего судебного акта и при отсутствии в деле  информации о том, что государственная пошлина уплачена добровольно.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской  области в течение месяца со дня его принятия.  

Судья О.И. Лазутина