Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-2587/2017

02 августа 2017 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 26.07.2017

Решение изготовлено в полном объеме 02.08.2017

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Пименовой В.С., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Сантехстрой 2008" (ИНН 1435209240, ОГРН 1081435012251) к муниципальному казенному учреждению "Дирекция единого заказчика" муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия) (ИНН 1411003698, ОГРН 1031400498436) о взыскании 1 000 000 рублей,

при участии в заседании:

от истца: ФИО2 – по доверенности от 28.03.2017,

от ответчика: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Сантехстрой 2008" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в суд с иском к муниципальному казенному учреждению "Дирекция единого заказчика" муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 250 007,79 рублей, в том числе 1 000 000 руб. основного долга, пени в размере 93 925 руб., штрафа в размере 75 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 81 082,79 руб.

В судебном заседании от истца поступило заявление об отказе от исковых требований в части взыскания пени в размере 93 925 руб., штрафа в размере 75 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 81 082,79 руб.

Отказ от иска в части судом принят, производство по делу в части взыскания пени в размере 93 925 руб., штрафа в размере 75 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 81 082,79 руб. прекращено.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен. Определение суда от 03.07.2017 вручено ответчику 12.07.2017 согласно почтовому уведомлению №67700013011189.

Суд в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил рассмотреть дело без участия представителя ответчика, извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Судом установлены обстоятельства дела.

02.09.2015 между МКУ «Дирекция единого заказчика» Горного улуса Республики Саха (Якутия) (Заказчик) и ООО «Сантехстрой 2008» (Подрядчик) заключен контракт №46/15-ЭА 0116300000715000179 на установку железобетонных свай объекта: «Культурно-музейный комплекс в с.Дикимдя» Горного улуса Республики Саха (Якутия), по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить собственными силами или привлеченными силами и средствами в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта установку железобетонных свай объекта: «Культурно-музейный комплекс в с.Дикимдя» Горного улуса Республики Саха (Якутия), а Заказчик обязуется осуществить контроль на выполнением работ, принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

В соответствии с пунктом 2.1. Контракта аванс не предусмотрен. Оплата производится по фактическому объему выполненных работ согласно форм КС-2, КС-3. Окончательный расчет – II квартал 2016 года.

Цена настоящего контракта является твердой на весь период выполнения и сдачи результатов работ и составляет 3 000 000 руб. (НДС не предусмотрен) (пункт 2.2. Контракта).

Календарные сроки выполнения работ: начало работ – с даты заключения настоящего контракта, окончание работ – в течение 14 календарных дней со дня подписания контракта (пункты 3.1.1, 3.1.2 Контракта).

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору Подрядчик выполнил работы на общую сумму 3 000 000 руб. по акту о приемке выполненных работ (КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 15.09.2015. Акты со стороны Заказчика подписаны без возражений.

Ответчиком произведена частичная оплата задолженности за выполненные работы на общую сумму 2 000 000 руб., в том числе платежными поручениями от 19.02.2016 №17 на сумму 1 500 000 руб., от 25.03.2016 №67 на сумму 500 000 руб.

Сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 года, из которого следует, что у ответчика имеется задолженность в размере 1 000 000 руб.

В адрес ответчика истцом направлена претензия от 04.04.2017 об оплате задолженности в размере 1 000 000 руб. в течение 5 календарных дней. Письмо направлено ответчику 05.04.2017.

В связи с отсутствием доказательств оплаты задолженности, истец обратился в суд с требованиями о взыскании основного долга по договорам. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.

Анализ материалов дела показывает, что между сторонами сложились правоотношения, вытекающие из договора подряда, регулируемого главой 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации. 

В соответствии с положениями статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает право подрядчика получить обусловленную договором цену работ.

В соответствии с частью 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Выполнение истцом работ по Контракту № 46/15-ЭА 0116300000715000179 от 02.09.2015 подтверждается подписанными сторонами без возражений по объему работ справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3 и актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 15.09.2015.

Ответчиком произведена частичная оплата задолженности по выполненным работам в размере 2 000 000 руб. платежными поручениями от 19.02.2016 №17 на сумму 1 500 000 руб., от 25.03.2016 №67 на сумму 500 000 руб.

С учетом частичной оплаты задолженность ответчика перед истцом за выполненные работы по спорным договорам составляет 1 000 000 рублей.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, имеются правовые основания для взыскания с ответчика задолженности в размере 1 000 000 рублей.

При обращении в суд истец уплатил государственную пошлину в размере 25 578 руб. согласно платежному поручению от 27.04.2017 №175.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 23 000 рублей возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с муниципального казенного учреждения «Дирекция единого заказчика» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сантехстрой 2008» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по контракту № 46/15-ЭА 0116300000715000179 от 02.09.2015 в размере 1 000 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 000 руб., всего 1 023 000 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

                                    В.С.Терских