Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-56972/2024

01 мая 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  27 марта 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  01 мая 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Болотовой Л.Д.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лебедевой П.Д.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Сити" 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Сектор Сервис" 

о взыскании

при участии:

- от истца: не явился; извещен;

- от ответчика: не явился; извещен;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Сити" (далее – , подрядчик, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Сектор Сервис" (далее – заказчик, ответчик) 9 053 253 руб. 00 коп. задолженности по договорам №1/12-П-5 от 01.072021 и №1/12-П-6 от 23.07.2021, 3 687 135 руб. 37 коп. неустойки.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2024 суд принял исковое заявление к рассмотрению по общим правилам искового производства.

Лица, участвующие в деле,  надлежащим  образом  извещенные  о  времени и месте судебного  разбирательства, своих представителей  в  судебное заседание  не направили,  в  связи с чем,  в  порядке  статьи  156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные  доказательства, суд,    установил, что определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.01.2023 г. в отношении ООО "Ритейл Сити" ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) № А56-2579/2023. 

Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.06.2023 г. по делу № А56-2579/2023 в отношении ООО "Ритейл Сити" введена процедура наблюдения. Временный управляющий ФИО1.

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.11.2023 (резолютивная часть от 25.10.2023г.) по делу № А56-2579/2023 ООО "Ритейл Сити" признано несостоятельным (банкротом). Открыто конкурсное производство. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на ФИО1. Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.12.2023 по делу № А56-2579/2023 конкурсным управляющим ООО "Ритейл Сити" утвержден ФИО1. 

Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.05.2024г. по делу № А56-2579/2023 срок конкурсного производства в отношении ООО "Ритейл Сити" продлили на три месяца. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о его деятельности и о результатах конкурсного производства должника назначено на 24 июля 2024 года в 10 час. 35 мин.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ, сообщение о введении в отношении ООО "Ритейл Сити" процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» №206(7651) от 03.11.2023. В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим ООО "Ритейл Сити" ФИО1 было установлено следующее.

01.07.2021 между ООО "Сектор Сервис" и ООО "Ритейл Сити" заключен договор подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021 (далее – договор 1), согласно п. 1.1. которого подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика комплекс общестроительных и ремонтных работ на территории складского комплекса по адресу: 196608, г.Санкт-Петербург, ФИО2, Промышленная ул., д.17, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены по следующему перечню: ремонт ограждающих конструкций заборов здания литер Б и В; ремонт цементных полов в зданиях литер Б и В; ремонт участков кровли здания литер А; работы по замене оконных блоков в здании литер Б; ремонт отдельных участков покрытия кровли здания литер Б. Детальный перечень и объем выполняемых работ стороны согласовали в смете.

Согласно п. 2.1. договора 1, стоимость работ составляет 2 259 748 руб. 49 коп., в т.ч. НДС 20%. Согласно п. 2.2. договора 1, порядок оплаты работ указан в графике платежей. 

Согласно графика платежей (приложение №4 к настоящему договору) общая стоимость работ составляет 2 259 748 руб. 49 коп., сумма платежа в размере 903 899 руб. 40 коп. в качестве авансового платежа должна быть оплачена до 15.07.2021г., сумма в размере 1 355 849,09 руб. в качестве окончательного расчета выплачивается в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания акта приемки сдачи работ. 

В соответствии с п. 2.4. договора 1, оплата общей стоимости выполненных работ, производится только после полной сдачи работ подрядчиком, при наличии подписанных с обеих сторон акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и услуг, подписанного сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы. 

Согласно п. 4.1.1. договора 1, подрядчик обязуется качественно и в сроки, установленные графиком производства работ, произвести утвержденный сторонами в смете объем работ своими силами, инструментами, механизмами, из своих материалов, с соблюдением строительных норм и правил и сдать «заказчику» результат выполненных работ в порядке, установленном разделом 3 настоящего договора. 

В соответствии с графиком производства работ, работы в полном объеме должны были быть выполнены до 03.08.2021. 

По окончании работ подрядчик обязуется передать результаты работ заказчику по акту приемки – сдачи выполненных работ к настоящему договору, и подписать акт выполненных работ. Одновременно с передачей заказчику результата выполненных работ представить заказчику справку о стоимости выполненных работ и услуг.

В то же время, заказчик обязуется принять работы не позднее следующего дня (п. 4.3.3. договора 1).

Как указывает истец, работы выполнены в полном объеме и сданы заказчику 10 сентября 2021, в подтверждение представлен акт приемки-сдачи № 1. Сторонами подписаны КС-2, КС-3 № 1 от 10.09.2021 без замечаний и возражений. 

Дополнительным соглашением № б/н от 30.09.2021 к договору № 1 стороны договорились, что заказчик выставляет подрядчику штраф в размере 515 222,00 руб., который погашается подрядчиком путем взаимозачета (п.п. 1, 2 соглашения). 

Согласно п. 3 дополнительного соглашения от 30.09.2021 к договору № 1 окончательный расчет за выполненные работы, согласно договора подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021 Заказчик производит в срок с 01.10.2021 по 31.10.2021г. 

Таким образом, сумма основного долга ООО «Сектор Сервис» перед ООО «Ритейл Сити» по договору подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021 составляет 1 744 526, 49 рублей., в том числе авансовый платеж в размере 903 899 руб. 40 коп., сумма окончательного расчета в размере 840 627 руб. 09 коп. 

Согласно п. 5.1. договора подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021, заказчик за нарушение договорных обязательств, в частности сроков оплаты работ, выплачивает подрядчику пени в размере 0,05% от суммы несвоевременной оплаты за каждый день просрочки.

Поскольку оплата выполненных и принятых работ по договору подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021 Заказчиком произведена не была, в пользу подрядчика начисляется неустойка на сумму 716 091 руб. 96 коп. 

23.07.2021 между сторонами заключен договор подряда №1/12 –П-6 от 23.07.2021 (далее – договор 2), согласно условиям подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика комплекс общестроительных и ремонтных работ на территории складского комплекса по адресу: 196608, Санкт-Петербург, ФИО2, Промышленная ул., д.17, а заказчика обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их. Работы должны быть выполнены по следующему перечню: ремонт кровли здания литер Д и ремонт кровли здания литер В; общестроительные работы в зданиях литер Б и В; работы по ремонту наружной канализации; работы по ремонту наружного водопровода холодной воды хозяйственно-питьевой и противопожарной систем; работы по ремонту наружной теплотрассы; сантехнические работы внутри помещений зданий складской территории; электромонтажные работы на складской территории и в помещениях зданий складской территории. Детальный перечень и объем выполняемых работ стороны согласовали в смете. 

Согласно п. 2.1. договора 2 стоимость работ составляет 10 427 804,51 руб., в т.ч. НДС 20%. 

Пунктом 2.2. договора 2 порядок оплаты работ указан в графике платежей.

В силу графика платежей общая стоимость работ составляет 10 427 804,51 руб., 

- сумма платежа в размере 1 439 431,46 руб. в качестве авансового платежа за 1ый этап работ должна быть оплачена до 06.08.2021г., сумма в размере 2 159 147,20 руб. в качестве окончательного расчета за 1-ый этап работ выплачивается в течение 8-ми рабочих дней с даты подписания акта приемки сдачи работ. 

- сумма платежа в размере 855 072,48 руб. в качестве авансового платежа за 2-ой этап работ должна быть оплачена до 11.08.2021г., сумма в размере 1 282 608,71 руб. в качестве окончательного расчета за 2-ой этап работ выплачивается в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания акта приемки сдачи работ. 

- сумма платежа в размере 1 073 322,91 руб. в качестве авансового платежа за 3-ий этап работ должна быть оплачена до 04.08.2021г., сумма в размере 1 609 984,37 руб. в качестве окончательного расчета за 3-ий этап работ выплачивается в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания акта приемки сдачи работ. 

- сумма платежа в размере 700 365,22 руб. в качестве авансового платежа за 4-ый этап работ должна быть оплачена до 18.08.2021г., сумма в размере 1 050 547,82 руб. в качестве окончательного расчета за 4-ый этап работ выплачивается в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания акта приемки сдачи работ. 

- сумма платежа в размере 154 394,60 руб. в качестве авансового платежа за 5-ый этап работ должна быть оплачена до 17.08.2021г., сумма в размере 102 929,74 руб. в качестве окончательного расчета за 5ый этап работ выплачивается в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания акта приемки сдачи работ. 

В соответствии с п. 2.4. договора 2, оплата общей стоимости выполненных работ, производится только после полной сдачи работ подрядчиком, при наличии подписанных с обеих сторон акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и услуг, подписанного сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы. 

По окончании работ подрядчик обязуется передать результаты работ заказчику по акту приемки – сдачи выполненных работ к настоящему договору, и подписать акт выполненных работ. Одновременно с передачей заказчику результата выполненных работ представить заказчику справку о стоимости выполненных работ и услуг. 

В то же время, заказчик обязуется принять работы не позднее следующего дня. 

Согласно п. 4.1.1. договора 2, подрядчик обязуется качественно и в сроки, установленные графиком производства работ, произвести утвержденный сторонами в смете объем работ своими силами, инструментами, механизмами, из своих материалов, с соблюдением строительных норм и правил и сдать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном разделом 3 настоящего договора. 

В соответствии с графиком производства работ, работы в полном объеме должны были быть выполнены до 02.09.2021, по окончании работ подрядчик обязуется передать результаты работ заказчику по акту приемки – сдачи выполненных работ к настоящему договору и подписать акты выполненных работ. Одновременно с передачей заказчику результата выполненных работ представить заказчику справку о стоимости выполненных работ и услуг. 

В то же время, заказчик обязуется принять работы не позднее следующего дня (п. 4.3.3. договора 2). 

Подрядчиком работы выполнены в полном объеме и сданы заказчику в полном объеме, в доказательство представлены: КС-2, КС-3 № 1 от 16.09.2021 на сумму 3 598 578 руб. 66 коп.; КС-2, КС-3 № 2 от 17.09.2021 на сумму 2 137 681 руб. 19 коп.; КС-2, КС-3 № 3 от 20.09.2012 на сумму 2 683 307 руб. 28 коп.; КС-2, КС-3 № 4 от 23.09.2021 на сумму 1 750 913 руб. 04 коп.; КС-2, КС-3 № 5 от 24.09.2021 на сумму 257 324 руб. 34 коп.

Как следует из п.п. 2, 3 актов сдачи приемки №№ 1, 2, 3, 4, качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии подрядчика и соответствует требованиям заказчика. Заказчик не имеет претензий по объему и качеству выполненных работ. 

Дополнительным соглашением от 30.09.2021 к договору подряда № 1/12 –П-6 от 23.07.2021 стороны договорились, что заказчик выставляет подрядчику штраф в размере 1 365 878 руб., который погашается подрядчиком путем взаимозачета (п.п. 1, 2 соглашения)

Согласно п. 3 дополнительного соглашения от 30.09.2021 к договору № 2 окончательный расчет за выполненные работы, согласно договора подряда № 1/12-П-6 от 23.07.2021, Заказчик производит в срок с 01.10.2021 по 31.10.2021г. 

22.10.2022 заказчиком произведена частичная оплата выполненных работ по договору 1/12-П-6 от 23.07.2021 на сумму 1 753 200 руб., что подтверждается платежным поручением № 327 от 22.10.2021. 

Таким образом, сумма основного долга ООО «Сектор Сервис» перед ООО «Ритейл Сити» по договору подряда № 1/12-П-6 от 23.07.2021 составляет 7 308 726,51 рублей. 

Согласно п. 5.1. договора 2, Заказчик за нарушение договорных обязательств, в частности сроков оплаты работ, выплачивает подрядчику пени в размере 0,05% от суммы несвоевременной оплаты за каждый день просрочки. 

Таким образом, поскольку оплата выполненных и принятых работ по договору подряда № 1/12-П-6 от 23.07.2021 заказчиком произведена не была, в пользу подрядчика начисляется неустойка на сумму 2 971 043,41 руб. 

Общая сумма задолженности договорной неустойки ООО «Сектор Сервис» в пользу ООО «Ритейл Сити» по договорам подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021 и № 1/12-П-6 от 23.07.2021 составляет 3 687 135,37 = (716 091,96+2 971 043,41).

Таким образом, по состоянию на 06.06.2024 задолженность основного долга ООО «Сектор Сервис» перед ООО «Ритейл Сити» по договорам подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021 и № 1/12-П-6 от 23.07.2021 составляет 9 053 253,00 руб. = (1 744 526, 49 + 7 308 726,51). 

Задолженность по пеням, предусмотренной договорной неустойкой ООО «Сектор Сервис» перед ООО «Ритейл Сити» по договорам подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021 и № 1/12- П-6 от 23.07.2021 составляет 3 687 135,37 руб. = (716 091,96 + 2 971 043,41). 

В целях внесудебного урегулирования спора, ответчику направлена претензия исх. №112 от 12.05.2023, с требованием в течение 10 дней оплатить задолженность по договорам подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021 и № 1/12-П-6 от 23.07.2021. Претензия была вручена директору ООО «Ритейл Сити» нарочно 04.12.2018 г. Однако по состоянию на дату составления настоящего искового заявления оплата не была произведена.

Ссылаясь  на  указанные  обстоятельства,  истец   обратился  в  суд  с  настоящим иском  в  суд.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом                   в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с нормами ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

 В соответствии ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст.711 данного Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В  силу  п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В  п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - Информационное письмо N 51) разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Факт выполнения работ должен подтверждаться надлежащими доказательствами.

Подрядчик надлежащим образом исполнил взятые на себя обязательства по выполнению работ по двум договорам, что подтверждается КС-2, КС-3 № 1 от 10.09.2021 на сумму 2 259 748 руб. 49 коп. (по договору 1); КС-2, КС-3 № 1 от 16.09.2021 на сумму 3 598 578 руб. 66 коп.; КС-2, КС-3 № 2 от 17.09.2021 на сумму 2 137 681 руб. 19 коп.; КС-2, КС-3 № 3 от 20.09.2012 на сумму 2 683 307 руб. 28 коп.; КС-2, КС-3 № 4 от 23.09.2021 на сумму 1 750 913 руб. 04 коп.; КС-2, КС-3 № 5 от 24.09.2021 на сумму 257 324 руб. 34 коп.

Общая сумма задолженности по договорам подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021 и № 1/12-П-6 от 23.07.2021. в соответствии с подписанными актами сдачи-приемки составляет 9 053 253 руб.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик представил соглашение от 18.10.2021 и платежное поручение № 327 от 22.10.2021 на сумму 1 753 200 руб. 00 коп.

Согласно п. 1 соглашения от 18.10.2021 стороны приходят к соглашению, что общая сумма задолженности по договору подряда № 1/12-П-5 от 01.07.2021г. и по договору подряда № 1/12-П-6 от 23.07.2021г., в сумме 10 806 453 руб. 00 коп., ответчик погашает в следующем порядке: на сумму 6 900 000 руб. 00 коп. ответчик передает простые бланковые векселя ЗАО «Сектор Инвест» (ИНН 

<

***> КПП 783801001, ОГРН 

<

***>), в количестве 7 (Семь) штук, по цене номинала на общую сумму 6 900 000 руб. 00 коп. до 22.10.2021г. включительно, а оставшуюся часть задолженности в сумме 3 906 453 руб. 00 коп. ответчик погашает путем перечисления денежных средств на расчетный счет истца в срок по 01.11.2021 включительно. 

Согласно п. 2. соглашения от 18.10.2021 соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания взаиморасчетов сторон по договору №1/12-П-5 от 01.07.2021г. и  договору №1/12-П-6 от 23.07.2021г. 

По своему характеру заключенное между сторонами соглашение является соглашение об отступном.

Согласно ст. 409 ГК РФ  по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества.

Как разъяснено в пункте 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" (далее – Постановление Пленума № 6) по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества. При этом правила об отступном не исключают, что в качестве отступного будут выполнены работы, оказаны услуги или осуществлено иное предоставление (пункт 1 статьи 407, статья 421 ГК РФ). 

Абзацем вторым указанного пункта указано, стороны вправе согласовать условие о предоставлении отступного на любой стадии существования обязательства, в том числе до просрочки его исполнения.

Согласно акта приема-передачи ценных бумаг от 22.10.2021 ответчик передал, а истец принял векселя на общую сумму 6 900 000 руб. 00 коп., соответственно обязательства по оплате результатов выполненных работ по двум договорам считаются прекращенными в размере 6 900 000 руб. 00 коп.

С учетом установленных обстоятельств, судом установлено, что задолженность, с учетом произведенных сторонами всех зачетов и оплаты по платежному поручению № 327 от 22.10.2021, составляет 2 153 253 руб. 00 коп. 

Кроме заявления требования о взыскании основного долга, истец также заявил требование о взыскании неустойки в размере 3 687 135 руб. 37 коп.

Согласно ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Учитывая, что материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком срока оплаты работ по договорам, доказательств обратного не представлено, суд приходит  к выводу о правомерности начисления истцом неустойки.

Проверив произведенный истцом расчет неустойки, суд установил, что произведенный расчет является неверным, поскольку не учитывает произведенных сторонами всех зачетов и оплаты по платежному поручению № 327 от 22.10.2021.

Произведя расчет в соответствии с размером причитающих истцу денежных сумм, требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в размере  828 542 руб. 65 коп.

Руководствуясь вышеизложенным, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании основного долга по договорам обосновано, правомерно и подлежит удовлетворению в 2 153 253 руб. 00 коп., требование о взыскании неустойки обосновано, правомерно и подлежит удовлетворению в 828 542 руб. 65 коп.

В соответствии со ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны.

Истцу, при принятии иска, была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины. С учетом размера заявленных исковых требований 12 740 388 руб. 37 коп., государственная пошлина, подлежащая уплате в федеральный бюджет, составляет 86 702 руб. 00 коп.

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ взысканию с истца в доход федерального бюджета подлежит 62 776 руб. 50 коп. государственной пошлины, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит 20 925 руб. 50 коп. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать общества с ограниченной ответственностью "Сектор Сервис" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ритейл Сити" (ОГРН 

<

***>) 2 153 253 руб. 00 коп. задолженности по договорам подряда, 828 542 руб. 65 коп. неустойки.

В удовлетворении  остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сектор Сервис" (ОГРН 

<

***>) в федеральный бюджет 20 925 руб. 50 коп. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ритейл Сити" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 62 776 руб. 50 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья                                                                                       Болотова Л.Д.