1 2016_6132655  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-20553/22

г. Уфа

22 декабря 2022 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Ганеева Р. Ф., при  

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению 

ГКУ УКС РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

третье лицо - АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  

СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

1050203466180) 

о взыскании штрафа по государственному контракту в размере 1 540 927 руб. 59  

коп., об обязании устранения выявленных недостатков 

при участии в судебном заседании:  

от истца – ФИО2 представитель по доверенности № 10-08 от 10.01.2022 г.,  

предъявлен диплом о высшем юридическом образовании 

от третьего лица – ФИО3 представитель по доверенности № 18-9722 от  

28.10.2022 г. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Обязать ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение  пятнадцати дней со дня вступления решения в законную силу устранить выявленные  

недостатки выполненных работ по государственному контракту от 13.09.2016 г. №  04/2016-110 в рамках исполнения гарантийных обязательств, а именно:  

1) на брусчатке перед центральным крыльцом собирается талая вода; 

2) плитка на центральном крыльце отстает от поверхности;  3) плитка в раздевалке для девочек спортзала, медицинском кабинете, в  

3(трех) цехах столовой отходит от стен; 4) разрушение участков пола № 110, 111, 112, 308; 

5) протекание крыши и затопление кабинета родного языка, библиотеки и  химии;  

6) отставание плитки на полу от поверхности: в коридорах, лестничных  клетках, столовой;  

7) снесение защитного ограждения с северной стороны крыши; 8) трещины на балконе над спортивным залом. 

Взыскать с ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ГКУ УКС РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 540 927 руб. 59 коп. сумму  штрафа.  

На случай не исполнения ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение пятнадцати дней со дня вступления решения в законную силу  судебного акта присудить ГКУ УКС РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  денежные средства, подлежащие взысканию с ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в размере 20000 рублей за каждый месяц неисполнения решения суда до  фактического исполнения в полном объеме.  

В удовлетворении остальных требований – отказать. 

 Взыскать с ООО "А-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 34409  руб. сумму государственной пошлины в доход федерального бюджета.  

Исполнительный лист на взыскание госпошлины в доход бюджета выдать после  вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия  решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики  Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aac.ru.  

Судья Р.Ф. Ганеев