Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-57460/2018

20 июля 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подписана 07 июля 2018 года.

Мотивированное решение изготовлено в связи с поступлением заявления от ответчика 20 июля 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

рассмотрев дело по иску:

истец Общество с ограниченной ответственностью "ЭрБи" (адрес:  194044, Санкт-Петербург, ФИО1 пр. д. 60 А пом. 2Н-9Н, ОГРН:  

<

***>)

ответчик Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ" (адрес:  192236, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. СОФИЙСКАЯ 6/8 СТРОЕНИЕ 1/1-Н ОФИС 252, ОГРН:  

<

***>)

о  взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРБИ» (далее – ООО «ЭРБИ») обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ» (далее – ООО «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ») о взыскании 358 269 руб. 85 коп. задолженности и 8972 руб. 68 коп. пеней за просрочку оплаты выполненных работ по договору строительного подряда от 06.11.2015 № 06-11/15-К-7.4-2.3-ОВ2, а также 13 587 руб. 26 коп. процентов за период с 25.10.2017 по 20.04.2018.

Определением от 17.05.2018 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства в соответствии со статьей 123 и частью 2 статьи 228 АПК РФ.

Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ООО «ЭРБИ» (подрядчик) и ООО «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ» (генеральный подрядчик) заключили договор строительного подряда от 06.11.2015 № 06-11/15-К-7.4-2.3-ОВ2, по условиям которого генеральный подрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также выполнить пусконаладочные работы на объекте – Здание № 2, корпус 3 в «Комплексе жилых домов со встроено-пристроенным досуговым центром и ДДУ на 110 мест, расположенном на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, п/о Янино САОЗТ «Выборгское» участок 7-4, кадастровый № 47:07:1044001:509 и сдать их результаты генеральному подрядчику, а генеральный подрядчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, установленных договором.

Согласно пункту 1.2 договора виды, объемы и  стоимость работ согласованы сторонами в смете на выполнение работ (Приложение № 1 к договору).

Пунктом 2.1 договора общая стоимость работ согласована сторонами в смете на выполнение работ (Приложение № 1 к договору) и составляет 4 704 860,23 руб.

В соответствии с пунктом 2.4 договора в целях обеспечения подрядчиком своих обязательств по договору стороны договорились об удержании генеральным подрядчиком при осуществлении каждого платежа за выполненные работы 10% от суммы, подлежащей перечислению подрядчику по договору. В случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, генеральный подрядчик вправе удержать из сумы гарантийных удержаний затраты, понесенные им в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по договору ( в том числе компенсировать расходы на устранение допущенных подрядчиком недостатков работ), а также подлежащие уплате подрядчиком суммы пени, штрафов, убытков.

По пункту 2.7.1 договора промежуточные расчеты осуществляются генеральным подрядчиком в размере стоимости работ, выполненных в отчетном месяце и определенной на основании актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 за отчетный период, с вычетом суммы гарантийных удержаний, стоимости услуг генерального подрядчика в размере 3% и аванса в течение 15 банковских дней со дня подписания генеральным подрядчиком акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, за отчетный период, при условии предоставления генеральному подрядчику исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ, и счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями Налогового кодекса, на основании выставленного подрядчиком счета.

В силу пунктов 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 договора подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки: дата начала работ 06.11.2015, дата окончания работ 29.02.2016, промежуточные сроки выполнения работ определены сторонами в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору). 

В соответствии с пунктом 6.2 договора в случае нарушения генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных работ более чем на 20 банковских дней, подрядчик вправе требовать от генерального подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

Подрядчик выполнил комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха, что подтверждается актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.05.2016, от 30.06.2016, от 31.08.2016, от 31.10.2016, от 30.11.2016, от 31.12.2016, от 28.02.2017 и справками о стоимости выполненных работ КС-3 от 31.05.2016,  от 30.06.2016, от 31.08.2016, от 31.10.2016, от 30.11.2016, от 31.12.2016, от 28.02.2017.

ООО «ЭРБИ» по данным работам выставило счета ООО «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ» от 31.05.2016 № 48, от 30.06.2016 № 63, от 31.08.2016 № 95, от 31.10.2016 № 111, от 30.11.2016 № 126, от 31.12.2016 № 142, от 28.02.2017 № 14, от 31.07.2017 № 63 на общую сумму 2 743 538,86 руб.

ООО «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ» произвело частичную оплату за выполненные работы по платежным поручениям от 06.09.2016, от 04.10.2016, 05.12.2016, от 11.04.2017, от 13.06.2017, от 25.09.2017 на общую сумму 2 743 538,86 руб.

Согласно акту взаимозачета встречных требований от 30.09.2017 задолженность ООО «ЭРБИ» перед ООО «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ» по предоплате по договору строительного подряда № 06-11/15-К-7.4-2.3-ОВ2 в счет оплаты выполненных работ зачтена в сумме 48 897,33 руб.

ООО «ЭРБИ» направило в адрес ООО «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ» претензии от 12.10.2017 № 242, от 21.02.2018 № 35, от 13.04.2018 № 66 об оплате задолженности по гарантийным удержаниям, которые получены ООО «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ» 17.10.2017, от 22.02.2018, от 13.04.2018, но не исполнены.

Отказ ООО «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ» оплатить задолженность послужил основанием для обращения ООО «ЭРБИ» в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его.

В пункте 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ).

По пункту 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Факт выполнения подрядчиком работ на сумму 2 227 500 руб. подтверждается представленными в материалы дела актами формы КС-2 от 31.05.2016, от 30.06.2016, от 31.08.2016, от 31.10.2016, от 30.11.2016, от 31.12.2016, от 28.02.2017 и справками о стоимости выполненных работ КС-3 от 31.05.2016,  от 30.06.2016, от 31.08.2016, от 31.10.2016, от 30.11.2016, от 31.12.2016, от 28.02.2017.

Генеральный подрядчик частично оплатил спорные работы по договору на сумму 2 743 538,86 руб. руб., что подтверждается платежными поручениями от 06.09.2016, от 04.10.2016, 05.12.2016, от 11.04.2017, от 13.06.2017, от 25.09.2017.

Таким образом, задолженность ООО «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ» перед ООО «ЭРБИ» составила в размере 358 269 руб. 85 коп.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 ГК РФ).

Общество начислило за нарушение сроков оплаты работ в размере 8972 руб. 68 коп. пеней за период с 25.10.2017 по 20.04.2018 на основании пункта 6.2 договора, а также 13 587 руб. 26 коп. за неоплату гарантийных удержаний за период с 25.10.2017 по 20.04.2018, рассчитанных по статье 395 ГК РФ. 

Принимая во внимание, что суду не представлены документы, опровергающие исковые требования истца, в деле отсутствуют доказательства оплаты долга, исковые требования истца подлежат удовлетворению.

В связи с удовлетворением исковых требований, судебные расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика на основании статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭРБИ» 358 269 руб. 85 коп. задолженности, 8972 руб. 68 коп. пеней, 13 587 руб. 26 коп. процентов и 10 617 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Косенко Т.А.