Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-8345/2023

г. Благовещенск

23 июля 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания Бондаревым А.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Управления жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации  города Райчихинска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «АмурДом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании  устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АмурДом» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение двух месяцев с момента вступления решения  суда в законную силу устранить недостатки выполненных работ по муниципальному  контракту № 32 от 17.06.2022 на выполнение работ по благоустройству дворовой  территории многоквартирного жилого дома по адресу 

<

...>, для  чего выполнить:  

 демонтировать асфальтобетонное покрытие тротуаров, в объеме 3,76 м3., площадью  215 м2.;  

 демонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части дворовой территории, в  объеме 21,3 м3., площадью 646 м2.;  

 демонтировать асфальтобетонное покрытие стоянки, в объеме 5,2 м3, площадью 158  м2.;  

 выполнить выемку основания под асфальтом проезжей части и стоянки  (щебень/песок), площадью 804 м2.;  

 демонтировать бордюры БР 100.30.15 - 215 шт.; 

 выполнить геодезическую съемку для естественного водоотведения по рельефу с  дворовой территории на площади 804 м2.;  

 разработать проект естественного водоотведения (подготовка планировки, уклона) по  рельефу с дворовой территории на площади 804 м2.;  

 выполнить монтаж бордюров БР 100.30.15-215 шт.; 

выполнить подсыпку основания согласно норм и требований (песок 160,8 м3, щебень  120,6 м3.), на площади 804 м2.;  

 выполнить трамбовку и укладку асфальтобетона тротуаров, в объеме 8,6 м3.,  площадью 215 м2.;  

 выполнить укладку асфальтобетона проезжей части дворовой территории, в объеме  25,8 м3., площадью 646 м2.;  

 выполнить укладку асфальтобетона стоянки, в объеме 5.3 м3., площадью 158 м2. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АмурДом» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления жилищно-коммунального  хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города  Райчихинска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы на проведение экспертизы  в размере 95 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АмурДом» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина