Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-8766/2021

11 октября 2021 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 11 октября 2021 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе                судьи Бухаровой С.В., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628400, г. Сургут, 

<

...>)  к обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ» (628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 4 100 187,92 руб.,

без участия представителей сторон,

установил:

общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ»  (далее – ответчик) о взыскании 19 684 054,92 руб., в том числе 6 290 621 рублей 99 копеек задолженности, 267 171 рублей 28 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №120п/09/19 от 23.09.2019;  3 933 142 руб. задолженности,                         167 045 рублей 92 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №121п/09/19 от 09.09.2019; 1 658 235 рублей задолженности, 658 235 рублей неустойки по договору №77п/09/17 от 10.09.2017;  1 275 710 рублей задолженности,                          275 710 рублей 40 копеек неустойки по договору №67п/09/17 от 10.09.2017;                                     804 021 рублей задолженности, 191 432 рубля 97 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 52-26/05/17 от 26.05.2017;                                                2 097 928 рублей задолженности по договору №180п/10/13 от 01.10.2013; 64 800 рублей задолженности по договору б/н. 

 Определением суда от 15.06.2021 суд выделил в отдельные производства:

- исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ» о взыскании 3 933 142 руб. задолженности, 167 045 рублей 92 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №121п/09/19 от 09.09.2019;

- исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ» о взыскании 1 658 235 рублей задолженности, 658 235 рублей неустойки по договору №77п/09/17 от 10.09.2017;

- исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ» о взыскании 1 275 710 рублей задолженности, 275 710 руб. 40 копеек неустойки по договору №67п/09/17 от 10.09.2017;

- исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ» о взыскании 804 021 рублей задолженности, 191 432 рубля 97 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 52-26/05/17 от 26.05.2017;

- исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ» о взыскании 2 097 928 рублей задолженности по договору №180п/10/13 от 01.10.2013.

- исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ» о взыскании 64 800 рублей задолженности по договору б/н.

В рамках настоящего дела рассматриваются исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ» о взыскании                                                3 933 142 руб. задолженности, 167 045 рублей 92 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №121п/09/19 от 09.09.2019.

Стороны, извещенные о времени и месте проведения судебных заседаний, не явились. 

Ответчик отзыв на исковое заявление, мотивированные аргументы и доказательства не представил, расчеты истца не оспорил, ходатайства, направленные на сбор дополнительных доказательств, не заявил. На ответчика возлагается риск наступления неблагоприятных последствий, в том числе, по не совершению им процессуальных действий в суде первой инстанции в установленные сроки. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения судебного заседания. 

Суд, исследовав материалы дела, находит исковые требования подлежащими  частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец в рамках договора №121п/09/19 от 09.09.2019 выполнил для ответчика строительно-монтажные работы на объекте: благоустройство придомовой территории дома, расположенного по адресу: Сургутский район,                                с.п. Солнечный, ул. Молодежная, д. 4/1. 

Ссылаясь на то, что работы по договору подрядчиком выполнены, но заказчиком не оплачены, истец обратился с иском в арбитражный суд. 

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные им работы после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом                                    и в согласованный срок.

В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ. 

         В соответствии с положениями пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им 

обоснованными. 

В материалы дела не представлен договор от №121п/09/19 от 09.09.2019. 

Между тем, в материалы дела представлены подписанные сторонами акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 20.06.2020 № 1, свидетельствующие о выполнении истцом принятых на себя обязательств.

Вместе с тем, суд обращает внимание, что, несмотря на отсутствие договора, ответчик, согласно занимаемой им позиции, не отрицает факт наличия обязательств по договору от 09.09.2019. 

Исходя из совокупности представленных в материалы дела доказательств, учитывая доводы и возражения сторон, суд проходит к выводу о доказанности наличия задолженности ответчика по договору №121п/09/19 от 09.09.2019.

Таким образом, выполнение истцом предусмотренных договором работи фактическое принятие их ответчиком влечет за собой возникновение обязанностипо оплате стоимости данных работ.

Доказательств, свидетельствующих о том, что результат выполненных истцом   работ по договору не представляет для ответчика интереса, не имеет потребительской ценности, фактически не использован и не может быть использован для целей, указанных в договоре, ответчиком не представлено. 

В соответствии с нормами гражданского законодательствами правоотношения сторон основываются на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых объектов гражданских прав и недопустимости неосновательного обогащения.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Оценив в соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности все представленные в материалы дела доказательства, суд полагает требование истца о взыскании с ответчика суммы основного долга обоснованным и подлежащим удовлетворению, в размере 3 933 142 руб.   

Дополнительно истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 167 045 рублей 92 копейки за период с 20.06.2020 по 07.06.2021.

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Представленный истцом расчет процентов судом проверен, признан ошибочным, так как неверно определено начало периода начисления процентов в соответствии с пунктом 2 статьи 314 Кодекса.

Так, в силу пункта 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.

Учитывая, что срок оплаты сторонами не согласован, суд, руководствуясь пунктом 2 статьи 314 Кодекса, приходит к выводу о том, что ответчик обязан был оплатить оказанные услуги (выполненные работы) по истечении 7 дней после подписания акта.

Суд произвел расчет процентов за период с 30.06.2020 по 07.06.2021, учитывая пункт 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым размер процентов составил 161 995,16 руб.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в размере 161 995,16 руб. за период с 30.06.2020 по 07.06.2021.

В остальной части проценты взысканию не подлежат в связи с необоснованностью. 

Статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Согласно пункту 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в случае, если после возбуждения производства по делу арбитражный суд выделил одно из предъявленных требований в отдельное производство (часть 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), то расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при предъявлении данного требования, взыскиваются со стороны, против которой принят судебный акт по делу, образованному в результате выделения требования в отдельное производство, по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с предъявлением остальных заявленных требований, распределяются между лицами, участвующими в деле, по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по итогам разрешения дела, в рамках которого эти требования рассмотрены.

Исходя из размера рассмотренных исковых требований, подлежащая уплате государственная пошлина в соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составила 43 501 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, пропорционально удовлетворенным требованиям, с взысканием в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Р Е Ш И Л:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ» в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» 095 137,16 руб., в том числе 3 933 142 руб. задолженности, 161 995,16 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «ЭКПАШ» в доход федерального бюджета 43 447,41 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮВиС» в доход федерального бюджета 53,59 руб. государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

СудьяС.В. Бухарова