АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-12680/2022

г. Барнаул

11 июля 2023 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении  протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации  города Бийска», г. Бийск, к государственному унитарному предприятию дорожного  хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление»,  г. Бийск,  

об обязании безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по  муниципальному контракту № Ф.2017.282958 от 18.07.2017,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора - общества с ограниченной ответственностью  «Вираж», г. Бийск (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

при участии в заседании представителей: 

от истца: ФИО2 по доверенности № 9 от 03.05.2023 (в режиме онлайн).  от ответчика: не явился, извещен,  

от третьего лица: не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить. 

Обязать государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского  края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», г. Бийск  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в срок не позднее 30 дней с момента  вступления в законную силу решения суда по настоящему делу безвозмездно устранить  

недостатки выполненных в ходе исполнения Муниципального контракта   № Ф.2017.282958 от 18 июля 2017 года работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов № 68, № 70, № 70/1, № 72, № 74, № 74/1, № 74/2 по ул. Липового  в городе Бийске Алтайского края, а именно, выполнить следующие работы:  

в дворовой территории многоквартирного дома № 68 по ул. Липового в городе  Бийске Алтайского края:  

- замену бортовых камней – 1 шт; 

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного  камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением  швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 375,05 кв.м.;  

- устройство нового асфальтобетонного покрытия с соблюдением требований  муниципального контракта и нормативной документации - 375,05 кв.м.;  

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 108 шт.;  

в дворовой территории многоквартирного дома № 70 по ул. Липового в городе  Бийске Алтайского края:  

- замену бортовых камней – 1 шт; 

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного  камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением  швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 559,4 кв.м.;  

- устройство нового асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований  муниципального контракта и нормативной документации – 559,4 кв.м.;  

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 174 шт.;  

в дворовой территории многоквартирного дома № 70/1 по ул. Липового в городе  Бийске Алтайского края:  

- замену бортовых камней – 3 шт; 

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 106 шт.;  

- ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой – 16,7 м; 

- выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия (фрезеровка, нанесение  выравнивающего слоя асфальтобетона, в случае повреждения бордюрного камня  осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно требований муниципального контракта и нормативной  документации с последующим устройством тонкослойного покрытия (тонкослойные  покрытия из битумоминеральных смесей) – 299,7 кв.м.;  

в дворовой территории многоквартирного дома № 72 по ул. Липового в городе  

Бийске Алтайского края: - замену бортовых камней – 4 шт; 

- демонтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей – 4 шт;  

- монтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей с учетом отметки верха  

асфальтобетонного покрытия – 4 шт; 

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного  

камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением  

швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 436,15 кв.м.; 

- устройство нового асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований  

муниципального контракта и нормативной документации – 436,15 кв.м.; 

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 126 шт.;  в дворовой территории многоквартирного дома № 74 по ул. Липового в городе  

Бийске Алтайского края: - замену бортовых камней – 10 шт; 

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного  

камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением  

швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 443,9 кв.м.; 

- устройство нового асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований  

муниципального контракта и нормативной документации – 443,9 кв.м.;  

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой –160 шт.;  в дворовой территории многоквартирного дома № 74/1 по ул. Липового в городе  

Бийске Алтайского края: - замену бортовых камней – 25 шт; 

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой – 160 шт.;  - ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой – 27,7 м;  

- замена асфальтобетонного покрытия с ремонтом основания – 1,0 кв.м.; 

- выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия (фрезеровка, нанесение  

выравнивающего слоя асфальтобетона, в случае повреждения бордюрного камня  

осуществить его замену с заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно требований муниципального контракта и нормативной  

документации с последующим устройством тонкослойного покрытия (тонкослойные  

покрытия из битумоминеральных смесей) – 420,81 кв.м.; 

в дворовой территории многоквартирного дома № 74/2 по ул. Липового в городе  Бийске Алтайского края:  

- замену бортовых камней – 9 шт; 

- демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бордюрного  камня (в случае повреждения бордюрного камня осуществить его замену с заполнением  швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) – 434,66 кв.м.;  

- устройство нового асфальтобетонного покрытия с соблюдение требований  муниципального контракта и нормативной документации – 434,66 кв.м.;  

- заполнение швов между бортовыми камнями с последующей расшивкой –210 шт. 

Взыскать с государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», г. Бийск  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу муниципального казенного  учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и  дорожного хозяйства Администрации города Бийска», г. Бийск (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), 468 000 руб. 00 коп. расходов на оплату судебной экспертизы  

Взыскать с государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», г. Бийск  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в доход Федерального бюджета Российской  Федерации 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения.  

Судья С.В. Янушкевич  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 12.04.2023 22:26:00

 Кому выдана Янушкевич Светлана Викторовна