ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А40-11359/2021

02 декабря 2021 года

город Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 25 ноября 2021 года

Полный текст постановления изготовлен 02 декабря 2021 года

Арбитражный суд Московского округа в составе: 

председательствующего судьи Кочеткова А.А.,

судей: Ворониной Е.Ю., Гришиной Т.Ю.,

при участии в заседании:

от истца – ФИО1, дов. от 16.08.2021

от ответчика –

рассмотрев 25 ноября 2021 года в судебном заседании кассационную жалобу

общества с ограниченной ответственностью «Ремстройинвест»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 26 июня 2021 года, 

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2021 года, 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Текиладжаз»

к обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройинвест»

о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен обществом с ограниченной ответственностью «Текиладжаз» к обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройинвест» о взыскании неосновательного обогащения в размере 6.350.000 руб., по договору № 35ЕР от 21 июня 2019 года пеней в размере 444.500 руб. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2021, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с судебными актами суда первой и апелляционной инстанций, ответчик обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты, поскольку полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, имеющимся в деле доказательствам, а обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального права.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы ссылаясь на законность и обоснованность принятых по делу судебных актов.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, своего представителя в судебное заседание суда кассационной инстанции не направил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

Выслушав представителя истца, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдение норм процессуального права при вынесении обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов в указанных актах установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Как следует из материалов дела, и установлено судами первой и апелляционной инстанций, 21.06.2019 между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) был заключен договор № 33ЕР, согласно которому заказчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства по выполнению ремонтно-строительных работ на объекте по адресу: 

<

...>.

В соответствии с пунктом 4.1 договора, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 05 сентября 2019 года к договору, стоимость работ составила 4.350.000 руб.

В соответствии с пунктом 5.1 договора начало выполнения работ – 01 июля 2019 года. Срок выполнения работ – 21 июля 2019 года.

Платежными поручениями № 500 от 26 июня 2019 года, № 413 от 16 июля 2019 года, № 88 от 11 сентября 2019 года, № 604 от 30 декабря 2019 года истец перечислил ответчику денежные средства в общем размере 4 350 000 руб.

Также, в подтверждение перечисления ответчику денежных средств, истец представил расходные кассовые ордера от 26 июня 2019 года на сумму 1 000 000 руб., от 03 июля 2019 года на сумму 500 000 руб., от 10 июля 2019 года на сумму 500 000 руб. из которых следует, что истцом выданы ФИО2 денежные средства за ремонт помещения магазина 

<

...>.

В связи с невыполнением ответчиком работ по договору в установленные сроки 01 декабря 2020 года истец направил в адрес ответчика уведомление исх. № б/н от 30 ноября 2020 года об отказе от договора (почтовое отправление 18303853584628 прибыло в место вручения 16 декабря 2020 года).

Поскольку договор был расторгнут по причине нарушения ответчиком сроков выполнения работ, истцом начислена неустойка в соответствии с пунктом 9.3 договора и ст. 330 ГК РФ.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные сторонами в обоснование своих доводов и возражений доказательства, в том числе обстоятельства исполнения заключенного между сторонами договора, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 450.1, 453, 708, 715, 740, 753, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив что спорный договор расторгнут истцом в одностороннем порядке, суды первой и апелляционной инстанций пришли к законному и обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований, поскольку ответчик свои обязательства по договору в предусмотренные сроки, не выполнил, доказательств выполнения работ и сдачи результатов работ в соответствии с условиями договора, не представил, расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен и признан верным, основания для удовлетворения ходатайства ответчика об уменьшении неустойки и применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, судами не установлено, в связи с тем, что ответчик не представил доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Доводы кассационной жалобы о том, что суды необоснованно отнесли все платежи к авансовым платежам, а также, что сумма взыскания превышает стоимость договора и что условиями договора предусмотрена безналичная оплата, не свидетельствуют о допущенных судами первой и апелляционной инстанций нарушениях норм материального и процессуального права, которые могли бы привести к принятию неверного по существу судебного акта, и не опровергают обстоятельств, установленных судами при рассмотрении настоящего спора.

Выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, отвечают правилам доказывания и оценки доказательств (части 1, 2 статьи 65, части 1 - 5 статьи 71, пункта 2 части 4 статьи 170, пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Иная оценка заявителем кассационной жалобы установленных судами фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

По существу доводы кассационной жалобы направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем, они не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены обжалуемых решения и постановления, по делу не установлено.

Судами были установлены все существенные для дела обстоятельства, изучены все доказательства по делу, и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы судов основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу, нормы материального права применены правильно.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В связи с принятием арбитражным судом кассационной инстанции постановления по результатам рассмотрения кассационной жалобы, определение Арбитражного суда Московского округа от 05.10.2021 о приостановлении исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 26 июня 2021 года и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2021 года по делу № А40-11359/21 подлежит отмене в соответствии с положениями статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2021 по делу № А40-11359/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2021 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2021 по делу № А40-11359/21, введенное определением Арбитражного суда Московского округа от 05.10.2021.

Председательствующий-судья

Судьи: 

А.А. Кочетков

                                                                                           Е.Ю. Воронина

Т.Ю. Гришина