АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

 

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Тонар-35»

к Государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»,

о признании действий (бездействий) незаконными и понуждении совершить определенные действия,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю,

при участии в судебном заседании представителя от истца – Общества с ограниченной ответственностью «Тонар-35» – ФИО2 (руководитель) в отсутствие представителей ответчик аи третьего лица, извещенных  о времени и месте судебного разбирательства, установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Тонар-35» (далее – общество) обратилось 13.03.2018 в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (далее – учреждение) и просило:

- признать незаконным действие (бездействие) ответчика по незаключению  истцом государственных контрактов на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации № 0874200000617000277, № 0874200000617000276, № 0874200000617000279, № 0874200000617000278;

- обязать ответчика заключить указанные контракты с истцом, с учетом предписания третьего лица, исключив пункты 3.3.2 – 3.3.14  из проектов государственных контрактов

- привлечь ответчика к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе рассмотрения спора истец уточнил заявленные требования и просил обязать ответчика заключить государственные контракты с истцом на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации  с учетом предписания третьего лица, исключив пункты 3.3.2 – 3.3.14  из проектов государственных контрактов, по следующим адресам: 

<

...> Бухта Казачья, 5, Стрелецкий проезд, 14.

Поскольку уточнение иска свелось к уменьшению требований и оставлению на рассмотрении суда только ранее принятого к рассмотрению гражданско-правового требования о понуждении к заключению государственных контрактов, суд считает возможным принять уточнение и рассматривать иск по уточненным требованиям.

Существо данных требований известно ответчику и о н высказал по ним свою позицию в предыдущих судебных заседаниях.

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные требования в полном объеме, в обоснование своих доводов пояснил, что ответчик недобросовестно уклонился от надлежащего исполнения обязанности по заключению контрактов.

Ответчик в отзыве на иск против удовлетворения исковых требований возражал, в обоснование своих доводов пояснил, что истец пропустил срок на представление подписанных контрактов.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю – в отзыве на иск указало, что учреждение нарушило сроки размещения информации о результатах торгов – протокол вскрытия конвертов, осуществленного 22.12.2017, размещен в ЕИС только 24.12.2017. При этом ответчику выдано предписание об исключении пунктов 3.3.2 – 3.3.14 из проектов государственных контрактов при их заключении.

Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.

Как видно из материалов дела,  учреждение разместило в единой информационной системе извещения от 18.12.2017 № 0874200000617000276, 0874200000617000277, 0874200000617000278 и 0874200000617000279 о запросе котировок на разработку проектно-сметной документации на объекты по следующим адресам: 

<

...> Бухта Казачья, 5, Стрелецкий проезд, 14.

В соответствии с протоколами рассмотрения и оценки заявок от 22.12.2017 победителем запроса котировок определено общество.

Протоколы размещены в единой информационной системе лишь 24.12.2017.

Ответчиком предоставлены истцу проекты государственных контрактов, содержащие пункты 3.3.2 – 3.3.14 следующего содержания:

«3.3.2. До начала производства работ согласовать с заказчиком временную схему организации движения и ограждения мест производства работ, предоставить Государственному заказчику приказ о назначении лица, ответственного за выполнение работ.

3.3.3. Письменно уведомить Государственного заказчика о дате начала производства работ на объекте.

3.3.4. Обеспечить в ходе выполнения работ проведение мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности. пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

3.3.5. Обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не допускать, за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

3.3.6. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику.

3.3.7. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с требованием нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

3.3.8. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

3.3.9. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Государственному заказчику по его требованию.

3.3.10. Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность контроля над ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе предоставлять автотранспорт для выезда на место выполнения работ, беспрепятственно допускать к месту выполнения работ, представлять по требованию представителей Государственного заказчика отчеты о ходе выполнения работ;

3.3.11. Известить Государственного заказчика за 3 (три) рабочих дня о готовности скрытых работ к приемке. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления Подрядчиком актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственным заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрьггь любую часть скрытых работ, согласно указанию Государственного заказчика, а зат^^О^танр^В^т^е за свои счет.

3.3.12. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Государственным заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

3.3.13. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

3.3.14. Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ по Контракту. Обеспечить уборку и вывоз мусора с места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории и его захоронение в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации. Обеспечить чистоту на территории места выполнения работ по окончании производства работ. Вывезти в пятидневный срок со дня окончания выполнения работ за пределы территории места производства работ оборудование и материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для выполнения работ по Контракту».

Предписанием УФАС по Республике Крым и городу Севастополю от 28.12.2017 по делу № 08/5123-17 учреждению предписано исключить пункты 3.3.2 – 3.3.14 из проекта государственного контракта и в срок до 15.01.2018 исполнить данное предписание.

Между тем, исправленные проекты государственных контрактов в единой информационной системе так и не размещены.

18 января 2018 года общество направило учреждению подписанные со своей стороны государственные контракты, которые получены учреждением.

В то же время данное письмо оставлено без ответа.

В ответ на запрос истца от 16.02.2018 по вопросу о подписании контрактов учреждение направило письмо от 20.02.2018, в котором сообщило  об утрате права на подписание контрактов в связи с пропуском 20-дневного срока на их подписание.

Считая отказ заключить контракты на условиях, предписанных антимонопольным органом, неправомерным, истец обратился с иском в арбитражный суд.

В ходе судебного разбирательства истец повторно направил ответчику подписанные проекты государственных контрактов. Данное обращение истца оставлено без ответа.

В соответствии с пунктами 1, 2 и 3 части 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона.

Согласно части 1 статьи 2 Закона № 44-ФЗ законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из названного Закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона № 44-ФЗ. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать названному Закону. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Данные правовые акты должны соответствовать нормативным правовым актам, указанным в частях 1 и 2 настоящей статьи, (часть 3 статьи 2 Закона № 44-ФЗ).

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 настоящего Федерального закона. Согласование заключения контракта в указанных случаях, за исключением случаев заключения контрактов в соответствии с частями 4 и 5 статьи 15, частями 1-3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, проводится при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, или контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок. В соответствии с настоящим пунктом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки, или цену контракта, предложенную соответствующим участником закупки при проведении электронного аукциона. Обращение заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. При этом срок согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты поступления указанного обращения. Контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого согласования, или в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона, в срок не более чем двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся, или в случаях, предусмотренных частями 1-3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, в сроки, установленные соответственно статьей 70 и частью 13 статьи 78 настоящего Федерального закона. Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержден приказом Минэкономразвития России от 31.03.2015 №189 (далее – Порядок согласования).

В пункте 8 Порядка согласования установлено, что по результатам рассмотрения обращения комиссия контрольного органа принимает одно из следующих решений:

о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе с указанием выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые не повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и необходимости устранения выявленных нарушений при заключении контракта;

об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему документов выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые повлияли на результат определения поставщика 'подрядчика, исполнителя).

Согласно части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Частью 1 статьи 54 Закона № 44-ФЗ установлено, что по результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.

Согласно частям 1, 2 и 3 статьи 50 Закона № 44-ФЗ конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, должна содержать, в том числе, наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона. К конкурсной документации должен быть приложен проект контракта, который является неотъемлемой частью конкурсной документации. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса.

В соответствии с частью 1 статьи 53 Закона № 44-ФЗ срок рассмотрения и щенки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в норме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней.

Согласно части 2 статьи 54 Закона № 44-ФЗ контракт заключается не ранее, чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола.

Как следует из материалов дела, несмотря на вступившее в законную силу решение антимонопольного органа, учреждение не осуществило подготовку проекта контракта, соответствующего требованиям действующего законодательства – скорректированные проекты контрактов не были размещены в единой информационной системе и не были направлены истцу. При этом ответчик также не сообщил истцу о принятии решения об утрате обществом права н заключение контракта после направления последним своих вариантов проектов контрактов.

В статье 3 Закона № 44-ФЗ закреплен принцип профессионализма заказчика, согласно которому контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

Между тем, в рассматриваемом случае заказчик уклонился от исполнения своих обязанностей, чем поставил победителя торгов в ущемленное положение, воспрепятствовавшее последнему своевременно реализовать возможность  воспользоваться нормальным алгоритмом заключения государственных контрактов.

В таких условиях направление обществом своих вариантов текста государственных контрактов не может рассматриваться как пропуск установленного законом срока на подписание контракта, влекущий утрату права на заключение государственного контракта.

Оценив спорные условия пунктов 3.3.2 – 3.3.14  государственных контрактов, суд находит их не соответствующими действующему законодательству и нарушающими прав подрядчика как возлагающие на него дополнительные обязанности, не предусмотренные законом и не соответствующие предмету закупки.

При таких обстоятельствах, в силу норм статей 448, 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 78 Закона № 44-ФЗ надлежащим способом защиты нарушенных прав победителя торгов, лишенного возможности заключить государственные контракты в установленном законом порядке, является обязание ответчика заключить эти контракты на условиях, соответствующих закону.

Поскольку при подаче иска истец допустил недоплату государственной пошлины, фактически понесенные расходы на уплату государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Государственная пошлина по иску в остальной части подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

 

 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Обязать Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 02.07.2014, адрес: улица Николая Музыки, дом 50 

<

...>, заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Тонар-35», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 25.04.2014, адрес: улица Строительная, дом 11-А, квартира 22, 

<

...>, государственные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на следующих условиях:

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРАКТ № __

 

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>"

 

город Севастополь                                                                                 «___» ________________ 2018 г.

 

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, действующий от имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения Севастополя, в лице исполняющего обязанности директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тонар-35», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем.

 

Идентификационный код закупки : 172920400367092040100102040047112000

1.      Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>" (далее – работы),  а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2.      Требования к выполняемым работам, состав и объем работ определяются                      Техническим заданием (приложение № 1  к Контракту).

1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью контракта).

1.4. Место выполнения работ:  по месту по месту нахождения Подрядчика. Подрядчик доставляет результат выполнения работ до места нахождения Государственного заказчика: 

<

...>.

1.6. Место нахождения объекта: 

<

...>.

 

2.      Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом.

2.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:

2.2.1. По соглашению Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта.

2.2.2. По соглашению Сторон в ходе исполнения Контракта Государственный заказчик вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.2.3. В случае уменьшения Государственному заказчику ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств по соглашению Сторон Контракта возможны изменения существенных условий. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом. В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов работ и (или) об изменении сроков исполнения Контракта, Государственный заказчик обеспечивает согласование существенных условий Контракта в части сокращения объемов работ.

2.3. Цена Контракта составляет 98 750 рублей 00 копеек (Девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %)- 15 063 рубля 56 копеек (Пятнадцать тысяч шестьдесят три рубля 56 копеек). [1]

В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, материалы и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.5.  Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.5.2. Оплата производится в Российских рублях.

2.5.3. Авансовые платежи не предусмотрены.

Зачет авансового платежа производится при окончательной оплате выполненных работ.

2.5.4. Расчет за выполненные Подрядчиком и принятые Государственным заказчиком работы осуществляется в течение 14 рабочих дней со дня заключения  Государственным заказчиком  и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ, а также выставленных Подрядчиком  счетов, счетов-фактур (если облагается НДС), в размере стоимости работ.

2.6. Источник финансирования –  бюджет субъекта Российской Федерации.

 

3.      Права и обязанности Сторон

3.1. Государственный заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работ по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. По согласованию Сторон изменить существенные условия Контракта в соответствии с п. 2.2. Контракта.

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

3.1.7. Производить соответствующие записи в Общем журнале работ при выполнении работ на Объекте, выдавать предписания.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2. Государственный  заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы  в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3.  Оплатить  выполненную по Контракту работу в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.4. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.2.5. Предоставить экспертам дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить работу в установленные сроки, а также в соответствии с условиями Контракта передать Государственному заказчику ее результаты в порядке, установленном Контрактом.

3.3.15 Подрядчик и его полномочные представители, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Государственного заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением  работ по Контракту.

3.3.16. Незамедлительно, в трехдневный срок, письменно информировать Государственного заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

3.3.17. Незамедлительно, в трехдневный срок, в письменной форме сообщать Государственному заказчику о приостановлении или прекращении работы.

3.3.18. Предоставлять по запросам Государственного заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

3.3.19. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.3.20. Своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.21. Предоставить экспертам дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Государственным заказчиком досрочно выполнить работы.

3.4.3. По согласованию Сторон изменить существенные условия Контракта в соответствии с п. 2.2. Контракта.

3.4.4.       Запрашивать у Государственного заказчика информацию,  необходимую для исполнения Контракта.

3.4.5. Требовать возмещения неустойки и(или) убытков, причиненных Подрядчику по вине Государственного заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

 

4. Сроки выполнения работ

4.1.  Сроки выполнения работ – в течение месяца с момента заключения настоящего Контракта.

4.2. Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с Государственным заказчиком. В случае согласования досрочного выполнение работ Государственный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.

 

5. Порядок привлечения субподрядных организаций Подрядчиком

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций осуществляется на основании статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

 

6.             Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Подрядчик не позднее не позднее следующего дня после окончания работы направляет в адрес Государственного заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче.

 Одновременно с указанным извещением (уведомлением) Подрядчик направляет Государственному заказчику комплект исполнительной документации, составленные в 2 (двух) экземплярах и подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и акт выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт выполненных работ), справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета на оплату выполненных работ.

6.2. Для проверки выполненных работ в части соответствия их результата условиям настоящего Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Государственный заказчик создает приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, и назначает дату приемки работ.  Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Приемка осуществляется приемочной  комиссией Государственного заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения (уведомления) о готовности работы к сдаче и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

6.5. По результатам приемки выполненных работ члены приемочной комиссии подписывают, а Государственный заказчик утверждает и направляет Подрядчику один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения, а также датой повторной приемки работ.  В случае отказа приемочной комиссии Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном приемочной комиссией Государственного заказчика, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Государственного заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в установленный произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно составленные и подписанные документы согласно п. 5.1. Контракта, для принятия Государственным заказчиком выполненных работ.

В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, приемной комиссией Государственного заказчика будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Государственный заказчик принимает выполненные работы.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Государственным заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Государственному заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Государственным заказчиком в письменном виде с предоставлением ответа в трехдневный срок. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов  для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Государственный заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Государственным заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _______________. Номером факса для получения уведомления является:________________.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении срок  обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Государственный заказчик вправе направить Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта и взыскать неустойку.

6.9. В случае досрочного завершения Подрядчиком обязательств по Контракту, Государственный заказчик вправе принять от Подрядчика выполненные работы по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

6.10. Датой (моментом) надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Контракту   является подписанный обеими Сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.

 

7. Обеспечение исполнения Контракта

 

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

 

8. Гарантии качества работ

8.1. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с условиями Контракта, требованиями Технического задания, проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими регламентами  и иными данными, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования;

б) соответствие материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ  в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4. В случае возникновения у Государственного заказчика претензий по качеству выполненных работ, Стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Государственного заказчика должна быть назначена экспертиза. В данном случае Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению.

8.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта обнаруженных дефектов от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

9. Ответственность сторон[2]

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[3], что составляет ___________.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных.

9.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[4], что составляет _________.

В случае если настоящий Контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[5], что составляет ________.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы[6], что составляет _________.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы[7], что составляет _________.

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, при условии выполнения п. 9.3. настоящего Контракта.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

10.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

10.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца,  Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон способов исполнения Контракта, в том числе Стороны имеют право  расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков.

 

11. Распределение рисков

11.1.    Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения настоящего Контракта, а также имущества, переданного Государственным заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.

11.2.    Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил безопасности в месте производства работ  от момента начала производства работ до момента подписания акта приемки выполненных  работ и освобождения объекта от своего имущества.

11.3. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения им работ на объекте в соответствии с Контрактом.

 

12. Порядок разрешения споров

12.1 Государственный заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.

12.3. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной форме. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения.

13. Расторжение Контракта

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

13.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

13.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Государственному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Государственный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

13.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

13.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с п. 3.3. Контракта Подрядчиком, Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Государственный заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

13.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

13.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 15 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 12.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

13.10. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика, а также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- выполнение работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не устранены Подрядчиком в установленный Государственный заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

-  неоднократного, более 2 (двух) раз, нарушения сроков выполнение работ;

13.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- неоднократного,  более 2 (двух) раз, нарушения сроков оплаты выполненных работ более чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней.

Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

13.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного  заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2018 года.

14.2. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов, договоров в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

 

15. Прочие условия

15.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Государственного заказчика и Подрядчика.

15.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

15.3. К Контракту прилагаются:

Приложение №  1 – Техническое задание.

15.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, одна Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.6. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права и обязанности Государственного заказчика по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

 

16. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

 

Государственный заказчик

Государственное казенное учреждение

города Севастополя «Управление по

эксплуатации объектов городского 

хозяйства»

 

299007, г. Севастополь, 

ул. Н. Музыки, 50

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>, КПП 920401001

СчетПБС № 03742D00110

в Управлении Федерального казначейства

по городу Севастополю

 

____________

"___" _________ 2018 г.

М.П.

Подрядчик

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тонар-35»

 

299018, г. Севастополь,

ул. Строительная 11-А, кв.22

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>   КПП 920301001

Расчетный счет 

<

***>

в АО КБ «РУБЛЕВ» г. Москва

корсчёт 30101810345250000253

БИК 044525253

 

______________            ФИО2

"___" _________ 2018 г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___» _____________ 2018 г. № ______

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>"

 

1. Государственный заказчик: Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»

2. Наименование работ: на изготовление проектно-сметной документации по демонтажу, перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящиеся в собственности города Севастополя, объектов;

        3.  Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 30.01.2018

 

                 4. Нормативно-правовые акты: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, условиями Государственного контракта с соблюдением требований следующих правовых и нормативных актов:

- Гражданский кодекс РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

- Порядок расходования средств бюджета города Севастополя на осуществление мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя;

- Постановление совета министров Республики Крым от 18.07.2017 № 370 «Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных) на территории Республики Крым на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения"

-Постановление Правительства Севастополя от 2 марта 2017 г. №160-пп «Об утверждении порядка принятия решений о сносе самовольных построек на территории города Севастополя»

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и других действующих нормативных документов РФ, а также других нормативно-правовых актов, существующих в данном регионе.

-    МДС 81–33.2004    Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (утв. постановлением Госстроя РФ от 12 января 2004 г. N 6)

-    МДС 81–25.2001    Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (утв. Постановлением Госстроя от 28.02.2001 №15)

-    МДС 81-36.2004    Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) (утв. Постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. N 180)

-    МДС 81-37.2004    Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) (утв. постановлением Госстроя России от 09.08.2002 г. № 105)

-    МДС 83-1.99

 

5. Основания выполнения работ.

5.1.) Письмо Департамента городского хозяйства города Севастополя №3020/05.1-10/2-17 от 29.11.2017 г.; 

5.2.) Решение Гагаринского суда г. Севастополя от 16.12.2016 г.            

6. Описание объекта, в отношении которого необходимо выполнить работы:

Двухэтажная капитальная пристройка, шириной 3,5 м. и длиной 12,5 м. и капитальный забор длиной 43 м., расположенные на земельном участке площадью 90 кв.м., прилегающем к кв. №6  многоквартирного жилого дома №5, расположенного по адресу: 

<

...>.

7. Исходные данные.

Предоставляются заказчиком в полном объеме для разработки Проекта производства работ по перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя. 

8. Состав и требования в проектно-сметной документации:

8.1. Состав проектно-сметной документации:

•        Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства», содержание текстовой и графической части согласно Постановлению Правительства № 87 от 16.02.2008 «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

•        Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

•        Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса на объекте (строение);

•        Проект организации дорожного движения на период работ по демонтажу строений;

•        Рабочая документация на перекладку (вынос и устройство сетей инженерно-технического обеспечения подземного сооружения (при необходимости);

•        Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (сети);

•        Проект устройства временных сетей ХГВС;

•         Сметная документация.

 

8.2. Требования к выполнению работ: 

8.2.1. Порядок выполнения работ по перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках:

1 этап – вскрытие, демонтаж и вывоз стеновых блоков, железобетонных и металлических отходов, очистка места после демонтажа объекта от строительного мусора, перевозка строительного мусора на объект размещения отходов, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов;

2 этап -  хранение отходов стеновых блоков, железобетонных и металлических конструкций, с выдачей владельцам или утилизацией по истечении срока хранения.

8.2.2. Работы по демонтажу следует выполнять с 8:00 до 17:00 ч.;  

8.2.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной и электробезопасности, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ;

8.2.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;

8.2.5. Подрядчик выполняет работы с учетом сохранения элементов озеленения, в случае повреждения обеспечить восстановление элементов озеленения за счет собственных средств;

8.2.6. Перед и после оказания услуг по демонтажу объекта Исполнителем должна быть произведена фотосъемка территории на которой был размещен объект.

8.2.7. В процессе оказания услуг по вывозу (перевозке) объекта при необходимости Исполнитель должен обеспечить сопровождение объекта Госавтоинспекцией.

8.2.8. В случае, когда демонтаж незаконно размещенного объекта невозможен без нанесения ущерба указанному объекту, происходит разбор конструкционных частей объекта и фото фиксация таких элементов с присвоением им инвентарных номеров.

8.2.9. При демонтаже объекта Исполнитель совместно с Государственным заказчиком составляет Акт о перемещении (демонтаже) объекта, в котором указываются место, время и основание проведения демонтажа незаконно установленного и эксплуатируемого объекта, место его хранения.

 

9. Согласование проектно-сметной документации.

Согласовать в госорганах и городских организациях проектно-сметную документацию на демонтаж незаконно (самовольных) построек, в объеме, необходимом для выдачи разрешения на работы.

 

10. Порядок сдачи работ: 

Генеральному проектировщику представить:

- перед сдачей в экспертизу, один комплект проектно-сметной документации на рассмотрение и согласование Заказчиком на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу;

- после получения положительного заключения экспертизы, комплект проектно-сметной документации, прошедший экспертизу и корректирующие записки в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), дополнительно, сметная документация предоставляется в формате xls (MS Exсel) и формате «Гранд смета».

Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу;

- после согласования комплекта проектно-сметной документации, в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), дополнительно, сметная документация предоставляется в формате xls (MS Exсel) и формате «Гранд смета».

Двухэтажная капитальная пристройка, шириной 3,5 м. и длиной 12,5 м. и капитальный забор длиной 43 м., расположенные на земельном участке площадью 90 кв.м., прилегающем к кв. №6 многоквартирного жилого дома №5, расположенного по адресу: 

<

...>.

 

Государственный заказчик

_____________     

"___" _________ 2018 г.

М.П.

Подрядчик

 

___________ ФИО2

"___" _________ 2018 г.

М.П.,

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРАКТ № ___

 

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>"

 

город Севастополь                                                                         «______» января  2018 г.

 

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, действующий от имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения Севастополя, в лице исполняющего обязанности директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тонар-35», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем.

 

Идентификационный код закупки 172920400367092040100102040027112000

 

4.      Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>" (далее – работы), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2.      Требования к выполняемым работам, состав и объем работ определяются                      техническим заданием (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью контракта).

1.4. Место выполнения работ: по месту по месту нахождения Подрядчика. Подрядчик доставляет результат выполнения работ до места нахождения Государственного заказчика: 

<

...>.

1.6. Место нахождения объекта: 

<

...>.

 

5.      Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом.

2.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:

2.2.1. По соглашению Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта.

2.2.2. По соглашению Сторон в ходе исполнения Контракта Государственный заказчик вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.2.3. В случае уменьшения Государственному заказчику ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств по соглашению Сторон Контракта возможны изменения существенных условий. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом. В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов работ и (или) об изменении сроков исполнения Контракта, Государственный заказчик обеспечивает согласование существенных условий Контракта в части сокращения объемов работ.

2.3. Цена Контракта составляет 112 500 рублей 00 копеек (Сто двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %)- 17 161 рубль 02 копейки (Семнадцать тысяч сто шестьдесят один рубль 02 копейки). [8]

В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, материалы и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.5.  Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.5.2. Оплата производится в Российских рублях.

2.5.3. Авансовые платежи не предусмотрены.

Зачет авансового платежа производится при окончательной оплате выполненных работ.

2.5.4. Расчет за выполненные Подрядчиком и принятые Государственным заказчиком работы осуществляется в течение 14 рабочих дней со дня заключения Государственным заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ, а также выставленных Подрядчиком счетов, счетов-фактур (если облагается НДС), в размере стоимости работ.

2.6. Источник финансирования –  бюджет субъекта Российской Федерации.

 

6.      Права и обязанности Сторон

3.1. Государственный заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работ по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. По согласованию Сторон изменить существенные условия Контракта в соответствии с п. 2.2. Контракта.

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

3.1.7. Производить соответствующие записи в Общем журнале работ при выполнении работ на Объекте, выдавать предписания.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2. Государственный  заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы  в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3.  Оплатить  выполненную по Контракту работу в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.4. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.2.5. Предоставить экспертам дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить работу в установленные сроки, а также в соответствии с условиями Контракта передать Государственному заказчику ее результаты в порядке, установленном Контрактом.

3.3.15 Подрядчик и его полномочные представители, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Государственного заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением  работ по Контракту.

3.3.16. Незамедлительно, в трехдневный срок, письменно информировать Государственного заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

3.3.17. Незамедлительно, в трехдневный срок, в письменной форме сообщать Государственному заказчику о приостановлении или прекращении работы.

3.3.18. Предоставлять по запросам Государственного заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

3.3.19. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.3.20. Своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.21. Предоставить экспертам дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Государственным заказчиком досрочно выполнить работы.

3.4.3. По согласованию Сторон изменить существенные условия Контракта в соответствии с п. 2.2. Контракта.

3.4.4.       Запрашивать у Государственного заказчика информацию,  необходимую для исполнения Контракта.

3.4.5. Требовать возмещения неустойки и(или) убытков, причиненных Подрядчику по вине Государственного заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

 

4. Сроки выполнения работ

4.1 Сроки выполнения работ – в течение месяца с момента заключения настоящего Контракта.

4.2. Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с Государственным заказчиком. В случае согласования досрочного выполнение работ Государственный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.

 

5. Порядок привлечения субподрядных организаций Подрядчиком

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций осуществляется на основании статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

 

7.             Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Подрядчик не позднее не позднее следующего дня после окончания работы направляет в адрес Государственного заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче.

 Одновременно с указанным извещением (уведомлением) Подрядчик направляет Государственному заказчику комплект исполнительной документации, составленные в 2 (двух) экземплярах и подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и акт выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт выполненных работ), справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета на оплату выполненных работ.

6.2. Для проверки выполненных работ в части соответствия их результата условиям настоящего Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Государственный заказчик создает приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, и назначает дату приемки работ.  Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Приемка осуществляется приемочной  комиссией Государственного заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения (уведомления) о готовности работы к сдаче и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

6.5. По результатам приемки выполненных работ члены приемочной комиссии подписывают, а Государственный заказчик утверждает и направляет Подрядчику один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения, а также датой повторной приемки работ.  В случае отказа приемочной комиссии Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном приемочной комиссией Государственного заказчика, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Государственного заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в установленный произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно составленные и подписанные документы согласно п. 5.1. Контракта, для принятия Государственным заказчиком выполненных работ.

В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, приемной комиссией Государственного заказчика будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Государственный заказчик принимает выполненные работы.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Государственным заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Государственному заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Государственным заказчиком в письменном виде с предоставлением ответа в трехдневный срок. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов  для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Государственный заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Государственным заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: ya.poyarkova@yandex.ru. Номером факса для получения уведомления является: нет.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении срок  обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Государственный заказчик вправе направить Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта и взыскать неустойку.

6.9. В случае досрочного завершения Подрядчиком обязательств по Контракту, Государственный заказчик вправе принять от Подрядчика выполненные работы по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

6.10. Датой (моментом) надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Контракту   является подписанный обеими Сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.

 

7. Обеспечение исполнения Контракта

 

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

 

8. Гарантии качества работ

8.1. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с условиями Контракта, требованиями Технического задания, проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и иными данными, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования;

б) соответствие материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ  в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4. В случае возникновения у Государственного заказчика претензий по качеству выполненных работ, Стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Государственного заказчика должна быть назначена экспертиза. В данном случае Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению.

8.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта обнаруженных дефектов от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

9. Ответственность сторон[9]

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[10], что составляет ___________.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных.

9.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[11], что составляет _________.

В случае если настоящий Контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[12], что составляет ________.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы[13], что составляет _________.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы[14], что составляет _________.

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, при условии выполнения п. 9.3. настоящего Контракта.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

10.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

10.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца,  Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон способов исполнения Контракта, в том числе Стороны имеют право  расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков.

 

11. Распределение рисков

11.1.    Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения настоящего Контракта, а также имущества, переданного Государственным заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.

11.2.    Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил безопасности в месте производства работ  от момента начала производства работ до момента подписания акта приемки выполненных  работ и освобождения объекта от своего имущества.

11.3. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения им работ на объекте в соответствии с Контрактом.

 

12. Порядок разрешения споров

12.1 Государственный заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.

12.3. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной форме. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения.

13. Расторжение Контракта

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

13.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

13.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Государственному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Государственный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

13.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

13.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с п. 3.3. Контракта Подрядчиком, Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Государственный заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

13.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

13.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 15 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 12.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

13.10. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика, а также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- выполнение работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не устранены Подрядчиком в установленный Государственный заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

-  неоднократного, более 2 (двух) раз, нарушения сроков выполнение работ;

13.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- неоднократного,  более 2 (двух) раз, нарушения сроков оплаты выполненных работ более чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней.

Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

13.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2018 года.

14.2. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов, договоров в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

15. Прочие условия

15.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Государственного заказчика и Подрядчика.

15.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

15.3. К Контракту прилагаются:

Приложение №  1 – Техническое задание.

15.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, одна Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.6. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права и обязанности Государственного заказчика по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

16. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

 

Государственный заказчик

Государственное казенное учреждение

города Севастополя «Управление по

эксплуатации объектов городского 

хозяйства»

 

299007, г. Севастополь, 

ул. Н. Музыки, 50

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>, КПП 920401001

СчетПБС № 03742D00110

в Управлении Федерального казначейства

по городу Севастополю

 

____________

"___" _________ 2018 г.

М.П.

Подрядчик

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тонар-35»

 

299018, г. Севастополь,

ул. Строительная 11-А, кв.22

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>   КПП 920301001

Расчетный счет 

<

***>

в АО КБ «РУБЛЕВ» г. Москва

корсчёт 30101810345250000253

БИК 044525253

 

______________            ФИО2

"___" _________ 2018 г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___» _____________ 2018 г. № ______

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>"

1. Государственный заказчик: Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»

2. Наименование услуг: на изготовление проектно-сметной документации по демонтажу, перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящиеся в собственности города Севастополя, объектов;

        3.  Срок оказания услуг: с даты заключения контракта до  30.01.2018г.

                 4. Нормативно-правовые акты: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, условиями Государственного контракта с соблюдением требований следующих правовых и нормативных актов:

- Гражданский кодекс РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

- Порядок расходования средств бюджета города Севастополя на осуществление мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя;

- Постановление совета министров Республики Крым от 18.07.2017 № 370 «Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных) на территории Республики Крым на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения"

-Постановление Правительства Севастополя от 2 марта 2017 г. №160-пп «Об утверждении порядка принятия решений о сносе самовольных построек на территории города Севастополя»

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и других действующих нормативных документов РФ, а также других нормативно-правовых актов, существующих в данном регионе.

-    МДС 81–33.2004    Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (утв. постановлением Госстроя РФ от 12 января 2004 г. N 6)

-    МДС 81–25.2001    Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (утв. Постановлением Госстроя от 28.02.2001 №15)

-    МДС 81-36.2004    Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) (утв. Постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. N 180)

-    МДС 81-37.2004    Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) (утв. постановлением Госстроя России от 09.08.2002 г. № 105)

-    МДС 83-1.99

5. Основания выполнения работ.

5.1.) Письмо Департамента городского хозяйства города Севастополя №3020/05.1-10/2-17 от 29.11.2017 г.; 

5.2.) Решение Гагаринского районного суда г. Севастополя

 от 27.10.1015 г.            6. Описание объекта, в отношении которого необходимо выполнить работы:

Одноэтажная капитальная пристройка к жилому дому по ул. Древняя 23, ориентировочной площадью 0,1266 га; капитальный навес; капитальный каменный забор, ориентировочной длиной 175,8 м; расположенного по адресу: 

<

...>.

7. Исходные данные.

Предоставляются заказчиком в полном объеме для разработки Проекта производства работ по перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя. 

8. Состав и требования в проектно-сметной документации:

8.1. Состав проектно-сметной документации:

•        Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства», содержание текстовой и графической части согласно Постановлению Правительства № 87 от 16.02.2008 «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

•        Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

•        Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса на объекте (строение);

•        Проект организации дорожного движения на период работ по демонтажу строений;

•        Рабочая документация на перекладку (вынос и устройство сетей инженерно-технического обеспечения подземного сооружения (при необходимости);

•        Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (сети);

•        Проект устройства временных сетей ХГВС;

•         Сметная документация.

         8.2. Требования к выполнению работ: 

8.2.1. Порядок выполнения работ по перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках:

1 этап – вскрытие, демонтаж и вывоз стеновых блоков, железобетонных и металлических отходов, очистка места после демонтажа объекта от строительного мусора, перевозка строительного мусора на объект размещения отходов, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов;

2 этап -  хранение отходов стеновых блоков, железобетонных и металлических конструкций, с выдачей владельцам или утилизацией по истечении срока хранения.

8.2.2. Работы по демонтажу следует выполнять с 8:00 до 17:00 ч.;  

8.2.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной и электробезопасности, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ;

8.2.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;

8.2.5. Подрядчик выполняет работы с учетом сохранения элементов озеленения, в случае повреждения обеспечить восстановление элементов озеленения за счет собственных средств;

8.2.6. Перед и после оказания услуг по демонтажу объекта Исполнителем должна быть произведена фотосъемка территории на которой был размещен объект.

8.2.7. В процессе оказания услуг по вывозу (перевозке) объекта при необходимости Исполнитель должен обеспечить сопровождение объекта Госавтоинспекцией.

8.2.8. В случае, когда демонтаж незаконно размещенного объекта невозможен без нанесения ущерба указанному объекту, происходит разбор конструкционных частей объекта и фото фиксация таких элементов с присвоением им инвентарных номеров.

8.2.9. При демонтаже объекта Исполнитель совместно с Государственным заказчиком составляет Акт о перемещении (демонтаже) объекта, в котором указываются место, время и основание проведения демонтажа незаконно установленного и эксплуатируемого объекта, место его хранения.

9. Согласование проектно-сметной документации.

Согласовать в госорганах и городских организациях проектно-сметную документацию на демонтаж незаконно (самовольных) построек, в объеме, необходимом для выдачи разрешения на работы.

10. Порядок сдачи работ: 

Генеральному проектировщику представить:

- перед сдачей в экспертизу, один комплект проектно-сметной документации на рассмотрение и согласование Заказчиком на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу;

- после получения положительного заключения экспертизы, комплект проектно-сметной документации, прошедший экспертизу и корректирующие записки в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), дополнительно, сметная документация предоставляется в формате xls (MS Exсel) и формате «Гранд смета».

Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу;

- после согласования комплекта проектно-сметной документации, в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), дополнительно, сметная документация предоставляется в формате xls (MS Exсel) и формате «Гранд смета».

 

Государственный заказчик

_____________

"___" _________ 2018 г.

М.П.

Подрядчик

____________ ФИО2

"___" _________ 2018 г.

М.П.

 

 

КОНТРАКТ №  

 

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>"

 

город Севастополь                                                                         «___» ________________ 2018 г.

 

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, действующий от имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения Севастополя, в лице исполняющего обязанности директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тонар-35», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола ________________________ от _____ № _____, извещение от _________ № ________, заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем.

 

Идентификационный код закупки 172920400367092040100102040037112000

 

7.      Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>" (далее – работы), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2.      Требования к выполняемым работам, состав и объем работ определяются                      Техническим заданием (приложение № 1  к Контракту).

1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью контракта).

1.4. Место выполнения работ: по месту по месту нахождения Подрядчика. Подрядчик доставляет результат выполнения работ до места нахождения Государственного заказчика: 

<

...>.

1.6. Место нахождения объекта: 

<

...>.

 

8.      Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом.

2.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:

2.2.1. По соглашению Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта.

2.2.2. По соглашению Сторон в ходе исполнения Контракта Государственный заказчик вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.2.3. В случае уменьшения Государственному заказчику ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств по соглашению Сторон Контракта возможны изменения существенных условий. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом. В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов работ и (или) об изменении сроков исполнения Контракта, Государственный заказчик обеспечивает согласование существенных условий Контракта в части сокращения объемов работ.

2.3. Цена Контракта составляет 132 500 рублей 00 копеек (Сто тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %)- 20 211 рублей 86 копеек (Двадцать тысяч двести одиннадцать рублей 86 копеек). [15]

В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, материалы и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.5.  Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.5.2. Оплата производится в Российских рублях.

2.5.3. Авансовые платежи не предусмотрены.

Зачет авансового платежа производится при окончательной оплате выполненных работ.

2.5.4. Расчет за выполненные Подрядчиком и принятые Государственным заказчиком работы осуществляется в течение 14 рабочих дней со дня заключения Государственным заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ, а также выставленных Подрядчиком счетов, счетов-фактур (если облагается НДС), в размере стоимости работ.

2.6. Источник финансирования –  бюджет субъекта Российской Федерации.

 

9.      Права и обязанности Сторон

3.1. Государственный заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работ по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. По согласованию Сторон изменить существенные условия Контракта в соответствии с п. 2.2. Контракта.

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

3.1.7. Производить соответствующие записи в Общем журнале работ при выполнении работ на Объекте, выдавать предписания.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2. Государственный  заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы  в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3.  Оплатить  выполненную по Контракту работу в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.4. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.2.5. Предоставить экспертам дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить работу в установленные сроки, а также в соответствии с условиями Контракта передать Государственному заказчику ее результаты в порядке, установленном Контрактом.

3.3.15 Подрядчик и его полномочные представители, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Государственного заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением  работ по Контракту.

3.3.16. Незамедлительно, в трехдневный срок, письменно информировать Государственного заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

3.3.17. Незамедлительно, в трехдневный срок, в письменной форме сообщать Государственному заказчику о приостановлении или прекращении работы.

3.3.18. Предоставлять по запросам Государственного заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

3.3.19. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.3.20. Своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.21. Предоставить экспертам дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Государственным заказчиком досрочно выполнить работы.

3.4.3. По согласованию Сторон изменить существенные условия Контракта в соответствии с п. 2.2. Контракта.

3.4.4.       Запрашивать у Государственного заказчика информацию,  необходимую для исполнения Контракта.

3.4.5. Требовать возмещения неустойки и(или) убытков, причиненных Подрядчику по вине Государственного заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

 

4. Сроки выполнения работ

4.1.  Сроки выполнения работ – в течение месяца с момента заключения настоящего Контракта.

4.2. Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с Государственным заказчиком. В случае согласования досрочного выполнение работ Государственный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.

 

5. Порядок привлечения субподрядных организаций Подрядчиком

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций осуществляется на основании статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

 

8.             Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Подрядчик не позднее не позднее следующего дня после окончания работы направляет в адрес Государственного заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче.

 Одновременно с указанным извещением (уведомлением) Подрядчик направляет Государственному заказчику комплект исполнительной документации, составленные в 2 (двух) экземплярах и подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и акт выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт выполненных работ), справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета на оплату выполненных работ.

6.2. Для проверки выполненных работ в части соответствия их результата условиям настоящего Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Государственный заказчик создает приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, и назначает дату приемки работ.  Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Приемка осуществляется приемочной  комиссией Государственного заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения (уведомления) о готовности работы к сдаче и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

6.5. По результатам приемки выполненных работ члены приемочной комиссии подписывают, а Государственный заказчик утверждает и направляет Подрядчику один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения, а также датой повторной приемки работ.  В случае отказа приемочной комиссии Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном приемочной комиссией Государственного заказчика, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Государственного заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в установленный произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно составленные и подписанные документы согласно п. 5.1. Контракта, для принятия Государственным заказчиком выполненных работ.

В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, приемной комиссией Государственного заказчика будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Государственный заказчик принимает выполненные работы.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Государственным заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Государственному заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Государственным заказчиком в письменном виде с предоставлением ответа в трехдневный срок. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов  для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Государственный заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Государственным заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: ya.poyarkova@yandex.ru. Номером факса для получения уведомления является: нет.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Государственный заказчик вправе направить Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта и взыскать неустойку.

6.9. В случае досрочного завершения Подрядчиком обязательств по Контракту, Государственный заказчик вправе принять от Подрядчика выполненные работы по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

6.10. Датой (моментом) надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Контракту   является подписанный обеими Сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.

 

7. Обеспечение исполнения Контракта

 

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

 

8. Гарантии качества работ

8.1. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с условиями Контракта, требованиями Технического задания, проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и иными данными, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования;

б) соответствие материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ  в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4. В случае возникновения у Государственного заказчика претензий по качеству выполненных работ, Стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Государственного заказчика должна быть назначена экспертиза. В данном случае Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению.

8.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта обнаруженных дефектов от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

9. Ответственность сторон[16]

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[17], что составляет ___________.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных.

9.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[18], что составляет _________.

В случае если настоящий Контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[19], что составляет ________.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы[20], что составляет _________.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы[21], что составляет _________.

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, при условии выполнения п. 9.3. настоящего Контракта.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

10.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

10.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца,  Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон способов исполнения Контракта, в том числе Стороны имеют право  расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков.

 

11. Распределение рисков

11.1.    Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения настоящего Контракта, а также имущества, переданного Государственным заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.

11.2.    Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил безопасности в месте производства работ  от момента начала производства работ до момента подписания акта приемки выполненных  работ и освобождения объекта от своего имущества.

11.3. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения им работ на объекте в соответствии с Контрактом.

 

12. Порядок разрешения споров

12.1 Государственный заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.

12.3. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной форме. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения.

13. Расторжение Контракта

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

13.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

13.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Государственному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Государственный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

13.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

13.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с п. 3.3. Контракта Подрядчиком, Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Государственный заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

13.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

13.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 15 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 12.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

13.10. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика, а также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- выполнение работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не устранены Подрядчиком в установленный Государственный заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

-  неоднократного, более 2 (двух) раз, нарушения сроков выполнение работ;

13.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- неоднократного,  более 2 (двух) раз, нарушения сроков оплаты выполненных работ более чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней.

Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

13.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного  заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2018 года.

14.2. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов, договоров в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

 

15. Прочие условия

15.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Государственного заказчика и Подрядчика.

15.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

15.3. К Контракту прилагаются:

Приложение №  1 – Техническое задание.

15.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, одна Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.6. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права и обязанности Государственного заказчика по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

 

16. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

 

Государственный заказчик

Государственное казенное учреждение

города Севастополя «Управление по

эксплуатации объектов городского 

хозяйства»

 

299007, г. Севастополь, 

ул. Н. Музыки, 50

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>, КПП 920401001

Счет ПБС № 03742D00110

в Управлении Федерального казначейства

по городу Севастополю

 

____________

"___" _________ 2018 г.

М.П.

Подрядчик

 

Общество с ограниченной

 ответственностью «Тонар-35»

 

299018, г. Севастополь,

ул. Строительная 11-А, кв.22

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>   КПП 920301001

Расчетный счет 

<

***>

в АО КБ «РУБЛЕВ» г. Москва

корсчёт 30101810345250000253

БИК 044525253

 

______________            ФИО2

"___" _________ 2018 г.

М.П.

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___» _____________ 2018 г. № ______

 

 

Техническое задание

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>"

 

1. Наименование услуг: на изготовление проектно-сметной документации по демонтажу, перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящиеся в собственности города Севастополя, объектов;

        2.  Срок оказания услуг: с даты заключения контракта до 30.12.2018г.

 

                 3. Нормативно-правовые акты: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, условиями Государственного контракта с соблюдением требований следующих правовых и нормативных актов:

- Гражданский кодекс РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

- Порядок расходования средств бюджета города Севастополя на осуществление мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя;

- Постановление совета министров Республики Крым от 18.07.2017 № 370 «Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных) на территории Республики Крым на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения"

-Постановление Правительства Севастополя от 2 марта 2017 г. №160-пп «Об утверждении порядка принятия решений о сносе самовольных построек на территории города Севастополя»

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и других действующих нормативных документов РФ, а также других нормативно-правовых актов, существующих в данном регионе.

-    МДС 81–33.2004    Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (утв. постановлением Госстроя РФ от 12 января 2004 г. N 6)

-    МДС 81–25.2001    Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (утв. Постановлением Госстроя от 28.02.2001 №15)

-    МДС 81-36.2004    Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) (утв. Постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. N 180)

-    МДС 81-37.2004    Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) (утв. постановлением Госстроя России от 09.08.2002 г. № 105)

-    МДС 83-1.99

 

4. Основания выполнения работ.

4.1.) Письмо Департамента городского хозяйства города Севастополя №3020/05.1-10/2-17 от 29.11.2017 г.; 

4.2.) Решение арбитражного суда г. Севастополя от 08.08.1016 г.            

5. Описание объекта, в отношении которого необходимо выполнить работы:

Здание кафе-бара «Тортуга», представляющего собой:

 - Цокольный этаж, который состоит из: I  торгового зала, основная площадь 53,8 кв.м., II торгового зала, основная площадь 76,2 кв. м., 

III санузла, подсобная площадь 3,9 кв. м.,  IV  кухни, подсобная площадь 8,5 кв.м., итого по цокольному этажу площадь 142,4 кв. м;

- Первый этаж, который состоит из: V кухни, подсобная площадь 19,0 кв. м., VI лестничного марша, подсобная площадь 2,9 кв.м., 

VII застекленной террасы, основная площадь 162,3 кв. м., итого по первому этажу 184,2 кв.м.;

- Второй этаж, который состоит из: VII террасы-торгового зала, основная площадь 168,6 кв.м., итого по второму этажу 168,6 кв.м.;

Итого по размещению объекта расположенного по адресу: 

<

...> площадь 495,2 кв.м., в том числе основная площадь 460,9 кв.м и подсобная площадь 34,3 кв.м.

6. Исходные данные.

Предоставляются заказчиком в полном объеме для разработки Проекта производства работ по перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя. 

7. Состав и требования в проектно-сметной документации:

7.1. Состав проектно-сметной документации:

•        Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства», содержание текстовой и графической части согласно Постановлению Правительства № 87 от 16.02.2008 «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

•        Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

•        Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса на объекте (строение);

•        Проект организации дорожного движения на период работ по демонтажу строений;

•        Рабочая документация на перекладку (вынос и устройство сетей инженерно-технического обеспечения подземного сооружения (при необходимости);

•        Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (сети);

•        Проект устройства временных сетей ХГВС;

•         Сметная документация.

 

7.2. Требования к выполнению работ: 

7.2.1. Порядок выполнения работ по перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках:

1 этап – вскрытие, демонтаж и вывоз стеновых блоков, железобетонных и металлических отходов, очистка места после демонтажа объекта от строительного мусора, перевозка строительного мусора на объект размещения отходов, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов;

2 этап -  хранение отходов стеновых блоков, железобетонных и металлических конструкций, с выдачей владельцам или утилизацией по истечении срока хранения.

7.2.2. Работы по демонтажу следует выполнять с 8:00 до 17:00 ч.;  

7.2.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной и электробезопасности, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ;

7.2.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;

7.2.5. Подрядчик выполняет работы с учетом сохранения элементов озеленения, в случае повреждения обеспечить восстановление элементов озеленения за счет собственных средств;

7.2.6. Перед и после оказания услуг по демонтажу объекта Исполнителем должна быть произведена фотосъемка территории на которой был размещен объект.

7.2.7. В процессе оказания услуг по вывозу (перевозке) объекта при необходимости Исполнитель должен обеспечить сопровождение объекта Госавтоинспекцией.

7.2.8. В случае, когда демонтаж незаконно размещенного объекта невозможен без нанесения ущерба указанному объекту, происходит разбор конструкционных частей объекта и фото фиксация таких элементов с присвоением им инвентарных номеров.

7.2.9. При демонтаже объекта Исполнитель совместно с Муниципальным заказчиком составляет Акт о перемещении (демонтаже) объекта, в котором указываются место, время и основание проведения демонтажа незаконно установленного и эксплуатируемого объекта, место его хранения.

 

8. Согласование проектно-сметной документации.

Согласовать в госорганах и городских организациях проектно-сметную документацию на демонтаж незаконно (самовольных) построек, в объеме, необходимом для выдачи разрешения на работы.

 

9. Порядок сдачи работ: 

Генеральному проектировщику представить:

- перед сдачей в экспертизу, один комплект проектно-сметной документации на рассмотрение и согласование Заказчиком на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу;

- после получения положительного заключения экспертизы, комплект проектно-сметной документации, прошедший экспертизу и корректирующие записки в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), дополнительно, сметная документация предоставляется в формате xls (MS Exсel) и формате «Гранд смета».

Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу;

- после согласования комплекта проектно-сметной документации, в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), дополнительно, сметная документация предоставляется в формате xls (MS Exсel) и формате «Гранд смета».

 

 

Государственный заказчик

_____________     

"___" _________ 2018 г.

М.П.

Подрядчик

____________ ФИО2

"___" _________ 2018 г.

М.П.    

 

  КОНТРАКТ № 

 

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>"

 

город Севастополь                                                                                 «___» ________________ 2018 г.

 

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, действующий от имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения Севастополя, в лице исполняющего обязанности директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тонар-35», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола ________________________ от _____ № _____, извещение от _________ № ________, заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем.

 

Идентификационный код закупки :172920400367092040100102040017112000

10.  Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>" (далее – работы),  а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2.      Требования к выполняемым работам, состав и объем работ определяются                      Техническим заданием (приложение № 1  к Контракту).

1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью контракта).

1.4. Место выполнения работ:  по месту по месту нахождения Подрядчика. Подрядчик доставляет результат выполнения работ до места нахождения Государственного заказчика: 

<

...>.

1.6. Место нахождения объекта: 

<

...>.

 

11.  Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом.

2.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:

2.2.1. По соглашению Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта.

2.2.2. По соглашению Сторон в ходе исполнения Контракта Государственный заказчик вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.2.3. В случае уменьшения Государственному заказчику ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств по соглашению Сторон Контракта возможны изменения существенных условий. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом. В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов работ и (или) об изменении сроков исполнения Контракта, Государственный заказчик обеспечивает согласование существенных условий Контракта в части сокращения объемов работ.

2.3. Цена Контракта составляет 108 750 рублей 00 копеек (Сто восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %)- 16 588 рублей 98 копеек (Шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 98 копеек). [22]

В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, материалы и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.5.  Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.5.2. Оплата производится в Российских рублях.

2.5.3. Авансовые платежи не предусмотрены.

Зачет авансового платежа производится при окончательной оплате выполненных работ.

2.5.4. Расчет за выполненные Подрядчиком и принятые Государственным заказчиком работы осуществляется в течение 14 рабочих дней со дня заключения Государственным заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ, а также выставленных Подрядчиком счетов, счетов-фактур (если облагается НДС), в размере стоимости работ.

2.6. Источник финансирования –  бюджет субъекта Российской Федерации.

 

12.  Права и обязанности Сторон

3.1. Государственный заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работ по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. По согласованию Сторон изменить существенные условия Контракта в соответствии с п. 2.2. Контракта.

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

3.1.7. Производить соответствующие записи в Общем журнале работ при выполнении работ на Объекте, выдавать предписания.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2. Государственный  заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы  в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3.  Оплатить  выполненную по Контракту работу в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.4. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.2.5. Предоставить экспертам дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить работу в установленные сроки, а также в соответствии с условиями Контракта передать Государственному заказчику ее результаты в порядке, установленном Контрактом.

3.3.15 Подрядчик и его полномочные представители, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Государственного заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением  работ по Контракту.

3.3.16. Незамедлительно, в трехдневный срок, письменно информировать Государственного заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

3.3.17. Незамедлительно, в трехдневный срок, в письменной форме сообщать Государственному заказчику о приостановлении или прекращении работы.

3.3.18. Предоставлять по запросам Государственного заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

3.3.19. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.3.20. Своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.21. Предоставить экспертам дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Государственным заказчиком досрочно выполнить работы.

3.4.3. По согласованию Сторон изменить существенные условия Контракта в соответствии с п. 2.2. Контракта.

3.4.4.       Запрашивать у Государственного заказчика информацию,  необходимую для исполнения Контракта.

3.4.5. Требовать возмещения неустойки и(или) убытков, причиненных Подрядчику по вине Государственного заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

 

4. Сроки выполнения работ

4.1.  Сроки выполнения работ – в течение месяца с момента заключения настоящего Контракта.

4.2. Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с Государственным заказчиком. В случае согласования досрочного выполнение работ Государственный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.

 

5. Порядок привлечения субподрядных организаций Подрядчиком

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций осуществляется на основании статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

 

9.             Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Подрядчик не позднее не позднее следующего дня после окончания работы направляет в адрес Государственного заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче.

 Одновременно с указанным извещением (уведомлением) Подрядчик направляет Государственному заказчику комплект исполнительной документации, составленные в 2 (двух) экземплярах и подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и акт выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт выполненных работ), справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета на оплату выполненных работ.

6.2. Для проверки выполненных работ в части соответствия их результата условиям настоящего Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Государственный заказчик создает приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, и назначает дату приемки работ.  Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Приемка осуществляется приемочной  комиссией Государственного заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения (уведомления) о готовности работы к сдаче и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

6.5. По результатам приемки выполненных работ члены приемочной комиссии подписывают, а Государственный заказчик утверждает и направляет Подрядчику один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения, а также датой повторной приемки работ.  В случае отказа приемочной комиссии Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном приемочной комиссией Государственного заказчика, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Государственного заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в установленный произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно составленные и подписанные документы согласно п. 5.1. Контракта, для принятия Государственным заказчиком выполненных работ.

В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, приемной комиссией Государственного заказчика будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Государственный заказчик принимает выполненные работы.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Государственным заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Государственному заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Государственным заказчиком в письменном виде с предоставлением ответа в трехдневный срок. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов  для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Государственный заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Государственным заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _______________. Номером факса для получения уведомления является:________________.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении срок  обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Государственный заказчик вправе направить Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта и взыскать неустойку.

6.9. В случае досрочного завершения Подрядчиком обязательств по Контракту, Государственный заказчик вправе принять от Подрядчика выполненные работы по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

6.10. Датой (моментом) надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Контракту   является подписанный обеими Сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.

 

7. Обеспечение исполнения Контракта

 

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

 

8. Гарантии качества работ

8.1. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с условиями Контракта, требованиями Технического задания, проектно-сметной документацией,  строительными нормами и правилами, техническими регламентами  и иными данными, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования;

б) соответствие материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ  в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4. В случае возникновения у Государственного заказчика претензий по качеству выполненных работ, Стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Государственного заказчика должна быть назначена экспертиза. В данном случае Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению.

8.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта обнаруженных дефектов от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

9. Ответственность сторон[23]

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[24], что составляет ___________.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных.

9.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[25], что составляет _________.

В случае если настоящий Контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы[26], что составляет ________.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы[27], что составляет _________.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы[28], что составляет _________.

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, при условии выполнения п. 9.3. настоящего Контракта.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

10.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

10.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца,  Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон способов исполнения Контракта, в том числе Стороны имеют право  расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков.

 

11. Распределение рисков

11.1.    Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения настоящего Контракта, а также имущества, переданного Государственным заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.

11.2.    Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил безопасности в месте производства работ  от момента начала производства работ до момента подписания акта приемки выполненных  работ и освобождения объекта от своего имущества.

11.3. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения им работ на объекте в соответствии с Контрактом.

 

12. Порядок разрешения споров

12.1 Государственный заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.

12.3. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной форме. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения.

13. Расторжение Контракта

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

13.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

13.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Государственному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Государственный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

13.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

13.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с п. 3.3. Контракта Подрядчиком, Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Государственный заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

13.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

13.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 15 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 12.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

13.10. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика, а также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- выполнение работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не устранены Подрядчиком в установленный Государственный заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

-  неоднократного, более 2 (двух) раз, нарушения сроков выполнение работ;

13.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- неоднократного,  более 2 (двух) раз, нарушения сроков оплаты выполненных работ более чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней.

Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

13.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2018 года.

14.2. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов, договоров в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

 

15. Прочие условия

 

15.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Государственного заказчика и Подрядчика.

15.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

15.3. К Контракту прилагаются:

Приложение №  1 – Техническое задание.

15.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, одна Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.6. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права и обязанности Государственного заказчика по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

 

16. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

 

Государственный заказчик

Государственное казенное учреждение

города Севастополя «Управление по

эксплуатации объектов городского 

хозяйства»

 

299007, г. Севастополь, 

ул. Н. Музыки, 50

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>, КПП 920401001

СчетПБС № 03742D00110

в Управлении Федерального казначейства

по городу Севастополю

 

____________

"___" _________ 2018 г.

М.П.

Подрядчик

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тонар-35»

 

299018, г. Севастополь,

ул. Строительная 11-А, кв.22

ОГРН 

<

***>

ИНН 

<

***>   КПП 920301001

Расчетный счет 

<

***>

в АО КБ «РУБЛЕВ» г. Москва

корсчёт 30101810345250000253

БИК 044525253

 

______________            ФИО2

"___" _________ 2018 г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___» _____________ 2018 г. № ______

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Демонтаж самовольно размещенных объектов по адресу: 

<

...>"

 

1. Государственный заказчик: Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»

2. Наименование работ: на изготовление проектно-сметной документации по демонтажу, перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящиеся в собственности города Севастополя, объектов;

        3.  Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 30.12.2018г.

 

        4. Нормативно-правовые акты: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, условиями Государственного контракта с соблюдением требований следующих правовых и нормативных актов:

- Гражданский кодекс РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

- Порядок расходования средств бюджета города Севастополя на осуществление мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя;

- Постановление совета министров Республики Крым от 18.07.2017 № 370 «Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных) на территории Республики Крым на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения"

-Постановление Правительства Севастополя от 2 марта 2017 г. №160-пп «Об утверждении порядка принятия решений о сносе самовольных построек на территории города Севастополя»

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и других действующих нормативных документов РФ, а также других нормативно-правовых актов, существующих в данном регионе.

-    МДС 81–33.2004    Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (утв. постановлением Госстроя РФ от 12 января 2004 г. N 6)

-    МДС 81–25.2001    Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (утв. Постановлением Госстроя от 28.02.2001 №15)

-    МДС 81-36.2004    Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) (утв. Постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. N 180)

-    МДС 81-37.2004    Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) (утв. постановлением Госстроя России от 09.08.2002 г. № 105)

-    МДС 83-1.99

 

5. Основания выполнения работ.

5.1.) Письмо Департамента городского хозяйства города Севастополя №3020/05.1-10/2-17 от 29.11.2017 г.; 

5.2.) Решение № 21 апелляционного арбитражного суда от 24.06.1015 г.            

6. Описание объекта, в отношении которого необходимо выполнить работы:

Пятиэтажный объект незавершенного строительства, возведенный ЖСК «Стрелецкий проезд, 14», Площадь земельного 0,0592 га., кадастровый номер земельного участка 8536400000:01:012:0146; расположенный по адресу: 

<

...>. 

7. Исходные данные.

Предоставляются заказчиком в полном объеме для разработки Проекта производства работ по перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя. 

8. Состав и требования в проектно-сметной документации:

8.1. Состав проектно-сметной документации:

•        Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства», содержание текстовой и графической части согласно Постановлению Правительства № 87 от 16.02.2008 «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

•        Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

•        Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса на объекте (строение);

•        Проект организации дорожного движения на период работ по демонтажу строений;

•        Рабочая документация на перекладку (вынос и устройство сетей инженерно-технического обеспечения подземного сооружения (при необходимости);

•        Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (сети);

•        Проект устройства временных сетей ХГВС;

•         Сметная документация.

 

8.2. Требования к выполнению работ: 

8.2.1. Порядок выполнения работ по перемещению, хранению и утилизацию незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках:

1 этап – вскрытие, демонтаж и вывоз стеновых блоков, железобетонных и металлических отходов, очистка места после демонтажа объекта от строительного мусора, перевозка строительного мусора на объект размещения отходов, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов;

2 этап -  хранение отходов стеновых блоков, железобетонных и металлических конструкций, с выдачей владельцам или утилизацией по истечении срока хранения.

8.2.2. Работы по демонтажу следует выполнять с 8:00 до 17:00 ч.;  

8.2.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной и электробезопасности, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ;

8.2.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;

8.2.5. Подрядчик выполняет работы с учетом сохранения элементов озеленения, в случае повреждения обеспечить восстановление элементов озеленения за счет собственных средств;

8.2.6. Перед и после оказания услуг по демонтажу объекта Исполнителем должна быть произведена фотосъемка территории на которой был размещен объект.

8.2.7. В процессе оказания услуг по вывозу (перевозке) объекта при необходимости Исполнитель должен обеспечить сопровождение объекта Госавтоинспекцией.

8.2.8. В случае, когда демонтаж незаконно размещенного объекта невозможен без нанесения ущерба указанному объекту, происходит разбор конструкционных частей объекта и фото фиксация таких элементов с присвоением им инвентарных номеров.

8.2.9. При демонтаже объекта Исполнитель совместно с Государственным заказчиком составляет Акт о перемещении (демонтаже) объекта, в котором указываются место, время и основание проведения демонтажа незаконно установленного и эксплуатируемого объекта, место его хранения.

 

9. Согласование проектно-сметной документации.

Согласовать в госорганах и городских организациях проектно-сметную документацию на демонтаж незаконно (самовольных) построек, в объеме, необходимом для выдачи разрешения на работы.

 

10. Порядок сдачи работ: 

Генеральному проектировщику представить:

- перед сдачей в экспертизу, один комплект проектно-сметной документации на рассмотрение и согласование Заказчиком на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу;

- после получения положительного заключения экспертизы, комплект проектно-сметной документации, прошедший экспертизу и корректирующие записки в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), дополнительно, сметная документация предоставляется в формате xls (MS Exсel) и формате «Гранд смета».

Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу;

- после согласования комплекта проектно-сметной документации, в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF (Adobe Reader), дополнительно, сметная документация предоставляется в формате xls (MS Exсel) и формате «Гранд смета».

 

Государственный заказчик

_____________     

"___" _________ 2018 г.

М.П.

Подрядчик

 

___________ ФИО2

"___" _________ 2018 г.

М.П.»  

 

 

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 02.07.2014, адрес: улица Николая Музыки, дом 50 

<

...>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Тонар-35», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 25.04.2014, адрес: улица Строительная, дом 11-А, квартира 22, 

<

...> 000 рублей расходов на оплату государственной пошлины.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 02.07.2014, адрес: улица Николая Музыки, дом 50 

<

...>, в доход федерального бюджета 18 000 рублей государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя  в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня его принятия.

 

 

Судья

А.Ю. Смоляков

 

[1] В случае, если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством РФ не облагается НДС, то в настоящем пункте вместо слов «включая налог на добавленную стоимость (__  %): __рублей __ копеек» указать «НДС не облагается».

[2] Штрафные санкции рассчитываются на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063»

[3] а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

[4] а) 10 процентов цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

[5] а) 3 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

[6] а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

[7]а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

 

[8] В случае, если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством РФ не облагается НДС, то в настоящем пункте вместо слов «включая налог на добавленную стоимость (__  %): __рублей __ копеек» указать «НДС не облагается».

[9] Штрафные санкции рассчитываются на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063»

[10] а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

[11] а) 10 процентов цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

[12] а) 3 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

[13] а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

[14]а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

 

[15] В случае, если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством РФ не облагается НДС, то в настоящем пункте вместо слов «включая налог на добавленную стоимость (__  %): __рублей __ копеек» указать «НДС не облагается».

[16] Штрафные санкции рассчитываются на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063»

[17] а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

[18] а) 10 процентов цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

[19] а) 3 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

[20] а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

[21]а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

 

[22] В случае, если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством РФ не облагается НДС, то в настоящем пункте вместо слов «включая налог на добавленную стоимость (__  %): __рублей __ копеек» указать «НДС не облагается».

[23] Штрафные санкции рассчитываются на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063»

[24] а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

[25] а) 10 процентов цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

[26] а) 3 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

[27] а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

[28]а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.