АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 

www.kemerovo.arbitr.ru

тел. (384-2) 58-43-26, факс (384-2) 58-37-05

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-20280/2017

город Кемерово

16 октября 2017 года

Резолютивная часть  решения оглашена   12 октября 2017 года

Полный текст решения изготовлен   16 октября 2017 года

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С. ,    при ведении протокола  и аудиозаписи судебного заседания  помощником судьи Покосовой Н. Ю., 

рассмотрев в судебном заседании  дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙКОНТРАКТ», г. Кемерово   (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Государственному бюджетному учреждению   здравоохранения  Кемеровской области «Гурьевская районная больница», г. Гурьевск  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 4 973 044 руб. 46 коп. долга по  контракту № 2016.411516 от 20.12.2016года

при участии:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности №01/17-ССК от 07.09.2017года, паспорт,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Сибстройконтракт»  (истец, ООО «Сибстройконтракт») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области  с иском о взыскании с Государственного бюджетного  учреждения   здравоохранения  Кемеровской области «Гурьевская районная больница»  (ответчик, ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница»)   4 992 535 руб. 30 коп. долга по  контракту                               № 2016.411516 от 20.12.2016года 

Определением от 15.09.2017года исковое заявление принято к производству,    предварительное судебное заседание  по делу назначено на  12.10.2017года на 11.30 час., судебное разбирательство по рассмотрению спора по существу в судебном заседании суда первой инстанции  назначено на 12.10.2017года на 11 часов 45 минут.

В предварительном судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требовании, на основании которого просит взыскать с ответчика   4 973 044 руб. 64 коп.  по  рассматриваемому контракту.

Уточнение  судом  принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 Ответчик явку представителя в предварительное судебное заседание не обеспечил, возражений относительно проведения предварительного судебного заседания и рассмотрения дела по существу в судебном разбирательстве арбитражного суда первой инстанции не заявил. Представил отзыв, в котором  исковые требования истца признал обоснованными и подлежащими удовлетворению, наличие задолженности (неисполнение денежного обязательства) мотивировал  отсутствием поступления  денежных средств из муниципального бюджета.

При отсутствии возражений сторон, суд,  руководствуясь ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил подготовку дела к судебному разбирательству и перешел к судебному разбирательству по рассмотрению спора по существу.

Представитель истца заявленные исковые требования поддержал, изложил доводы в обоснование со ссылкой на представленные в материалы дела доказательства.

            Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

            Исследовав обстоятельства и материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил  следующее.

            Обществом  с ограниченной ответственностью «Сибстройконтракт» (подрядчик) и Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница» Гурьевского муниципального района» (заказчик) заключен  контракт                                  № 2016.411516 Капитальный ремонт психонаркологического отделения и администрации  МБУЗ «ЦРБ» по адресу: 

<

...> от 20.12.2016года, в соответствии с условиями которого  заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить  ремонтные работы: Капитальный ремонт психонаркологического отделения и администрации  МБУЗ «ЦРБ» по адресу: 

<

...> (объект) в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием, являющимся  неотъемлемой частью контракта и  его условиями, а заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные  надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего контракта (п.1.1. контракта).

            В соответствии с п.2.1. контракта, его цена составляет 4 992 535 руб. 30 коп. 

( п. 2. 1 контракта). 

             Заказчик производит оплату за фактически выполненные подрядчиком объемы после подписания акта приемки  выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3), предоставления счета-фактуры. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату за фактически  выполненные  подрядчиком  объемы в срок до 01.07.2017 года после подписания акта сдачи- приемки всего объекта  Заказчиком ( при отсутствии замечаний) и справок о стоимости  выполненных работ и затрат  (формы Кс-2, КС-3) , предоставления счета – фактуры и при условии оплаты  подрядчиком всех,  предусмотренных контрактом штрафных санкций  и пени, в случае, если заказчиком предъявлены такие санкции к оплате. Заказчик может произвести частичную  оплату выполненных и принятых работ  до подписания акта сдачи- приемки всего объекта в случае наличия денежных средств.  ( 2.4.)

            Согласно п. 9.1 контракт вступает в силу со дня заключения и действует до 01.07.2017, но в любом случае, до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту в полном объеме. При заключении и исполнении контракта изменение условий настоящего контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

            Согласно Решения Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 16.12.2016года №334-16 муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница» Гурьевского муниципального  района  переименовано в Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Кемеровской области «Гурьевская районная больница».

            С учетом переименования заказчика  сторонами подписано дополнительное соглашение №1 от 26.12.2016г. , которым в преамбулу  контракта внесены изменения в части  наименования заказчика. Правильным наименованием заказчика следует считать  «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Гурьевская районная больница» .

              Работы подрядчиком выполнены   и приняты заказчиком по актам  о приемке выполненных работ  (формы КС-2)  от 23.12.2016года №№10 на сумму  1 446 076, 56 руб. ( справка о стоимости выполненных работ и затрат  №10 от 23.12.2016года на сумму 1 446 076, 56 руб.), №9 от 23.12.2016года на сумму  455 268, 78 руб. (  справка о стоимости выполненных работ и затрат №9 от 23.12.2016года);  акту №8 от 23.12.2016года на сумму  137 903,  06 руб. ( справка о стоимости выполненных работ  №8 от 23.12.2016года);  акту о приемке выполненных работ №7 от 23.12.2016года на сумму 269  743, 28 руб. ( справка о стоимости выполненных работ и затрат  №7 от 23.12.2016года);  акту о приемке выполненных работ №6 от 23.12.2016года на сумму 131 370, 58 руб. (справка о стоимости выполненных работ и затрат №6 от 23.12.2016года) ;  акту о приемке выполненных работ №5 от 23.12.2016года на сумму  116 191, 06 руб. (справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 23.12.2016года на сумму 116 191, 06 руб. );  акту о приемке выполненных работ  №4 от 23.12.2016года на сумму  80 284, 84 руб. ( справка о стоимости выполненных работ №4 от 23.12.2016года на сумму 80 284, 84 руб.),  акту о приемке выполненных работ №3 от 23.12.2016года на сумму  1 817 938, 68 руб. ( справка о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 23.12.2016года на сумму 1 817  938, 68 руб.);  акту о приемке выполненных работ и затрат №2 от 23.12.2016года на сумму  146 199, 64 руб. ( справка о стоимости  выполненных работ №2 от 23.12.2016года на сумму 146 199, 64 руб.);  акту о приемке выполненных работ №1 от 23.12.2016года на сумму  372 068, 16 руб. ( справка о стоимости выполненных работ №1 от 23.12.2016года на сумму 372 068, 16 руб. ) , всего на сумму  4 973 044 руб. 64 коп. 

            На оплату выставлены счета-фактуры.

            Работы приняты, оплата не произведена. Претензия истца (исх. № 67 от 31.08.2017года)  ответчиком получена 05.09.2017года, что подтверждается почтовым уведомлением, оставлена без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим  иском.

            Наличие долга в сумме 4 973 044 руб. 64 коп.  ответчиком не оспорено и признано в акте  сверки взаимных расчетов за период:  9 месяцев 2017года, по состоянию на 30.09.2017года. Доказательств оплаты  долга на день принятия  судом решения  по иску, ответчиком в материалы дела не представлено.

            В соответствии с пунктом 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

            Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

            Таким образом, выполненные  подрядчиком   и принятые заказчиком работы подлежат оплате на основании положений  главы 37  Гражданского кодекса Российской Федерации, условий контракта №2016.411516 Капитальный ремонт психонаркологического отделения и администрации  МБУЗ «ЦРБ» по адресу: 

<

...> от 20.12.2016года, заключенного между сторонами, подлежат оплате ответчиком.

            При указанных обстоятельствах, исковые требования о взыскании 4 973 044 руб. 64 коп. долга признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

            В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы  по  госпошлине за рассмотрение иска относятся на ответчика.

Руководствуясь  статьями 171, 176, 180, 181, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с   Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Гурьевская  районная больница»  в пользу  общества с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙКОНТРАКТ»  4 973 044 руб.  64 коп. долга, 47 865 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, всего – 5 020 909 руб. 64 коп.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙКОНТРАКТ» справку на возврат из Федерального бюджета РФ  98 руб. госпошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 557 от 07.09.2017года

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск  в течение месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                        О. С. Андуганова