Арбитражный суд Хабаровского края

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-8455/2025

г. Хабаровск

23 июля 2025 года

Резолютивная  часть  решения  объявлена  15 июля 2025

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем  О.Г. Лисичкиной

рассмотрев в заседании суда дело по иску открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 107174, г. Москва, муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1)

к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680020, 

<

...>/1)

о взыскании 15 000 000 руб. 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, действующей по доверенности от 14.07.2023 б/н,

от ответчика – ФИО2, действующего по доверенности от 03.12.2024 № 33-25.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» о взыскании штрафа в размере 15 000 000 руб. за повторное причинение ущерба имуществу на основании п.16.7 договора от 18.08.2014 № ВЛ-142223/Д-Вост в редакции Дополнительного соглашения от 17.09.2015 № 2.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из договора от 18.08.2014 № ВЛ-142223/Д-Вост, ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств, наличие права на взыскание штрафа в размере 15 000 000 руб.

Ответчик, как следует из отзыва на исковое заявление, объяснений представителя в судебном заседании, просил снизить размер штрафа в порядке статьи 333 ГК РФ.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

18.08.2014 между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», заказчик и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», подрядчик заключен договор № ВЛ-142223/Д-Вост, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя подряд на выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» по строительству (реконструкции) объектов, в соответствии с приложением №1. 

В соответствии с пунктом 4.2.22 договора подрядчик обязан не   допускать   фактов   производства   работ   в   зоне действующих технических устройств предприятий (организаций), расположенных на участке строительства (реконструкции), а также технических устройств обеспечивающих работу железнодорожного транспорта без, надлежащим образом, оформленных, актов-допусков, нарядов-допусков и иных разрешительных документов на производство работ в полном соответствии с требованиями и порядком, установленными локальными нормативными актами ОАО «РЖД», действующими на момент выполнения работ в рамках договора. При отсутствии у подрядчика необходимой информации, либо наличии сомнений в отношении нормативных требований ОАО «РЖД», регламентирующих процедуры производства работ в зоне железнодорожной инфраструктуры действующих в период производства работ, подрядчик обязан запросить необходимые сведения у заказчика в срок, обеспечивающий своевременное производство работ в рамках договора.

Как указано в пункте 4.2.23 договора, подрядчик обязан не допускать нарушения технологий при производстве работ, угрожающих безопасности объектов, находящихся вблизи строительной площадки.

В соответствии с пунктом 4.2.24. договора подрядчик обязан в процессе производства работ нести ответственность за соблюдение безопасности движения поездов, а также сохранность сооружений и устройств ж.д. пути, СЦБ, связи, электроснабжения, подвижного состава и т.п., в соответствии с нормами Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. В случае повреждения затраты на восстановление и штрафные санкции возмещаются подрядчиком.

В пункте 16.7. договора в редакции дополнительного соглашения от 17.09.2015 № 2 стороны согласовали, что  в случае повреждения (порчи) подрядчиком инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняются работы, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 9 000 000 руб. За повторный случай повреждения (порчи) вышеуказанного имущества, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 15 000 000 руб. При этом убытки, причиненные заказчику в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.

26.07.2024 на перегоне Блок-пост – 9 км - Кумтэ зафиксирован случай обрыва  подрядной организацией ответчика проводов принадлежности дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» (ЭЧ-5).

Из объяснений водителя экскаватора следует, что во время движения к месту работы для улучшения обзора он произвел поднятие ковша, что увеличило габарит техники по высоте. Во время прохождения экскаватора в пролете указанных опор рукоять ковша попала в стрелу провеса ЛЭП, вследствие чего произошло натяжение проводов с последующим изломом опоры № 214 и падением ее на землю. По результатам осмотра места повреждения установлено, сто по фидеру ПЭ на опоре № 215 и опоре № 216  сорвано два провода, на опоре № 216 поврежден изолятор и на опоре № 213 сорван один провод и поврежден один изолятор.

В ходе расследования установлено, что при проезде экскаватора  по существующей автодороге, в пролете опоры № 214 и опоры № 215 действующей ЛЭП ПЭ АБ произошел обрыв проводов принадлежности ЭЧ-5.

В результате сложившихся обстоятельств произошла задержка 1 грузового поезда на 6 минут, что подтверждается справкой о задержанных поездах.

Указанное событие подтверждается актом служебного расследования от 26.07.2024.

В результате допущенного повреждения имущества истцу причинен ответчиком материальный ущерб в размере 4 687 руб., связанный с задержкой поездов.

Ущерб погашен ответчиком в полном объеме, что подтверждается истцом и ответчиком. 

Данный факт повреждения является повторным с учетом следующих случаев:

- случай отказа технических средств, в ходе которого ложно занялись рельсовые цепи 24СП, 12-18СП, 6-10СП, 22 СП. Потерян контроль стрелок №№ 24, 12, 6/8, 22, 18, произошедший 16.06.2024 по причине повреждения кабельной линии СЦБ при взятии грунта вне зоны производства работ, что зафиксировано в претензии от 11.07.2024 № 7746/ДВОСТ ДКС;

- случай отказа технических средств, в ходе которого ложно занялся перегон, сработали 1ЧУКСПС1 и 1ЧУКСПС2. Произошедший 31.05.2024 по причине повреждения кабеля СЦБ экскаватором подрядной организации ООО «Желдорстрой», что зафиксировано в претензии от 11.07.2024 № 7724/ДВОСТ ДКС;

- случай отказа технических средств, в ходе которого ложно занялась рельсовая цепь первого пути перегона с 432П на 454П, произошедший 05.06.2024 по причине повреждения кабеля СЦБ буровой установкой подрядной организации ООО «Желдорстрой», что зафиксировано в претензии ль 24.06.2024 № 7052/ДВОСТ ДКС;

- случай отказа технических средств, в ходе которого ложно занялась рельсовая цепь т произошло срабатывание УКСПС, произошедший 20.04.2024 по причине повреждения кабеля СЦБ при разработке котлована, что зафиксировано  в претензии от 21.05.2024 № 5606/ДВОСТ ДКС.

Истцом ответчику направлена претензия от 21.08.2024 № ИСХ-9301/ДВОСТДКС с требованием оплаты штрафа в размере 15 000 000 руб. и возмещения убытклв в размере 4 687 руб.

Неисполнение в добровольном порядке ответчиком обязанности по оплате штрафа послужило основанием для обращения акционерного общества «Российские железные дороги» в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассматриваемые отношения основаны на обязательствах строительного подряда.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Статьей 714 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Как установлено в пункте 1 статьи 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а часть 2 статьи 9 АПК РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В рассматриваемом случае материалами дела подтверждается, что в процессе исполнения ответчиком заключенного с истцом договора, допущен факт повреждения имущества ОАО «РЖД».

Указанные обстоятельства АО «БСМ» по существу не отрицало, о фальсификации представленных ОАО «РЖД» доказательств в установленном законом порядке не заявило, иным образом их содержание, а равно факт повреждения имущества, расположенного в пределах объекта производства работ в рамках заключенного договора не оспорило.

Доводы ответчика об отсутствии оснований для привлечения к ответственности за повторность нарушения судом отклоняется ввиду следующего.

Пунктом 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» установлено, что условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), другими положениями ГК РФ. законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (ст.ст. 3, 422 ГК РФ).

При толковании условий договора в силу абзаца первого ст. 431 ГК РФ судом принимается   во   внимание  буквальное  значение  содержащихся   в  нем   слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (п. 5 ст. 10, п. 3 ст. 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый ст. 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

В пункте 16.7. договора в редакции дополнительного соглашения от 17.09.2015 № 2 стороны согласовали, что  в случае повреждения (порчи) подрядчиком инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняются работы, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 9 000 000 руб.. За повторный случай повреждения (порчи) вышеуказанного имущества, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 15 000 000 руб. При этом убытки, причиненные заказчику в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.

Пунктом 1.1 Договора предусмотрено, что заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя подряд на выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» по строительству (реконструкции) объектов, в соответствии с приложением №1.

Пунктом 1 дополнительного соглашения от 22.09.2022 № УПС ВП-225635 к договору предусмотрено, что заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по объекту: «Электрификация линии Комсомольск-Сортировочный - Ванино Дальневосточной железной дороги» (Бизнес код: 001.2018.10008295) на Дальневосточной железной дороге, в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «РЖД»: «Увеличение пропускной способности участка Тайшет - порты Дальнего Востока (Восточный полигон)».

В силу пункта 2 дополнительного соглашения общая цена комплекса работ 21 972 048 ООО руб. с НДС, в том числе в 2024 году - 16 854 408 ООО руб. с НДС.

Положения разделов 3, 4, 5 и т.д. договора также указывают на то обстоятельство, что под комплексом работ сторонами подразумевается выполнение всех работ, предусмотренных договором, а не какие-либо отдельные работы, выполняемые на конкретном участке объекта.

Следовательно, буквальное и системное толкование положений договора указывает на то, что для применения санкции в размере 15 000 000 руб., предусмотренной п. 16.7 договора, подрядчик должен допустить повторный случай повреждения инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ. связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняется комплекс работ.

Также довод ответчика относительно применения выводов, указанных в судебных актах по делу № А40-504/2024 судом отклоняется, поскольку данные выводы не относится к предмету настоящего спора

Учитывая установленный судом выше факт ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по обеспечению сохранности имущества заказчика, суд полагает, что в данном случае имеются достаточные правовые основания для привлечения ООО «УКБСМ» к договорной ответственности в виде взыскания фиксированной суммы штрафа, предусмотренной пунктом 16.7 договора.

Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство о снижении взыскиваемой неустойки на основании статьи 333 ГК РФ, суд пришел к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 333 ГК РФ предусмотрено, что если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (пункт 2 статьи 333 ГК РФ). 

В пункте 69 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 7) содержатся разъяснения, в соответствии с которыми подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ) (пункт 71 Постановления Пленума ВС РФ № 7).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 АПК РФ) (пункт 73 Постановления Пленума  ВС РФ № 7).

В пункте 75 Постановления Пленума ВС РФ № 7 указано, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1         ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ) (пункт 77 Постановления Пленума ВС РФ № 7).

В пункте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам).

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 № 11680/10).

По существу применяя положения статьи 333 ГК РФ суд должен с учетом доводов и возражений сторон установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, который причинен в результате конкретного правонарушения.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть по существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Оценив доводы ходатайства ООО «УК БСМ», принимая во внимание условия договора, конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, включая, в том числе возмещения подрядчиком причиненных ОАО «РЖД» убытков в связи с допущенным повреждением его имущества, суд приходит к выводу, что в данном случае предъявленный к взысканию размер неустойки несоразмерен последствиям нарушения обязательства. 

Взыскание штрафа в заявленном размере, по мнению суда, в данном конкретном случае повлечет получение истцом необоснованной выгоды и нарушит баланс прав и законных интересов сторон, прежде всего лишив ответчика возможности получить соразмерную оплату за выполненную работу.

Суд считает необходимым уменьшить подлежащий взысканию с ответчика штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по договору до 1 000 000 руб.

Указанный размер штрафа, по мнению суда, отвечает требованиям соразмерности допущенного ответчиком нарушения обязательства и позволит компенсировать истцу негативные последствия ненадлежащего исполнения обязательства контрагентом, при этом не повлечет получения кредитором необоснованной выгоды.

При изложенных обстоятельствах требования истца о взыскании с ответчика неустойки по договору подлежат удовлетворению в определенном судом размере 1 000 000 руб.

Судебные расходы истца по оплате государственной пошлины по иску возлагаются на ответчика с учетом итогового результата рассмотрения настоящего дела и положений статьи 110 АПК РФ и разъяснений, содержащихся в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела».

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в сумме 375 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд                                            

Р Е Ш И Л

     Иск удовлетворить.

     Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680020, 

<

...>/1) в пользу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 107174, г. Москва, муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1) штраф в размере 1 000 000 руб., а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере  375 000 руб.

    Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

    Судья                                                                                           Л.А. Збарацкая