АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А78-4701/2025

г.Чита

25 июля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 01 июля 2025 года

Решение изготовлено в полном объёме 25 июля 2025 года

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Е.В. Гончарук,

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Ю.П. Орловой

рассмотрел в открытом судебном заседании 

дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

об обязании осуществить технологическое присоединение по договору №20.7500.3538.21 от 29.11.2021г.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 представитель по доверенности от 15.04.2025,

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 02.04.2025. 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт" (истец) обратился в суд с уточненным исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Россети Сибирь" (ответчик) об обязании по договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.7500.3538.21 от 29.11.2021г. заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) - осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объект для эксплуатации и обслуживания бетонорастворного узла расположенный на земельном участке с кадастровым номером 75:14:470102:48 в соответствии с техническими условиями №8000478950 для присоединения к электрическим сетям.

В отсутствии возражении сторон, суд завершил предварительное судебное заседание, перешел в судебное заседание по рассмотрению спора по существу.

Истец представил уточнение исковых требовании об обзании ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору в течение шести календарных месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Уточнения исковых требований приняты к рассмотрению протокольным определением от 01 июля 2025 года.

Представитель истца уточнённые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика поддержал доводы отзыва, наличие обязательств по осуществлению технологического присоединения объекта к электрическим сетям по договору не оспаривает, пояснил, что организации имеются обстоятельства затрудняющие исполнение договора, срок в течении которого решение может быть исполнено просит не менее шести месяцев.

Суд, рассмотрев материалы дела, исследовав доводы сторон, изучив документы, оценив доказательства в совокупности, пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, между сторонами подписан договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.7500.3538.21 от 29.11.2021г. для технологического присоединения объекта "объект для эксплуатации и обслуживания бетонорастворного узла", расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, 674520, Забайкальский край, Оловяннинский,Нет, Нет, кадастровый номер земельного участка 75:14:470102:48.;

В силу пункта 4 Договора технические условия являются Неотъемлемой, частью договора.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от18.12.2020 № 593-НПА, от 22.01.2021 № 9-НПА и составляет 550,00 руб.

Технические условия №8000478950 для присоединения согласованы. 

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 договора).

Платежным поручением №122 от 29.11.2021 произведена оплата.

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения, мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Как следует из представленной переписки, истец обращался в адрес ответчика об исполнении мероприятий.

Доказательств выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению не представлены.

Представленные в материалы дела документы исследованы в ходе судебного разбирательства в порядке главы 7 АПК РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратится в арбитражный суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов в порядке, установленном кодексом.

В силу ст.8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается и только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статьи 309 и 310 ГК РФ).

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение ЭПУ (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему ЭПУ к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия.

Из материалов дела следует, между истцом и ответчиком подписан договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям№20.7500.3538.21 от 29.11.2021г.

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 договора).

Платежным поручением произведена оплата.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п.5 договора).

Договор технологического присоединения по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг, регулирование которого осуществляется, в том числе статьями 779 - 783 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рассматриваемый договор относится к категории публичных, направленных на получение доступа заявителей к электрическим сетям для получения электрической энергии.

Технические условия для присоединения согласованы. 

Доказательства исполнения ответчиком по договору мероприятий, перечисленных в технических условиях для присоединения к электрической сети, не представлены.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено указанным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения, Правила N 861).

Правила технологического присоединения определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, регламентируют процедуру технологического присоединения, устанавливают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения.

Заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пунктами 16,17 Правил № 861). 

Платежным поручением №122 от 29.11.2021 произведена оплата.

Технические условия №8000478950 для присоединения согласованы. 

Согласно пункту 16.3 Правил, подпунктом «а(2)» пункта 25 Правил присоединения установлено, что в технических условиях должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Суд полагает возражения ответчика о наличии финансовых, технических затруднений несостоятельными. 

 Статьями 309, 310 и 408 ГК РФ, предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается и только надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Ответчик не представил доказательства отсутствия вины в ненадлежащем неисполнении обязательств в рамках заключенного сторонами договора и согласованных условий.

Исходя из приведенных положении на ответчике лежит обязанность не только по совершению мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора присоединения, но и совершению действий по обеспечению технических условий технологического присоединения, в том числе по своевременному урегулированию отношений с третьими лицами по вопросу исполнения мероприятий по технологическому присоединению. 

Правовая позиция, изложена Верховным Судом Российской Федерации в определении от 22.06.2021 № 48-КГ21-6-К7, 2-408/2020.

Статья 12 ГК РФ предусматривает в качестве одного из способов защиты гражданских прав присуждение к исполнению обязанностей в натуре, применяемого с целью реального исполнения должником своего обязательства.

В предмет доказывания по такому иску входит установление у ответчика определенных обязанностей, факт неисполнения ответчиком конкретных обязанностей, а также наличие у ответчика реальной возможности исполнения этих обязанностей.

В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

Исполнение обязательства в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося обязательства.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям возможно только после выполнения заказчиком и сетевой организацией своих обязательств по договору и техническим условиям.

Итоговым результатом надлежащего исполнения сетевой организацией принятых обязательств по договору технологического присоединения является составление акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

Однако обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению ответчиком не исполнены.

Ответчик документально доводы истца не опроверг, доказательства выполнения договора не представлены. 

В силу части 2 статьи 174 АПК РФ, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено.

Учитывая изложенное, исходя из анализа норм права, оценив доказательства в совокупности, суд полагает требование истца об обязаний исполнить договор, об осуществлении технологического присоединения подлежащим удовлетворению, в течение шести календарных месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обоснованным и разумным. 

При указанных обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в порядке ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать публичное акционерное общество "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение шести календарных месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.7500.3538.21 от 29.11.2021г. заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) - осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объект для эксплуатации и обслуживания бетонорастворного узла расположенный на земельном участке с кадастровым номером 75:14:470102:48 в соответствии с техническими условиями №8000478950 для присоединения к электрическим сетям. 

Взыскать с публичное акционерное общество "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 50 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

Судья Е.В. Гончарук