Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

31. 03. 2023  года.                                                    Дело № А40-248287/22-43-1926

Резолютивная часть решения объявлена 27. 03. 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме 31. 03. 2023 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " Конвентмонтаж " (ОГРН 

<

***>)

к ЗАО " Траскон Текнолоджи " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 11 716 475 руб. 22 коп. – долга, неустойки, 

с участием представителей: от истца  – ФИО2, адвокат,  доверенность б/н от 10.01.2023 г., от ответчика – ФИО3, доверенность № 2/40 от 10.06.2022 г.

 Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителей, арбитражный суд          

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 11 716 475 руб. 22 коп. – долга, неустойки, на основании статей 309, 310  ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал предъявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении; не согласился с доводами ответчика против иска, изложенными в отзыве на исковое заявление по основаниям изложенным в письменных пояснениях, представил истребованные судом документы не в полном объеме, не заявил о том, что располагает какими-либо иными, кроме имеющихся в материалах дела документами, подтверждающими предъявленный иск, опровергающими возражения ответчика; не заявил, в установленном порядке, о фальсификации ответчиком каких-либо доказательств, представленных в материалы дела в подтверждение возражений против иска, заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с намерением заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы; каких-либо иных ходатайств не заявил.

Ответчик направил представителя в судебное заседание, который иск не признал полностью по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление; истребованные судом документы, опровергающие, по его мнению, иск предъявил; расчет истца оспорил по основаниям изложенным в отзыве; не заявил о том, что располагает какими-либо документами, опровергающими предъявленный иск, кроме имеющихся, в деле; не возражал против рассмотрения спора по существу в данном судебном заседании, по имеющимся в деле документам; оставил на усмотрение суда ходатайство ответчика об отложении рассмотрения дела в связи с намерением заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы, указав, вместе с тем, что не видит необходимости в проведении судебной экспертизы по делу, поскольку судебная экспертиза не может изменить условия договоров, регулирующие порядок оплаты выполненных работ доказательств исполнения которых истцом не представлено; каких-либо ходатайств не заявил.

Ходатайство истца об отложении рассмотрения дела в связи с намерением заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы, принимая во внимание мнение ответчика, имеющиеся в деле документы и обстоятельства дела, по мнению суда, в соответствии со статьями 82, 159 АПК РФ, следует оставить без удовлетворения, поскольку истцом никак не обоснована и не доказана необходимость проведения судебной экспертизы по делу, принимая во внимание предъявленные истцом требования и возражения ответчика против предъявленных ему требований.

Суд, с учетом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Истец основывает свои требования на том, что в период с августа по октябрь, 2019 г. между ООО «Конвентмонтаж» (Исполнитель) и ЗАО «Траскон Текнолоджи» (Заказчик) было заключено пять договоров строительного субподряда: №ПСП19/081 от 19.08.2019г., №ПСП19/087 от 02.09.2019г., №ПСП19/093 от 23.09.2019г., №ПСП19/103 от 11.10.2019г., №ПСП19/104 от 18.10.2019г., по которым Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями договоров, сметами и технической документацией на объекте: «Завод по производству электротехнической продукции», расположенном по адресу: 432072, 

<

...> (далее - Объект) Работы.

Истец указывает, что им были выполнены, а Ответчиком были частично не приняты выполненные работы, которые, по мнению Истца, подлежат оплате всего на сумму: по договору строительного субподряда №ПСП19/081 от 19.08.2019 г.- денежные средства в размере 2 059 975,37 рублей, из которых: 1 844 423,28 рублей сумма задолженности по договору за выполненные работы, 215 552,09 рублей размер неустойки; по договору строительного субподряда № ПСП19/087 от 02.09.2019г. денежные средства в размере 5 714 234,6 рублей, из которых: 4 925 885,99 рублей сумма задолженности по договору за выполненные работы, 788 348,61 рублей размер неустойки; по договору строительного субподряда № ПСП 19/093 от 23.09.2019 года денежные средства в размере 130 587 рублей, из которых: 118 500 рублей сумма задолженности по договору за выполненные работы, 12 087,00 рублей размер неустойки; по договору строительного субподряда № ПСП 19/103 от 11.10.2019 года денежные средства в размере 175 567,83 рублей, из которых: 158 427,65 рублей сумма задолженности по договору за выполненные работы, 17 140,18 рублей размер неустойки; по договору строительного субподряда № ПСП 19/104 от 18.10.2019 года денежные средства в размере 3 636 110,42 рублей, из которых: 3 417 397,01 рублей сумма задолженности по договору за выполненные работы, 218 713,41 рублей размер неустойки.

В силу ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 2 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (ч. 4 ст. 71 АПК РФ).

Из материалов дела усматривается, что между ЗАО «Траскон Текнолоджи» Заказчик) и ООО «КОНВЕНТМОНТАЖ» (Исполнитель), заключены следующие договоры строительного субподряда №ПСП19/081 от 19.08.2019г., №ПСП19/087 от 02.09.2019г., №ПСП19/093 от 23.09.2019г., №ПСП19/103 от 11.10.2019г., №ПСП19/104 от 18.10.2019г. (далее Договоры).

Согласно п.п. 1.1., 1.1.1., 1.1.2. Договоров, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего договора, сметами и технической документацией на объекте: «Завод по производству электротехнической продукции» расположенный по адресу: 432072, 

<

...> (далее -Объект) следующие Работы:

-Устройство системы ОВиК в объеме указанном в Смете №1; Устройство системы кондиционирования (раздел ОВиК) в объеме указанном в Смете №2 (договор строительного субподряда №ПСП19/081 от 19.08.2019г.);

-Устройство системы автоматического водяного пожаротушения (АУВПТ) в объеме указанном в Смете №1 (договор строительного субподряда №ПСП19/087 от 02.09.2019г.);

-Устройство отопления в объеме указанном в смете №1 (договор строительного субподряда  №ПСП19/093 от 23.09.2019г.);

- Производство монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта в объем, предусмотренном в Смете расчете №1 (договор строительного субподряда №ПСП19/103 от 11.10.2019г.);

- Устройство системы ОВиК ПК СК в объем указанном в Смете №1 (договор строительного субподряда №ПСП19/104 от 18.10.2019г.);

Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает получение от Заказчика технической документации.

Стороны заключили Договоры о нижеследующем.

Исполнитель обязуется выполнить все Работы своими силами в объеме, определенном в пп.1.1, 1.2. настоящего Договора, и в сроки, установленные в п.3.1 Договора (п. 1.3. Договоров).

Исполнитель принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных в пп.1.1, 1.2. настоящего Договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора (п. 1.4. Договоров).

Исполнитель, подписав настоящий договор, подтверждает, что (п. 1.6. Договоров):

-Исполнитель тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ (п. 1.6.1. Договоров).

-Исполнитель изучил все материалы настоящего договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ (п. 1.6.2. Договоров).

-Никакая другая работа Исполнителя не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему договору (п. 1.6.3. Договоров).

Согласно п. 2.1. Договоров строительного субподряда:

- №ПСП19/081 от 19.08.2019г. ориентировочная цена работ по настоящему договору определяется в соответствии с утвержденными Сторонами Сметами № 1, №2 и составляет 7 058 251,32 руб. 32 копейки; согласно п. 2 Дополнительного соглашения №2 от 04.12.2020 года общая сумма дополнительных работ составляет 68 000 рублей;

-№ПСП19/087 от 02.09.2019г., цена работ по настоящему Договору определяется в соответствии с утвержденной Сторонами Сметой № 1 и составляет 14 064 494 руб. 44 копейки; в редакции п.2 Дополнительного соглашения №3 от 04.12.2020 года общая стоимость работ согласно Приложению №1 к настоящему дополнительному соглашения составлением 14 446 451 руб. 44 коп.; согласно п. 2 Дополнительного соглашения №3 от 05.11.2021 года общая сумма дополнительных работ по настоящему дополнительному соглашению составляет 310 197 рублей;

-№ПСП19/093 от 23.09.2019г., цена работ по настоящему Договору определяется в соответствии с утвержденной Сторонами Сметой и составляет 790 000 руб.;

-№ПСП19/103 от 11.10.2019г., Цена работ по настоящему Договору определяется  в   соответствии   с  утвержденной   Сторонами   Сметой  №1   и составляет 965 391 руб. 52 коп.;

-№ПСП19/104 от 18.10.2019г., Цена работ по настоящему договору определяется в соответствии с утвержденными Сторонами Сметой № 1 и составляет 34 500 000 руб. рублей 00 копеек; в редакции п.1.3. Дополнительного соглашения №2 от 01.02.2021 года Цена работ по настоящему Договору составляет 35 047151 руб. 80 коп.; согласно п. 2 Дополнительного соглашения №3 от 04.12.2020 года общая стоимость дополнительных работ составляет 897 777 рублей 06 коп.; в силу п. 2 Дополнительного соглашения №4 от 04.12.2020 года общая стоимость дополнительных работ составляет 112 110 руб.; в соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения №4 от 21.05.2021 года стоимость дополнительных работ составляет 120 000 руб.; в силу п. 2 Дополнительного соглашения №5 от 04.12.2020 года общая стоимость дополнительных работ составляет 50 000 руб.; согласно п. 2 Дополнительного соглашения №6 от 04.12.2020 года общая стоимость дополнительных работ составляет 60 000 руб.;

Договорная цена Работ, указанная в п. 2.1 настоящего договора, включает в себя (п. 2.2. Договоров):

-Цену всех Работ и услуг, осуществленных, оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком (п. 2.2.1. Договоров).

- Цену материалов и оборудования, необходимого для выполнения Работ в полном объеме, в порядке предусмотренном п. 1.7. настоящего договора (п. 2.2.2. Договоров).

- Все расходы Исполнителя, понесенные им в связи с исполнением обязанностей, перечисленных в статье 4 настоящего договора (п. 2.2.3. Договоров).

- Все иные накладные расходы (п. 2.2.4. Договоров).

Согласно п. 2.3. Договора строительного субподряда №ПСП19/081 от 19.08.2019г., Заказчик перечисляет Исполнителю аванс по Договору, в размере 20 % от Цены Договора, указанной в п.2.1. Договора, на основании выставленного Исполнителя Счета (ов).

Оплата выполненных работ по настоящему договору производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом удержания Заказчиком, начиная с первой сдачи-приемки выполненных Работ в качестве гарантийного обеспечения исполнения условий настоящего договора.

Гарантийное удержание от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ по Смете №1 «ОВиК» (Приложение №1 к договору) составляет 5 %, по Смете №2 «Кондиционирование» (Приложение №2 к договору) - 15 %.

Невыплаченная Заказчиком сумма по Смете №1 в размере 5% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ должна быть выплачена Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней с даты подписания, в соответствии с п.6.8. настоящего договора, окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В сумму платежа за полностью завершенные Исполнителем работы по Смете №2 Заказчик обязан включить из ранее удержанных им сумм в размере 15% от каждого платежа половину указанной суммы удержания, т.е. 7,5% от суммы выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ. Невыплаченная Заказчиком сумма в размере 7,5% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ должна быть выплачена Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней с даты подписания, в соответствии с п.6.8. настоящего договора, окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ выполняемых в рамках Сметы №2.

В соответствии с п. 2.3. Договора строительного субподряда №ПСП19/087 от 02.09.2019г., в редакции п.1 Дополнительного соглашения №1 от 18.09.2019 года, Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 15 % от цены работ, предусмотренной в п.2.1. Договора, на основании выставленного Исполнителем Счета. При этом Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения аванса предоставить Заказчику счет-фактуру на аванс.

Оплата выполненных и принятых работ по настоящему договору производится на основании, выставленного Исполнителем Счета, в течение 15 рабочих со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом удержания Заказчиком, начиная с первой сдачи-приемки выполненных Работ, в качестве гарантийного обеспечения исполнения условий настоящего договора денежных средств в размере 15% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ по договору.

В сумму платежа за полностью завершенные Исполнителем работы по Смете №1 Заказчик включает из ранее удержанных им сумм в размере 15% от каждого платежа половину указанной суммы удержания, т.е. 7,5% от суммы выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ. Невыплаченная Заказчиком сумма в размере 7,5% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ должна быть выплачена Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней с даты подписания, в соответствии с п.6.8. настоящего договора, окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ выполняемых в рамках Сметы №1.

В силу п. 2.3. Договора строительного субподряда №ПСП19/093 от 23.09.2019г., Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50 % от цены работ, предусмотренной в п.2.1. Договора, на основании выставленного Исполнителем Счета. При этом Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения аванса предоставить Заказчику счет-фактуру на аванс.

Оплата выполненных работ по настоящему договору производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом удержания Заказчиком, начиная с первой сдачи-приемки выполненных Работ, в качестве гарантийного обеспечения исполнения условий настоящего договора денежных средств в размере 15% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ по договору.

В сумму платежа за полностью завершенные Исполнителем работы по Смете Заказчик включает из ранее удержанных им сумм в размере 15% от каждого платежа половину указанной суммы удержания, т.е. 7,5% от суммы выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ. Невыплаченная Заказчиком сумма в размере 7,5% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ должна быть выплачена Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней с даты подписания, в соответствии с п.6.8. настоящего договора, окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ выполняемых в рамках Сметы.

Согласно п. 2.3. Договора строительного субподряда №ПСП19/103 от 11.10.2019г., Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 700 000 рублей, в т.ч. НДС (20%), на основании выставленного Исполнителем Счета. При этом Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения аванса предоставить Заказчику счет-фактуру на аванс.

Оплата выполненных работ по настоящему договору производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом удержания Заказчиком, начиная с первой сдачи-приемки выполненных Работ, в качестве гарантийного обеспечения исполнения условий настоящего договора денежных средств в размере 15% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ по договору.

В сумму платежа за полностью завершенные Исполнителем работы по Смете Заказчик включает из ранее удержанных им сумм в размере 15% от каждого платежа половину указанной суммы удержания, т.е. 7,5% от суммы выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ. Невыплаченная Заказчиком сумма в размере 7,5% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ должна быть выплачена Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней с даты подписания, в соответствии с п.6.7. настоящего договора, окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ выполняемых в рамках Сметы.

Согласно п. 2.3. Договора строительного субподряда №ПСП19/104 от 18.10.2019г., Заказчик перечисляет Исполнителю первый аванс по Договору, в размере 10 % от Цены Договора, указанной в п.2.1. Договора, на основании выставленного Исполнителя Счета (ов). При этом Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения аванса предоставить Заказчику счет-фактуру на аванс. Аванс предоставляется для производства и поставки части воздуховодов на объект для начала работ.

Заказчик перечисляет Исполнителю второй аванс по Договору, в размере 10 % от Цены Договора, указанной в п.2.1. Договора в течение двух недель от даты подписания настоящего договора, на основании выставленного Исполнителя Счета (ов), при условии уведомления о готовности части воздуховодов. При этом Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения аванса предоставить Заказчику счет-фактуру на аванс (п. 2.4. Договора строительного субподряда №ПСП19/104 от - 18.10.2019г.).

По согласованию Сторон Заказчик перечисляет Исполнителю третий аванс по Договору, в размере не более 20 % от Цены Договора, указанной в п.2.1. Договора в течение одного месяца от даты выплаты второго аванса, на основании выставленного Исполнителя Счета (ов). При этом Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения/ аванса предоставить Заказчику счет-фактуру на аванс. Сумма аванса списывается пропорционально при оплате Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (п. 2.5. Договора строительного субподряда №ПСП19/104 от 18.10.2019г.).

Оплата выполненных работ по настоящему договору производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом удержания Заказчиком, начиная с первой сдачи-приемки выполненных Работ, в качестве гарантийного обеспечения исполнения условий настоящего договора денежных средств в размере 15% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ по договору.

В сумму платежа за полностью завершенные Исполнителем работы по Смете №1 Заказчик включает из ранее удержанных им сумм в размере 15%  от каждого платежа половину указанной суммы удержания, т.е. 7,5% от суммы выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ. Невыплаченная Заказчиком сумма в размере 7,5% от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ должна быть выплачена Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней с даты подписания, в соответствии с п.6.8. настоящего договора, окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ выполняемых в рамках Сметы №1 (п.  2.6. Договора строительного субподряда №ПСП19/104 от 18.10.2019г.).

Если в ходе выполнения Работ возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, изменении объемов и/или видов Работ, предусмотренных в настоящем договоре, Исполнитель, до начала выполнения соответствующих работ (не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней) обязан уведомить письменно об этом Заказчика. Заказчик, рассмотрев указанное уведомление, в течение 10 календарных дней может принять меры к заключению дополнительного соглашения об уменьшении или увеличении объема Работ, изменении видов Работ, сроков выполнения Работ или одного из этих параметров.

Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют. При этом стоимость работ определяется согласно дополнительному сметному расчету.

Сроки выполнения дополнительного объема работ согласовывается с Заказчиком отдельно. При этом сроки могут отличаться от срока окончания работ, указанного в настоящем договоре и приложениях к нему (п. 2.5. Договоров, п. 2.8. Договора строительного субподряда №ПСП19/104 от 18.10.2019г.).

Расходы, понесенные Исполнителем вследствие выполнения дополнительных Работ без соблюдения порядка, предусмотренного п.2.5. настоящего договора, и не подтвержденные дополнительным соглашением к настоящему договору, подписанным обеими сторонами, несет Исполнитель за свой счет (п. 2.6. Договоров, п. 2.9. Договора строительного субподряда №ПСП19/104 от 18.10.2019г.).

Исполнитель обязан выставить Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ, либо УПД, на стоимость выполненных за отчетный период Работ, в момент подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Счета-фактуры либо УПД должны быть подписаны лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации (п. 2.9. Договоров, п. 2.11. Договора строительного субподряда №ПСП19/104 от 18.10.2019г.).

Пунктом 3.1. Договоров предусмотрены сроки выполнения работ.

Так согласно п. 3.1.1. Договора строительного субподряда №ПСП19/081 от 19.08.2019г., Срок начала выполнения работ: в течение 1 (одного) календарного дня с момента перечисления аванса. Платежным поручением №1477 от 26.08.2019 года перечислен аванс.

В силу п. 3.1.2. Договора строительного субподряда №ПСП19/081 от 19.08.2019г., Срок окончания производства работ - согласно Приложению №3 (График производства работ). Согласно Графику производства работ (Приложение №3) работы выполняются в течение 5 недель, то есть срок окончания работ не позднее 30.09.2019 года.

Пунктом 3.1.1. Договора строительного субподряда №ПСП19/087  от 02.09.2019г. предусмотрено, что Срок начала выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента перечисления аванса. Платежным поручением №1549 от 05.09.2019 года перечислен аванс.

Согласно п. 3.1.2. Договора строительного субподряда №ПСП19/087 от 02.09.2019г., Срок окончания производства работ: в течение 130 календарных дней, с момента подписания настоящего Договора, согласно Графику производства работ (Приложение №2 к Договору). Тем самым срок окончания производства работ не позднее 14.01.2020 года.

Согласно п.3 Дополнительного соглашения №2 от 04.12.2020 г. к Договору строительного субподряда №ПСП19/087 от 02.09.2019г., пункт 3.1. Договора изменен и изложен в следующей редакции:

«3.1. Сроки выполнения работ

3.1.1. Срок начала выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента перечисления аванса.

3.1.2. Срок окончания производства работ - согласно Приложению №2/1 «График окончания производства работ» к настоящему Дополнительному соглашению».

В соответствии с п.4 Дополнительного соглашения №2 от 04.12.2020 г. к Договору строительного субподряда №ПСП19/087 от 02.09.2019г., с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения утрачивает силу Приложение № 2 к Договору строительного субподряда от 02 сентября 2019 г. №П19/087 и вместо него вступает в силу Приложение № 2/1 - График производства работ к Дополнительному соглашению №2 от 04 декабря 2020г.

Согласно Графику завершения работ - Приложение №2/1 к Дополнительного соглашения №2 к Договору строительного субподряда №ПСП19/087 от 02.09.2019г., сроком начала указано 07.12.2020 года, сроком окончания работ указано 31.03.2021 года.

В соответствии с п. 1.1. Дополнительного соглашения №3 от 29.03.2021 г. к Договору строительного субподряда №ПСП19/087 от 02.09.2019г., пункт 3.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Сроки выполнения работ

3.1.1. Срок начала выполнения работ: в течение 3 календарных дней с момента перечисления аванса.

3.1.2. Срок окончания производства работ - 15 июня 2021 г. (с учетом исправления недостатков)».

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №2 от 29.03.2021 г. к Договору строительного субподряда №ПСП19/087 от 02.09.2019г., с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения утрачивает силу Приложение №2/1 к Договору строительного субподряда от 02 сентября 2019 г. №П19/087 - График производства работ.

В силу п. 1.1. Дополнительного соглашения №_ от 26.07.2021 г. к Договору строительного субподряда №ПСП19/087 от 02.09.2019г., пункт 3.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «3.1. Сроки выполнения работ

3.1.1.Срок начала выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента перечисления аванса.

3.1.2.Срок окончания производства работ - 30 августа 2021 г.»

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №от 26.07.2021 г. к Договору строительного субподряда №ПСП19/087 от 02.09.2019г. с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения утрачивает силу Приложение №2/1 График завершения работ к Дополнительному соглашению №2 от 04 декабря 2020 г. Даты завершения по видам работ Стороны согласуют в рабочем порядке.

Пунктом 3.1.1. Договора строительного субподряда №ПСП19/093 от 23.09.2019г., предусмотрено, что Срок начала выполнения работ: дата подписания Договора.

В силу п. 3.1.2. Договора строительного субподряда №ПСП19/093 от 23.09.2019г.,   Срок окончания производства работ: 10 октября 2019 г.

Пунктом 3.1.1. Договора строительного субподряда №ПСП19/103 от 11.10.2019г., предусмотрено, что Срок начала выполнения работ: с момента оплаты аванса в порядке, предусмотренном п.2.3. Договора. Платежным поручением №1824 от 21.10.2019 года перечислен аванс.

Согласно п. 3.1.2. Договора строительного субподряда №ПСП19/103 от 11.10.2019г., Срок выполнения работ: в течение 21 календарных дней, с момента оплаты аванса. Тем самым работы должны быть окончены не позднее 11.11.2019 года.

Пунктом 3.1.1. Договора строительного субподряда №ПСП19/104 от 18.10.2019г., Срок начала выполнения работ: в течение 1 (одного) календарного дня с момента перечисления аванса. Платежными поручениями №2059 от 27.11.2019, №2069 от 29.11.2019 года перечислен аванс. В соответствии с п. 3.1.2. Договора строительного субподряда №ПСП19/104 от 18.10.2019г., Срок окончания производства работ - согласно Приложению №2 (График производства работ). Согласно Графику производства работ (Приложение №2) работы выполняются в течение 21 недели, то есть срок окончания работ не позднее   24.04.2020 года

Любая отсрочка из-за обстоятельств непреодолимой силы увеличивает сроки выполнения работ на разумный период времени, согласованный Сторонами (п. 3.2. Договоров).

Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить основанием для требования Исполнителя о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем договоре (п. 3.3. Договоров).

Пунктом 4.1. Договоров, предусмотрены обязанности Исполнителя: - Выполнить все Работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с рабочей документацией и иными условиями настоящего договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от технической документации, в том числе не влияющие на технологию и качество выполнение Работ, Исполнитель обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком (п. 4.1.1. Договоров);

Предоставлять Заказчику, одновременно с актами о приемке выполненных работ КС-2, комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы, состоящий из: 1 (одного) цветного экземпляра; 3 (трех) черно-белых экземпляров; 1 (одного) экземпляра в электронном виде.

Предоставление исполнительной документации позже установленного в настоящем пункте срока и/или предоставление в неполном объеме является основанием для приемки работ в следующем отчетном периоде (п. 4.1.8. Договоров);

-Устранить своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия настоящего договора и гарантийного периода и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору (п. 4.1.13. Договоров);

-Исполнять письменные, подписанные компетентными лицами требования Заказчика, связанные с исполнением настоящего договора, в день поступления таких требований Заказчика, если иной срок исполнения не установлен по письменному соглашению Сторон (п. 4.1.18. Договоров);

В силу п. 4.3. Договоров, Заказчик вправе: Не оплачивать работы при наличии замечаний к выполненным работам, а также порядку ведения и комплектности исполнительной документации (п. 4.3.5. Договоров).

В исковом заявлении Истец исказил условия договоров.

Так на 7 листе иска изложено, что: «Согласно п.6.6. Договоров строительного субподряда № ПСП19/081 от 19.08.2019 г., № ПСП19/087 от 02.09.2019 г., № ПСП19/093 от 23.09.2019 г., № ПСП19/103 от 11.10.2019 г., № ПСП19/104 от 18.10.2019 г.: «В течение десяти дней, следующих за датой получения от Исполнителя документов, предусмотренных п.6.5 настоящего договора, Заказчик обязан направить Исполнителю, подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Исполнителем Работ. Если в вышеуказанный срок мотивированный отказ не направлен Заказчиком, принимаемые работы считаются исполненными Исполнителем в полном объеме и с надлежащим качеством. В случае получения Исполнителем отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить акт Заказчику.

Исполнитель обязан устранить замечания в назначенный Заказчиком срок, либо оспорить отказ от приемки Работ Заказчика в суде. Одностороннее подписание акта выполненных Работ не допускается».

Однако в п. 6.6. Договоров строительного субподряда №ПСП19/081 от 19.08.2019г., №ПСП19/103 от 11.10.2019г., №ПСП19/104 от 18.10.2019г. и п. п.6.7. Договоров строительного субподряда №ПСП19/093 от 23.09.2019г., №ПСП19/087 от 02.09.2019г. условие договора указанное Истцом: «Если в вышеуказанный срок мотивированный отказ не направлен Заказчиком, принимаемые работы считаются исполненными Исполнителем в полном объеме и с надлежащим качеством» отсутствует, оно истцом было надумано.

Более того, п. п.6.6. Договоров строительного субподряда №ПСП19/093 от 23.09.2019г., №ПСП19/087 от 02.09.2019г. Истцом изложены в иске неверно.

Так согласно п.6.6. Договоров строительного субподряда №ПСП19/093 от 23.09.2019г., №ПСП19/087 от 02.09.2019г. Исполнитель, не позднее 25 числа каждого месяца, обязан предоставить акты выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 на выполненные этапы работ, предусмотренный Графиком производства работ (Приложением №2 к Договору), а также счет на оплату, счета-фактуры, выставленные в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, исполнительная документация, на основании которой были составлены акты КС-2.

Предоставление исполнительной документации позже установленного в настоящем пункте срока и/или предоставление в неполном объеме освобождает Заказчика от обязанности рассмотрения актов выполненных работ и является основанием для приемки работ в следующем отчетном периоде.

Ответчик мотивировано отказав в приемке выполненных работ, вправе их не оплачивать, а Истец не устраняет замечания в назначенный Ответчиком срок и не оспаривает отказ от приема Работ Ответчиком в суде.

Пунктом 4.1. Договоров, предусмотрены обязанности Исполнителя: Предоставлять    Заказчику, одновременно с актами о приемке выполненных работ КС-2, комплект  исполнительной  документации  на предъявляемые к приемке Работы, состоящий из: 1 (одного) цветного экземпляра; 3 (трех) черно-белых экземпляров; 1 (одного) экземпляра в электронном виде.

Предоставление исполнительной документации позже установленного в настоящем пункте срока и/или предоставление в неполном объеме является основанием для приемки работ в следующем отчетном периоде (п. 4.1.8. Договоров);

Согласно п. 6.4. Договоров, Готовность выполненных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Исполнителя актов приёмки выполненных работ (КС-2) или актов освидетельствования скрытых работ.

В соответствии с п.6.6. Договоров строительного субподряда №ПСП19/093 от 23.09.2019г., №ПСП19/087 от 02.09.2019г. Исполнитель, не позднее 25 числа каждого месяца, обязан предоставить акты выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 на выполненные этапы работ, предусмотренный Графиком производства работ (Приложением №2 к Договору), а также счет на оплату, счета-фактуры, выставленные в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, исполнительная документация, на основании которой были составлены акты КС-2.

Предоставление исполнительной документации позже установленного в настоящем пункте срока и/или предоставление в неполном объеме освобождает Заказчика от обязанности рассмотрения актов выполненных работ и является основанием для приемки работ в следующем отчетном периоде.

Согласно п.6.7. Договоров строительного субподряда №ПСП19/093 от 23.09.2019г., №ПСП19/087 от 02.09.2019г. в течение десяти дней, следующих за датой получения от Исполнителя документов, предусмотренных п.6.6 настоящего договора, Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Исполнителем Работ. В случае получения Исполнителем отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить акт Заказчику.

Исполнитель обязан устранить замечания в назначенный Заказчиком срок, либо оспорить отказ от приемки Работ Заказчика в суде. Одностороннее подписание акта выполненных Работ не допускается.

Исполнитель, не позднее срока, указанного в п.3.1. Договора, обязан предоставить акты выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 на выполненный объем работ, счет на оплату, счет-фактуру, выставленный в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, а также одновременно предоставляет исполнительную документацию, на основании которой были составлены акты КС-2.

Предоставление исполнительной документации позже установленного в настоящем пункте срока и/или предоставление в неполном объеме освобождает Заказчика от обязанности рассмотрения актов выполненных работ по форме КС-2 и является основанием для приемки работ в следующем отчетном периоде (п. 6.5. Договоров строительного субподряда №ПСП19/081 от 19.08.2019г., №ПСП19/103 от 11.10.2019г., №ПСП19/104 от 18.10.2019г).

В течение десяти рабочих дней, следующих за датой получения от Исполнителя документов, предусмотренных п.6.5 настоящего договора, Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Исполнителем Работ. В случае получения Исполнителем отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить акт Заказчику.

Исполнитель обязан устранить замечания в назначенный Заказчиком срок, либо оспорить отказ от приемки Работ Заказчика в суде (п. 6.6. Договоров строительного субподряда №ПСП19/081 от 19.08.2019г., №ПСП19/103 от 11.10.2019г., №ПСП19/104 от 18.10.2019г).

Так Ответчик направлял Истцу мотивированные отказы от приемки выполненных Работ:

24.02.2022г. под исх. № 2/44: КС-2 Акт № 11 от 04.02.2022 г., КС-3 Акт № 10 от 04.02.2022 г. на сумму 825 197,67 руб. в связи с отсутствием актов освидетельствования скрытых работ и исполнительной документации, на основании которой были составлены акты КС-2, с установлением 5 дневного срока устранения замечания;

16.03.2022г. под исх. № 2/62: КС-3 № 5 от 02.03.2022 г. на сумму 1 458 367,90 руб., КС-2 Акт № 6 от 02.03.2022 г. на сумму 1 148 446,14 руб., КС-2 Акт № 7 от 02.03.2022 г. на сумму 309 921,76 руб. в связи с отсутствием исполнительной документации (в составе 1 (одного) цветного экземпляра, 3 (трех) черно-белых экземпляров, 1 (одного) экземпляра в электронном виде), на основании которой были составлены акты КС-2, с установлением 5 дневного срока устранения замечания;

16.03.2022г. под исх. № 2/63; КС-2 Акт № 11 от 04.02.2022 г., КС-3 Акт № 10 от 04.02.2022 г. на сумму 825 197,67 руб.; КС-2 Акт № 12 от 14.02.2022 г., КС-3 Акт № 11 от 14.02.2022 г. на сумму 1 016 330,65 руб.; КС-2 № 2 от 01.03.2022 г.; КС-3 № 2 от 01.03.2022 г. на сумму 228 858,20 руб.; КС-2 № 1 0т 28.02.2022 г., КС-3 № 1 от 28.02.2022 г. на сумму 142 326,01 руб., КС-2 № 1 от 28.02.2022 г., КС-3 № 1 от 28.02.2022 г. на сумму 1 065 282,96 руб., окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.03.2022 года по Договору № ПСП19/087 от 02.09.2019 на сумму 14 051 374,29 рублей, в связи с неисполнением пуско-наладочных работ, отсутствием исполнительной документации (в составе 1 (одного) цветного экземпляра, 3 (трех) черно-белых экземпляров, 1 (одного) экземпляра в электронном виде), подтверждающей фактическое выполнение указанных в Актах работ, в Акте № 2 от 01.03.2022 на сумму 228 858,20 рублей (в том числе НДС 20%) и Акте №1 от 28.02.2022 на сумму 142 326,01 рублей (в том числе НДС 20%) указаны задвоенные объемы работ, представленный Реестр исполнительной документации относится к ранее предъявленному и принятому объему работ, с установлением 5 дневного срока устранения замечания;

16.03.2022г. под исх. № 2/64: КС-2 № 2 от 02.03.2022 г., КС-3 № 2 от 02.03.2022 г. на сумму 124 736,84 руб., окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.03.2022 года по Договору № ПСП19/093 от 23.09.2019 на сумму 790 000 рублей, в связи с отсутствием документов, подтверждающих фактическое выполнение указанных в Актах работ, неисполнение пуско-наладочных работ, с установлением 5 дневного срока устранения замечания;

16.03.2022г. под исх. № 2/65, КС-2 № 3 от 02.03.2022 г., КС-3 № 3 от 02.03.2022 г. на сумму 108 995,45 руб., окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.03.2022 года по Договору № ПСП19/103 от 11.10.2019 на сумму 956 391,52 руб., в связи с отсутствием документов, подтверждающих фактическое выполнение указанных в актах работ, в актах указан физический объём не соответствующий фактически исполненным работам;

16.03.2022г. под исх. № 2/66; КС-2 Акт № 10 от 01.03.2022 г., КС-3 № 10 от 01.03.2022 г. на сумму 383 597,96 руб., КС-2 Акт № 1 от 01.03.2022 г., КС-3 № 1 от 01.03.2022 г. на сумму 897 777,06 руб., КС-2 Акт № 1 от 01.03.2022 г., КС-3 № 1 от 01.03.2022 г. на сумму 120 000,00 руб., КС-2 № 1 от 28.02.2022 г., КС-3 № 1 от 28.02.2022 г. на сумму 24 150,00 руб., окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.03.2022 года по Договору № ПСП19/104 от 18.10.2019 на сумму 32 428 575,42 руб., в связи с отсутствием документов, подтверждающих фактическое выполнение указанных в актах работ, представленный Реестр исполнительной документации относится к ранее предъявленному и принятому объему работ;

Замечания Ответчиком изложены в письме 27.05.2022г. под исх. № 2/132, согласно которому для принятия работ необходимо завершить СМР, выполнить пуско-наладочные работы и сдать выполненные работы на условиях подписанных договоров, а именно: устранить недостатки в выполненных ООО «КОНВЕНТМОНТАЖ» работах выявленных в ходе сдачи работ, препятствующих нормальному функционированию смонтированных систем (недостатки выявлены в ходе приемки работ, на которой ООО «КОНВЕНТМОНТАЖ» отсутствовал в разрез п. 4.1.12. Договора № ПСП19/087, Договора № ПСП19/104, Договора № ПСП19/103, Договора № ПСП19/081, Договора № ПСП19/093):

Складской корпус - на всех приточных установках складского корпуса перепутаны линии подачи прямой и обратной горячей воды, вследствие чего системы не пригодны для эксплуатации;

Система дренажа фанкойлов прессового цеха не врезана в магистраль, вследствие чего эксплуатация системы холодоснабжения прессового цеха не возможна;

Дренаж системы кондиционирования компрессорной на 1 этаже (пом. 41) не   подключен в магистраль, вследствие чего нормальная эксплуатация компрессоров не возможна;

Дренаж системы кондиционирования помещения компрессорной на 2 этаже (пом. 55) не подключен в магистраль, вследствие чего нормальная эксплуатация компрессора и холодильной машины технологического холодоснабжения не возможна;

Дренаж системы кондиционирования ГРЩ (пом. 53) не подключен к магистрали, вследствие чего нормальная эксплуатация ГРЩ не возможна.

Сдать выполненные работы с предъявлением корректно оформленной исполнительной документации, соответствующей реально выполненному объему работ, отраженному в актах согласно СП-48.13330.2019, а также предоставить журналы общих работ и журнал сварочных работ , о чем ЗАО «Траскон Текнолоджи» информировало письмами Исх. № 2/62, 2/63, 2/64, 2/65 от 16 марта 2022г. и Исх. № 2/88 от 04.04.2022г.;

Привести в соответствие Акты выполненных работ по договорам с реально выполненным объемом работ (замечания по объему работ, указанному в актах передавались и обсуждались в телефонном разговоре с представителем ФИО4, однако откорректированных актов не поступало).

Завершить работы: по монтажу всех тепловых завес (не установлены концевые дверные выключатели и микропроцессорные контроллеры воздушных завес), не закончена изоляция трубопроводов ТХС ПК и СК и АБК, не установлены наружные решетки приточных установок, несколько решеток в АБК не врезаны в потолок, трубы теплоснабжения ВТЗ АБК не окрашены, отсутствует теплоизоляция, Коммуникации кондиционера в кухне уложены некачественно, дренажный трубопровод не закреплен в нескольких помещениях АБК, частично отсутствует теплоизоляция ИТП, монтаж вытяжной системы В45, В43, В37, ООО «КОНВЕНТМОНТАЖ» не проводило работы по устройству систем технологических вытяжек ВМО.

Кроме того, замечания послужившие причинами в отказ от приемки Работ были изложены Ответчиком в : Письме ЗАО «Траскон Текнолоджи» №2/164 от 03.07.2022г.; Письме ЗАО «Траскон Текнолоджи» №2/88 от 04.04.2022г.;

Более того, ответчик в письме ЗАО «Траскон Текнолоджи» №2/177 от 29.07.2022 просил истца устранить оставшиеся замечания и предоставить откорректированные Акты выполненных работ.

Однако, ООО «КОНВЕНТМОНТАЖ»:

В нарушение п. 4.1.8. Договоров, не предоставило Заказчику, одновременно с актами о приемке выполненных работ КС-2, комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы, состоящий из: 1 (одного) цветного экземпляра; 3 (трех) черно-белых экземпляров; 1 (одного) экземпляра в электронном виде;

В нарушение п. 4.1.18. Договоров, не исполнило письменные, подписанные компетентными лицами требования Заказчика, связанные с исполнением настоящего договора, в день поступления таких требований Заказчика;

В нарушение п.п. 6.6., 6.1., Договоров, в течение 5 (пяти) рабочих дней не устранило замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, отказ от приемки Работ не оспорило в суде.

В исковом заявлении истец считает, что замечания ЗАО «Траскон Текнолоджи» необоснованные, отказ в принятии выполненных работ не мотивирован.

Однако, основания признания вышеизложенных отказов ответчика необоснованными и не мотивированными, истец не излагает.

В силу п. 4.3.5. Договоров Заказчик вправе не оплачивать работы при наличии замечаний к выполненным работам, а также порядку ведения и комплектности исполнительной документации.

Тем самым, в силу п. 4.3.5. Договоров, при наличии вышеуказанных замечаний, Ответчик вправе не оплачивать настоящие работы.

Согласно п.4 ст.753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно ч. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Следовательно, оплате выполненных работ в обязательном порядке предшествует их сдача и приемка.

Таким образом, в соответствии со ст. 753 ГК РФ, подписание актов сдачи- приемки выполненных работ в одностороннем порядке не может считаться правомерным и не несет безусловного обязательства по оплате заявленных ко взысканию работ.

Ответчиком начислена Истцу неустойка сумма, которой подлежит удержанию из стоимости выполненных Истцом и принятых работ.

Так, в случае нарушения сроков выполнения Работ/устранения дефектов, в том числе в гарантийный период, Исполнитель, по письменному требованию Заказчика, обязан уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 % от стоимости Договора за каждый день просрочки. В случае если период просрочки исполнения обязательств превысит 14 календарных дней, начиная с 15 пятнадцатого дня Исполнитель уплачивает Заказчику неустойки в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки (п. 8.1. Договоров).

Удержание штрафов (неустоек, пени), подлежащих уплате Исполнителем, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы штрафов (неустоек, пени) из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ (п. 8.8. Договоров).

Однако, ООО «КОНВЕНТМОНТАЖ»:

- в нарушение п. п. 1.3., 1.4., 1.6.1., 4.1.1. Договоров, не выполнил все Работы в объеме, определенном в пп.1.1, 1.2. настоящего Договора, и в сроки, установленные в п.3.1 Договоров, не принял на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ, не уплатил задолженность Заказчику в размере 4 020 309 руб. 47 коп.;

- грубо нарушены сроки выполнения работ предусмотренные п. 3.1. Договоров, работы предусмотренные п.п. 1.1., 1.1.1., 1.1.2. Договоров, не выполнены и по сей день.

Согласно п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно ст. 331 ГК РФ, соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с п. 8.1. Договоров, ЗАО «Траскон Текнолоджи» произведен расчет штрафной неустойки в размере 0,2 % и 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.

Согласно п. 8.1. Договоров, письменное требование ЗАО «Траскон Текнолоджи» об обязательной уплате ООО «КОНВЕНТМОНТАЖ» штрафной неустойки было направлено 27.12.2022 под исх. №2/301. В приложении к требованию изложен обоснованный контррасчет.

Ответчик указал, что в силу п. 8.8. Договоров, удержание неустойки в размере 59 117 698 руб. 60 коп. будет осуществлено ЗАО «Траскон Текнолоджи», путем вычета суммы неустойки из стоимости выполненных ООО «КОНВЕНТМОНТАЖ» и принятых работ.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

При изложенных обстоятельствах, требование о взыскании 11 716 475 руб. 22 коп. – долга, неустойки, заявлено истцом необоснованно и  удовлетворению не подлежит.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на Истца в соответствии со ст.ст. 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 102, 103, 106, 110, 112, 155, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Ходатайство истца об отложении рассмотрения дела в связи с намерением заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы оставить без удовлетворения.

Иск ООО " Конвентмонтаж " (ОГРН 

<

***>) к ЗАО " Траскон Текнолоджи " (ОГРН 

<

***>) о взыскании 11 716 475 руб. 22 коп. – долга, неустойки оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на истца.

Взыскать с ООО " Конвентмонтаж " (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 81 582 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья

ФИО1